640/2021-5122(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  

http://novgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Великий Новгород Дело № А44-4868/2020  08 февраля 2021 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» в течение  двух месяцев после вступления решения в законную силу (с учетом погодных условий)  произвести за свой счет гарантийный ремонт автомобильной дороги общего пользования с  кадастровым № 53:17:0110101:312, расположенной по адресу: Новгородская область,  Старорусский район, с/п Наговское, д. Анишино-1, ул. Новая, принадлежащей по праву  собственности Муниципальному образованию Натовское сельское поселение, в соответствии  с дефектной ведомостью в рамках муниципального контракта от 06.07.2018 №  0150300015018000003-0269312-01, а именно: санацию трещин в асфальтобетонном покрытии  битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для  разделки трещин и плавильно-заливочной машины (состав работ: 1. Загрузка знаков,  ограждений, материалов, 2. Доставка знаков, ограждений, материалов к месту производства  работ, 3. Установка ограждений и дорожных знаков на ремонтируемом участке дороги. 4  Загрузка мастики в бак плавильно-заливочной машины, 5. Прогрев мастики до температуры  184 градуса, 6. Фрезерование трещин, 7. Продувка трещин с использованием компрессора, 8.  Заливка трещин битумно-герметизирующей мастикой, 09. Засыпка образовавшейся ленты  минеральным порошком, 10. Перемещение к следующей трещине. 11. Снятие ограждение и  обратная загрузка ограждений, знаков.) на протяжении имеющихся трещин в асфальтовом  покрытии в связи с разрушением дорожного покрытия в виде сетки трещин глубиной до 1 см  и более, шириной до 0,5 см и более (продольных и поперечных) на всем протяжении участка  дороги (90м/5м.).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000,00 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу на  основании заявления взыскателя. Исполнительный лист на взыскание государственной  пошлины выдать по истечении 10 дней с момента вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.Е. Федорова