АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-9507/2024

г. Уфа

07 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 04.06.2024

Полный текст решения изготовлен 07.06.2024

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Зайнуллиной А.Р.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Рефстройпроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2 409 057 руб. 04 коп.

 

при участии в судебном заседании:

От истца к онлайн-заседанию подключился  – ФИО1 представитель по доверенности № 1 от 05.01.2024 г., представлен диплом, паспорт;

От ответчика – явки нет, извещены надлежащим образом.

 

Общество с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Рефстройпроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору подряда № 22/07-БД от 31 мая 2022 года в размере 468 757 руб. 24 коп., задолженности по договору подряда № 22/08-БД от 31 мая 2022 года в размере 1 940 299 руб. 80 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 20 246 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.04.2024 исковое заявление было принято к производству.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования, просил удовлетворить.

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с необходимостью изучения, подготовки и подачи встречного искового заявления.

Представитель истца возражает против отложения судебного заседания, поясняет, что данное ходатайство направлено на затягивание процесса, просит рассмотреть дело по существу.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд не нашел правовых оснований для его удовлетворения и соответственно отложению судебного разбирательства на новый срок, так как у ответчика было достаточно времени для подготовки правовой позиции по настоящему иску.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв, возражения по существу иска не представил, об уважительных причинах неявки не сообщил.

Согласно ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 31.05.2022 года между обществом с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Рефстройпроект" (генеральный подрядчик) заключен договор № 22/07-БД, по которому Генеральный Подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: 

<

...>

ИКЗ плана-графика: 223027001604002700100100230004299244.

Номер закупки: № 0101500000322000071.

Согласно п. 2.1 договора договорная цена определяется - Приложением № 1 к настоящему Договору.

Цена является твердой, фиксированной и включает в себя:

- стоимость работ по благоустройству;

- стоимость материалов, необходимых для работ;

- стоимость доставки на объекты материалов, используемых при благоустройстве;

- стоимость тары, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов;

- стоимость сбора, вывоза и утилизации строительного мусора, ТБО, вывоз оборудования с территории (площадки) объектов;

- уплату налогов, страхования, обязательных платежей, а также иных расходов Подрядчика, необходимых для исполнения Контракта;

- стоимость всех остальных расходов (издержек) Подрядчика, связанных с исполнением настоящего договора.

Цена договора указана с учетом услуг Генерального Подрядчика (Генподрядные) в размере 4 (четыре) процента от цены Контракта.

Выполнение Подрядчиком дополнительных работ осуществляется только после письменного согласования Сторонами таких работ и заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору с учетом Генподрядных услуг.

В соответствии с п. 3.7 договора оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

3.7.1.     Оплата выполненных Работ производится Генеральным Подрядчиком в течение 35 дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) по завершения всех видов Работ, оформленных в установленном порядке.

Датой оплаты Генеральным Подрядчиком выполненных Работ считается дата списания денежных средств с банковского счет банка Генерального Подрядчика.

Оплата выполненных работ производится после получения Генеральным Подрядчиком денежных средств по Контракту от Заказчика.

В соответствии с протоколом согласования договорной цены стоимость работ по указанному выше договору составила 12 371 881 руб. 50 коп.

Факт выполнения работ по договору подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.12.2022 года на сумму 11 968 757 руб. 24 коп.

Общий объем фактически выполненных работ по данному договору подряда №22/07-БД от 31 мая 2022 года составил 11 968 757 руб. 24 коп.

Генеральным подрядчиком всего оплачено работ на общую сумму 11 500 000 руб. 00 коп.

Задолженность генерального подрядчика по данному договору подряда составляет 468 757 руб. 24 коп.

31.05.2022 года между обществом с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Рефстройпроект" (генеральный подрядчик) заключен договор № 22/08-БД, по которому Генеральный Подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: 

<

...> Победы, 15, 17. 19 

<

...>

ИКЗ плана-графика: 223027900140102790100100240004299244.

Номер закупки: № 0101500000322000071.

Согласно п. 2.1 договора договорная цена определяется - Приложением № 1 к настоящему Договору.

Цена является твердой, фиксированной и включает в себя:

- стоимость работ по благоустройству;

- стоимость материалов, необходимых для работ;

- стоимость доставки на объекты материалов, используемых при благоустройстве;

- стоимость тары, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов;

- стоимость сбора, вывоза и утилизации строительного мусора, ТБО, вывоз оборудования с территории (площадки) объектов;

- уплату налогов, страхования, обязательных платежей, а также иных расходов Подрядчика, необходимых для исполнения Контракта;

- стоимость всех остальных расходов (издержек) Подрядчика, связанных с исполнением настоящего договора.

Цена договора указана с учетом услуг Генерального Подрядчика (Генподрядные) в размере 4 (четыре) процента от цены Контракта.

Выполнение Подрядчиком дополнительных работ осуществляется только после письменного согласования Сторонами таких работ и заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору с учетом Генподрядных услуг.

В соответствии с п. 3.7 договора оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

3.7.1.     Оплата выполненных Работ производится Генеральным Подрядчиком в течение 35 дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) по завершения всех видов Работ, оформленных в установленном порядке.

Датой оплаты Генеральным Подрядчиком выполненных Работ считается дата списания денежных средств с банковского счет банка Генерального Подрядчика.

Оплата выполненных работ производится после получения Генеральным Подрядчиком денежных средств по Контракту от Заказчика.

В соответствии с протоколом согласования договорной цены стоимость работ по указанному выше договору составила 26 411 249 руб. 66 коп.

Факт выполнения работ по договору подтверждается актом о приемке выполненных работ № 2 от 12.12.2022г. на сумму 6 797 361 руб. 25 коп., № 2 от 12.12.2022г. на сумму 5 643 247 руб. 04 коп., № 3 от 29.09.2023г. на сумму 4 995 033 руб. 54 коп., № 3 от 29.09.2023г. на сумму 13 823 руб. 95 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 12.12.2022г. на сумму 10 982 983 руб. 96 коп., № 3 от 29.09.2023г. на сумму 4 808 503 руб. 19 коп.

Общий объем фактически выполненных работ по данному договору подряда №22/08-БД от 31 мая 2022 года составил 23 339 605 руб. 68 коп.

Генеральным подрядчиком всего оплачено работа на общую сумму также 23 339 605 руб. 68 коп.

Задолженность генерального подрядчика по данному договору подряда составляет 1 940 299 руб. 80 коп.

31.05.2022 года между обществом с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Рефстройпроект" (генеральный подрядчик) заключен договор № 22/06-БД, по которому Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: РБ, 

<

...>, 60а.

ИКЗ плана-графика: 223025601417902560100100180004299243.

Номер закупки № 0101500000322000071.

В соответствии с протоколом согласования договорной цены стоимость работ по указанному выше договору составила 20 336 966 рублей 78 копеек.

Общий объем фактически выполненных работ по данному договору подряда № 22/06-БД от 31 мая 2022 года составил 19 454 266 рублей 23 копейки.

Генеральным подрядчиком всего оплачено работа на общую сумму также 19 454 266 рублей 23 копейки.

По данному договору подряда задолженности генерального подрядчика перед подрядчиком не имеется.

Поскольку спор в досудебном порядке урегулировать не удалось, претензии истца были оставлены ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленных договоров № 22/07-БД от 31.05.2022 года, № 22/08-БД от 31.05.2022 года, суд приходит к выводу, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Договоры № 22/07-БД от 31.05.2022 года, № 22/08-БД от 31.05.2022 года содержат все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с протоколом согласования договорной цены стоимость работ по договору № 22/07-БД от 31.05.2022 года составила 12 371 881 руб. 50 коп.

Факт выполнения работ по договору подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.12.2022 года на сумму 11 968 757 руб. 24 коп.

Общий объем фактически выполненных работ по данному договору подряда №22/07-БД от 31 мая 2022 года составил 11 968 757 руб. 24 коп.

Генеральным подрядчиком всего оплачено работ на общую сумму 11 500 000 руб. 00 коп.

В соответствии с протоколом согласования договорной цены стоимость работ по договору № 22/08-БД от 31.05.2022 года составила 26 411 249 руб. 66 коп.

Факт выполнения работ по договору подтверждается актом о приемке выполненных работ № 2 от 12.12.2022г. на сумму 6 797 361 руб. 25 коп., № 2 от 12.12.2022г. на сумму 5 643 247 руб. 04 коп., № 3 от 29.09.2023г. на сумму 4 995 033 руб. 54 коп., № 3 от 29.09.2023г. на сумму 13 823 руб. 95 коп., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 12.12.2022г. на сумму 10 982 983 руб. 96 коп., № 3 от 29.09.2023г. на сумму 4 808 503 руб. 19 коп.

Общий объем фактически выполненных работ по данному договору подряда №22/08-БД от 31 мая 2022 года составил 23 339 605 руб. 68 коп.

Генеральным подрядчиком всего оплачено работа на общую сумму также 23 339 605 руб. 68 коп.

Документы содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости.

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ субподрядчиком (истцом), принятии их результата подрядчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться.

Задолженность генерального подрядчика по договору № 22/07-БД от 31.05.2022 года составляет 468 757 руб. 24 коп.

Задолженность генерального подрядчика по договору № 22/08-БД от 31.05.2022 года составляет 1 940 299 руб. 80 коп.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Принимая во внимание положения ст. 9 АПК РФ, которой установлено осуществление судопроизводства в арбитражном суде на основе состязательности, заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою позицию в споре путем представления доказательств, состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие, по общему правилу, с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств, учитывая обстоятельства дела. Гарантируя каждому лицу, участвующему в деле, право представлять арбитражному суду доказательства ч. 2 ст. 9 АПК РФ одновременно возлагает на названных лиц риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком не опровергнуты.

Учитывая вышеизложенное, требования истца о взыскании суммы долга по договору подряда № 22/07-БД от 31 мая 2022 года в размере 468 757 руб. 24 коп., суммы долга по договору подряда № 22/08-БД от 31 мая 2022 года в размере 1 940 299 руб. 80 коп.,  подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой" удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Рефстройпроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму долга по договору подряда № 22/07-БД от 31 мая 2022 года в размере 468 757 руб. 24 коп., сумму долга по договору подряда № 22/08-БД от 31 мая 2022 года в размере 1 940 299 руб. 80 коп.,  судебные расходы по оплате госпошлины в размер 20 246 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                          Д.П. Кузнецов