47_36110894 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-230119/22-47-1720

г. Москва

26 июня 2023 г.

Арбитражный суд в составе судьи Эльдеева А.А., при ведении протокола судебного  заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по  исковому заявлению (заявлению) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (119526,  

<

...>, ЭТ/КАБ  20/2017, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2004, ИНН: 

<

***>)   к ответчику ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ИМ.Н.Л.ДУХОВА" (127030, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2002,  ИНН: 

<

***>)  

третье лицо 

АО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН"  (ИНН: 

<

***>)  

о взыскании убытков, расторжении договора, по встречному иску о внесении изменений в договор, при участии представителей: согласно протоколу 

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать.  Встречный иск удовлетворить. 

 Изменить условия договора от 28.12.2017 № 10-11/17-1116 в части срока  подключения и изложить п.3.1. Раздела 3 договора в следующей редакции: Срок  фактического подключения по договору – 18 месяцев с момента согласования  ответчиком (ПАО «МОЭК») разработанной истцом (ФГУП «ВНИИА») проектной  документации.  

 Взыскать с ПАО «МОЭК» в пользу ФГУП «ВНИИА» расходы по уплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: А.А. Эльдеев