АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

432970, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А72-11770/2017

г. Ульяновск

16» сентября 2019 г.

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Кнышевского Дениса  Леонидовича, руководствуясь статьями 110, 146, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Производство по делу возобновить. 

Ходатайство представителя Муниципального автономного учреждения  дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа  Новомалыклинского района Ульяновской области о вызове и допросе эксперта  оставить без удовлетворения.  

Исковые требования Муниципального автономного учреждения дополнительного  образования Детско-юношеская спортивная школа Новомалыклинского района  Ульяновской области удовлетворить частично.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Керамзит" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение тридцати дней со дня вступления решения  в законную силу устранить недостатки выполненных по муниципальному контракту от  29.07.2015 № 1 работ, а именно:  

1. Привести в соответствие наружные, внутренние стены и перегородки бассейна  из керамзитобетонных блоков Своду правил СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»  в части недопустимости применения данного материала и п.8.7 СП 50.13330.2012  "Тепловая защита зданий" в части устройства пароизоляции со стороны помещений.  Привести наружные стены из кирпича в соответствие с проектом в части отсутствия  утеплителя.  

2. Провести антикоррозийную окраску эмалью ХВ-1120 строительных  конструкций в соответствии с проектом (условию контракта № 1) и требованиям Свода  правил 28.13330.2012 и СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций от  коррозии. Актуализированная редакция СНиП 21.03.11-85.  

3. Провести окраску трубопроводов отопления в бассейне в соответствии с  проектом (условию контракта № 1) и требованиям Свода правил СП 71.13330.2017  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.  

4. Привести Огнезащитное покрытие металлического каркаса в соответствии с  требованиям СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и  сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и  требования к результатам работ в части необработанных участков и наличие пятен  ржавого оттенка.  

5. Привести кровлю здания Мягкая кровля в соответствие: 

- проекту (условию Контракта № 1) в части отсутствия желобов из оцинкованной  стали (у парапета изнутри), недостаточной толщины утеплителя на участке кровли над  главным входом и фитнессзалом;  

- требованиям п. 2.46 СП 71.13330.2011 "Изоляционные и отделочные  покрытия", в части имеющихся вздутий, морщинистости;  

- требованиям п. 3.6 МДС 12-33.2007 Кровельные работы в части отсутствия  бортиков в углах примыкания, п. 7.9 МДС 12-33.2007 Кровельные работы в части  отсутствия фланцевого соединения металлических листов покрытия парапетов и их  герметизации;  

- требованиям п. 10.1 МДС 12-33.2007 Кровельные работы в части  водонепроницаемости.  

Кровлю из профлиста по сэндвич-панелям привести в соответствие с  требованиями п. 10.1 МДС 12-33.2007 Кровельные работы в части имеющихся  повреждений листов (вмятин, изломов кромок), неплотного примыкания листов.  

6. Оконные блоки привести в соответствие требованиям п.5.1.15.4.3, В.5 ГОСТ  30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам  Общие технические условия в части отсутствия пароизоляции.  

7. Главный вход и крыльцо № 3 привести в соответствие проекту (условию  Контракта № 1) и требованиям ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 N 384- ФЗ  (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и  Своду правил СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных  групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.  

8. Покрыть полы подвала керамической плиткой, заменить отделку потолков 1-го  и 2-го этажей в соответствии с проектом (условию Контракта № 1).  

9. Вентиляционную систему привести в соответствие проекту (условию Контакта   № 1) в части изменения конфигурации, Своду правил СП 31-112-2004 Физкультурно-  спортивные залы, Своду правил СП 31-113-2004 Бассейны для плавания в части  совмещения вытяжных систем помещений различных по своему функциональному  назначению.  

10. Установить ПРУ (противорадиационное укрытие) на 190 мест в подвале ФОК  в соответствии с проектом.  

В остальной части исковые требования Муниципального автономного учреждения  дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа  Новомалыклинского района Ульяновской области оставить без удовлетворения.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Керамзит» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального автономного учреждения  дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа  Новомалыклинского района Ульяновской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. – в возмещение расходов по оплате  экспертизы.  

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Керамзит»  удовлетворить частично.  

Взыскать с Муниципального автономного учреждения дополнительного  образования Детско-юношеская спортивная школа Новомалыклинского района  Ульяновской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Керамзит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

задолженность в сумме 1 909 120 (один миллион девятьсот девять тысяч сто двадцать)  руб. 94 коп.  

В остальной части исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью «Керамзит» оставить без удовлетворения.  

Взыскать с Муниципального автономного учреждения дополнительного  образования Детско-юношеская спортивная школа Новомалыклинского района  Ульяновской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 169 223 (сто шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) руб. 36 коп. –  государственную пошлину.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Керамзит» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 34 986 (тридцать  четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) руб. 81 коп. – государственную пошлину.  

Возвратить Муниципальному автономному учреждению дополнительного  образования Детско-юношеская спортивная школа Новомалыклинского района  Ульяновской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета  Арбитражного суда Ульяновской области денежные средства в сумме 208 500 (двести  восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., перечисленные платежным поручением от  16.04.2018 № 3195.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ульяновской области  денежные средства в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. на счет  Автономной некоммерческой организации по проведению исследований «Поволжская  палата судебных экспертов».  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Ульяновской области  денежные средства в сумме 91 500 (девяносто одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. на счет  Автономной некоммерческой организации «Экспертная специализированная  организация «Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу - Ульяновск».  

Заявление Муниципального автономного учреждения дополнительного  образования Детско-юношеская спортивная школа Новомалыклинского района  Ульяновской области о наложении судебного штрафа оставить без удовлетворения.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия.  

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст. 257- 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Д.Л. Кнышевский