АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А10-7115/2016

27 января 2017 года

г. Улан-Удэ

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 30 января 2017 года.

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Байкальские информационные сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670031, микрорайон 119-й, д. 62, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670013, ул. Онохойская, д. 1, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) о взыскании 1 780 419 руб. 31 коп – суммы  долга,

третье лицо  - Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Атриум»;

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, генеральный директор,

от ответчика: не явился, извещен,

от третьего лица: не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальские информационные сети» обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3» о взыскании 1 780 419 руб. 31 коп. – задолженности по договорам субподряда №В-35/15 от 17.10.2015, №В-53/15 от 05.11.2015. 

В обоснование исковых требований истец указал, что между ООО СК «Атриум» и ООО «Строительное управление-3» заключены договор субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2016 на сумму 16 626 852 руб. 54 коп. и договор субподряда №В-53/15 от 05.11.2015 в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2016 на сумму 7 216 817 руб. 42 коп. 

ООО СК «Атриум» выполнены работы в полном объеме.

Согласно акту сверки по договору субподряда №В-35/15 задолженность ООО «Строительное управление -3» составила 831 342 руб. 63 коп. Согласно акту сверки по договору субподряда №В-53/15 задолженность ООО «Строительное управление -3» составила 949 076 руб. 68 коп. Сумма общей задолженности составила 1 780 419 руб. 31 коп.

ООО СК «Атриум» уступило истцу по договору цессии от 29.09.2016 право требования оплаты по договору субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 и договору субподряда №В-53/15 от 05.11.2015.

Истец направил ответчику претензию об оплате задолженности с приложением договора цессии от 29.09.2016, однако оплаты не поступило, что и послужило основанием обращения в суд.

В качестве правового обоснования истец сослался на статьи 309, 310, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В предварительное судебное заседание ответчик не явился, извещен о времени и месте судебного заседания в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается почтовым уведомлением №67000806862463.

Третье лицо в предварительное судебное заседание не явилось, считается извещенным надлежащим образом в порядке части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Определение о принятии искового заявления к производству, направленное по юридическому адресу ответчика заказным судебным письмом №67000806862456 возвращено отделением почтовой связи с указанием причины возврата  - «истек срок хранения».

Информация о времени и месте предварительного судебного заседания размещена судом на официальных сайтах Арбитражного суда Республики Бурятия и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие сторон не заявлено.

Суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик отзыв на исковое заявление, заявлений, ходатайств не представил.

Согласно части 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующее.

В соответствии с договором субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 ООО СК «Атриум» (субподрядчик) принимает на себя выполнение работ по строительству наружных сетей водоотведения и сдачу инженерных сетей ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, сдачу функционирующей инженерной системы на строительстве объекта: «Строительство наружных сетей водоотведения АТК «Байкальский», в соответствии с рабочей документацией, техническим заданием (приложение №1), локальным сметным расчетом (приложение №2), графиком производства работ (приложение №3), а ООО «Строительное управление – 3» (подрядчик) обязуется принять и оплатить их результат.

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что  объем и стоимость работ установлены  сметным расчетом (приложение №1).  Согласно локальному сметному расчету цена договора составляет 14 934 082 руб. 36 коп. 

01 апреля 2016 между сторонами заключено дополнительное соглашение №1, согласно которому стороны пришли к соглашению об аннулировании приложения №1 к договору, утверждению объема и стоимости работ на основании локального сметного расчета №1 (приложение №1 к соглашению). Согласно локальному сметному расчету к соглашению  цена договора составляет 16 626 852 руб. 54 коп. 

Сроки  выполнения  работ в редакции дополнительного  соглашения  № 1  от 01.04.2016г : дата начала работ 17 октября 2015, дата окончания работ 19 апреля 2016.

В соответствии с пунктом 3.3 оплата работ производится на основании следующих документов: согласованных с подрядчиком справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов по форме КС-2; исполнительной документации, оформленной согласно требованиям РД 11-05-2007, РД 11-02-2006, если отсутствие исполнительной документации исключает возможность использования объекта по прямому назначению; документов удостоверяющих качество скрытых работ, использованных оборудования, материалов, конструкций, деталей и изделий, в течение 15 дней со дня предъявления к оплате счета-фактуры, в размере 95% от стоимости принятых работ.

Пунктом 3.4 предусмотрено, что окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, сдачи ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, сдачи функционирующей инженерной системы, отраженной в п.1.1 договора, включая устранения дефектов, выявленных при приемке результата работ и окончания гарантийного срока.

Выполнение работ субподрядчиком подтверждаются актом о приемке выполненных работ от 20.10.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 20.10.2015 на сумму 1 800 232 руб. 78 коп., актом о приемке выполненных работ от 25.11.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 25.11.2015 на сумму 7 293 354 руб. 62 коп., актом о приемке выполненных работ от 30.11.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 30.11.2015 на сумму 4 415 031 руб. 36 коп., актом о приемке выполненных работ от 10.12.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 10.12.2015 на сумму 67 837 руб. 52 коп., актом о приемке выполненных работ от 25.12.2015, справкой о стоимости выполненных работ от 25.12.2015 на сумму 1 357 626 руб. 08 коп., расчетом и справкой о стоимости выполненных работ от 19.04.2016 на сумму 1 692 770 руб. 18 коп., итого на сумму  16 626 852 руб. 54 коп. Акты приемки работ , справки о стоимости выполненных  работ  подписаны  сторонами  договора  без  замечаний.    

Согласно акту сверки взаимных расчетов по договору В-35/15 от 17.10.2015, подписанному  ООО СК «Артиум» (субподрядчик)  и ООО «Строительное  управление 3 (подрядчик)  задолженность в пользу ООО СК «Атриум» по состоянию на 11.07.2016г составляет 831 342 руб. 63 коп.

Ответчиком доказательств оплаты задолженности в размере 831 342 руб. 63 коп. не представлено.

В соответствии с договором субподряда №В-53/15 от 05.11.2015 ООО СК «Атриум» (субподрядчик) принимает на себя выполнение работ по строительно-монтажным работам по КНС1, КНС2 на строительстве объекта: «Строительство наружных сетей водоотведения АТК «Байкальский», в соответствии с рабочей документацией и локальным сметным расчетом (приложение №1), графиком производства работ (приложение №2), а ООО «Строительное управление – 3» (подрядчик) обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно пункту 2.1 договора в  редакции дополнительного  соглашения № 1  от 01.04.2016г объем  и стоимость работ определяются на основании локальных сметных расчетов №1 (приложение №1 к соглашению) и №2 (приложение 2 к соглашению)  и  составляет  7 216 817 руб. 19 коп, в том  числе  по локальному  сметному  расчету № 1 - 2 386 134 руб, 72 коп , по локальному сметному  расчету № 2 -  4 830 682  руб 47 коп. 

Дата начала работ 05 ноября 2015, дата окончания работ 06 апреля 2016.

В соответствии с пунктом 3.3 оплата работ производится на основании следующих документов: согласованных с подрядчиком справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов по форме КС-2; исполнительной документации, оформленной согласно требованиям РД 11-05-2007, РД 11-02-2006, если отсутствие исполнительной документации исключает возможность использования объекта по прямому назначению; документов удостоверяющих качество скрытых работ, использованных оборудования, материалов, конструкций, деталей и изделий, в течение 15 дней со дня предъявления к оплате счета-фактуры, в размере 95% от стоимости принятых работ.

Пунктом 3.4 предусмотрено, что окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней после выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, сдача инженерных сетей ресурсоснабжающей организации в установленном порядке, сдачи функционирующей инженерной системы, отраженной в п.1.1 договора, включая устранения дефектов, выявленных при приемке результата работ и окончания гарантийного срока.

Выполнение работ субподрядчиком подтверждаются актом о приемке выполненных работ №1 от 23.12.2015 на сумму 2 142 601 руб. 52 коп., актом о приемке выполненных работ №2 от 23.12.2015 на сумму 4 380 010 руб. 14 коп., справкой о стоимости выполненных работ от 23.12.2015 на сумму 6 522 611 руб. 66 коп, расчетом и справкой о стоимости выполненных работ от 06.04.2016 на сумму 595 750 руб. 14 коп., итого на  сумму  7 118 361 руб. 80 коп.

Согласно акту сверки взаимных расчетов по договору В-53/15 от 05.11.2015, подписанному   ООО СК «Артиум» (субподрядчик)  и ООО «Строительное  управление 3» (подрядчик)  задолженность в пользу ООО СК «Атриум» по состоянию на 11.07.2016г составляет 949 076 руб. 68 коп.

Как  следует  из распоряжения Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора №66-Р3 от 31.12.2015 и заключения №66-1-16/2015 от 31.12.2015 построенный  объект  капитального  строительства «Строительство наружных  сетей  водоотведения АТК «Байкальский», расположенный по адресу  Республика Бурятия, Иволгинский  район, г.Улан-Удэ, соответствует  требованиям ФЗ «Технический  регламент  о безопасности  зданий и сооружений» №  384-ФЗ  от  30.12.2009г, проектной документации.

Требования о проведении  окончательного  расчета правомерны.

Ответчиком доказательств оплаты задолженности в размере 949 076 руб. 68 коп. не представлено.

Таким образом,  задолженность ответчика составляет 1 780 419 руб. 31 коп. из расчета 831 342 руб. 63 коп. + 949 076 руб. 68 коп.

Согласно договору цессии, уступки права требования оплаты за выполненные работы от 29.09.2016 ООО СК «Атриум» (цедент) уступает, а ООО «Байкальские информационные сети» (цессионарий) принимает право требования оплаты за выполненные работы с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление – 3», ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/032301001 (должник) по договору субподряда №В-53/15 от 05.11.2015 г., по договору субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 г. в полном объеме (пункт 1.1).

Согласно пункту 1.2 размер права требования оплаты, уступаемого цессионарию, по договору субподряда №В-53/15 от 05.11.2015 г. составляет 949 076 руб. 68 коп., по договору субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 г. составляет 831 342 руб. 63 коп.

В соответствии с пунктом 1.6 договор является возмездным, в счет уступки права требования, указанного в разделе 1 договора. Стороны пришли к соглашению, что право требования у цессионария с должника возникает с момента заключения договора, при этом цессионарий обязуется передать цеденту 500 000 рублей в качестве оплаты по настоящему договору в срок не позднее 31.12.2017 г. 

Пунктом 2.1 цедент обязан передать цессионарию в 3-дневный срок после подписания договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования оплаты.

Существенные условия об уступаемом обязательстве в договоре цессии от 29.09.2016г согласованы.

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Письмом, врученным ответчику 28.10.2016, ответчик был извещен о состоявшемся переходе права требования по оплате задолженности по договору субподряда №В-53/15 от 05.11.2015 г., по договору субподряда №В-35/15 от 17.10.2015 г. с требованием оплаты задолженности.

Материалами дела задолженность ответчика подтверждена, не оспорена, доказательств оплаты за выполненные работы не представлено.

На основании статей 309, 310, 382, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации   требование истца о взыскании задолженности обоснованно и подлежит удовлетворению в  сумме 1 780 419 руб. 31 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины суд относит на  ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление - 3» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Байкальские информационные сети» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 780 419 руб 31 коп  - сумму долга;

в доход федерального бюджета 30 804 руб 00 коп -  государственную пошлину.

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу  по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

СудьяЛ.ФИО3