А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д Г О Р О Д А М О С К В Ы 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 г. Москва Дело № А40-35511/23-151-295  24.07.2023 года  

Резолютивная часть решения объявлена 13.07.2023 

Решение в полном объеме изготовлено 24.07.2023 

Арбитражный суд города Москвы в составе Судьи Вольской К.В. при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФКР МОСКВЫ (ОГРН: 1157700003230) 

к ответчику: ООО «ГК «ГАЗСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН: 1165047051498)  о взыскании 1 487 837,01 руб.  

при участии: лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены, 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неустойки по договору № ПКР-004759-19 от 10.02.2020 в  размере 1 487 837 руб. 01 коп.  

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Стороны, надлежащим образом извещенные, в судебное заседание не явились, в связи с  чем, в порядке ст. 156 АПК РФ, суд считает возможным провести судебное заседание в их  отсутствие.  

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим  выводам.  

Между ФКР Москвы (далее Заказчик, Истец) и ООО "ГАЗСПЕЦСТРОЙ" (далее  Генподрядчик, Ответчик) заключен договор от 10.02.2020 № ПКР-004759-19 на выполнение  работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ЮЗ АО, пр-кт. Ленинский, д. 121/1, корп. 1, пр- кт. Ленинский, д. 121/1, корп. 2 (далее - договор).  

Согласно п. 4.1. Генподрядчик обязуется выполнить Работы по Договору, как в целом,  так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая выполнение  этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с Графиком  производства работ (Приложение № 1 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения  в выполнении работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении  сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания,  включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, за  

исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных  нормами действующего законодательства РФ.  

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам)^  здания по каждому Объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам  (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения  имущественных санкций в случае нарушения Генподрядчиком сроков производства Работ.  

В силу п. 4.2. договора продолжительность производства работ на Объекте(-ах)  определяется Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

Согласно п. 4.2.1. договора начало выполнения работ - согласно Графика производства и  стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

В силу п. 4.2.2. договора конечный срок выполнения работ - последний день  установленного срока выполнения работ согласно Графика производства и стоимости работ  (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

Согласно п. 6.1.10. генподрядчик обязан выполнить и сдать Работы по Объекту(-ам) в  объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать работы по Актам согласно п. 1.3 и 1.4,  1.8 настоящего Договора.  

В соответствии с п. 12.6. За невыполнение или ненадлежащее исполнение  Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте(-ах) в соответствии с  Графиком производства работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере:  

- 0,1% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания или  этапа работ по отдельному элементу (системе) здания, за каждый день просрочки до  фактического завершения выполнения работ по данному элементу (системе) здания или этапу  работ по отдельному элементу (системе) здания, в случае просрочки  продолжительностью от 1 до 10 календарных дней;  

- 0,2% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания или  этапа работ по отдельному элементу (системе) здания, за каждый день просрочки до  фактического завершения выполнения работ по данному элементу (системе) здания или этапу  работ по отдельному элементу (системе) здания, в случае просрочки продолжительностью  свыше 10 календарных дней.  

Неустойка взимается со следующего дня, после дня, на который в соответствии с  графиком выполнения работ приходится завершение выполнения работ по элементу (системе)  здания или этапа работ по отдельному элементу (системе) здания.  

В порядке досудебного урегулирования спора Истцом в адрес Ответчика направлены  претензии от 15.06.2022 № ФКР-ПИР-3951/22 и № ФКР-ПИР-3953/22, которые были  отправлены по юридическому адресу ответчика. Претензии остались без ответа.  

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.  

Удовлетворяя требования, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310,  330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.  

Проверив представленный истцом расчет неустойки суд признает его методологически и  арифметически верным.  

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.  

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Доказательства в опровержение доводов истца ответчиком не представлены, о времени и  месте проведения судебного заседания ответчик извещен, однако в судебное заседание не  явился, доказательства в подтверждение возражений относительно исковых требований не  предъявил, правами, предусмотренными законодательством, не воспользовался.  

Совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств подтверждает  обоснованность требований истца о взыскании неустойки в заявленном размере.  

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или  возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или  несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований (ст. 70 АПК РФ).  

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований,  действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств  в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.  

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст.  110 АПК РФ.   

На основании статей 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ГК «ГАЗСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН: 1165047051498) в пользу ФКР  МОСКВЫ (ОГРН: 1157700003230) неустойку по договору № ПКР-004759-19 от 10.02.2020 в  размере 1 487 837 руб. 01 коп., госпошлину в размере 27 878 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья К.В. Вольская