Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-29556/2018

23 мая 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  25 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  23 мая 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: акционерное общество "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "АТОМПРОЕКТ" (адрес:  Россия 197183, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул САВУШКИНА 82/А, ОГРН:  1089847342001);

ответчик: акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОАТОМИНВЕНТ" (адрес:  Россия 197022, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт АПТЕКАРСКИЙ 2/З/10 Н, ОГРН:  1037843012833);

третье лицо: акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭНЕРГОИЗЫСКАНИЯ" (адрес:  Россия 192029, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул БАБУШКИНА 1, ОГРН:  1089847279532)

о взыскании 3789143.34

при участии

-от истца: ФИО1 по доверенности от 13.03.17,

-от ответчика: ФИО2 по доверенности от 09.01.19,

-от третьих лиц: ФИО3 по доверенности от 03.10.18, ФИО4 по доверенности от 03.10.18,

установил:

АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "АТОМПРОЕКТ" предъявило иск о взыскании с АО "НПО"ЭНЕРГОАТОМИНВЕНТ" 3 789 143 руб. 34 коп. убытков в связи с ненадлежащим использованием обязательств по договору №14016/0671/133/852/2706/200 от 29.04.14.

Ответчик иск отклонил.

Ходатайство ответчика о проведении экспертизы отклонено как необоснованное.

Определением от 05.07.18 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено АО "СПб НИИИ "ЭНЕРГОИЗЫСКАНИЯ".

Третье лицо поддержало позицию истца.

Судом установлено:

29.04.2014 между АО «АТОМПРОЕКТ» (Заказчик) и АО «НПО «Энергоатоминвент» (Исполнитель) заключен договор № 14016/0671/133/852/2706/200 (далее - Договор) на выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке комплекса по хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС (III пусковой комплекс) (далее - Работы). Договор заключен во исполнение Генерального договора от 12.07.2013 № 852/2706/200/4600013486 (далее по тексту - Генеральный договор), подписанного между АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «АТОМПРОЕКТ».

Цена Работ по Договору составляет 6 150 000,00 руб. (Шесть миллионов сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Согласно Генеральному договору комплект документации, выполненной АО «НПО «Энергоатоминвент» был направлен в адрес Генерального заказчика-АО «Концерн Росэнергоатом» (п.1.5. Договора) 15.10.2014 за № 46-2.412.10/36033.

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ Генеральный заказчик АО «Концерн Росэнергоатом» направил документацию по объекту капитального строительства «Комплекс хранения и переработки РАО. III пусковой комплекс», в том числе и документацию по инженерным изысканиям, выполненную АО «НПО «Энергоатоминвент» в рамках Договора, в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

26.03.2016 Генеральным заказчиком получено отрицательное заключение Государственной экспертизы № 350-16/ГГЭ-5149/02 (номер в реестре 00-1-3-3-1074-16).

По результатам рассмотрения предварительных замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» было проведено совещание с участием специалистов АО «НПО «Энергоатоминвент» с утверждением плана корректировки документации ЗАО «НПО «Энергоатоминвент». По результатам отрицательного заключения Государственной экспертизы № 350-16/ГТЭ-5149/02 в адрес АО «НПО «Энергоатоминвент» были направлены запросы о корректировке документации и устранении замечаний ФАУ «Главгосэкпертиза России».

В силу ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ работы на выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке комплекса по хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС (III пусковой комплекс) отнесены к особо опасным и технически сложным объектам.

Статьей 761 ГК РФ установлено, что Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

Согласно ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо непригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, (ст. 723 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 8.7. Договора Исполнитель несет ответственность согласно ст. 761 Гражданскому кодексу РФ и ст. 37 Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся результатом работ по Договору. При обнаружении соответствующих недостатков результатов работ АО «НПО «Энергоатоминвент» обязан безвозмездно устранить их по требованию АО «АТОМПРОЕКТ».

В связи с тем, что АО «НПО «Энергоатоминвент» - ответчик на основании неоднократных запросов АО «АТОМПРОЕКТ» не представило откорректированные отчеты с учетом замечаний ФАУ «Главгосэкспертизы», для обеспечения устранения данных    замечаний    и    прохождения    экспертизы    повторно,    29.06.2016 АО «АТОМПРОЕКТ»   заключило      с   АО   «СПб   НИМИ   «ЭИЗ»   договор

(№5097/16/3/418, цена работ по договору 95 480,27 руб. (девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят рублей 27 копеек). В соответствии с договором от 29.06.2016 №5097/16/3/418 АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме «Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке комплекса по хранению и переработке РАО ЛАЭС. III пусковой комплекс». Техническим заданием договора от 29.06.2016 №5097/16/3/418 с АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» предусмотрено:

- рассмотрение результатов технических комплексных инженерных изысканий, выполненных АО «НПО «Энергоатоминвент»;

- рассмотрение замечаний Главгосэкспертизы;

- доработка технических отчетов комплексных инженерных изысканий.

В процессе выполнения работ по договору от 29.06.2016 №5097/16/3/418 АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» выявлена необходимость в проведении дополнительных инженерных изысканий в связи с недостаточностью и недостоверностью данных, содержащихся в отчетах АО «НПО «Энергоатоминвент», а также выдано заключение о необходимости проведения дополнительных полевых, лабораторных и камеральных работ, невыполненных, либо выполненных ненадлежащим образом ЗАО «НПО «Энергоатоминвент».

27.07.2016 №46-1-2413/16634 в адрес АО «НПО «Энергоатоминвент» направлено письмо о невозможности выполнения АО «СПб НИИ «ЭИЗ» работ по договору в связи с некондиционностью отчетных материалов ЗАО «НПО «Энергоатоминвент» и просьбой в связи с обнаружением недостатков результатов работ устранить их в срок до 30.08.2016.

09.08.2016 в адрес АО «НПО «Энергоатоминвент» направлена претензия №46/60/2016-ПРЕТ с требованием в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии предоставить АО «АТОМПРОЕКТ» откорректированную документацию с устраненными замечаниями АО «АТОМПРОЕКТ» и ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ответ на претензию в адрес Заказчика не поступал.

17.08.2016 АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» письмом №1338/01-11 уведомило АО «АТОМПРОЕКТ», что при выполнении работ по договору №5097/16/3/418 от 29.06.2016 выявлена невозможность достижения результата работ в связи с отсутствием необходимых исходных данных в виде результатов полевых работ, вследствие чего работы приостановлены и срок сдачи технических отчетов перенесен до предоставления дополнительных инженерных изысканий и корректировки отчетных материалов на площадке комплекса по хранению и переработке РАО ЛАЭС, III пусковой комплекс.

В связи с тем, что откорректированная документация с устраненными замечаниями АО «АТОМПРОЕКТ» и ФАУ «Главгосэкспертиза России», АО «НПО «Энергоатоминвент» не была представлена, 22.06.2017 между АО «АТОМПРОЕКТ» и АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» был заключен договор №5964/17/2 а выполнение работ по теме: «Дополнительные инженерные изыскания- по исправлению замечаний экспертизы к технической документации по теме «Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке комплекса по хранению и переработке РАО «Ленинградская АЭС (III пусковой комплекс)».

Согласно п.5.1 договора №5964/17/2 от 22.06.2017 цена работ составляет 3 693 663,07 руб. (три миллиона шестьсот девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят три рубля 07 копеек), включая НДС 18% в размере 563 440,13 руб. (пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста сорок рублей 13 копеек).

Выполненные АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» работы приняты АО «АТОМПРОЕКТ»:

1. По договору № 5964/17/2 от 22.06.2017 по акту №36 от 30.06.2017 на общую сумму 3 693 663,07 руб., включая НДС 18%;

2. По договору №5097/16/3/418 от 29.06.2016 по акту от 07.07.2017 на общую сумму 95 480,27 руб., включая НДС 18%;

В связи с неисполнением АО «НПО «Энергоатоминвент» обязательств по устранению обнаруженных недостатков в результатах работ по договору, АО «АТОМПРОЕКТ» понесло убытки на общую сумму 3 789 143,34 руб. (три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок три рубля 34 копейки).

Заявление ответчика о фальсификации истцом договора № 5964/17/2 от 22.06.17, заключенного с АО "СПб НИИИ "ЭНЕРГОИЗЫСКАНИЯ" проверено судом и признано не соответствующим действительности, так как указанные в нем работы фактически проводились третьим лицом в 2016 году, но были оформлены договором №5964/17/2 от 22.06.17, что было вызвано необходимостью соблюдения сроков выполнения работ. Переписка между истцом и третьим лицом по поводу проведения дополнительных инженерных изысканий со ссылкой на договор № 5964/17/2 от 22.06.17 приобщена к материалам дела. Истцом также представлены карточки на выдачу пропусков сотрудникам АО "СПб НИИИ "ЭНЕРГОИЗЫСКАНИЯ", список инструментов и оборудования, которое использовалось при ведении буровых работ. Поскольку объект – Ленинградская АЭС является режимным, не доверять представленным документам у суда нет оснований.

Учитывая изложенное, суд считает, что исковые требования доказаны по праву и размеру и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 15, 393, 723, 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества "НПО"ЭНЕРГОАТОМИНВЕНТ" в пользу акционерного общества "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "АТОМПРОЕКТ" 3 789 143 руб. 34 коп. убытков и 41 946 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.