И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                                                             Дело № А40-210544/24-126-1701

12.02.2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 23.01.2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 12.02.2025 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С.

протокол судебного заседания вел помощник судьи Антоновский С.А.,

рассматривает в судебном заседании дело

по иску ООО ГК "СБС" (ИНН: 

<

***>)

к ООО "СТРОЙ МОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 

<

***>)

о взыскании 2 334 728,78 руб.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: ФИО1, доверенность от 02.08.2024

от ответчика: ФИО2, доверенность от 19.12.2024

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании: задолженности по договору №01/98-23 от 10.07.2023 в размере 2 206 285 руб. 70 коп.; задолженности за переданный и неоплаченный товар в размере 1285 443 руб. 08 коп.  

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Представитель истца требования поддержал. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно доводам искового заявления, 10.07.2023 между Истцом ООО ГК «Системы безопасности и связи» и Ответчиком ООО «Строй Монтаж Инжиниринг» заключён Договор 01/98-23 от 10 июля 2023 года (далее -Договор 01/98-23).

В соответствии с п. 1.1 Договора, изложенным в редакции Дополнительного соглашения №1 от 16 августа 2023 года, Подрядчик ООО ГК «Системы безопасности и связи» обязуется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в рамках реализации титула: «Строительство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии постоянного тока напряжением 20 кВ Центральная - РП-9 протяжённостью 2,5 км» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада расположенного по адресу: 

<

...> ПС 330кВ Центральная, в соответствии с разделами рабочей документации П132207- 33. 0005-027 -ЭП1.3 - Силовая Сеть, П132207-33. 0005-030-ЭП1 - Освещение (далее - Работы), в соответствии с Расчётом стоимости выполнения работ (Приложение №1 к Договору), условиями настоящего Договора и Рабочей документации в сроки, определённые Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору), а Заказчик ООО «Строй Монтаж Инжиниринг» обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Дата начала работ после получения в полном объёме авансового платежа, строительной готовности объекта, подписания акта готовности помещений к проведению СМР и наличие материалов, предоставляемых на давальческой основе по графику передачи давальческих материалов, при не выполнении указанных условий, график производства работ (Приложение № 3 к Договору) подлежит изменению путём заключения Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

Согласно п. 2.1. Договора, изложенном в редакции Дополнительного соглашения №2 от 22.08.2023 к Договору 01/98-23 от 10.07.23, цена Договора включает в себя стоимость Работ и составляет 11 269 260 рублей 35 копеек, в т.ч. НДС 20% - 1 878 210 руб. 06 коп.

Цена Договора учитывает стоимость полного комплекса работ, включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также все другие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, указанных в Приложении №1 к Договору.

В соответствии с п. 2.6.2 Договора, изложенным в редакции Дополнительного соглашения №1 от 16 августа 2023 года, Заказчик оплачивает фактическую стоимость выполненных и принятых работ в размере, определённом в соответствии с Приложением №1 к Договору и указанном в соответствующем Акте о приёмке выполненных работ, с пропорциональном удержанием ранее выплаченного аванса и гарантийной суммы в соответствии с п. 2.6.4 Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи Заказчику подписанного Сторонами комплекта исполнительной документации на выполненные работы, а также подписания Сторонами соответствующего Акта о приёмке выполненных работ. Сертификаты, паспорта, отказные письма, протоколы и т.п. документацию на оборудование и материалы, предоставляемые на давальческой основе, Заказчик подготавливает самостоятельно.

Согласно Акту сверки взаимных расчётов от 17.05.2024 за период с 10.07.2023 по 17.05.2024 общая стоимость выполненных работ по Договору 01/98-23 от 10 июля 2023 года составила 6 118 310 (шесть миллионов сто восемнадцать тысяч триста десять) рублей 75 коп., что подтверждается Справками КС-2 (акт о приёмке выполненных работ) №1 от 29.09.2023 г. на сумму 1 952 700 руб., №2 от 18.10.2023 г. на сумму 521 928 руб., №3 от 19.10.2023 г. на сумму 748 212 руб., №4 от 17.11.2023 г. на сумму 992 940 руб., №5 от 30.11.2023 г. на сумму 195 669 руб. 95 коп., №6 от 10.01.2024 г. на сумму 1 609 330 руб. 80 коп., j\r27 от 17.01.2024 г. на сумму 97 530 руб., из которых Ответчиком было оплачено всего 2 753 536 (два миллиона семьсот двадцать три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 30 коп.

Выполненные Истцом работы по Договору 01/98-23 на сумму 3 394 774 (три миллиона триста девяноста четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) руб. 45 коп. по состоянию на 21.08.2024 г. не оплачены Ответчиком.

Также между Истцом и Ответчиком заключён Договор 01/101-23 от 16 августа 2023 года (далее - Договор 1/101-23), по которому Истец принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по строительству высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии постоянного тока напряжением 20 кВ Центральная - РП-9 протяжённостью 2,5 км, для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада расположенного по адресу: 

<

...> ПС 330 кВ Центральная, в соответствии с разделами проектной документации П132207-33.0005-027-ЭП1.3 - Силовая Сеть, П132207-33.0005-030 -ЭП1 - Освещение, П132207-33.0005-061-ЭП1 Кабельные металлоконструкции, П132207-33.0005-АПТ1.1 - Автоматическое пожаротушение. Электротехнические решения, П132207-33.0005-АПТ1.2 - Автоматическое пожаротушение. Технологические решения, на объекте: ПС 330кВ Центральная, по адресу: 

<

...>.

В соответствии с п. 2.5.2 Договора 1/101-23, Заказчик оплачивает фактическую стоимость выполненных и принятых работ в размере, определённом в соответствии с Приложением №1 к Договору и указанном в соответствующем «Акте о приёмке выполненных работ», с пропорциональном удержанием ранее выплаченного аванса и гарантийной суммы в соответствии с п.п. 2.5.3, 2.5.4 Договора 1/101-23 , в течение 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи Заказчику подписанного Сторонами комплекта исполнительной документации на выполненные работы, а также подписания Сторонами соответствующего Акта о приёмке выполненных работ.

В соответствии с п. 8.1. Договора 01/101-23, Подрядчик ежемесячно до 25 числа текущего месяца - направляет Заказчику Акт о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС-3, с предъявлением подписанного Сторонами комплекта исполнительной документации на объёмы работ, указанные в Актах о приёмке выполненных работ.

В соответствии с п. 8.2. Договора №01/101-23, в случае наличия замечаний по объёму выполненных работ, об этом делается отметка в Акте о приёмке выполненных работ и Справке о стоимости выполненных работ и затрат.

В соответствии с п. 8.4. Договора №01/101-23, Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней (или иной срок, согласованный письменно Сторонами) после получения мотивированного отказа от приёмки работ обязан за свой счёт и без увеличения цены Договора устранить причины, послужившие основанием для мотивированного отказа, после чего повторно направить Заказчику на рассмотрение Акт о приёмке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат.

Согласно Акту сверки взаимных расчётов от 17.05.2024 за период с 10.07.2023 по 17.05.2024 общая стоимость выполненных работ по Договору 01/101-23 составила 1818 619 (один миллион восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 45 коп., что подтверждается Справками КС-2 №1 от 21.08.2023 г. на сумму 525 979 руб. 34 коп., №2 от 23.08.2023 г. на сумму 375 689 руб. 03 коп., №3 от 20.11.2023 г. на сумму 916 951 руб. 08 коп.

Поскольку Ответчиком были осуществлены оплаты по Договору 01/101-23 на сумму 3 007 108 руб. 20 коп., задолженность Истца в пользу Ответчика по Договору №01/101-23 составляет 1 188 488 руб. 75 коп.

В соответствии с п. 8.1. Договора 01/98-23 и Договора 01/101-23, Подрядчик повторно передал 18.12.2023 по описи подписанный комплект документов представителю

Заказчика, представитель Заказчика принял документы 18.12.2023 и подписал опись передаваемых документов.

Помимо вышеуказанных Работ, выполненных Истцом по Договору 01/98-23 от 10 июля 2023 года и по Договору 01/101-23 от 16 августа 2023 года, Истец передал Ответчику необходимый для исполнения вышеуказанных Договор товар на общую сумму 177 696 руб. 08 коп. по УПД №100 от 20.10.2023 г. на сумму 49 253 руб., УПД №108 от 10.11.2023 г. на сумму 3 150 руб., УПД №109 от 17.11.2023 г. на сумму 9 333 руб. 08 коп., УПД №17 от 09.02.2024 г. на сумму 115 952 руб., из которых Ответчиком были оплачены только 49 253 (сорок девять тысяч двести пятьдесят три) руб. по УПД №100. Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом по передаточным актам составляет 128 443 (сто двадцать восемь тысяч четыреста сорок три) руб. 08 коп.

Таким образом, учитывая взаимозачёт встречных однородных требований между Истцом и Ответчиком по Договору 01/98-23 от 10 июля 2023 года и по Договору 01/101-23 от 16 августа 2023 года, задолженность Ответчика перед Истцом составляет 2 206 285 (два миллиона двести шесть тысяч двести восемьдесят пять) руб. 70 коп., что в совокупности с задолженность по универсальным передаточным документам в размере 128 443 (сто двадцать восемь тысяч четыреста сорок три) руб. 08 коп. составляет 2 334 728 (два миллиона триста тридцать четыре тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 78 коп.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Отказывая в удовлетворении требований, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 410, 421, 431, 506, 516, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ).

Согласно позиции, изложенной в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» - в целях применения статьи 410 ГК РФ предметы активного и пассивного требований должны быть однородны, то есть стороны после осуществления зачета должны оказаться в том же положении, как если бы оба обязательства были прекращены исполнением. Статья 410 ГК РФ допускает в том числе зачет активного и пассивного требований, которые возникли из разных оснований. Критерий однородности соблюдается при зачете требования по уплате основного долга (например, покупной цены по договору купли-продажи) на требование об уплате неустойки, процентов или о возмещении убытков (например, в связи с просрочкой выполнения работ по договору подряда).

Из изложенного следует, что требования должны существовать на момент предъявления.

Между ООО Группа компаний «Системы безопасности и связи» (ООО ГК «СБС») («Подрядчик» / «Истец») и ООО «Строй Монтаж Инжиниринг» («Заказчик» / «Ответчик») заключен Договор № 01/98-23 от 10.07.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации титула: «Строительство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) кабельной линии постоянного тока напряжением 20 кВ Центральная - РП-9 протяженностью 2,5 км» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада расположенного по адресу: 

<

...> ПС ЗЗОкВ Центральная, в соответствии с разделами проектной документации П132207-33.0005-027-ЭП1.3 - Силовая Сеть, П132207-33.0005-030-ЗП1 - Освещение (далее -Договор).

В соответствии с п. 8.1. Договора Подрядчик ежемесячно до 25 числа текущего месяца - направляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» (по унифицированной форме №КС-2) и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (по унифицированной форме №КС-3) с предъявлением подписанного Сторонами комплекта исполнительной документации на объемы работ, указанные в «Актах о приемке выполненных работ».

В соответствии с п. 2.1. Договора (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 16.08.2023г.) окончательная стоимость работ определяется на основании фактически выполненного объема работ и подписанных форм № КС-2, № КС-3, сформированных на основании расценок, приведенных в Расчете стоимости выполнения работ (Приложение № 1 к Договору).

Согласно п. 2.6.2 Договора Заказчик оплачивает фактическую стоимость выполненных и принятых работ в размере, определенном в соответствии с Приложением №1 к Договору и указанном в соответствующем «Акте о приемке выполненных работ», с пропорциональном удержанием ранее выплаченного аванса и гарантийной суммы в соответствии с п. 2.6.4 Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи Заказчику подписанного Сторонами комплекта исполнительной документации на выполненные работы, а также подписания Сторонами соответствующего «Акта о приемке выполненных работ. Сертификаты, паспорта, отказные письма, протоколы и т.п. документацию на оборудование и материалы, предоставляемые на давальческой основе, Заказчик подготавливает самостоятельно.

В соответствии с п. 2.6.4. Договора окончательный расчет по Договору в виде оплаты гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком, производится в следующей порядке:

- 10%, что составляет 667 006,20 руб. в том числе НДС 20% - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта рабочей комиссии по приемке результатов работ.

По Договору № 01/98-23 от 10.07.2023г. Подрядчиком выполнено работ на сумму 4 411 449,95 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ: КС-2 №1 от 29.09.2023 г. - 1 952 700,00 руб. КС-2 № 2 от 18.10.2023 г. - 521 928,00 руб. КС-2 №3 от 19.10.2023 г. - 748 212 руб. КС-2 №4 от 17.11.2023 г. - 992 940 руб. КС-2 №5 от 30.11.2023г. - 195 669,95 руб.

Между Истцом и Ответчиком заключен Договор на выполнение строительно-монтажных работ № 01/101-23 от 16.08.2023г. Подрядчиком по указанному Договору выполнено работ на сумму 1 818 619,45 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работКС-2 №1 от 21.08.2023 г. - 525 979,34 руб. КС-2 №2 от 23.08.2023 г. - 375 689,03 руб. КС-2 №3 от 20.11.2023 г. - 916 951,08 руб.

Ответчиком по Договору № 01/98-23 от 10.07.2023 произведена оплата на сумму 2 753 536 руб. 30 коп. и по Договору № 01/101-23 от 16.08.2023 - на сумму 3 007 108 руб. 20 коп., что не оспаривается Истцом.

Задолженность Истца в пользу Ответчика по Договору № 01/101-23 от 16.08.2023г. составляет 1 188 488 руб. 75 коп.

С учетом зачета встречных однородных требований, задолженность Ответчика по Договору № 01/98-23 от 10.07.2023г. составляет 469 424 руб. 90 коп., что является суммой гарантийного удержания по п. 2.6.4. Договора.

Истец, в обосновании требований, ссылается на выполнение этапа работ по Договору № 01/98-23 от 10.07.2023г. и передачу Ответчику Актов КС-2 №6 от 10.01.2024г. на сумму 1 609 330 руб. 80 коп. и КС-2 №7 от 17.01.2024г. на сумму 97 530 руб.

Однако, работы по актам КС-2 №6 от 10.01.2024г. и КС-2 №7 от 17.01.2024г. на сумму 1 706 860 руб. 80 коп. не предъявлялись Подрядчиком к сдаче Заказчику.

В соответствии с п. 11.1. Договора претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

-           письмом (в виде скан-копии) на электронный почтовый ящик (e-mail), указанный в разделе 16 Договора;

-           заказным письмом, направленным по адресу места нахождения Стороны;

-           передачей лично Стороне или уполномоченному представителю Стороны под роспись либо по передаточному акту.

Указанные акты, а также соответствующий комплект исполнительной документации, подписанный Сторонами, не направлялся Подрядчиком в адрес Заказчика как по средствам электронного почтового ящика info@smi-msk.ru, так и заказным письмом или передачей лично стороне под роспись по передаточному акту.

По смыслу п. 1 статьи 753 ГК РФ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ.

Истец в обоснование факта передачи актов КС-2 ссылается на опись передаваемых документов №01/18 от 18.12.2023г. При этом, согласно указанной описи КС-2 №6 от 10.01.2024г. и КС-2 №7 от 17.01.2024г. Истцом не передавались Ответчику.

О наличии задолженности по актам КС-2 №6 от 10.01.2024г. и КС-2 №7 от 17.01.2024г. Ответчику стало известно из претензии Истца от 03.04.2024г. исх. №01/03 (получена Ответчиком 17.04.2024г.).

На указанную претензию 19.04.2024г. Ответчик направил возражения исх. № 03/527-24 с уведомлением о вызове уполномоченного представителя Истца 23.04.2024г. на объект ПС ЗЗОкВ Центральная по адресу: 

<

...> в целях определения фактически выполненного объема работ по Договору № 01/98-23 от 10.07.2023г., комиссионного обследования и составления акта осмотра выполненных работ.

Уполномоченный представитель Истца присутствовал на объекте при осмотре выполненных работ, но от подписания акта осмотра от 23.04.2024 отказался, о чем в акте сделана соответствующая отметка.

При этом Актом от 23.04.2024 зафиксированы недостатки в объемах работ по актам КС-2 №1-5: отсутствие исполнительной документации, несоответствие отдельных работ рабочей документации. Пуско-наладочные работы не выполнены.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

В соответствии с п. 2.6.4. Договора окончательный расчет по Договору в виде оплаты гарантийной суммы, удерживаемой Заказчиком, что составляет 667 006,20 руб. в том числе НДС 20% - производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта рабочей комиссии по приемке результатов работ.

Указанный акт Сторонами не подписан, а недостатки в работах по актам КС-2 №1-5 по Договору № 01/98-23 от 10.07.2023 Истцом не устранены, соответственно задолженность Ответчика по Договору № 01/98-23 от 10.07.2023, являющееся гарантийным удержанием, в размере 469 424 руб. 90 коп. не подлежит оплате.

Истцом не предоставлены документы, которые бы свидетельствовали об извещении Ответчика о готовности Истца к сдаче результата выполненных работ по актам КС-2 №6-7, об оформлении двустороннего акта по результатам сдачи работ Подрядчиком и приемки их Заказчиком.

При этом представленные Истцом односторонние акты формы КС-2 №6-7 на сумму 1 706 860 руб. 80 коп. не являются надлежащими доказательствами по делу, учитывая нарушение Подрядчиком порядка сдачи результата работ.

Поскольку основанием для возникновения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ Заказчику, а доказательства, свидетельствующие о сдаче работ Заказчику на сумму 1 706 860 руб. 80 коп., Истцом не представлены, акт рабочей комиссии по приемке результатов работ Сторонами не подписан, требование Истца об оплате работ является необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Довод Истца о направлении УПД №17 от 09.02.2024 на сумму 115 952 руб. и о его частичной оплате Ответчиком в размере 49 253 руб. является необоснованным и не соответствует фактическим обстоятельствам.

Указанный УПД не направлялся Истцом в адрес Ответчика, сумма в размере 49 253 руб. была оплачена Ответчиком по счету Истца №124 от 20.10.2023.

Принимая во внимание изложенное, правовых оснований для удовлетворения требований судом не установлены.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании статей 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков