Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-19648/2019

30 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  17 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  30 октября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М.КИРОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (адрес:  Россия 194044, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул АКАДЕМИКА ЛЕБЕДЕВА 6/ЛИТЕРА Ж, ОГРН:  1037804002500);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАБАЛТСТРОЙ СК" (адрес:  Россия 196084, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ЗАСТАВСКАЯ 7/Б/1-Н, 3 ЭТАЖ; Россия 196128, Санкт-Петербург, ул Варшавская д 11 лит А оф 480, ОГРН:  1127847055247; 1127847055247);

о взыскании 249517.40

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 04.12.18,

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 23.07.19,

установил:

ФГБВОУВО "ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М.КИРОВА" МО РФ предъявило иск о взыскании с ООО "АЛЬФАБАЛТСТРОЙ СК" 249 517 руб. 40 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по контракту №722-ЭА/2017 от 08.08.17.

Ответчик представил контррасчет на сумму 177 289 руб. 17 коп.  по ставке рефинансирования ЦБ РФ, заявил ходатайство об уменьшении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

Определением от 19.04.19 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен контракт №722-ЭА/2017 от 08.08.17 на выполнение работ по текущему ремонту клиники термических поражений кислородной станции, в/городок №49 для нужд "ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М.КИРОВА".

Цена контракта составляет 1 126 216 руб. 08 коп. 

Срок выполнения работ – 45 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема – передачи объекта для выполнения работ. 

Помещения были переданы в работу по акту от 08.08.17, следовательно, срок окончания работ не позднее 21.09.17.

Фактически работы были выполнены 29.12.17. Просрочка исполнения обязательства составила 98 календарных дней.

В соответствии с п. п. 6.5, 6.6 контракта, ответчику начислена неустойка в размере 249 517 руб. 40 коп.

Суд считает, что подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Часть работ была выполнена ответчиком в установленный срок, просрочка не привела к неблагоприятным последствиям для заказчика.

Учитывая изложенное, суд полагает возможным, учитывая ходатайство ответчика на основании ст. 333 ГК РФ уменьшить подлежащую взысканию неустойку до 200 000 руб. 00 коп. 

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФАБАЛТСТРОЙ СК" в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М.КИРОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 руб. 00 коп. неустойки и 7 990 руб. 35 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.