АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

12 августа 2019 года

Дело №

А55-26053/2018

 

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матросовой И.А., после перерыва помощником судьи Леонтьевой Н.А.

рассмотрев в судебном заседании 31 июля 2019 – 06 августа 201906 августа 2019 года  дело по иску, заявлению

Муниципального бюджетного учреждения "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Приоритет Тольятти"

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Стройком"

о понуждении устранить недостатки

 

при участии в заседании

от истца – ФИО2, доверенность от 15.01.2019, ФИО3, доверенность от 11.10.2018 № 43;

от ответчика – ФИО4, доверенность от 06.12.2017, ФИО5, доверенность от 06.12.2017;

от третьего лица – ФИО6, доверенность от 11.02.2019.

установил:

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области (Истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Приоритет Тольятти" (Ответчик) о понуждении устранить выявленные нарушения, а именно:

1. Выполнить монтаж конструкций несвязного основания спортивной площадки, бортов хоккейной коробки, искусственного покрытия, стоек баскетбольных щитов.

2. Привести в соответствие с требованиями проекта и нормативно-технической документации: - толщину слоев песка и щебня; - фракционный состав щебня верхнего слоя; - качество уплотнения, планировку площадки по уклону, требования безопасности по неровности покрытия.

3.Устранить нарушения технологии монтажа покрытий из искусственной травы, а именно: -устранить непроклеенные участки, зазоры между полотнами, нахлёсты (прирезать полотна); -врезать полосы разметки;

4. Выполнить разметку игровой зоны баскетбола.

5. Выполнить заложенную проектом засыпку песка в полном объеме.

6. Выполнить бетонные конструкции фундаментов для монтажа бортов хоккейной коробки и стоек баскетбольных щитов.

7. Устранить нарушения в конструкциях хоккейных бортов, а именно в таких элементах как поручни и отбойная доска.

8. Установить откатные ролики на въездных воротах.

9. Выполнить надписи на бортах, заложенные проектом и сметной документацией.

В судебном заседании представитель истца требования искового заявления поддержал в полном объёме, а представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, полагая доводы истца необоснованными. Рассмотрев материалы искового заявления Муниципального бюджетного учреждения "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей сторон, суд полагает, что в удовлетворении исковых требований следует отказать в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом. Пунктом 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. В соответствии с пунктом 2 указанной статьи по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. В силу статьи 768 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной ГК РФ, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.10.2011 № 9382/11, в регулировании подрядных работ для государственных и муниципальных нужд приоритетное значение остается за нормами Кодекса: в части, не урегулированной статьями 763 - 767 ГК РФ, должны применяться в зависимости от вида подрядных работ положения параграфа 3 или 4 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а затем - общие положения о договоре подряда (параграф 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов. В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

Как следует из материалов дела, 31.10.2017 г. между обществом с ограниченной ответственностью «Приоритет Тольятти» (далее - Подрядчик) и муниципальным бюджетным учреждением «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (далее - Заказчик) был заключен муниципальный контракт № 18-МК18/УГ (далее – Контракт).

Согласно пункту 1.1. Контракта заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязанность выполнить работы по устройству универсальной спортивной площадки в с.п. Рождествено Волжского района Самарской области (далее – Объект).

В соответствии с пунктом 2.1. Контракта стоимость поручаемых подрядчику работ по контракту определяется на основании сметной документации, составленной ресурсным методом на основе государственных элементных сметных норм, и составляет 6 204 747,43 (шесть миллионов двести четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 43 копейки, в том числе НДС 18%, что составляет 946 486,90 (девятьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 90 копеек. Срок выполнения работ – с момента подписания Контракта до 25 декабря  2017 г. (пункт 4.1.1. Контракта).

По условиям Контракта приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных контрактом и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта.

На основании пункта 6.6. Контракта сдача результатов работ на соответствие их объема и качества требованиям Контракта и приложений к нему оформляется промежуточными актами приемки выполненных работ и окончательным актом приемки выполненных работ (форма КС-2), которые подписываются обеими сторонами.

По окончанию выполнения работ (этапов работ) заказчик с участием подрядчика осмотрел и принял выполненную в рамках исполнения Контракта работу, о чем свидетельствуют подписанные акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 от 20.11.2017 г., 28.11.2017 г. и 25.12.2017 г. Доказательств отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе на момент приемки работ, суду представлено не было. Оплата по муниципальному контракту Истцом произведена. Указанные обстоятельства также не оспариваются сторонами по существу.

Пунктом 3.3.1 Контракта установлена обязанность подрядчика выполнить все работы по контракту в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. В соответствии с пунктом 3.3.3 Контракта подрядчик обязуется обеспечить производство работ  в полном соответствии с проектно-сметной документацией (приложение №1 к Контракту), рабочими чертежами и строительными нормами и правилами, а также качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

В соответствии с п.7.1.4 Контракта при обнаружении некачественно выполненных работ представитель заказчика  фиксирует их на месте актом и выдает Подрядчику предписание по обеспечению надлежащего качества их выполнения. Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком некачественно выполненные, в том числе привлеченными силами, работы и дефекты самостоятельно, за свой счет, в сроки, указанные в предписаниях. В соответствии с п.7.1.3 наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

Как указал истец, 01.06.2018 Актом №489 заказчик в одностороннем порядке выявил следующие недостатки:

- перепад уровня бортов спортплощадки в горизонтальной оси достигает 250 мм,

- установленные борта имеют отклонения от прямолинейной проекции,

- основание спортивной площадки имеет перепад высот до 250 мм,

- металлоконструкции бортов площадки местами не закреплены распорными дюбелями,

- стыки искусственной травы не проклеены, не выполнено крепление травы около бортов,

- бетонная отмостка выполнена с отклонением от вертикальной и горизонтальной проекций бортов на 200 мм,

- уложенная искусственная трава имеет разный цвет,

- отсутствует вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10,

- установленные баскетбольные стойки смонтированы внутри площадки, что не соответствует требованиям эксплуатации универсальной спортивной площадки в зимний период.

Письмом за № 509 от 07.06.2018 истец направил ответчику претензию с требованием по устранению выявленных недостатков и установил срок до 10.06.2018г.

Письмом за исх. № 154/18 от 08.06.2018 г. Ответчиком был дан ответ по всем пунктам претензии об отсутствии недостатков, связанных с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязанностей в рамках Контракта.

Предложений от заказчика о проведении комиссионного осмотра Объекта подрядчику не поступало.

Письмом № 810 от 30.08.2018 г. Истец направил Ответчику вторую претензию с указанием новых недостатков, не упомянутых в первоначальной претензии за № 509 от 07.06.2018  и с требованием устранить выявленные недостатки в срок до 14.09.2018г., в том числе:

1) В ходе первоначального визуального обследования поверхности игрового поля выявлены значительные неровности;

2) В ходе измерения зазоров между 2-х метровой рейкой и поверхностью на девяти характерных участках установлено, что неровности на отдельных участках достигают значения 40 мм. Согласно п.4.1. ГОСТ 56199-2014 не допускается наличие неровностей более 10 мм;

3) Установлено, что качественная планировка, уплотнение щебеночного основания не производилась, требование проекта по уклону поверхности также не выполнено;

4) В результате измерения толщины слоев установлено, что толщина не соответствует требованиям проекта:

- в среднем существующая толщина щебня составляет не более 10 см – проектная 21 см;

- в среднем существующая толщина песка составляет не более 10 см – проектная 13 см;

5) При вскрытии участков установлено, что непосредственно под искусственным покрытием в верхней части основания применен щебень фракции 5-20 мм – проектная фракция 5-10 мм.

6) При освидетельствовании смонтированного искусственного покрытия зафиксированы следующие дефекты:

- Монтаж полотен выполнен некачественно, зафиксированы зазоры 3-5 мм., также нахлест до 30 мм. Зафиксированы непроклеенные участки;

- Полосы белой разметки должны врезаться в покрытие и склеиваться также стык в стык, в действительности они наклеены сверху на основное покрытие;

- Засыпка покрытия кварцевым песком местами не выполнена, по проекту расход составляет 25 кг/м?;

- Разметка на части площадки для игры в баскетбол не выполнена;

7) Фундаменты для крепления бортов выполнены не по проекту, вместо подушек 400х600х300 (h) мм залита сплошная монолитная лента толщиной от 3,5 до 15,5 см;

8) Крепление полимерной отбойной доски и поручня выполнено некачественно, по всему периметру зафиксировано коробление этих элементов;

9) По проекту крепление 3-х метровых баскетбольных стоек должно выполняться путем анкеровки в отдельные монолитные фундаменты с размерами 900х900х900 мм, в действительности:

- с одной стороны стойка крепится на монолитную ленту для крепления бортов;

- монтаж противоположной стойки выполнен на бетоне толщиной 15 см

В настоящее время конструкции баскетбольных стоек находятся в неработоспособном состоянии;

10) На въездных воротах отсутствуют откатные ролики;

11) Надписи на бортах, заложенные проектом и сметной документацией не выполнены.

В исковом заявлении МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области в обосновании своих требований также ссылается на выводы Заключения по результатам обследования технического состояния и оценки качества выполненных работ универсальной открытой спортивной площадки, расположенной по адресу: 

<

...> участок 3а, выполненного ООО «Лаборатория качества и технологии строительства» по заданию МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области в августе 2018 г. ведущим инженером ФИО7 и руководителем лаборатории к.т.н. ФИО8. В результате обследования технического состояния универсальной открытой спортивной площадки, были сделаны следующие выводы о некачественно выполненных работах. Выявленные ООО «Лаборатория качества и технологии строительства» недостатки продублированы истцом в претензии № 810 от 30.08.2018 г.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. Исковые требования мотивированы тем, что выполненные подрядчиком работы являются некачественными, что подтверждается односторонними актами истца и Заключением ООО «Лаборатория качества и технологии строительства». В силу положений пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика в том числе безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Возражая по доводам искового заявления, ответчик в своем отзыве указал, что при исполнении муниципального контракта им были выполнены все работы, предусмотренные Локальным ресурсным сметным расчетом № РС-1736 (приложение №1 к Контракту), в соответствии с требованиями строительных норм и правил; проект для выполнения работ подрядчику не передавался; все работы приняты и оплачены заказчиком; в исковом заявлении отсутствуют ссылки на строительные регламенты, результаты измерения, количественные показатели, способы установления некачественного выполнения работ; возможной причиной образования дефектов на спортивной площадке является неправильная эксплуатация объекта.

Суд предложил сторонам урегулировать спор мирным путем, в том числе путем проведения совместного комиссионного выезда на Объект для определения его состояния.

В материалы дела был представлен Акт от 30.10.2018 г., согласно которому стороны провели совместный комиссионный выезд на Объект для составления акта об обнаруженных дефектах и сроках их устранения. Комиссией было зафиксировано общее состояние спортивной площадки. Актом от 30.10.2018 г. были зафиксированы замечания заказчика, а также возражения подрядчика относительно выявленных дефектов. Также в акте сторонами зафиксировано, в том числе посредством фотографирования, что спортивная площадка под постоянным наблюдением не находится, въездные ворота открыты, по территории площадки свободно передвигается крупный рогатый скот (коровы), у въездных ворот имеются следы ходовой части автомобиля, указывающие на въезд транспортного средства внутрь площадки, по территории спортивной площадки разбросан мусор, футбольные ворота находятся в опрокинутом состоянии (сломана металлическая перекладина), имеются фрагменты прожженной искусственной травы, по всему периметру ограждения площадки нарисованы нецензурные надписи.

Установив, что для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, относящихся к предмету спора, требуются специальные знания, суд определением от 18.03.2019 удовлетворил заявленные сторонами ходатайства и назначил судебную строительно-техническую экспертизу, поручив ее проведение ООО "Межрегиональная лаборатория судебных экспертиз и исследований" (443077, 

<

...>), эксперту ФИО9, заключение которого № 426 от 06.06.2019 оглашено судом в судебном заседании 10.06.2019 согласно ч.3 ст.86 Арбитражного процессуального кодекса РФ, после чего в судебном заседании 06.08.2019г. экспертом ФИО9 даны пояснения по заключению и ответы на дополнительные вопросы истца и ответчика.

Суд считает, что представленное экспертное заключение № 426 от 06.06.2019, в силу положений статей 64, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является надлежащим доказательством по настоящему делу.

Согласно выводам эксперта ФИО9, работы по устройству универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: 

<

...> целом соответствую муниципальному контракту №18-МК18/УГ от 31.10.2017 и локальному ресурсному сметному расчету №РС -1736, кроме работ по выполнению надписи на бортах, которые предусмотрены сметным расчетом; выявленные повреждения универсальной спортивной площадки вызваны механическим воздействием в ходе эксплуатации данного объекта.

При таких обстоятельствах, требование искового заявления в части возложения на ответчика обязанности безвозмездно устранить выявленные им нарушения удовлетворению не подлежит. В отношении требования истца о выполнении надписи на бортах, которые предусмотрены сметным расчетом суд пришел к следующим выводам.

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином документе удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

На момент проведения осмотра экспертом ООО "Межрегиональная лаборатория судебных экспертиз и исследований " отсутствовали наклейки на бортах. Однако, согласно Акту о приемке выполненных работ №81 от 28.11.2017г., были приняты работы в виде оклейки стен поливинилхлоридной декоративно- отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам на сумму 4.189,68 руб. (номер по порядку 24) и Справкой №ФЗ-54 от 28.11.2017г. о стоимости выполненных работ и затрат. Работы по оклейке стен поливинилхлоридной декоративно- отделочной самоклеющейся пленкой не являются скрытыми, в связи с чем, на момент приемки работ, отсутствие наклеек на бортах не могло быть не обнаружено Заказчиком.

Учитывая положения приведенных норм права и пунктов контракта, регулирующих порядок осуществления приемки выполненных работ заказчиком, суд приходит к выводу о том, что в процессе выполнения и сдачи ответчиком работ, истец, добросовестно реализуя права участника гражданского оборота, был обязан проверить ход ведения работ, их качество, и, в случае выявления каких-либо недостатков, незамедлительно заявить о них подрядчику.

Вместе с тем, истцом, в процессе исполнения требований п.п. 6.8 - 6.10 муниципального контракта, не выявлено недостатков работ, о чём свидетельствуют факты приёмки выполненных работ и их оплата в полном объёме, а Акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 от 20.11.2017 г., 28.11.2017 г. и 25.12.2017 г. не содержат мотивированные указания на конкретные и обоснованные недостатки результатов выполненных работ.

Как предусмотрено положениями пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Согласно пункту 3 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Указанные истцом недостатки (отсутствие наклеек на бортах) являются явными недостатками и при обычном способе приемки работ должны были быть выявлены заказчиком, в связи с чем, в настоящее время истец не вправе ссылаться на них как на основание заявленных требований о понуждении устранить недостатки выполненных по контракту работ.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о скрытом характере недостатков, в том числе умышленно скрытых ответчиком, истцом не представлено. Истец не представил в дело надлежащих доказательств отсутствия у него возможности при приемке работ изучить объем выполненных ответчиком работ, их качество и выявить отступления от Технического задания, согласованного сторонами.

К представленному истцом Заключению по результатам обследования технического состояния и оценки качества выполненных работ универсальной открытой спортивной площадки, расположенной по адресу: 

<

...> участок 3а, выполненного ООО «Лаборатория качества и технологии строительства» суд относится критически, поскольку данное заключение является лишь частным мнением специалистов и не является заключением эксперта в смысле ст. 86 АПК РФ и п. 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 N 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», эксперты об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения не предупреждались.

Кроме того, Заключение ООО «Лаборатория качества и технологии строительства» имело целью определение качества выполненных работ, их соответствие требованиям проектной и нормативной документации (л.д.35). Качество работ оценивалось в соответствии с требованиями Проекта 09-12 «Универсальная спортивная площадка», разработанного ООО «КаскадСтрой» в 2012 году. Однако, в ходе судебного разбирательства суд установил и сторонами не оспаривалось, что Проект подрядчику не передавался, приложением к муниципальному контракту №18-МК18/УГ от 31.10.2017г. не являлся. Работы по муниципальному контракту проводились в соответствии с объемами, предусмотренными Локальным ресурсным сметным расчетом № РС-1736 (приложение №1 к Контракту). Экспертом ООО "Межрегиональная лаборатория судебных экспертиз и исследований" ФИО9 несоответствие объемов работ Локальному ресурсному сметному расчету № РС-1736 не обнаружено; зазоры, нахлесты полотен искусственной травы отсутствуют; перепады высот спортивной площадки находятся в допустимых значениях.

На основании вышеизложенного в удовлетворении требований МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области следует отказать полностью.

Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259, ч.3 ст.319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья

 

/

ФИО1