Именем Российской Федерации

                                                                 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Москва

Дело № А40-63637/20

116-482 

14 октября 2020 г.

Резолютивная часть решения  объявлена  29.09.2020г.

Полный  текст решения  изготовлен 14.10.2020г.

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П., 

при ведении протокола судебного заседания, секретарем   судебного заседания  ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ"  ( ОГРН  

<

***>)

к ООО "СТРОЙДИЗАЙН"  ( ОГРН  

<

***> ИНН  

<

***>) 

 о взыскании 418 486,66 руб и обязании совершить определенные действия.

при участии представителей 

от  истца (заявителя) – ФИО2 паспорт, доверенность  от 02.03.2020г., диплом

от ответчика (заинтересованного лица) –   не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения  требований ,  принятых судом в порядке ст. 49  АПК РФ ,  ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ" обратилось в арбитражный суд г. Москвы   с иском  к ответчику   об обязании        предоставить  отчетную документацию  согласно « технического задания « в соответствии с п.3.8  контракта № 72/2018 от 14.01.2019г.  ( фотофиксация, журнал производства   работ , паспорта  на  МАФ, схема  производства  работ)  по всем  выполненным  адресам , а также  произвести , в рамках  гарантийных обязательств  по Контракту , работы  по следующим адресам : 1.  Мкр. Северное  Чертаново , д. 7 , корп. «Б» : восстановить  горизонтальность  ступеней, произвести  замену  бортового камня; 2. Сумской  пр.,  д. 3 , корп. 2 –осуществить  перекладывание  брусчатого покрытия  на площади  около  20м2 ;  3. Сумской  пр., д. 5, корп. 2 –осуществить   перекладывание   брусчатого  покрытия  на площади  около 50м2, восстановить  бетонировку  бортового  камня; 4.  Сумской  пр., д. 31 корп.2 –восстановить  сопряжение  бортового камня с асфальтобетонным  покрытием , убрать  строительный мусор, устранить  проседание  бортового  камня около 5м.п.;  5.  ФИО3 , д. 14, корп. 1 :  осуществить частичную  замену  бортового камня, осуществить  ремонт  поврежденных участков  асфальтобетонного  покрытия, осуществить  ремонт поврежденных  участков  искусственного ( синтетического)  покрытия ,  бетонирование  опор  ограждения, восстановить  травяной  покров  на участках  общей площадью около 100м2;  6.  ФИО3 , д. 16, корп.1 –осуществить  ремонт поврежденных участков  асфальтобетонного  покрытия, осуществить  ремонт  поврежденных участков  асфальтобетонного  покрытия  с промазыванием  швов;  7.  Ул. Чератновская , д. 11, корп.1, д. 13 :  -осуществить  ремонт  поврежденных участков  асфальтобетонного  покрытия  на площади  до 2м2.  , взыскании    штрафа  за ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  контракту  № 72/2018  от 14.01.2019г.  в размере  403.926  рублей , штрафа  за ненадлежащее  исполнение  гарантийных  обязательств  в размере  14.560 рублей.  В судебном заседании    истец  требования  поддержал.

Ответчик   в судебное заседание не явился, извещен, отзыв не представлен. 

Исследовав материалы дела, выслушав  представителя  истца , оценив   представленные  доказательства   в совокупности , в порядке ст. 71  АПК РФ ,   суд приходит  к следующему. 

Из  материалов   дела  следует, что  между  Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное" и ООО «СТРОЙДИЗАЙН» заключен Договор на выполнение мероприятий по благоустройству района Чертаново Северное Южного административного округа № 72/2018 от 14.01.2019 года (далее - Контракт).

На основании п. 1.1 Контракта: «Подрядчик (ООО «Стройдизайн») обязуется по заданию Заказчика (ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное») выполнить работы по благоустройству района Чертаново Северное Южного административного округа (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

В виду п.3.1 Контракта: «Сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту) с момента заключения по "31 "декабря 2019г.».

Согласно п.4.1. Контракта: Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания завершения выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

Как следует из п.4.4 Контракта, в случае получения от Заказчика,надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса опредоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ илимотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, и срокомих устранения, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимыхдоработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих днейобязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношениивыполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащемперечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранитьполученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передатьЗаказчику приведенный в соответствие с предъявленнымитребованиями(замечаниями) комплект отчетной документации, отчет обустранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторноподписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в.2 (двух)экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.г

Как следует из пп. 5.4.1., 5.4.3. Контракта, Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания, и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течении гарантийного срока, за свой счет.

На основании п.6.6. Контракта, Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.

Работы по Контракту выполнены частично, акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 18 декабря 2019 года, без сдачи отчетной документации, с учетом авансирования фактически выполненных работ на сумму 8 078 529,73 руб., согласно платежных поручений № 5143 от 25.12.2019 г. и № 5144 от 25.12.2019 г.

Однако, в нарушение п.3.8. Технического задания, Ответчиком частично не предоставлена отчетная документация по всем адресам производства работ, а именно: фотофиксация, журнал производства работ, паспорта на МАФ, схема производства работ.

20.01.2020 г. в адрес Ответчика направлено уведомление № 1338 о предоставлении необходимой документации в срок, не позднее 25.01.2020 г. Ответ на уведомление в адрес Истца не поступал, документация в указанный срок не была предоставлена.

04.02.2020 г. в адрес Ответчика направлена претензия №1380 от 29.01.2020 г. с требованием предоставить Истца недостающий комплект документов. Указанная претензия получена Ответчиком 07.02.2020 г., однако данное требование не было исполнено, отчетная документация не предоставлена.

На основании п.7.3 Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 5 процентов Цены контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа), что составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет 403 926 (четыреста три девятьсот двадцать шесть) руб. 49 коп.

17.02.2020 г. в адрес Ответчика направлена повторная претензия от 17.02.2020 г. с указанием на неисполнение ранее направленного требования о предоставлении отчетной документации, а также требованием оплатить штраф за ненадлежащее исполнение контракта в размере 403 926 (четыреста три девятьсот двадцать шесть) руб. 49 коп. Претензия получена Ответчиком 21.02.2020 г., однако требования, содержащиеся в претензии до настоящего времени не исполнены.

Как следует из ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п.2 ст.721 ГК РФ, если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

В силу п.3.1 Контракта, сроки выполнения работ по Контракту установленыв соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частьюнастоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту) с моментазаключения по 31 декабря 2019г.».s

Согласно п.6.1. Контракта, Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Как следует из п. 6.2. Контракта, гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Согласно ст.6.3. Контракта, при обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

Работы по Контракту выполнены частично, акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 18 декабря 2019 года.

17.01.2020 г. Истцом, в рамках проведения контроля за ходом выполнения работ по Контракту, в ходе ежедневного смотра вверенных территорий, а также объектов благоустройства 2019 года, выявлено нарушение целостности, проседание относительно общего уровня устроенного покрытия дорожно-тропиночной сети из брусчатки по адресу: Сумской пр. д. 3, корп.2 (5-2), о чем составлен Акт комиссионного обследования.

20.01.2020 г. в адрес Ответчика направлено уведомление № 1338 о необходимости устранения выявленных замечаний в кратчайшие сроки. Ответ на уведомление в адрес Истца не поступал, работы в рамках гарантийных обязательств не были выполнены.

04.02.2020 г. в адрес Ответчика направлена претензия №1379 от 29.01.2020 г. с требованием в семидневный срок устранить нарушение целостности, проседание относительно общего уровня устроенного покрытия дорожно-тропиночной сети из брусчатки по адресу: Сумской пр. д. 3, корп.2 (5-2). Указанная претензия получена Ответчиком 07.02.2020 г. Согласно Акта комиссионного обследования от 17.02.2020 г. выявленные замечания не устранены, требования претензии не исполнены.

В связи с неисполнением Ответчиком в установленные сроки гарантийных обязательств, Истец   просит взыскать с Ответчика штраф, предусмотренный п. 7.3. Контракта в размере 14 560 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 17 коп.

В обеспечение исполнения Контракта Ответчик представил безотзывную банковскую гарантию №1242257 от 26.12.2018г. выданную ПАО «Совкомбанк» на сумму 2 400 000 руб. 00 коп. Срок действия гарантии до 31.12.2021 года.

В целях реализации права по взысканию штрафных санкций за ненадлежащее исполнение Ответчиком обязательств за счет обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, Истец обратился в ПАО «Совкомбанк» с требованием о возмещении Банком денежных средств, в счет уплаты Ответчиком штрафных санкций по Контракту в сумме 403 926 руб. 49 коп., а также в сумме 14 560 рублей 17 коп.

По результатам рассмотрения предъявленных требований ПАО «Совкомбанк» в адрес Истца направленно уведомление от 12.03.2020г. об отказе в платеже по предъявленным требованиям.

Таким образом, Истец предпринял все меры, возможные в порядке досудебного урегулирования спора, однако по настоящее время Ответчик штрафы не оплатил, работы не произвел, документы не предоставил.

 С учетом  изложенного ,  в отсутствие   возражений  от ответчика  , суд считает требования  истца подлежащими удовлетворению.

В соответствии  со ст. 101  АПК РФ  судебные расходы  состоят из государственной  пошлины  и судебных  издержек, связанных с рассмотрением  дела  арбитражным судом .

В соответствии   со ст. 110  АПК РФ  судебные  расходы , понесенные    лицом, участвующим в деле, в пользу  которого  принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.

На  основании  изложенного, руководствуясь    ст. ст. 65,71 , 156, 110,167-170,171,  176,  АПК РФ  арбитражный суд

 

РЕШИЛ:

Обязать   ООО « СТРОЙДИЗАЙН» ( ОГРН  

<

***> ИНН  

<

***>)  в пользу ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ"  ( ОГРН  

<

***>)   предоставить  отчетную документацию  согласно « технического задания « в соответствии с п.3.8  контракта № 72/2018 от 14.01.2019г.  ( фотофиксация, журнал производства   работ , паспорта  на  МАФ, схема  производства  работ)  по всем  выполненным  адресам , а также  произвести , в рамках  гарантийных обязательств  по Контракту , работы  по следующим адресам : 1.  Мкр. Северное  Чертаново , д. 7 , корп. «Б» : восстановить  горизонтальность  ступеней, произвести  замену  бортового камня; 2. Сумской  пр.,  д. 3 , корп. 2 –осуществить  перекладывание  брусчатого покрытия  на площади  около  20м2 ;  3. Сумской  пр., д. 5, корп. 2 –осуществить   перекладывание   брусчатого  покрытия  на площади  около 50м2, восстановить  бетонировку  бортового  камня; 4.  Сумской  пр., д. 31 корп.2 –восстановить  сопряжение  бортового камня с асфальтобетонным  покрытием , убрать  строительный мусор, устранить  проседание  бортового  камня около 5м.п.;  5.  ФИО3 , д. 14, корп. 1 :  осуществить частичную  замену  бортового камня, осуществить  ремонт  поврежденных участков  асфальтобетонного  покрытия, осуществить  ремонт поврежденных  участков  искусственного ( синтетического)  покрытия ,  бетонирование  опор  ограждения, восстановить  травяной  покров  на участках  общей площадью около 100м2;  6.  ФИО3 , д. 16, корп.1 –осуществить  ремонт поврежденных участков  асфальтобетонного  покрытия, осуществить  ремонт  поврежденных участков  асфальтобетонного  покрытия  с промазыванием  швов;  7.  Ул. Чератновская , д. 11, корп.1, д. 13 :  -осуществить  ремонт  поврежденных участков  асфальтобетонного  покрытия  на площади  до 2м2.

Взыскать с ООО "СТРОЙДИЗАЙН"  ( ОГРН  

<

***> ИНН  

<

***>) в пользу  ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ"  ( ОГРН  

<

***>)  штраф  за ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  контракту  № 72/2018  от 14.01.2019г.  в размере  403.926  рублей , штраф  за ненадлежащее  исполнение  гарантийных  обязательств  в размере  14.560 рублей , расходы  по госпошлине  17.370 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок  в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                                                                     А.П. Стародуб