478/2023-358042(2) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 № 09АП-82801/2023

Дело № А40-99524/23

г. Москва

21 декабря 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 21 декабря 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Тетюка В.И., судей Семёновой А.Б., Кузнецовой Е.Е., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" на  решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.10.2023 по делу № А40-99524/23  

по иску ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"  

к ООО "СИРИУС" о взыскании 1 118 448 руб. 89 коп. 

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 14.03.2023 от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.06.2023 

УСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА  МОСКВЫ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" о взыскании неустойки в  размере 1 118 448 руб. 89 коп.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2023 с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" в  пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"  штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) руб.  

В остальной части иска отказано. 

Не согласившись с вышеуказанным решением, ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ  ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" обратилось с апелляционной  жалобой, в которой считает его незаконным и необоснованным, принятым с  нарушением норм процессуального права, просит отменить решение суда в части  отказа во взыскании неустойки и принять новый судебный акт об удовлетворении  исковых требований в полном объеме.  

В своей жалобе заявитель указывает, что работы в установленный контрактом  срок не выполнены, судом первой инстанции неправомерно применены положения ст.  333 ГК РФ и снижен размер неустойки, подлежащей взысканию.  

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы  поддержал в полном объеме, возражений относительно проверки законности и  обоснованности решения в части не заявил.  

Ответчик с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и  обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без  удовлетворения, возражений относительно проверки законности и обоснованности  решения в части не заявил.  

В соответствии с ч. 5 ст.268 АПК РФ в случае обжалования только части  судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и  обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие  в деле, не заявляют возражений.  

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей  сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная  коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.  

Как следует из материалов дела, 25.05.2020 г. между Государственным  бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Дирекция развития  объектов здравоохранения города Москвы» (переименовано в ГБУ «Дирекция развития  объектов здравоохранения города Москвы», заказчик) и Обществом с ограниченной  ответственностью «Сириус» (подрядчик) заключен гражданско-правовой договор  бюджетного учреждения № 152/20 (ПСД) на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры  города Москвы (лот 10).  

Согласно п. 1.1 контракта, подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить  комплекс проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов  социальной инфраструктуры города Москвы (лот 10) в объеме, установленном в  техническом задании (приложение № 1 к контракту, являющееся его неотъемлемой  частью), а заказчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить его в  порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.  

Согласно п. 2.1 цена контракта составляет 22 368 977 руб. 71 коп. 

В соответствии с п. 3.1 контракта сроки выполнения работ по контракту  установлены в соответствии с техническим заданием и составляют 300 календарных  дней с момента заключения контракта. Таким образом, подрядчик обязался выполнить  работы в срок до 21.03.2021 г.  

Контракт вступал в силу со дня его подписания сторонами и действовал по  31.12.2021 включительно, истечение срока действия контракта влечет прекращение  обязательств по контракту (за исключением гарантийных обязательств,  предусмотренных п. 6.3 контракта, и обязательств заказчика по оплате работ,  выполненных в течение срока действия контракта) (п. 12.1 и 12.2 контракта).  

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.4.1 контракта подрядчик обязался  своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с  

требованиями технического задания и представить заказчику отчетную документацию  по итогам исполнения контракта.  

Из материалов дела следует, что работы в срок действия контракта выполнены. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)  обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то:  передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право  требовать от должника исполнения его обязанности.  

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона  и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Пунктом 7.1 контракта установлено, что за неисполнение или ненадлежащее  исполнение своих обязательств, установленных контрактом, заказчик и подрядчик  несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от  30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,  начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в  постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и  признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от  25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.  

Пунктом 7.4 контракта установлено, что за каждый факт неисполнения или  ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного  обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в  следующем порядке: 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта  (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).  

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком,  сумма штрафа за просрочку выполнения работ по контракту составила 1 118 448 руб.  89 коп.  

Как следует из представленного отзыва ответчика, ответчик считает размер  суммы штрафа несоразмерным последствиям нарушения условий договора, ссылается  на положения ст. 333 ГК РФ, просит суд снизить сумму штрафа. Суд первой инстанции  правомерно применил ст. 333 ГК РФ и снизил сумму штрафа до 100 000 руб., исходя из  следующего.  

Согласно позиции судов вышестоящих инстанций следует, что соразмерность  суммы неустойки последствиям нарушения обязательства подразумевает выплату  кредитору компенсации за потери, которая будет адекватна нарушенному интересу и  соизмерима с ним.  

Предоставленная суду возможность уменьшить неустойку в случае ее  несоразмерности последствиям нарушения обязательств является одним из правовых  способов защиты от злоупотребления правом свободного определения размера  неустойки, то есть, по существу, способом реализации требования ч. 3 ст. 17  Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод человека и  гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.  

Согласно ч. 1 ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить подлежащую взысканию  неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. По  

существу эта норма предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к  нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба,  причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  изложенной в Определении № 263-О от 21.12.2000 г., суд обязан установить баланс  между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного  (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного  правонарушения.  

В свою очередь, превращение института неустойки в способ обогащения  кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.  

С учетом изложенного, принимая во внимание доводы ответчика, суд первой  инстанции уменьшил размер неустойки за выявленные нарушения, поскольку выплата  кредитору неустойки в указанном размере адекватна его нарушенному интересу.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.  Решение суда в части удовлетворения исковых требований не обжалуется.  

Довод заявителя о том, судом первой инстанции неправомерно снижен размер  неустойки, отклоняется апелляционной коллегией как необоснованный.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении  Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 № 1363-О, учитывается, что норма п. 1 ст.  333 ГК РФ предписывает суду установить баланс между применяемой к нарушителю  мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в  результате конкретного правонарушения.  

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения  обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать  оценку данному критерию, исходя из обстоятельств дела, в соответствии с  положениями ст. 71 АПК РФ.  

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного  Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств», необоснованность выгоды может выражаться в том, что размер убытков  кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки.  

Применительно к настоящему спору суд первой инстанции правомерно снизил  размер неустойки, подлежащей взысканию с учетом обстоятельств дела.  

С учетом изложенного, арбитражный суд первой инстанции правильно  определил спорные правоотношения и предмет доказывания по делу, с достаточной  полнотой выяснил имеющие значение для дела обстоятельства. Выводы суда об этих  обстоятельствах основаны на доказательствах, указание на которые содержится в  обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями  статей 67, 68, 71 АПК РФ.  

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела,  установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и  объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и  возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим  обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, и вопреки  доводам жалобы, основаны на правильном применении судом норм материального и  процессуального права, отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого  по делу решения.  

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2023 по делу № А4099524/23 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без  удовлетворения.  

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья В.И. Тетюк 

Судьи Е.Е. Кузнецова  

 А.Б. Семёнова  

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.