Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-99656/2022

10 мая 2023 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи  Хорошева Н.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго" (197227, Санкт-Петербург, Гаккелевская ул., д. 21, литера А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2002, ИНН: 

<

***>)

к государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской области "Музейное агентство" (188356, Ленинградская область, Гатчинский район, Рождествено село, Музейная улица, дом 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.03.2003, ИНН: 

<

***>)

о взыскании, расторжении договора ТП 

при участии 

от истца: ФИО1, по доверенности от 19.12.2022  № 314-22

от ответчика: отсутствует, извещен 

у с т а н о в и л:

публичное акционерное общество "Россети Лленэнерго" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской области "Музейное агентство" с требованиями:

о расторжении договора от 10.07.2018 № ОД-ГтЭС-16140- 18/24402-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 

о взыскании 33 528,91 руб. – неустойки, за период просрочки с 01.01.2020 по 01.01.2021. 

Определением от 10.10.2022 иск принят к производству, назначены предварительное и основное судебные заседания. 

На основании статьи 137 АПК РФ суд завершил подготовку дела к судебному разбирательству, открыл основное судебное заседание (ст. 137 АПК РФ). 

Судом удовлетворено ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства ввиду невозможности явки представителя, в связи с чем, дело отложено определением от 01.12.2022.

В судебное заседание 07.02.2023 представитель ответчика не явился, извещен                   (ст. ст. 123, 156 АПК РФ).

Истец поддержал требования в полном объеме. Отзыв не представлен

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв для уточнений иска. После перерыва рассмотрение дела продолжено с участием представителя истца, которым представлен информационный расчет неустойки на сумму 8 726, 70 руб., за период просрочки с 01.01.2020 по 05.04.2020. 

(применен мораторий по пандемии, установленный Постановлениями Правительства РФ от 03.04.2020 № 428, от 01.10.2020 № 1587).

 

При рассмотрении дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства:

Между сторонами подписан договор от 10.07.2018 № ОД-ГтЭС-16140- 18/24402-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.07.2018, по условиям которого истец обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) – музей-усадьба «Рождествено», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено, уловный номер; 47-47-17/028/2011-228, а ответчик – оплатить расходы за технологическое присоединение, выполнить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями.

В соответствии с положениями технических условий к Договору технологическое присоединение энергопринимающих устройств Ответчика осуществляется на уровне напряжения – 0,4 кВ, по третьей категории надежности, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 100 кВт.

Положениями пункта 8 Договора установлена обязанность Ответчика надлежащим образом исполнять обязательства по внесению платы за технологическое присоединение. 

В соответствии с положениями пункта 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определен сторонами в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 № 648-п и составляет 36 744 (тридцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля 02 копейки, в том числе НДС 18 % - 5 605 рублей 02 копейки. 

Пунктом 11 Договора установлено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Ответчиком в соответствии с графиком внесения платежей. 

Обязанность по оплате первого платежа Ответчиком исполнена не в срок.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего Договора и определен датой 10.01.2019. 

Согласно Дополнительному соглашению к Договору от 20.12.2018, данный срок был продлен до 31.12.2019 года. 

В установленные сроки мероприятия по технологическому присоединению со стороны Ответчика исполнены не были. 

12.07.2019 истец направил в адрес ответчика уведомление № ГтЭС/032/3068 о выполнении со своей стороны мероприятий по Договору.

Мероприятия по технологическому присоединению со стороны ответчика по настоящий момент не исполнены, ответчик фактически уклоняется от завершения процедуры технологического присоединения, предусмотренной положениями Договора, а также Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП). 

В адрес истца не поступало уведомления о выполнении мероприятий со стороны ответчика, у истца отсутствует информация, что ответчиком созданы энергопринимающие устройства, предусмотренные пунктом 2 Договора. 

С целью досудебного урегулирования спора истец обратился в адрес ответчика с претензией от 12.05.2022 № ГтЭС/032/2438, в которой содержалось требование уплатить неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, а также уведомление о готовности обратиться в суд с иском о расторжении Договора. Ответ на указанную претензию в адрес истца не поступал.

Исследовав материалы дела, оценив доводы истца, арбитражный суд пришел к следующим выводам:

Правоотношения сторон вытекают из договора от 10.07.2018 № ОД-ГтЭС-16140- 18/24402-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, последний не поименован в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), однако, может быть квалифицирован в качестве договора подрядного типа ввиду выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя и как договора об оказании услуг ввиду оказания нематериальных услуг по запланированным мероприятиям (гл. 37, 39 ГК РФ).

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем, если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями (пп. «а» п. 16 (6) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" – далее Правила ТП № 861).

Подпунктом «в» пункта 16 Правил ТП и пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки, не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

В связи с не направлением в адрес сетевой организации уведомления о готовности, невыполнением мероприятий со стороны Ответчика в срок до 31.12.2019 у Истца возникло право требовать взыскания неустойки за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 в размере 33 528 рублей 91 копейка согласно представленному ниже расчету: 36 744,02 (общий размер платы за ТП) * 0,0025 (ставка неустойки) * 365 (количество дней просрочки) = 33 528,91 руб.

По информационному расчету неустойка составляет 8 726, 70 руб., за период просрочки с 01.01.2020 по 05.04.2020, при учете моратория по пандемии, установленного Постановлениями Правительства РФ от 03.04.2020 № 428, от 01.10.2020 № 1587. Суд принимает во внимание информационный расчет истца.

В соответствии с положениями пункта 16(5) Правил ТП, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

Данной норме корреспондируют положения абзаца 2 пункта 16 Договора, предусматривающие возможность судебного расторжения заключенного Договора. 

Возможность судебного расторжения Договора ставится в зависимость от наступления двух условий: выполнение Истцом мероприятий по технологическому присоединению, которые не являются встречными к обязательствам Ответчика, нарушение Ответчиком срока осуществления мероприятий на 12 и более месяцев. 

Мероприятия по технологическому присоединению со стороны истца исполнены 12.07.2019. Дополнительным соглашением к Договору срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению продлен, однако, выполнения обязанностей со стороны ответчика не последовало. На момент подготовки настоящего иска – 22.08.2022 период просрочки превышает 12 месяцев. 

Исковые требования о взыскании подлежат частичному удовлетворению судом,             в связи с чем, государственная пошлина распределяется пропорционально удовлетворению имущественных требований (ст. 110 АПК РФ). За расторжение договора оплачивает госпошлину ответчик в доход федерального бюджета в сумме 6 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  

 

решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Расторгнуть договор от 10.07.2018 № ОД-ГтЭС-16140- 18/24402-Э-18 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ныне – публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго") и государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской области «Музейное агентство».

 В остальной части в удовлетворении иска отказать.

 

  Взыскать с государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» 8 726, 70 руб. неустойки, за период просрочки с 01.01.2020 по 05.04.2020; а также 521 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины;

  в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины. 

 

 Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                         Хорошева Н.В.