Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-12528/2019

г. Петрозаводск

12 февраля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена   12 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен   12 февраля 2020 года.

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Погорелов В.А.,   

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску  общества с ограниченной ответственностью «Альянс Электро»

к казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия»

об обязании заключить дополнительное соглашение к контракту №339/2017 от 20.12.2017 года 

при участии представителей:

истца, общества с ограниченной ответственностью «Альянс Электро», -  Никифоровой  Л.А., доверенность от 12.12.2019 года

ответчика, казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», -  руководителя Школина Д.Б., Карнаух А.А., доверенность от 04.07.2019 года

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Альянс Электро» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к   казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» (далее – ответчик) об обязании заключить дополнительное соглашение к контракту №339/2017 от 20.12.2017 года. 

Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 405, 445, 446, 718 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержала заявленные требования по мотивам, изложенным в исковом заявлении.          Представители ответчика в предварительном судебном заседании исковые требования признали в полном объёме.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между истцом (Подрядчик) и ответчиком (Заказчик) был заключён Государственный  контракт на выполнение работ по строительству объекта «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа  Республики Карелия» №339/2017 от 20.12.2017 года. 

Истец обратился в суд с иском об обязании ответчика заключить дополнительное соглашение к контракту №339/2017 от 20.12.2017 года.

Представители ответчика заявленные исковые требования признали в полном объёме. 

Согласно части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание иска является правом ответчика. Поскольку оно не противоречит закону, и не нарушает права других лиц, суд принимает признание иска. 

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

         При таких обстоятельствах заявленные требования подлежат удовлетворению.         Судебные расходы суд относит на ответчика в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Обязать казённое учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) подписать Дополнительное соглашение № 11 к Государственному контракту № 339/2017 от 20.11.2017 года на выполнение работ по строительству  объекта «Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа  Республики Карелия» об изменении срока окончания выполнения работ, предусмотренного пунктом 9.1 Государственного контракта № 339/2017 от 20.12.2017 года и Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) с 15.12.2019 года на 01.11.2020 года.

3. Взыскать с казённого учреждения Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Альянс Электро" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6000 рублей в возмещение расходов по госпошлине.

4. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Погорелов В.А.