219/2023-180616(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6  

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru 

http://astrahan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А06-1446/2023

г. Астрахань

22 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2023 года. 

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи: Богатыренко С.В.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью   "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" к Обществу с ограниченной ответственностью "Эфор" о  взыскании неустойки в размере 2 940 470 руб. 06 коп.  

при участии: 

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 17.10.2022 г.  от ответчика: не явился.  

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о взыскании неустойки в  размере 2 940 470 руб. 06 коп.  

В судебное заседание представитель ответчика не явился, о дате заседания  извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ.  

Судебное заседание в порядке ст. 156 АПК РФ проводится в отсутствие  представителя ответчика.  

Представитель истца в порядке ст.49 АПК РФ заявил ходатайство об уменьшении  исковых требований до 2 920 310 руб. 07 коп. Пояснил. что из суммы предъявленных  имущественных санкций исключил штраф в размере 20 160 руб.  

Судом принято уменьшение исковых требований. 

 Представитель истца поддерживает исковые требования в полном объеме. Просит  иск удовлетворить.  

Исследовав доказательства, содержащиеся в материалах дела, выслушав лиц,  участвующих в деле, суд  

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (далее -  Покупатель) и ООО «Эфор» (далее - Поставщик) заключен договор от 16.08.2018 № 18V0545  на поставку товара и оказание услуг по шеф-монтажу и шеф-пусконаладке.  

В соответствии с п. 1.1. Договора Поставщик взял на себя обязательство поставить  новый, не бывший в употреблении товар, изготовленный не ранее 2018г., для реализации  проекта «Обустройство м/р им. В.И. Грайфера (первая стадия освоения), ЛСП, ПЖМ» (далее  - Объект) в номенклатуре, в количестве и в сроки, определенные в Спецификации № 1  (Приложение № 1 к Договору), Технических требованиях на закупку товара и Общих  

технических требованиях (далее ТТ, Приложение № 2 к Договору) и  Детализированной технической спецификации (Приложение № 6 к Договору), являющихся  неотъемлемой частью Договора, а Покупатель принять и оплатить его.  

Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром все принадлежности и  документы на русском языке и, в случае изготовления не на территории Российской  Федерации, на английском языке, относящиеся к товару (сертификаты, технические  паспорта, инструкции, иные документы, оформление которых является обязательным для  данной категории товара в соответствии с требованиями действующего законодательства  Российской Федерации), а также счета-фактуры, счета и накладные.  

Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов,  обязательных для исполнения на территории Таможенного союза. Поставщик оформляет и  передает покупателю документы в соответствии с требованиями данных Технических  регламентов Таможенного союза (декларации).  

В соответствии с п. 2.1 Договора качество поставляемого товара должно  соответствовать условиям Договора, проектной документации и Техническим требованиям  на закупку товара и Общим техническим требованиям (Приложение № 2 к Договору), а также  соответствующим стандартам (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТП), установленным действующим  законодательством РФ для данной категории товаров.  

Согласно пункту 2.9 договора на весь поставляемый Поставщиком товар проводится  процедура входного контроля. Для возможности организации данной процедуры по  поставляемому товару Поставщик заблаговременно информирует Покупателя о дате  поступления товара в место доставки (пункт 6.2. Договора), а также дополнительно сообщает  информацию, необходимую для осуществления погрузо-разгрузочных работ.  

Представители Поставщика участвуют в процедуре входного контроля, по результатам  которого Покупателем оформляется акт входного контроля по количеству, качеству и  соответствию Техническим требованиям на закупку и Общим техническим требованиям/  Технической спецификации на поступивший товар, акт о приеме-передаче технической,  сертифицирующей, эксплуатационной и товаросопроводительной документации,  предусмотренные соответствующими формами документов в Приложении № 5 к настоящему  Договору (Формы документов).  

Акт входного контроля и акт о приеме-передаче технической, сертифицирующей,  эксплуатационной и товаросопроводительной документации оформляются в следующие  сроки:  

- акт входного контроля: срок оформления данного акта - 5 (пять) рабочих дней с  момента проведения процедуры входного контроля; после оформления оригинал акта  остается у Покупателя, заинтересованным Сторонам Покупателем предоставляются копии  данного документа.  

-акт о приеме-передаче технической, сертифицирующей, эксплуатационной и  товаросопроводительной документации: срок оформления акта - 10 (десять) рабочих дней с  момента проведения процедуры входного контроля. Акт составляется в двух экземплярах:  один экземпляр Покупателя и один экземпляр Поставщика.  

В соответствии с пунктом 2.10 договора при обнаружении несоответствия качеству,  комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара  или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или каких-либо данных в  сопроводительном документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке)  Покупателем составляется Акт с указанием несоответствий. Товар, при приемке которого  обнаружены такие несоответствия, может быть принят Покупателем на ответственное  хранение. При этом право собственности на такой товар не переходит от Поставщика к  Покупателю.  

Пунктом 5.1 Договора установлено, что цена Договора составляет 110 920 000 руб. (с  НДС), с учетом шеф-монтажных и шеф-пусконаладочных услуг и обучение персонала  Покупателя и поставки ЗИП согласно п. 2.12 Договора.  

Согласно Спецификации № 1 к Договору, действовавшей на дату поставки и приемки,  стоимость Оборудования системы газового пожаротушения ЛСП составила 57 556 440,00  

руб. с НДС, стоимость Оборудования системы газового пожаротушения ПЖМ  составила 43 755 612,00 руб. с НДС, общая стоимость ЗИП (запасные части, инструменты,  принадлежности, материалы и приспособления) на период 2-х лет эксплуатации  оборудования ЛСП и ПЖМ составила 10 887 948,00 руб. с НДС.  

 В соответствии с пунктом 5.3 договора оплата за товар производится на 45 (сорок  пятый) календарный день после подписания Покупателем без замечаний товарной накладной  ТОРГ-12 и Акта входного контроля, при условии устранения всех замечаний, выявленных  при входном контроле оборудования/материалов и ЗИП для 2-х лет эксплуатации и  получения Покупателем оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с  действующим законодательством РФ, на основании представленного счета на оплату.  

Оплата за ЗИП на период двух лет эксплуатации производится на 45 (сорок пятый)  календарный день после подписания Покупателем без замечаний товарной накладной ТОРГ12 при условии получения Покупателем оригинала счета-фактуры, оформленного в  соответствии с действующим законодательством РФ, на основании представленного счета на  оплату.  

Оплата за оказание услуг по шефмонтажу, шеф-пусконаладке и оплата за обучение  персонала Покупателя производится на 45 (сорок пятый) календарный день после  подписания Покупателем без замечаний Акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме  Приложения № 5 к настоящему Договору), при наличии оригиналов счетов-фактур,  оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ на основании  представленного счета на оплату.  

 Пунктом 5.4 договора предусмотрено, что поставщик предоставляет Покупателю  оригиналы счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12 и счета на оплату, оформленные в  соответствии с законодательством РФ:  

- за поставленный товар - в течение 5-ти календарных дней с момента поставки, но не  позднее последнего числа месяца поставки товара;  

- за поставленный ЗИП на период двух лет эксплуатации - в течение 5-ти календарных  дней с момента поставки, по не позднее последнего числа месяца поставки ЗИП на период  двух лет эксплуатации.  

За оказанные по п. 1.3 настоящего Договора услуги Поставщик в течение 5 календарных  дней предоставляет Покупателю оригиналы Акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета на  оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством РФ, но не  позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг.  

В соответствии с пунктом 6.3 Договора срок поставки указывается в Спецификации №  1, являющейся неотъемлемой частью Договора.  

В Приложении № 1 к протоколу урегулирования разногласий от 09 марта 2021 года к  протоколу разногласий к дополнительному соглашению от 17.12.2020 № 18V0545003  стороны согласовали срок поставки оборудования и ЗИП - 31 января 2020 года.  

Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения  переходит к Покупателю в момент подписания Сторонами без замечаний товарной  накладной по форме ТОРГ-12, Акта входного контроля и передачи товара Покупателю на  КТПБ (пункты 6.2, 6.4. Договора).  

В нарушение договорных условий Поставщик допустил просрочку поставки товара: 

- оборудование системы газового пожаротушения ЛСП (позиция 1 Спецификации   № 1) на сумму 57 556 440,00 руб. с НДС поставлен и принят Покупателем 28.02.2020 с  учетом устранения замечаний, отраженных в Акте входного контроля от 06.02.2020 № 757- ЛНВН-18У0555-18У0545-54-АВК, дополнении к Акту входного контроля от 28.02.2020   № 757-ЛНВН-18У0555-18У0545-54-АВК-Д2, дополнении к Акту входного контроля от  20.02.2020 № 757-ЛНВН-18У0555-18У0545-54-АВК-Д1, что подтверждается отметкой на  товарной накладной от 22.01.2020 ТОРГ-12 № 1  

- оборудование системы газового пожаротушения ПЖМ (позиция 6 Спецификации   № 1) на сумму 43 755 612,00 руб. с НДС поставлен и принят Покупателем 28.02.2020 с  учетом устранения замечаний, отраженных в Акте входного контроля от 06.02.2020 № 757- 

ЛНВН-18У0505-152-АВК, дополнении к Акту входного контроля от 20.02.2020 № 757- ЛНВН-18У0505-152-АВК-Д1, дополнении к Акту входного контроля от 28.02.2020 № 757- ЛНВН-18У0505-152-АВК-Д2, что подтверждается отметкой на товарной накладной от  22.01.2020 ТОРГ-12 № 2  

- ЗИП на период 2-х лет эксплуатации оборудования (позиции 2 и 7 Спецификации   № 1) на общую сумму 10 887 948,00 руб. с НДС поставлен и принят Покупателем 08.07.2020  с учетом устранения замечаний, отраженных в Акте входного контроля от 14.02.2020 № 757- ЛНВН-18У0555-18У0545-54-АВК-ЗИП, дополнении к Акту входного контроля от 08.07.2020   № 757-ЛНВН-18У0555-18У0545-54-АВК-ЗИП-Д1.  

Приемка товаров по количеству в торговой организации предусматривает проверку  соответствия фактического наличия товара данным, содержащимся в транспортных,  сопроводительных и (или) расчетных документах, в соответствии с Гражданским кодексом  Российской Федерации, а при приемке их по качеству и комплектности - соответствие  требованиям к качеству товаров, которые предусмотрены в договоре.  

Пунктом 2.9 Договора закреплено, что на весь поставляемый Поставщиком товар  проводится процедура входного контроля.  

При проведении процедуры входного контроля по Оборудованию 06.02.2020 и  14.02.2020 по ЗИП с участием представителя Поставщика, было выявлено, что Оборудование  не соответствует требованиям проекта, отдельные позиции товара имеют повреждения,  отсутствуют маркировки, имеется пересортица по позициям ЗИП. Кроме того, установлено,  что в нарушение требований Детализированной технической спецификации (далее - ДТС) и  Технических требований на закупку (757-П-10-ТТ-0-005-0048-003-ТТ, 757-П-30-ТТ-1-005- 0048-001-ТТ) (далее - ТТ) отсутствует техническая документация, сертификаты.  

При этом, п. 2.10 Договора предусмотрено, что при обнаружении несоответствия  качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификации  товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или каких-либо  данных в сопроводительном документе или при входном контроле товара, Покупателем  составляется Акт с указанием несоответствий.  

В результате чего, подготовлены Акты входного контроля, в которых указаны  замечания.  

Требования о подтверждении таможенного декларирования Товара иностранного  производства и сроке изготовления Товара являются существенными, предусмотрены п. 1.1.  и 13.7 Договора и должны были быть соблюдены Поставщиком на этапе закупки Товара.  

Представитель Поставщика был извещен о выявленных несоответствиях товара и не  полном комплекте сопроводительной документации, поскольку большая часть замечаний  была озвучена комиссией при проведении входного контроля.  

В ответ на Акт входного контроля от 06.02.2020 № 757-ЛНВН-18У0555-18V0545-54- ABK и Акт входного контроля от 06.02.2020 № 757-ЛНВН-18У0505-152-АВК, Поставщик, до  их получения на бумажном носителе 26.02.2020, начал устранять замечания. Данный факт  подтверждается Дополнением № 1 к АВК № 757-ЛНВН-18У0555-18У0545-54-АВК от  20.02.2020 и Дополнением № 1 к АВК № 757-ЛНВН-18У0505-152-АВК от 20.02.2020.  

В ответ на Акт входного контроля от 14.02.2020 № 757-ЛНВН-18У0555-18У0545-54- АВК-ЗИП письмом от 28.04.2020 № 00373 Поставщик предоставил информацию о  регистрационных номерах ДТ и стране происхождения товара. Специалистами Покупателя  была проведена проверка прохождения таможенного оформления Товара, по итогам которой  было выявлено, что ЗИП - фильтр Epcos B84114DB20 прошел процедуру таможенного  оформления в 2015 году, однако, в соответствии с Техническим заданием поставляемый  товар должен быть изготовлен не ранее 2018 года. В связи с чем, данное замечания было  предъявлено Поставщику 15.05.2020 письмом № 35-14-02-5381.  

Фактически оборудование было принято Покупателем путем подписания без замечаний  товарных накладных ТОРГ-12 и Актов входного контроля 28.02.2020, а по ЗИП на два года  эксплуатации - 08.07.2020, соответственно просрочка поставки Оборудования и ЗИП  составляет:  

- по ТОРГ-12 от 22.01.2020 №№ 3 и 4 (ЗИП) - 139 дней (с 21.02.2020 по 08.07.2020).  

- по ТОРГ-12 от 22.01.2020 №№ 1 и 2 (Оборудование) - 2 дня (с 27.02.2020 по  28.02.2020).  

В соответствии с условиями Договора Товар подлежал поставке в срок по 31.01.2020,  фактически оборудование было принято Покупателем путем подписания без замечаний  товарных накладных ТОРГ-12 и Актов входного контроля 28.02.2020, а по ЗИП на два года  эксплуатации - 08.07.2020.  

Пунктом 6.5 Договора, Стороны установили, что товар считается поставленным в срок,  если момент передачи товара Поставщиком на склад Покупателя происходит согласно сроку  поставки по Спецификации № 1 при условии отсутствия замечаний, выявленных при  входном контроле, и передачи полного комплекта технической, эксплуатационной и  сертифицирующей документации, указанного в Технических требованиях на закупку.  

Пунктом 11.5 Договора установлено, что в случае нарушения сроков поставки (замены,  доукомплектования, устранения недостатков по гарантии, устранения несоответствий с  документацией, необходимой для разработки рабочей документации) товара Поставщик  обязуется уплатить Покупателю пени в размере 0,15% от стоимости такого товара за каждый  день просрочки. Абзацем 2 п. 11.5 Договора определена ответственность Поставщика за  поставку товара без полного комплекта документации, указанной в п. 1.1 Договора в размере  0,15% от стоимости такого товара за каждый день просрочки.  

Исходя из этого, Покупателем в соответствии с условиями Договора начислены пени  Поставщику за просрочку поставки товара, согласно прилагаемому расчету:  

- 172 669,32 руб. за просрочку поставки товара по товарной накладной ТОРГ-12 от  22.01.2020 № 1 за период с 27.02.2020 по 28.02.2020;  

- 131 266,84 руб. за просрочку поставки товара по товарной накладной ТОРГ-12 от  22.01.2020 № 2 за период с 27.02.2020 по 28.02.2020;  

- 2 270 137,16 руб. за просрочку поставки ЗИП по товарным накладным ТОРГ-12 от  22.01.2020 № 3 и № 4 за период с 21.02.2020 по 08.07.2020.  

Кроме того, стороны при заключении договора от 16.08.2018 № 18V0545 согласовали  ответственность за несвоевременное предоставление первичных учетных документов и/или  счета-фактуры (с НДС), оформленных в соответствии с действующим законодательством  РФ.  

Пунктом 4.6 Договора определено, что Поставщик на поставленный ЗИП оформляет  отдельный пакет первичной бухгалтерской документации.  

Пунктом 5.4 Договора установлена обязанность Поставщика предоставить Покупателю  оригиналы счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12 и счета на оплату, оформленных в  соответствии с действующим законодательством РФ:  

- за поставленный товар - в течение 5 календарных дней с момента поставки, но не  позднее последнего числа месяца поставки товара;  

- за поставленный ЗИП на период двух лет эксплуатации - в течение 5 календарных  дней с момента поставки, но не позднее последнего числа месяца поставки ЗИП на период  двух лет эксплуатации.  

За просрочку предоставления Поставщиком первичных учетных документов  Покупатель вправе применить нормы об ответственности Поставщика, предусмотренные  пунктом 5.4 Договора - Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,02% от  суммы несвоевременно предоставленных первичных учетных документов и/или счета- фактуры (с НДС), оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ за  каждый день просрочки представления, но не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.  

В связи с нарушением Подрядчиком сроков предоставления первичных учетных  документов на ЗИП, которые согласно условиям заключенного Договора, должны были быть  представлены 31.01.2020, учитывая положения п. 5.4. Договора и фактическую дату  устранения замечаний по ЗИП - 08.07.2020, заказчиком начислена неустойка в размере 346  236,75 рублей за период с 01.02.2020 по 08.07.2020г.  

Таким образом, общая сумма начисленной неустойки составляет 2 920 310  руб. 07 коп., в том числе, неустойка за просрочку поставки товара по накладной ТОРГ-12 от  22.01.2020 г. № 1 за период с 27.02.2020 г. по 28.02.2020 г.; неустойка в сумме 131 266 руб.  84 коп. за просрочку поставки товара по товарной накладной ТОРГ-12 от 22.01.2020 г. № 2 за  период с 27.02.2020 г. по 28.02.2020 г.; неустойка в сумме 2 270 137 руб. 16 коп. за  просрочку поставки ЗИП по товарным накладным ТОРГ-12 от 22.01.2020 г. № 3 и 4 за  период с 21.02.2020 г. по 08.07.2020 г.; неустойка в сумме 346 236 руб. 75 коп. за просрочку  предоставления первичных учетных документов  

В адрес ответчика была направлена претензия от 13.12.2022г. № 16/16-353 об оплате  неустойки (пени) в размере 2 920 310 руб. 07 коп.  

Поскольку ответчик с требования претензии не согласился, истец обратился в суд с  иском.  

 Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации обстоятельства по делу и доказательства, суд считает требования  истца обоснованными, соответствующими требованиям закона и подлежащими  

удовлетворению. К указанному выводу суд приходит на основании следующего. 

В соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)  по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую  деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или  закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности  или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным  использованием.  

Согласно ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением  порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон  порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными  поручениями.  

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями.  

В силу положений пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением  случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми  актами.  

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,  банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не  обязан доказывать причинение ему убытков.  

 Материалами дела подтверждается, что ответчик произвел поставку товаров с  нарушением установленных договором сроков.  

В силу ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его  ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или  неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные  основания ответственности.  

Лицо признаётся невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности,  какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все  меры для надлежащего исполнения обязательства.  

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401  ГКРФ).  

Кроме того, Поставщик произвел поставку некомплектного товара, не  соответствующего требованиям Раздела 4, пункта 5.4 Раздела 5 757-П-10-ТТ-0-005-0048-003- ТТ, 757-П-30-ТТ-1-005-0048-001-ТТ, Разделов 4, 5 ДТС.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 478 ГК РФ продавец обязан передать покупателю  товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности.  

Пунктом 1 ст. 511 ГК РФ предусмотрено право поставщика, допустившего  недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное  количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора  поставки, если иное не предусмотрено договором.  

В соответствии с положениями статьи 521 ГК РФ установленная законом или  договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров  взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его  обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах  поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.  

Поскольку ответчик поставил товар с нарушением срока, истцом начислена неустойка  в сумме 172 669,32 руб. за просрочку поставки товара по товарной накладной ТОРГ-12 от  22.01.2020 № 1 за период с 27.02.2020 по 28.02.2020; в сумме 131 266,84 руб. за просрочку  поставки товара по товарной накладной ТОРГ-12 от 22.01.2020 № 2 за период с 27.02.2020 по  28.02.2020 и в сумме 2 270 137,16 руб. за просрочку поставки ЗИП по товарным накладным  ТОРГ-12 от 22.01.2020 № 3 и № 4 за период с 21.02.2020 по 08.07.2020.  

Материалами дела также подтверждается, что ответчик предоставил первичные  учетные документы – счета-фактуры истцу с просрочкой.  

Согласно пункту 5.4 договора счета фактуры, товарные накладные ТОРГ-12 и счета на  оплату должны быть предоставлены истцу в течение 5-ти календарных дней с момента  поставки, но не позднее последнего числа месяца поставки товара.  

За просрочку предоставления Поставщиком первичных учетных документов  Покупатель вправе применить нормы об ответственности Поставщика, предусмотренные  пунктом 5.4 Договора - Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,02% от  суммы несвоевременно предоставленных первичных учетных документов и/или счета- фактуры (с НДС), оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ за  каждый день просрочки представления, но не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.  

 Исходя из даты поставки, указанных в товарных накладных - 22.01.2020, счета-фактуры  должны быть переданы Покупателю не позднее 31.01.2020.  

Пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что  при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при  получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров  (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются  соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки  товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня  получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров  (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.  

 В связи с нарушением Подрядчиком сроков предоставления первичных учетных  документов на ЗИП, учитывая положения п. 5.4. Договора и фактическую дату устранения  замечаний по ЗИП - 08.07.2020, заказчиком начислена неустойка в размере 346 236,75 рублей  за период с 01.02.2020 по 08.07.2020г.  

Общая сумма начисленной неустойки по Договору составляет 2 920 310 руб. 07 коп.  

Суд, проверив расчет истца, считает его верным. 

Доводы ответчика указанные в отзыве на иск, суд, считает необоснованными, не  соответствующими документам, представленными в материалы дела.  

 Арбитражный суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу, что  требования истца о взыскании неустойки в сумме 2 920 310 руб. 07 коп., в том числе,  неустойку за просрочку поставки товара по накладной ТОРГ-12 от 22.01.2020 г. № 1 за  период с 27.02.2020 г. по 28.02.2020 г.; неустойку в сумме 131 266 руб. 84 коп. за просрочку  поставки товара по товарной накладной ТОРГ-12 от 22.01.2020 г. № 2 за период с 27.02.2020  г. по 28.02.2020 г.; неустойку в сумме 2 270 137 руб. 16 коп. за просрочку поставки ЗИП по  товарным накладным ТОРГ-12 от 22.01.2020 г. № 3 и 4 за период с 21.02.2020 г. по  08.07.2020 г.; неустойку в сумме 346 236 руб. 75 коп. за просрочку предоставления  первичных учетных документов подлежат удовлетворению в полном объеме.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в  пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Поскольку истец уменьшил исковые требования, то государственная пошлина в  сумме 100 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Эфор" в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" неустойку в сумме  2 920 310 руб. 07 коп., в том числе, неустойку за просрочку поставки товара по накладной  ТОРГ-12 от 22.01.2020 г. № 1 за период с 27.02.2020 г. по 28.02.2020 г.; неустойку в сумме  131 266 руб. 84 коп. за просрочку поставки товара по товарной накладной ТОРГ-12 от  22.01.2020 г. № 2 за период с 27.02.2020 г. по 28.02.2020 г.; неустойку в сумме 2 270 137 руб.  16 коп. за просрочку поставки ЗИП по товарным накладным ТОРГ-12 от 22.01.2020 г. № 3 и  4 за период с 21.02.2020 г. по 08.07.2020 г.; неустойку в сумме 346 236 руб. 75 коп. за  просрочку предоставления первичных учетных документов, а также судебные расходы по  оплате госпошлины в сумме 37 602 руб.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефть" из федерального бюджета госпошлину в сумме 100 руб., уплаченную  по платежному поручению № 1584 от 20.02.2023 г.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья С.В. Богатыренко