Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-179471/23-96-1291

07 ноября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 24.10.2023

Полный текст решения изготовлен  07.11.2023

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "МОСКОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 127018, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, СТРЕЛЕЦКАЯ УЛ., Д. 18, КВ. 41, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.02.2022, ИНН: 

<

***>, КПП: 771501001

к ответчику ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ 129090, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 770201001

о взыскании 18 860 432,02 руб.; третье лицо ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ТРЭНД".

при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 14.09.23г.; диплом;

от ответчика: ФИО3 по дов. от 04.08.23г.; диплом;

от третьего лица: ФИО2 по дов. от 10.10.23г.; диплом,

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ООО "МОСКОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (далее по тексту – Ответчик) о взыскании:

- задолженности в размере 15 855 399,86(Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста девяноста девять) рублей 86 копеек.

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 855 322,80(Восемьсот пятьдесят пять тысяч триста двадцать два) рубля 80 копеек.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика по иску возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

23.11.2020 года между, ФКР МОСКВЫ и ООО Группа компаний «ТРЭНД» был заключен договор №ПКР-005554-20 (ДАЛЕЕ — ДОГОВОР).

Согласно п. 2.1 ДОГОВОРА по настоящему Договору Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 10 к настоящему Договору) своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - работы) в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу(ам), предусмотренному(ым) Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору), (далее - Объект/Объекты), включая разработку проектной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по разработке проектной документации по Акту приемки выполненных работ по разработке проектной документации, сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по Акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу Обьекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

В силу п. 3.1 ДОГОВОРА цена Договора определяется на основании Сметы (Приложение № 9 к настоящему Договору), Адресного перечня (Приложение № 2 к настоящему Договору), которым определена предельная стоимость выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества, с учетом процента снижения, установленного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (протокол № 027300000012001840 от «06» ноября 2020 г.) составляет 117 646 968,10 руб. (сто семнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 10 коп.), в том числе НДС - 20 % - 19 607 828,02 руб. (девятнадцать миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 02 коп.), и включает все затраты Генподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте(-ах), в том числе:

- расходы за изготовление необходимого количества экземпляров проектной документации согласно Техническому заданию (Приложение № 10 к настоящему Договору);

- затраты на прохождение государственной экспертизы;

- затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимости Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;

- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Генподрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для начала производства Работ, и их демобилизацией после окончания Работ или в случае прекращения действия настоящего Договора;

- затраты, связанные с обеспечением Генподрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте(-ах);

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;

- затраты, связанные с получением Генподрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно п. 3.2 ДОГОВОРА цена Договора в части стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах подлежит изменению в соответствии с результатами выполнения работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в пределах размера, установленного настоящим Договором, с учетом процента снижения по результатам электронного аукциона путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

Стоимость каждого из видов фактически выполненных работ по настоящему Договору не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об электронном аукционе, по каждому из соответствующих видов работ.

Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ.

Допускается изменение объемов и соответствующей стоимости работ на основании изменений, внесенных в установленном порядке в Смету, проектную и сметную документацию, согласованную с Заказчиком. Изменение Цены Договора должно быть оформлено дополнительным соглашением к Договору, подписанным Сторонами, с приложением согласованной сметы.

В случае внесения изменений в постановление Правительства РФ No 615-ПП, иные нормативно-правовые акты в части порядка изменения цены договора, Стороны вправе изменить положение настоящей статьи соглашением Сторон.

Если при расчете стоимости вида работ был применен понижающий коэффициент с целью приведения стоимости такой работы к предельной стоимости в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее — Краткосрочный план), то в случае уменьшения объема выполнения работ в связи с внесением изменений в проектную документацию в установленном порядке Заказчик вправе внести изменения в сметную документацию, в части уменьшения размера такого понижающего коэффициента для приведения стоимости работы к сметной стоимости без учета примененного понижающего коэффициента, но не выше предельной стоимости, установленной Краткосрочным планом.

Виды работ при этом не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора.  Превышение Генподрядчиком проектных объемов и стоимости работ, но в пределах Цены Договора, не оформленных соответствующим дополнительным соглашением, не допускается и не оплачивается Заказчиком.

В соответствии с п. 3.6 ДОГОВОРА оплата выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по настоящему Договору производится Заказчиком с зачетом ранее перечисленного аванса пропорционально стоимости выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) дней (без учета выходных и праздничных дней) после предоставления Генподрядчиком надлежаще оформленных в соответствии с п. 1.8, п. 3.7 настоящего Договора и при условии выполнения требования, предусмотренного п. 3.8 настоящего Договора, Акта приемки выполненных работ по элементу (системе здания), счета, счета-фактуры, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также договора страхования гражданской ответственности рисков, указанных в п. 1.3 Требований к страховым организациям и договору страхования (приложение No 14 к настоящему Договору). Пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

Окончательная оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком с зачетом ранее перечисленного аванса пропорционально стоимости выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) дней (без учета выходных и праздничных дней) после предоставления Генподрядчиком надлежащим образом оформленных документов согласно п. 3.7 настоящего Договора, счета, счета-фактуры и Акта приемки выполненных работ по Объекту, оформленного в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора, при условии выполнения требования, предусмотренного п. 3.8 настоящего Договора, а также договора страхования гражданской ответственности рисков, указанных в п. 1.3 Требований к страховым организациям и договору страхования (приложение № 14 к настоящему Договору). в соответствии с действующим законодательством и при условии документального обоснования Заказчиком и Генподрядчиком. Пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

В силу п. 3.7 ДОГОВОРА с целью осуществления расчетов по настоящему Договору Генподрядчик направляет Организации Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее чем в 4 (четырех) экземплярах. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

Организация в течение 5 (пяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) с момента получения документов рассматривает представленные документы, визирует и уведомляет Заказчика, Генподрядчика о готовности объекта к приемке выполненных работ в соответствии с п. 7.9 настоящего Договора либо направляет Генподрядчику обоснованный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения. Неполучение Генподрядчиком отказа Организации в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

При непредставлении Генподрядчиком оформленных с учетом замечаний Организации первичных документов (формы КС-2, КС-3) в срок, установленный соответствующим документом и (или) в случае повторного предоставления Генподрядчиком первичных документов (формы КС-2, КС-3) без устранения выявленных замечаний, Генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.

Завизированные Организацией Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются уполномоченными представителями Сторон с подписанием Акта приемки выполненных работ по элементу (системе) здания или Акта приемки выполненных работ по Объекту.

В связи с возникшими у ООО Группа компаний «Трэнд» финансовыми трудностями и явной не возможностью исполнения ДОГОВОРА, между ООО Группа компаний «Трэнд» и ООО «МСК» были заключены договора уступки прав требований (цессии), а именно: 13/07-СГП, 14/07-СПГ, 15/07-СПГ, 16/07-СПГ, 17/07-СПГ и 18/07-СПГ.

26.07.2022 года ООО Группа компаний «Трэнд» уведомило ФКР Москвы о заключении договора уступки прав требований (цессии).

Таким образом, после 26.07.2022 года все работы выполнялись силами ООО «МСК», а принятие работ осуществлялось напрямую ФКР МОСКВЫ.

Согласно ст. 309 и ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу ст. 421 ГК РФ Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

В силу ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Выполненные работы были приняты ФКР МОСКВЫ, что подтверждается актами выполненных работ №090882-22 от 14.12.2022 года, №091852-22 от 19.12.2022 года, №101023-22 от 19.12.2022 года и №101024-22 от 19.12.2022 года.

30.12.2022 года в ФКР Москвы были переданы документы предусмотренные ДОГОВОРОМ, в том числе справки по формам КС-2 и КС-3 по работам выполненным в рамках договоров уступки прав требований (цессии) №13/07-СПГ, 14/07-СПГ и 18/07-СПГ на сумму 16 100 600 (шестнадцать миллионов сто тысяч шестьсот) рублей 24 копейки.

12.01.2023 года в ФКР Москвы были переданы документы предусмотренные ДОГОВОРОМ, в том числе справки по формам КС-2 и КС-3 по работам выполненным в рамках договоров уступки прав требований (цессии) №15/07-СПГ, 16/07-СПГ и 17/07-СПГ на сумму 2 279 882 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля.

Ответчик поясняет, что  основанием для приемки и оплаты выполненных работ по требованию ЖК РФ является акт приемки выполненных работ по системе, подписанный всеми членами комиссии по приемке выполненных работ- проектной организации, управы района города Москвы или префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (по территориальной принадлежности многоквартирного дома), органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования в городе Москве, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию отдельного оборудования в многоквартирном доме, а также представитель собственников помещений в многоквартирном доме.

Указанный акт Генподрядчиком не предоставлен, что также свидетельствует о грубом нарушении Генподрядчиком порядка сдачи-приемки выполненных работ.

В связи с изложенным, поскольку Генподрядчик не направлял Заказчику документы для приемки выполненных работ, Заказчик не организовывал комиссионную приемку на объекте, необходимо установить объем выполненных работ надлежащего качества и их стоимость.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве  не исключают правомерности требований истца, опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами,  сделаны при не правильном и не верном применении норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения.

Вопреки доводам ответчика, договор продолжает действовать с прежним Подрядчиком.

Ответчик не заявил ходатайство о фальсификации подписанных актов о приёмке выполненных работ. Кроме того, в отзыве ответчик фактически признал факт выполнения работ. К представленным истцом документам ответчик имеет доступ посредством системы внутреннего документооборота между ФКР г. Москвы и Подрядчиком.

В адрес ФКР Москвы по системе РСКР были направлены следующие документы.

1. По ремонту системы кровля на сумму 11 408 314,25 руб.

- КС-2 № 5 от 14.12.2022

- КС-3 № 5 от 14.12.2022

- Акт приемки выполненных работ по элементу от 14.12.2022 по форме приложение 7 к Договору, подписанный всеми участниками комиссии.

30.11.2022 года вышеназванные акты загружены в систему и согласованы и переданы в оплату .

2. По ремонту системы подвальных помещений на сумму 3 361 841,22 руб.

- КС-2 № 6 от 19.12.2022

- КС-3 № 6 от 19.12.2022

- Акт приемки выполненных работ по элементу от 19.12.2022 по форме приложение 7 к Договору, подписанный всеми участниками комиссии.

30.11.2022 года вышеназванные акты загружены в систему и согласованы и переданы в оплату .

3. По ремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения (разводящие магистрали) на сумму 710 974,00 руб.

- КС-2 № 8 от 19.12.2022

- КС-2 № 9 от 19.12.2022

- КС-3 № 7 от 19.12.2022

- Акты приемки выполненных работ по элементу от 19.12.2022 по форме приложение 7 к Договору, подписанный всеми участниками комиссии.

09.11.2022 года вышеназванные акты загружены в систему и согласованы и переданы в оплату .

4. По ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) на сумму 374 270,61 руб.

- КС-2 № 7 от 26.12.2022

- КС-3 № 8 от 26.12.2022

- Акты приемки выполненных работ по элементу от 26.12.2022 по форме приложение 7 к Договору, подписанный всеми участниками комиссии.

30.11.2022 года вышеназванные акты загружены в систему и согласованы и переданы в оплату .

Согласно системе РСКР, акты согласованы, приняты без замечаний, подписаны и направлены на оплату.

Таким образом, сумма основного долга Ответчика перед Истцом по принятым и неоплаченным работам составляет 15 855 399,86 руб.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком.

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

Кроме того, ответчик не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В свою очередь иных доказательств, подтверждающих наличие недостатков в выполненных истцом работах, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

В силу ч. 1 ст. 64, ст. 71 и 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами ст. ст. 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

Оценив представленные в дело доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, руководствуясь названными нормами права, суд приходит к выводу о взыскании задолженности в размере 15 855 399 руб. 86 коп.,

 

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 855 322,80(Восемьсот пятьдесят пять тысяч триста двадцать два) рубля 80 копеек.

Как установлено п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Задолженность:

15 855 399,86 р.

Период просрочки:

с 20.03.2023 по 20.10.2023

Регион:

Центральный федеральный округ

Расчёт дней:

в календарных днях

 

Период просрочки

 

 

Задолженность

с

по

дней Ставка Формула

Проценты

15 855 399,86 р.

20.03.2023

23.07.2023

126

7,50

15 855 399,86 х 126 х 7.5% / 365

410 502,82 р.

15 855 399,86 р. 24.07.2023

14.08.2023

22

8,50

15 855 399,86 х 22 х 8.5% / 365

81 231,77 р.

15 855 399,86 р.

15.08.2023

17.09.2023

34

12,00

15 855 399,86 х 34 х 12% / 365

177 232,96 р.

15 855 399,86 р.

18.09.2023

20.10.2023

33

13,00

15 855 399,86 х 33 х 13% / 365

186 355,25 р.

Сумма основного долга: 15 855 399,86 р.

Сумма процентов: 855 322,80 р.

Следовательно, неправомерно удерживая денежные средства истца (просрочка уплаты денежных средств), ответчик должен нести ответственность за пользование ими в виде уплаты процентов по ставке рефинансирования Банка России.

Поскольку ответчиком допущено нарушение денежного обязательства, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ заявлено правомерно.

В силу части 1 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "МОСКОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 15 855 399 руб. 86 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 855 322 руб. 80 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 106 554 руб.

Возвратить ООО "МОСКОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 

<

***>)  из федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 748 руб., уплаченную по чек-ордеру  от 04.08.2023 года операция 4978.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                     П.С. Гутник