РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-60292/20

116-455 

20 августа 2020 г.

Резолютивная часть решения  объявлена 27.07.2020г.

Полный  текст решения  изготовлен 20.08.2020г.

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П., 

при ведении протокола судебного заседания, помощником судьи Иордановым  Г.В.

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению ИП ФИО1 ( ОГРНИП 31936680009083)  к ООО  "ИНКОР СИСТЕМЫ"   ( ОГРН  

<

***>) 

 о взыскании 5 170 562, 46 руб.

при участии представителей 

от  истца (заявителя) – ФИО2   паспорт,  доверенность  от 17.03.2020г, диплом

от ответчика (заинтересованного лица) –   не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ИП  ФИО1  обратился  в арбитражный суд г. Москвы   с иском  о взыскании  с ответчика   суммы  задолженности в  размере  4.720.938,60 рублей , неустойку в размере  449.623,26 рублей   по договору  подряда № 19-СП-43   от 13.09.2019г.

Ответчик   в судебное заседание не явился, отзыв  не представлен.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей  истца, оценив представленные  доказательства в совокупности, в порядке ст. 71 АПК РФ , суд приходит  к следующему. 

Из  материалов   дела  следует, что  13 сентября 2019г. между обществом с ограниченной ответственностью «Инкор Системы» (Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 ИНН 

<

***> ОГРНИП 31936680009083 (Подрядчик) был заключен договор подряда №19-СП-43 .

Согласно , п. 1.1, 1.2 1.3 Договора подряда Подрядчик по поручению Заказчика обязуется выполнить работы по монтажу, СОР по шахте, установке ОДШ и пуско-наладке(далее - Работы) согласно утверждённой проектной документации, протоколу согласования договорной цены (Приложение 2 к Договору подряда) и в сроки, установленные и согласованные в Графике производства работ (Приложение 3 к Договору подряда) на объекте «здание», расположенном по адресу: МО, 

<

...>, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № 50:22:0010109:32539 используя расходные материалы, предоставляемые Заказчиком для монтажа лифтов и производства СОР в шахтах по установленным нормативам, а Заказчик обязуется принять результаты Работ, оплатить их в соответствии с условиями Договора подряда.

В соответствии с п.2.1 договора подряда и протоколу согласования договорной цены общая стоимость работ по договору подряда составляет 7 319 442, 00 рублей (НДС не облагается).

Согласно п.3.1. Договора подряда Заказчик обязуется оплачивать работы в соответствии с Договором подряда и протоколом согласования договорной цены.

В соответствии с п.3.4. Если платежи производятся позже, чем это предусмотрено Договором подряда и протоколом согласования договорной цены, Подрядчик вправе соответственно увеличить сроки выполнения Работ и/или приостановить Работы по Договору подряда до полного погашения задолженности.

Согласно протоколу согласования договорной цены, оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

1) 10% от стоимости Работ, что составляет 731 944, 20 руб. (Семьсот тридцать одна тысяча девятьсот сорок четыре рубля 20 копеек), оплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установки направляющих;

2) 30% от стоимости Работ, что составляет 2 195 832, 60 руб. (Два миллиона сто девяносто пять тысяч восемьсот тридцать два рубля 60 копеек), оплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания механомонтажных работ;

3) 20 % от стоимости Работ, что составляет 1 463 888, 40 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей 40 копеек), оплачивается в течение 5(пяти) рабочих дней с момента окончания строительно-отделочных работ по шахтам;

4) 20 % от стоимости Работ, что составляет 1 463 888, 40 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей 40 копеек), оплачивается в течение 5(пяти) рабочих дней с момента окончания пуско-наладочных работ;

5) 20% от стоимости Работ, что составляет 1 463 888, 40 руб. (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей 40 копеек), оплачивается после получения следующих документов:

- Всех подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 по Объекту;

-Всех подписанных сторонами Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 по Объекту;

-Акта полного технического освидетельствования техническому регламенту таможенного союза РФ (TP ТС 011 /2001).

Согласно ч.1 ст.720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием субподрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно п.1 ст.711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п.1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

23.10.2019г. Подрядчик выполнил работы по монтажу направляющих, механомонтажные работы на сумму 2 532 303,80 рублей. Указанные обстоятельства подтверждаются подписанными сторонами без замечаний Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 23.10.2019г., Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 23.10.2019г. по Объекту.

Истец указывает , что Заказчик оплатил указанные работы, согласованные Сторонами  частично в сумме 150 000 рублей .  Указанные работы до настоящего времени Заказчиком полностью не оплачены. Платежное поручение на оплату  указанной суммы   в материалы дела  истцом не представлено.

20.01.2020г. Подрядчик выполнил СОР (строительно-отделочные работы) по шахтам 9 лифтов из 16 на сумму 1 266 152, 40 руб. Указанные обстоятельства подтверждаются подписанными сторонами без замечаний Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 20.01.2020г., Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 20.01.2020г. по Объекту. 

26.11.2019г., 03.02.2020г. Подрядчик выполнил работы по установке ОДШ (обрамление дверей шахты) и ПНР (пусконаладочные работы) на сумму 1 072 482, 4 рублей. Указанные обстоятельства подтверждаются подписанными сторонами без замечаний Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 26.11.2019г. от  03.02.2020г., Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 26.11.2019г., 03.02.2020г. 

На основании вышеизложенных обстоятельств, работы, выполненные Подрядчиком, считаются принятыми и подлежащими оплате.

Таким образом, Подрядчиком выполнено работ по Договору подряда на сумму 4 870 938, 60 копеек.

Срок оплаты выполненных работ наступил.

С учётом частичной оплаты задолженность Заказчика по оплате выполненных работ на настоящее время составляет 4 720 938, 60 рублей.

Указанное обстоятельство подтверждается вышеуказанными документами, подписанными сторонами без замечаний.

25 октября 2019г. Подрядчик направил уведомление об увеличении сроков работ в связи с тем, что Заказчик не выполнил обязательства по поставке необходимых материалов и оборудования.

11 марта 2020г. Подрядчик направил Заказчику уведомление об увеличении сроков работ в связи с тем, что Заказчик не выполнил обязательства по поставке необходимых материалов и оборудования .

На указанное обращение до настоящего времени Заказчик не ответил, материалы и оборудование для окончания монтажа части лифтов не предоставил.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п.1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно статье 717, ст.718 ГК РФ Заказчик обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В нарушение действующего законодательства РФ Заказчик не исполняет обязанности по оказанию подрядчику содействия в выполнении работы,

Исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий Заказчика.  Обратного суду  не доказано.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Согласно 7.3. Договора подряда за нарушение срока платежей, предусмотренных указанным договором. Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

Согласно расчёту договорной неустойки, начисленной за нарушение оплаты выполненных работ на 30.03.2020г. оставляет 449 623, 26 рублей. Расчет суммы неустойки судом проверен, является правильным.

С целью урегулирования в досудебном порядке денежного требования, Истец направил по юридическому адресу ответчика две претензии    от 31.10.2019г. ( направлена 01.11.2019г.) и от 20.02.2020 г. , претензии   оставлены  ответчиком  без ответа.

С учетом изложенного , требования истца подлежат удовлетворению.

В соответствии  со ст. 101  АПК РФ  судебные расходы  состоят из государственной  пошлины  и судебных  издержек, связанных с рассмотрением  дела  арбитражным судом .

В соответствии   со ст. 110  АПК РФ  судебные  расходы , понесенные    лицом, участвующим в деле, в пользу  которого  принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.

На  основании  изложенного, руководствуясь    ст. ст. 65,71 , 156, 110,167-170,171,  176,  АПК РФ  арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с  ООО  «  Инкор Системы»  ( ОГРН  

<

***>) в пользу  ИП  ФИО1 ( ОГРНИП  31936680009083)  сумму  задолженности  в размере 4.720.938,60  руб., неустойку в размере  449.623,26  руб., расходы по госпошлине  48.853  руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.П. Стародуб