АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-28629/23

11 декабря 2023 года.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчук И. С.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Почта  России" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Генстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, о взыскании 1 811 206 руб. штрафа  

 Руководствуясь статьями 110, 156. 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-16-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404521, расположенного по адресу: 

<

...>, установленные актом от 24.04.2023 № 1:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- убрать строительный мусор; 

- заделать трещины в стенах, образовавшиеся в весенний период из-за осыпания  шпаклевочного слоя, устранить следы бурения;  

- сварить линолеум в рабочей зоне клиентского зала; - выполнить примыкания к смонтированным дверным блокам; - завершить отмостку, выполнить подсыпку грунтом к отмостке; 

- выполнить в полном объеме работы по ремонту кровли:  

- подготовить поверхность тыльной стороны фасада под нанесение декоративной  штукатурки «короед»;  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  КС-2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-24-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  

«Сельское ОПС» 404547, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский  

район, п. Береславка, д. 3Б, установленные актом от 24.04.2023 № 2: 

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  

соответствии с техническим заданием; 

- покрытие крыльца выполнить с контруклоном, оборудовать разворотную  

площадку на пандусе; 

- выполнить примыкание и отделочные работы по устройству откосов дверных  

блоков и козырька; 

- завершить монтаж электрооборудования в соответствии с правилами ПЭУ;  - выполнить устройство радиаторных ниш;  

- установить защиту проложенных кабелей; заделать отверстия; - завершить монтаж оконечных устройств; 

- устранить провисы потолка; выполнить окраску; устранить трещины в местах  

стыков облицовки стен ГКЛ; 

- выполнить заделку узлов прохода, заделать монтажные швы дверных блоков;  - выполнить примыкание разных типов пола;  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  

КС-2. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  

после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  

строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-24-2022 на  

выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  

«Сельское ОПС» 403024. расположенного по адресу: Волгоградская область,  

<

...>, установленные актом от  

24.04.2023 № 3: 

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  

соответствии с техническим заданием; 

- в местах установки датчиков выполнить подготовка поверхности под окраску;  

- окрасить и заизолировать тепловую сеть; устранить следы коррозии на  

трубопроводных и опорных стойках; - убрать строительный мусор; 

- оборудовать узел примыкания кровельного покрытия козырька к вертикальной  

стене; выполнить элементы металлоконструкций козырька к стене; 

- завершить монтаж окон, установить элементы откосов и отливов; заделать  

сквозные отверстия в помещения со стороны улицы; 

- выполнить подготовку поверхностей стен под окраску и отделку, выполнить  

покраску стен и потолка; 

- проложенные в запотолочном пространстве кабели оборудовать креплениями и  

гофротрубой; 

- установить защиту на кабельные линии, узлы прохода заделать противопожарной  

пеной; 

- устранить нарушения требований ПУЭ и охраны труда, допущенные при монтаже  

щита электропитания; 

- устранить нарушения требований ПУЭ и охраны труда, допущенные при монтаже  

электропроводки в клиентском зале; 

- заделать отверстия прохода кабелей, оборудовать защитой кабельные линии;  - завершить отделочные работы в соответствии с требованиями ТК и СОКК,  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  

КС-2. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-26-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404012, расположенного по адресу: Волгоградская область, Дубовский  район, с. Горповодяное, ул. Победы, д. 39, установленные актом от 24.04.2023 № 4:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- выполнить работы по восстановлению отделочного покрытия торцов входной  группы;  

- выполнить в полном объеме отделочные работы стен тамбура и технического помещения; - выполнить работы по чистовому покрытию пола, укладке линолеума и плитки; 

- выполнить в полном объеме работы по устройству потолка типа Армстронг,  выполнить окраску потолка;  

- выполнить в полном объеме электромонтажные работы, оборудовать изоляцией  концы электрических кабелей, установить гофрированную трубу, устранить скрутки  проводов в запотолочном пространстве;  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  КС-2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-15-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404510, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский  район, х. ФИО2, ул. 40 лет Победы, д. 13, кв. 15, установленные актом от 24.04.2023 №  5:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- выполнить монтаж окопных блоков в соответствии с требованиями ГОСТ 309712016;  

- осуществить демонтаж приступка на входе в тамбур; 

- установить защиту электрических кабелей для исключения поражения  электрическим током;  

- выполнить ремонт отмостки; 

- выполнить работы по защите и креплению кабельной линии по фасаду почтового  отделения;  

- установить поручень на пандус; устранить контруклон покрытия пандуса;  выполнить заезд на пандус в требуемых нормативах;  

- представить исполни тельную документацию но выполненным работам формы  КС-2.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Генстрой" в месячный срок  после вступления в силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в  строительно - монтажных работах по договору от 19.09.2022 № 8.4.8.1-01-25-2022 на  выполнение строительно-монтажных работ для отделения почтовой связи формата  «Сельское ОПС» 404026, расположенного по адресу: 

<

...>, установленные актом от 24.04.2023 № 6:  

- установить приборы и датчики противопожарной и охранной сигнализации в  соответствии с техническим заданием;  

- закончен монтаж дверного блока, произвести очистку от шпаклевочного состава и  краски;  

- выполнить в полном объеме работы по покрытию пола керамической плиткой,  оборудовать плинтус;  

- выполнить работы по устранению недостатков в монтаже электрооборудования,  шкафов, кабелей в соответствии с требованиями нормативных документов;  

- выполнить монтаж окон в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 «Швы  монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические  условия».  

- представить исполнительную документацию по выполненным работам формы  КС-2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Генстрой" в пользу  акционерного общества "Почта России" 1 848 318 руб., из них 1 811 206 руб. – штраф,  37 112 руб. – судебные расходы по оплате госпошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Меленчук И. С.