61/2021-6974(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-547/2020

г. Ярославль

21 января 2021 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального казенного  учреждения "Многофункциональный Центр Развития" Ярославского муниципального  района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Авторемтех" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании предоставить исполнительно-техническую документацию, о взыскании  штрафа в размере 1000484.66 руб.  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора  Общество с ограниченной ответственностью "Ярстройгрупп" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>), Акционерное общество "Газпром газораспределение  Ярославль" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), Федеральная служба по  экологическому, технологическому и атомному надзору Центральное управление в  Ярославской и Костромской областях (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление муниципального казенного учреждения  "Многофункциональный Центр Развития" Ярославского муниципального района (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить в части, обязать общество с  ограниченной ответственностью "Авторемтех" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) предоставить муниципального казенного учреждения  "Многофункциональный Центр Развития" Ярославского муниципального района (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнительно-техническую документацию на  смонтированные участки газопровода высокого давления с. Туношна - д. Воробино  ЯМР:  

- акты на переходы газопроводами водных преград; 

- акты на устройство и подготовку дна траншеи, укладку газопровода и 

присыпку песчаной подушкой; - акты на устройство футляров с выводом контрольных трубок; - акт на проверку целостности провода спутника; - акт проверки исправности маркеров 

2 

Исполнительная геодезическая съемка в масштабе 1:500. 

3 

Исполнительная схема сварных стыков 

4 

Исполнительный продольный профиль газопровода 

5 

Журнал производства работ, общий журнал производства работ 

6 

Журнал авторского надзора 

7 

Копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы, заверенные печатью  организации с расшифровкой должности и подписи лица, заверившего копии  

8 

Протокол ультразвукового контроля стыков ПЭ газопровода  

9 

Протокол механических испытаний сварных стыков на сварщиков 

10 

Распечатка сварочного процесса (с ксерокопией, заверенной печатью с расшифровкой  подписи и должности заверившего), с приложением акта (протокола) ежегодного  сервисного обслуживания сварочного аппарата  

11 

Копии свидетельств аттестации сварочного оборудования и технологии сварки,  выданных аттестационным центром, аккредитованным в установленном порядке в  Национальном аттестационном комитете по сварочному производству (НАКС)  

12 

Приказ о назначении ответственного лица за проведением строительно-монтажных  работ, сварочных работ с приложением удостоверений, протоколов аттестации  

13 

Копии удостоверений и протоколов аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства  

14 

Прохождение преград бестраншейным методом (дополнительные требования к  

документации): 1. сертификаты заводов-изготовителей на трубы, сварочные и изоляционные материалы; 

2. акт разбивки и передачи трассы;  3. Журнал производства работ;  

4. Протокол проверки качества сварных  

стыков газопровода физическими методами; 

5. Протоколы механических испытаний  

сварных стыков газопровода; 6. Акт предварительного испытания газопровода (перед протаскиванием) на прочность и герметичность; 7. Профиль бурения; 8. Протокол бурения; 9. Карта бурения; 

10. Акт на протаскивание газопровода по  

буровому каналу; 11. Акт испытания газопровода (после протаскивания) на прочность и герметичность; 12. Исполнительный паспорт газопровода, построенного методом наклонно- направленного бурения; 13. Акт приемки перехода газопровода, выполненного бестраншейным способом (форма В); При сдаче подземного перехода газопроводом подводного перехода приложить: - Акт приемки створа перехода. 

15 

Акт входного контроля проверки качества труб, деталей и узлов газопроводов, 

арматуры, изоляционных и других материалов 

16 

Строительный паспорт на участок смонтированного подземного  газопровода  

с ПК 7.0+82,80 до ПК 9.0+86,80 

 № п/п 

Исполнительно-техническая документация (наименование документа) 

1 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на  

безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией  строительства, контроль за исполнением которых не может быть проведен  

после наполнения других работ (скрытые работы):  - акты на переходы газопроводами водных преград;  - акты на устройство и подготовку дна траншеи, /кладку газопровода и  

присыпку песчаной подушкой; - акты на устройство футляров с выводом контрольных трубок; - акт на проверку целостности провода спутника; - акт проверки исправности маркеров 

2 

Исполнительная геодезическая съемка в масштабе 1:500. 

3 

Исполнительная схема сварных стыков 

4 

Исполнительный продольный профиль газопровода  

5 

Журнал производства работ, общий журнал производства работ 

6 

Журнал авторского надзора 

7 

Копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы, заверенные печатью  организации с расшифровкой должности и подписи лица, заверившего копии  

8 

Протокол ультразвукового контроля стыков ПЭ газопровода  

9 

Протокол механических испытаний сварных стыков на сварщиков, осуществляющих работы 

10 

Распечатка сварочного процесса (с ксерокопией, заверенной печатью с расшифровкой  подписи и должности заверившего), с приложением акта (протокола) ежегодного  

сервисного обслуживания сварочного аппарата 

11 

Копии свидетельств аттестации: сварочного оборудования и технологии сварки, 

выданных аттестационным центром, аккредитованным в установленном порядке  в Национальном аттестационном комитете по сварочному производству  

(НАКС) 

12 

Приказ о назначении ответственного лица за проведением строительно-монтажных  работ, сварочных работ с приложением удостоверений, протоколов аттестации  

13 

Копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков и специалистов  сварочного производства  

14 

Прохождение преград бестраншейным методом (дополнительные требования к  

документации): 1. сертификаты заводов-изготовителей на трубы, сварочные и изоляционные материалы; 

2. акт разбивки и передачи трассы;  3. Журнал производства работ;  

4. Протокол проверки качества сварных  

стыков газопровода физическими методами; 

5. Протоколы механических испытаний  

сварных стыков газопровода; 6. Акт предварительного испытания газопровода (перед протаскиванием) на 

прочность и герметичность;  7. Профиль бурения;  8. Протокол бурения;  9. Карта бурения;  

10. Акт на протаскивание газопровода по буровому каналу; 11. Акт испытания газопровода (после протаскивания) на прочность и герметичность; 12. Исполнительный паспорт газопровода, построенного методом наклонно- 

направленного бурения;  13. Акт приемки перехода газопровода,  

выполненного бестраншейным способом (форма В); 

При сдаче подземного перехода газопроводом подводного перехода приложить: - Акт  

приемки створа перехода.  

15 

Акт входного контроля проверки качества труб, деталей и узлов газопроводов,  арматуры, изоляционных и других материалов  

16 

Строительный паспорт на участок смонтированного подземного  газопровода  

С ПК 9.0+86,80 до ПК 23.00 

1 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на  

безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией  строительства, контроль за исполнением которых не может быть проведен после  выполнения других работ (скрытые работы):  

- акты на переходы газопроводами водных преград; 

- акты на устройство и подготовку дна траншеи, укладку газопровода и присыпку  песчаной подушкой;  

- акты на устройство футляров с выводом контрольных трубок; - акт на проверку целостности провода спутника; - акт проверки исправности маркеров 

2 

Исполнительная геодезическая съемка в масштабе 1:500 

3 

Исполнительная схема сварных стыков 

4 

Исполнительный продольный профиль газопровода 

5 

Журнал производства работ, общий журнал производства работ 

6 

Журнал авторского надзора 

7 

Копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с расшифровкой должности и подписи лица, заверившего копии 

8 

Протокол ультразвукового контроля стыков ПЭ газопровода 

9 

Протокол механических испытаний сварных стыков на сварщиков 

10 

Распечатка сварочного процесса (с ксерокопией, заверенной печатью с расшифровкой  подписи и должности заверившего), с приложением акта (протокола) ежегодного  

сервисного обслуживания сварочного аппарата 

11 

Копии свидетельств аттестации сварочного оборудования и технологии сварки,  выданных аттестационным центром, аккредитованным в установленном порядке в  

Национальном аттестационном комитете по сварочному производству (НАКС)  

12 

Приказ о назначении ответственного лица за проведением строительно-монтажных  работ, сварочных работ с приложением удостоверений, протоколов аттестации  

13 

Копии удостоверений и протоколов аттестации  сварщиков и специалистов сварочного  производства  

14 

Акт входного контроля проверки качества труб, деталей и узлов газопроводов,  арматуры, изоляционных и других материалов  

15 

Строительный паспорт на участок смонтированного подземного газопровода 

с ПК 36.0+31,70 до ПК 51.00 

 № п/п 

Исполнительно-техническая документация (наименование документа)  

1 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на  безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией  

строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен 

после выполнения других работ (скрытые работы), по форме приложения № 3 РД-11- 02-2006:  

- акты на переходы газопроводами водных преград; - акты на устройство и подготовку дна траншеи, 

укладку газопровода и присыпку песчаной подушкой; 

- акты на устройство футляров с выводом 

<

контрольных трубок;  - акт на проверку целостности провода спутника;  

- акт проверки исправности маркеров 

2 

Исполнительная геодезическая съемка в масштабе 1:500  

3 

Исполнительная схема сварных стыков 

4 

Исполнительный продольный профиль газопровода  

5 

Журнал производства работ, общий журнал производства работ 

6 

Журнал авторского надзора 

7 

Копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы, заверенные печатью  организации с расшифровкой должности и подписи лица,  

заверившего копии 

8 

Протокол ультразвукового контроля стыков ПЭ газопровода  

9 

Протокол механических испытаний сварных стыков на сварщиков 

2) газопровод среднего давления диаметром 90 х 5,2: с ПК 1 .1 до ПК 1.7+42,0 

 № п/п 

Исполнительно-техническая документация (наименование документа)  

1 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на  безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией  

строительства, контроль за исполнением которых не может быть проведен после  наполнения других работ (скрытые работы):  

- акты на переходы газопроводами водных преград; - акты на устройство и подготовку дна траншеи, /кладку газопровода и присыпку песчаной подушкой; 

- акты на устройство футляров с выводом контрольных трубок;  - акт на проверку целостности провода спутника;  

- акт проверки исправности маркеров 

2 

Исполнительная геодезическая съемка в масштабе 1:500 

3 

Исполнительная схема сварных стыков 

4 

Исполнительный продольный профиль газопровода 

5 

Журнал производства работ, общий журнал производства работ 

б 

Журнал авторского надзора 

7 

Копии сертификатов и паспортов на применяемые материалы, заверенные печатью 

организации с расшифровкой должности и подписи лица, заверившего копии  

8 

Протокол ультразвукового контроля стыков ПЭ газопровода 

9 

Протокол механических испытаний сварных стыков на сварщиков 

10 

Распечатка сварочного процесса (с ксерокопией, заверенной печатью с расшифровкой  подписи и должности заверившего), с приложением акта (протокола) ежегодного  сервисного обслуживания сварочного аппарата  

11 

Копии свидетельств аттестации сварочного оборудования и технологии сварки,  выданных аттестационным центром, аккредитованным в установленном порядке в  Национальном аттестационном комитете по сварочному производству (НАКС)  

12 

Приказ о назначении ответственного лица за проведением строительно-монтажных  работ, сварочных работ с приложением удостоверений, протоколов аттестации  

13 

Копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков и специалистов сварочного  производства  

14 

Акт входного контроля проверки качества труб, деталей и узлов газопроводов, арматуры, изоляционных и других материалов 

15 

Строительный паспорт на участок смонтированного подземного  газопровода  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Авторемтех" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  "Многофункциональный Центр Развития" Ярославского муниципального района (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 441 138 руб. 20 коп. штрафа, 29 004 руб. 85 коп. в  возмещение расходов по уплате госпошлины.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Шадринова Л.А.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.08.2020 6:56:08

Кому выдана Шадринова Любовь Александровна