АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

город Новосибирск                                                            Дело № А45-16211/2025

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 сентября 2025 года 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Бурдинской К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ДеСтрой» (ОГРН 

<

***>),  г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью «РСС-Сервис НСК» (ОГРН 

<

***>), г. Москва, 

при участии в деле третьих лиц: 1) общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Фридом-Сити» (ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «АД Констракшн» (ОГРН: 

<

***>),

о взыскании 3166084,78 рублей,

при участии в судебном заседании представителей

истца: ФИО1, доверенность от 17.01.2025, паспорт, диплом,

ответчика: ФИО2, доверенность № 4 от 09.01.2025, паспорт, диплом,

третьего лица: 1) - 2) не явился, извещен,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ДеСтрой» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «РСС-Сервис НСК» (далее - ответчик) о взыскании 3166084,78 рублей.

Исковые требования мотивированы тем, что 25 сентября 2024 года между ответчиком (заказчик) и истцом (истец) был заключен договор подряда №25/09/24/Р-2/НСК (далее по тексту — договор).

Истец выполнил все свои обязательства по договору и сдал выполненные работы своевременно и в полном объеме на сумму 4216608,10 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 20.11.2024, №2 от 20.12.2024, №3 от 20.01.2025, №4 от 20.02.2025.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

В соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора оплата подрядчику стоимости работ осуществляется за фактически выполненные работы в течении 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости по форме КС-3 и предъявления подрядчиком счета на оплату.

Подрядчик из суммы каждого платежа за выполненные работы оплачивает генподрядные услуги в размере 14% от стоимости выполненных работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В нарушение пункта 2 настоящего договора платежи в размере 3039586,58 рублей, внесены не были.

Согласно пункту 3.2.2. настоящего договора заказчик в течение пяти рабочих дней с момента своевременного получения документов, указанных в пункте 3.2.1. настоящего договора, рассматривает результаты и осуществляет приемку по договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в договоре.

Заказчик, при отсутствии претензий по объему и качеству выполненной работы, полученные документы подписывает и один подписанный экземпляр возвращает в адрес подрядчика. При наличии возражений по качеству, объему и/или стоимости выполненных работ, оформлению документов направляет подрядчику мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок и замечаний. В сроки, указанные заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных работ, подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки (дефекты). После устранения замечаний подрядчик в 2-хдневный срок письменно уведомляет заказчика о готовности передать работы и вновь представляет документы, предусмотренные пунктом 3.2.1 настоящего договора. Если подрядчик в установленный заказчиком срок не устранит недостатки, заказчик вправе не принять у подрядчика выполненный объем работ, а в случае если подрядчик предъявляет окончательный акт сдачи-приемки всех работ по договору, предъявить подрядчику требование о возмещении понесенных: убытков, уплате неустойки и (или) расторжении договора. 

Заказчик вправе при отсутствии полного комплекта первичных документов, предусмотренных пунктом 3.2.1. договора (счет, счет-фактура, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) отказать в их рассмотрении.

Ответчиком были приняты работы и подписаны следующие документы: счет-фактура, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В соответствии с пунктом 9.1. настоящего договора в случае нарушения предусмотренного договором срока оплаты за выполненные и принятые работы, заказчик уплачивает подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости не исполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 3 % от цены договора. Уплата пени производится только при условии направления подрядчиком письменного требования о ее уплате. Срок рассмотрения такого требования составляет Пять рабочих дней с момента его получения. При этом начисление суммы пени производится со дня нарушения договорных обязательств.

Сумма пени составляет: 126498,2 рублей расчет неустойки по договору выполнен в приложении к исковому заявлению.

Таким образом, на момент подачи искового заявления в Арбитражный суд ответчик имеет не исполненное обязательство перед истцом по оплате выполненных работ.

Общая сумма задолженности составила 3166 084,78 рублей.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте судебного разбирательства направил своего представителя в судебное заседание, который заявил о признании иска в полном объеме. 

Полномочия лица, заявившего о признании иска, соответствуют части 4 статьи 59, части 2 статьи 61, статье 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), оснований, предусмотренных частью 5 статьи 49 АПК РФ, препятствующих принятию признания ответчиком исковых требований в заявленной части, арбитражный суд не усматривает. 

В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ). 

Также, в соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. 

Согласно части 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. 

В соответствии с частью 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части судебного акта может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ). 

Признание иска не противоречит действующему законодательству, не нарушает права и интересы третьих лиц, поэтому, в соответствии со статьей 49 АПК РФ, суд принимает признание ответчиком уточненных исковых требований. 

Распределение судебных расходов производится по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина взыскивается пропорционально удовлетворенным требованиям. В связи с признанием ответчиком иска, истцу также возвращается из федерального бюджета 70% уплаченной государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РСС-Сервис НСК» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДеСтрой» (ОГРН 

<

***>) 2926282 рубля 96 копеек задолженности, 108788 рублей 48 копеек неустойки, 34816 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ДеСтрой» (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета Российской Федерации 85167 рублей государственной пошлины.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                        Е.Л. Серёдкина