РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 14 апреля 2025 года по делу А33-17108/2024 Красноярск  

«14» апреля 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Преображенский 9" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить следующие выявленные строительные недостатки многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>:  

1. Зачеканить примыкание лестницы к порогу/стене выхода на кровлю: подъезд № 1 -0,3м2; подъезд № 3 - 0,2м2; подъезд № 8 - 0,3м2.  

2. Окрасить ГКЛ: подъезд 1: помещение выхода на кровлю (торец лифт, шахты) - 1м2; между 1 и 2 этажами (лестничный марш между маршем и лифтовой шахтой) - 0,4 м2.  

3. Завершить отделку: подъезд 8 в помещении выхода на кровлю (торец лифтовой . шахты) - 0,6м2; 4-й этаж (холл, примыкание ревизионного люка к стене) - 0,001м2; подъезд 9 на 1-ом этаже (холл, дверной проём в колясочную) - 0,6м2.  

4. Устранить трещины штукатурно-окрасочного слоя на потолке у лестницы выхода на кровлю: подъезд № 1 - 4,7 мп; подъезд № 2 - 4,7 мп; подъезд № 3 - 4,7 мп.  

5. Устранить отслоение штукатурно-окрасочного слоя: подъезд № 5 2-й этаже на лестничном марше на стене под окном площадью до 0,20 кв.м, а также трещина с раскрытием до 1мм; подъезд № 6 2-й этаж на стене лестничного марша под окном площадью до 1,5 кв.м.  

6. Устранить сколы, неровности по периметру лифтовой шахты: подъезд № 2 (лестничный марш у выхода на кровлю) - 7,4 мп; подъезд № 4 (лестничный марш у выхода на кровлю) - 0,2 мп; подъезд № 6 (лестничный марш у выхода на кровлю) -4,72 мп.  

7. Зачеканить (заделать) отверстие (примыкание) стены лифтовой шахты к лестничному маршу подъезд № 9 на 9-м этаже (холл) - 0,01 м2.  

8. Завершить окраску стен: подъезд № 1 помещение выхода на кровлю - 0,7 м2 (примыкание вент.шахты к потолку, у перил); на 1-м этаже (тамбур со стороны улицы. Откос у дверей из лифтового холла на улицу) - 0,35 м2; подъезд № 3 между 8 и 9 этажами (лестничный марш по углу вентиляционной шахты) - 0,01 м2; на 8-м этаже (вход в мусорокамеру) - 0,04 м2; на 2-м этаже (вход в мусорокамеру) - 0,18 м2; подъезд № 4 на 3-м этаже (мусорокамера) - 0,5 м2; подъезд № 7 на 4-м этаже (холл. у ревизионного люка) - 0,1 м2; подъезд № с 9 на 1-м этаже (у ревизионного люка у входной двери) - 0,01 м2.  

9. Устранить неровности (шероховатость) отделки подъезд № 6: на 1-м этаже (холл, под линейным светильником) -1м2.  

10. Замазать серпянку (выступает из-под краски) подъезд № 7 на 7-м этаже (холл у ревизионного люка) - 0,01 м2; на 3-м этаже (холл, по периметру электрощита) -0,01 м2.  

11. Завершить декоративный слой окраски стен подъезд № 5 на 1 -м этаже (дверь тамбура выхода на улицу) - 3,43 м2; подъезд № 8 между 3 и 4 этажами (лестничный марш) - 0,02 м2.  

12. Устранить наплывы краски потолков на стены Подъезд 1 на 7-м этаже (холл) -0,01 м2 (над электрическим щитом).  

13. Устранить пятна от краски стен на потолке подъезд № 2 - выход на кровлю - 1,5 м2; подъезд № 3 между 6 и 7 этажами (лестничный марш) - 0,02 м2.  

14. Очистить розетки, выключатели, светильники от краски стен: подъезд № 1 с 1-го по 9-й этажи - 0,2 м2; подъезд № 2 с 1-го по 9-й этажи - 0,01 м2; подъезд № 4 на 1-м этаже - 0,001 м2; подъезд № 6 на 1-м этаже (холл) - 0,003 м2.  

15. Очистить двери в тамбур от краски: подъезд № 4 на 1-м этаже - 0,5 м2; подъезд № 7 на 1-м этаже (тамбур выхода на улицу) - 0,3 м2.  

16. Завершить отделку примыкания дверного блока к стене подъезд № 5 на 1-м этаже (дверь тамбура выхода на улицу) - 3,43 мп; подъезд № 7 на 1-м этаже (дверь тамбура выхода на улицу) - 7,6 мп; подъезд № 8 на 1-м этаже (тамбур выхода на улицу) -10,8 мп.  

17. Демонтировать плёнку с вентиляционного отверстия в стене: подъезд № 1 помещение выхода на кровлю - 0,09 м2; подъезд № 4 помещение выхода на кровлю -0,09 м2; подъезд № 5 помещение выхода на кровлю - 0,09м2.  

18. Выполнить частично отсутствующую затирку по керамической плитке: подъезд № 1 на 2- этаже (мусорокамера по торцу проёма) - 0,5 мп; подъезд № 2 на 6-м этаже (холл. у лифта) - 1,5 мп; на 6-м этаже (мусорокамера )- 4,0 мп; между 5 и 6 этажами (лестничный марш) - 1,0 мп; на 3-м этаже (мусорокамера) - 1,5 мп; подъезд № 4 на 3-м этаже (мусорокамера у ствола мусоропровода) - 0,5 мп; на 2-м этаже (мусорокамера) - 0,5 мп; на 1-м этаже (колясочная) -1,5 мп; подъезд № 5 на 8-м этаже (мусорокамера, холл) - 15 мп; подъезд № 7 на 7-м этаже (холл, у входа в лифт) - 0,8 мп.  

19. Выполнить частично отсутствующую затирку по керамическому плинтусу: подъезд № 1 помещение выхода на кровлю - 0,3 мп; на 3-м этаже (холл) -1,5 мп; на 2-м этаже (холл) - 1,5 мп; подъезд № 2 с 1-го по 9-й этажи (лестничный марш) - 2,0 мп по плинтусу у ступеней лестничного марша; между 5 и 6 этажами (лестничный марш) -0,5 мп.  

20. Устранить строительную смесь на ступенях лестничного марша подъезд № 1 помещение выхода на кровлю - 0,2 м2.  

21. Устранить строительную смесь, краску на ограждениях лестничного марша: подъезд № 1 с 1-го по 9-й этажи; подъезд № 2 с 1-го по 9-й этажи; подъезд № 3 с 1-го по 9-й этажи; подъезд № 4 с 1-го по 8-й этажи; подъезд № 5 с 1-го по 8-й этажи; подъезд № 6 с 1-го по 8-й этажи; подъезд № 7 с 1-го по 7-й этажи; подъезд № 8 с 1-го по 7-й этажи; подъезд № 9 с 1-го по 9-й этажи. Очистить керамическую плитку от затирки: подъезд № 1 на 9-м этаже (мусорокамера) -16 м2; на 8-м этаже (мусорокамера) - 16 м2; на 7-м этаже (у лифта) - 0,5 м2; на 7-м этаже (мусорокамера) - 2 м2; на 1-м этаже (холл у лифта) - 5,6 м2; на 1-м этаже (колясочная) - 10,4 м2.  

22. Очистить керамический плинтус от краски: подъезд № 1 на 3-м этаже (холл) - 0,01 м2; подъезд № 6 на 6-м этаже (холл) - 0,01 м2; на 1-м этаже (холл) -0,1 м2; на 1-м этаже (тамбур с улицы) - 0,01 м2; подъезд № 9 на 1-м этаже (холл) -0,1 м2.  

23. Устранить следы замачивания на потолочной плитке «армстронг» 0,6* 1,2м: подъезд № 1 на 9-м этаже (холл) - 2 шт; на 9-м этаже (мусорокамера) - 2 шт; на 6-м этаже (мусорокамера) - 1 шт; подъезд № 2 на 9-м этаже (холл) - 2 шт; на 9-м этаже (мусорокамера) - 5 шт; на 8-м этаже (мусорокамера) - 1 шт; подъезд № 3 на 3-м этаже (мусорокамера) - 1 шт; подъезд № 4 на 7-м этаже (мусорокамера) -1 шт; на 4-м этаже (мусорокамера) - 2 шт; на 3-м этаже (мусорокамера) - 1 шт; подъезд № 6 на 8-м этаже (холл) - 1шт; подъезд № 7 на 6-м этаже (мусорокамера)-1шт; подъезд № 8 на 2-м этаже (холл) - 1 шт; подъезд № 9 на 8-м этаже (мусорокамера) - 1шт.  

24. Устранить механические повреждения на потолочной плитке «армстронг» 0,6* 1,2м: подъезд № 1 на 9-м этаже (холл) - 1 шт; на 2-м этаже (холл) - 2 шт; подъезд № 2 на 3-м этаже  

(холл) - 4 шт; на 2-м этаже (холл) - 2 шт; подъезд № 3 на 4-м этаже (у входа в мусорокамеру) - 1 шт; на 3-м этаже (холл) - 2 шт; подъезд № 4 на 7-м этаже (холл)  

- 8 шт. (на 7штуках пятна); на 6-м этаже (холл у кв.111) - 1 шт. (выгнута); на 5-м этаже (холл) - 1 шт; подъезд № 5 этаж 8 (холл) - 4 шт; этаж 7 (холл) - 1 шт; этаж 6 (холл) - 3 шт; этаж 5 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 2 (мусорокамера) - 2 шт; подъезд № 6 этаж 8 (холл) - 3 шт; этаж 6 (холл) - 2 шт; этаж 5 (холл) - 1 шт; этаж 4 (холл) -1 шт; этаж З(холл) - 2 шт; этаж 2 (холл) - 2 шт; подъезд № 7 этаж 2 (холл) - 4 шт; подъезд № 8: этаж 2 (холл) - 2 шт; подъезд № 9 этаж 5 (холл) - 1 шт; этаж З(холл) - 2 шт; этаж 2 (холл) - 3 шт.  

25. Устранить следы краски на потолочной плитке «армстронг»: подъезд 1 этаж 5 (холл) 

- 2 шт; подъезд 2 этаж 8 (холл) - 2шт; подъезд 4 этаж 6 (холл) - 1 шт; этаж 4 (холл) -1 шт; подъезд 5 этаж 2 (у входа в мусорокамеру) - 2 шт; подъезд 8 этаж 3 (холл) - 1 шт.  

26. Устранить следы замачивания на потолке по ГКЛ подъезд 6 этаж 1 (холл) - 0,1 м2. 

27. Устранить отслоение шпатлевки по примыканию витража к стене (шпатлевка нанесена поверх плёнки): Подъезд 1 этаж с 1 по 9; Подъезд 2 этаж с 1 по 9; Подъезд 3 этаж с 1 по 9; Подъезд 4 этаж с 1 по 8; Подъезд 5 этаж с 1 по 8; Подъезд 6 этаж с 1 по 8; Подъезд 7 этаж с 1 по 7; Подъезд 8 этаж с 1 по 7; Подъезд 9 этаж с 1 по 9.  

28. Очистить пол от строительной смеси: Подъезд 1 этаж 9(мусорокамера) - 2,7 м2; этаж 8 (мусорокамера) - 2,7 м2; этаж 7 (мусорокамера) - 2,7 м2; этаж 5 (мусорокамера) - 2,7 м2; этаж 2 (холл) - 2м2; Подъезд 7 этаж 7 (мусорокамера) - 0,2 м2.  

29. Устранить отслоение перфорированного уголка на вентиляционной шахте: Подъезд 1 между 6 и 7 этажами (лестничный марш) - 2,9 мп; между 5 и 6 этажами (лестничный марш) - 1,27 мп.  

30. Приклеить керамическую плитку: Подъезд 2 этаж 9 (мусорокамера у стояков водоснабжения ЗУМ) - 1 шт; Подъезд 8 выход на кровлю - (у лифтовой шахты) - 1 шт.  

31. Устранить механическое повреждение керамической плитки: Подъезд 2 этаж 2 (мусорокамера) - 0,4*0,4м - 1 шт; Подъезд 4 этаж 6 ( мусорокамера) - 0,4*0,4м - 1 шт; Подъезд 9 этаж 1 (колясочная) - 0,4*0,4м - 1 шт.  

32. Устранить механическое повреждение керамического плинтуса: Подъезд 3 этаж 1 (тамбур во двор) - 0,05 мп.  

33. Обрезать керамическую плитку по проему: Подъезд 1 этаж 6 (мусорокамера) - 1 мп. 

34. Обрезать керамический плинтус: Подъезд 2 (лестничный марш . перед выходом на кровлю) - 0,1 мп.  

35. Приклеить керамический плинтус: Подъезд 2 (лестничный марш перед выходом на кровлю) - 0,1 мп; этаж 9 (холл у кв.63) - 0,5 мп; этаж 1 (тамбур во двор) - 0,4 мп; Подъезд 4: этаж 1 (у двери выхода на улицу) - 0,1 мп; Подъезд 5 этаж 1 (у двери выхода на улицу) - 0,4 мп; (у двери выхода во двор) - 0,9 мп; Подъезд 6 между 3 и 4 этажами (лестничный марш) - 0,07 мп; Подъезд 7 этаж 1 (тамбур выхода на улицу) - 0,1 мп; Подъезд 8 выход на кровлю (торец лифт шахты) - 0,4 мп; этаж 1 (у входной двери с улицы) - 0,1 мп; Подъезд 9 этаж 8 (мусорокамера) - 0,4 мп; этаж 1 (колясочная) - 0,4 мп.  

36. Устранить следы краски стен/строительной смеси на щите: Подъезд 1 этаж 5(холл, ниша отопления) - 0,01 м2; Подъезд 2 этаж 4 (холл. эл. щит) - 0,5 м2; Подъезд 4 этаж 6 (холл, электрический щит) - 0,01 м2; этаж 3 (холл, щит отопления) - 0,01 м2; Подъезд 6 этаж 6 (холл, щит электрики, отопления, ГВС, ХВС) - 0,01 м2; Подъезд 7 этаж 6 (холл, щит отопления) - 0,001 м2; Подъезд 9 этаж 4 (холл, щит отопления) -0,001 м2.  

37. Устранить скол, механическое повреждение, отверстие по ГКЛ Подъезд 1 этаж 5 (холл, потолок) - 0,002 м2; Подъезд 4 этаж 5 (холл, потолок)- 0,01 м2; Подъезд 5 этаж 1 (холл) - 0,002 м2; Подъезд 7 этаж 7 (холл, над входом в лифт) - 0,001 м2; Подъезд 8 этаж 7 (холл, у ревизионного люка) - 0,001 м2; этаж 1 (холл) - 0,002 м2.  

38. Устранить «Заплатку» (заклеено отверстие) на потолке по ГКЛ: Подъезд 6 этаж 1 (холл) - 1 шт; этаж 1 (тамбур выхода на улицу) - 1 шт; Подъезд 7 этаж 1 (холл) - 1 шт; Подъезд 8 этаж 1 (холл) - 2 шт; этаж 1 (тамбур выхода на улицу) - 2 шт; Подъезд 9 этаж 1 (холл) - 2 шт.  

39. Устранить отслоение краски стен: Подъезд 1 между 4 и 5 этажами (лестничный марш у шахты лифта) - 0,01 м2; Подъезд 2 между 4 и 5 этажами (лестничный марш у шахты лифта) - 0,01 м2 нитевидная в виде трещины; Подъезд 3 этаж 3 (холл, вход в мусорокамеру у выключателя) - 0,01 м2; Подъезд 4 этаж 1 (проём выхода на улицу) - 1,5 м2; Подъезд 6 этаж 8 (лестничный марш) - механическое повреждение - 0,001 м2; Подъезд 8 между 4 и 5 этажами (лестничный марш) - механическое повреждение на шахте лифта - 0,001 м2.  

40. Устранить отслоение краски потолков: подъезд 5 выход на кровлю - 0,05 м2. 

41. Устранить следы инструмента на потолке: Подъезд 1 этаж 1 (холл, у люстры) - 0,01 м2.  

42. Демонтировать малярный скотч с 1-го по 9-1 подъезды. 

43. Устранить зазоры (завершить отделку) между F-профилем и стеной у входной двери: подъезд 8 этаж 1 (холл) 0 0,01 м2.  

44. Закрыть отверстие в кладке стены: Подъезд 1 этаж 1 (холл) - 0,09 м2; Подъезд 2 этаж 1 (колясочная) - 0,06 м2; Подъезд 3 этаж 4 (мусорокамера) - 0,023 м2; Подъезд 5 этаж 1 (холл) - 0,05 м2; Подъезд 6 этаж 1 (холл) - 0,075 м2; Подъезд 8 этаж 1 (тамбур выхода во двор) - 0,05 м2.  

45. Закрыть отверстие (щель/зазор) между потолочным профилем и стеной: подъезд 9 этаж 1 (колясочная) - 0,01 м2.  

46. Окрасить сварочный шов перил: Подъезд 1 между 1 и 2 этажами (лестничный марш) - 0,001 м2. 

47. Зачеканить полностью, либо зачеканить монтажную пена проходок труб: Подъезд 2 этаж 1 (канализация) - 1 шт; Подъезд 3 этаж 1 (водоснабжение, вентиляция) - 3 шт; Подъезд 4 выход на кровлю (вентиляция) - 1 шт; этаж 8 (мусорокамера) - 2 шт; этаж 7 (мусорокамера) - 2 шт; этаж б(мусорокамера) - 2 шт; этаж 5 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 4 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 3 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 1 (тамбур во двор) -1 шт; Подъезд 5 между 4 и 5 этажами (лестничный марш проходка труб отопления) -1 шт; Подъезд 8 лестничный марш выхода на кровлю - 1 шт.; этаж 6 (мусорокамера)  

- 1 шт; этаж 1 (тамбур выхода во двор) - 2 шт. 

48. Очистить трубы отопления на лестничном марше от краски: Подъезд 8 между 3 и 4 этажами (лестничный марш) - 0,5м2; Подъезд 9 между 7 и 8 этажами (лестничный марш) - 0,5 м2.  

49. Закрепить декоративную планку ступеней: Подъезд 9 между 1 и 2 этажами (лестничный марш) - 8 мп.  

50. Заменить светильники: подъезд 1: помещение выхода на кровлю этаж 9 - 1 шт; этаж 9 (холл) - 3 шт; между 8 и 9 этажами (лестничный марш) - 3 шт; этаж 8 (холл) - 4 шт; этаж 7 (холл) - 4 шт; этаж 6 (холл) - 4 шт; этаж 5 (холл) - 5 шт; этаж 4 (холл) - 4 шт; этаж 3 (холл) - 3 шт; этаж 2 (холл) - 2 шт + 1 шт линейный; подъезд 2 этаж 9 (холл) -1 шт; подъезд 4 выход на кровлю -1 шт; лестничный марш выхода на кровлю  

- 1 шт; этаж 1 (черные светильники в тамбуре) - 1 шт; подъезд 6 лестничный марш перед выходом на кровлю - 1 шт; этаж 8 (холл) - 1 шт; этаж 7 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 6 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 3 (мусорокамера) - 1 шт; подъезд 7 между 6 и 7 этажами (лестничный марш) - 1 шт; между 5 и 6 этажами (лестничный марш) - 1 шт; между 4 и 5 этажами (лестничный марш) - 1 шт; между 3 и 4 этажами (лестничный марш) - 1 шт; между 2 и 3 этажами (лестничный марш) - 1 шт; между 1 и 2 этажами (лестничный марш) - 1шт; подъезд 8 выход на кровлю - 3 шт; этаж 7 (мусорокамера)  

- 1 шт; этаж 6 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 5 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 4 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 3 (мусорокамера) - 1 шт.  

51. Закрепить светильник подъезд 6 этаж 6 (холл, над лифтом) - 3 шт. 52. Подключить светильник подъезд 6 этаж 4 (мусорокамера) - 1 шт.  

53. Установить декоративную накладку на светильнике: подъезд 1 этаж 9 (холл) - 1 шт; этаж 9 (межквартирный коридор) - 1 шт; этаж 7 (холл) - 2 шт; этаж 5 (холл) - 1 шт; этаж 1 (холл) - 1 шт; подъезд 2 этаж 6 (холл) - 1 шт; этаж 4 (холл) - 1 шт; подъезд 3 помещение  

выхода на кровлю - 1 шт; этаж 4 (мусорокамера) - 1 шт; подъезд 4 лестничный марш выхода на кровлю - 1 шт; подъезд 6 этаж 4 (мусорокамера) - 1 шт; подъезд 7 между 2 и 3 этажами (лестничный марш) - 1 шт; подъезд 8 этаж 7 (холл) -1 шт; этаж 3 (мусорокамера) -1 шт; между 1 и 2 этажами (лестничный марш) - 1 шт.  

54. Установить защитное стекло/пластик на светильнике: подъезд 6 этаж 2 (мусорокамера) - 1 шт; подъезд 8 между 1 и 2 этажами (лестничный марш) - 1 шт.  

55. Установить крышку распределительной коробки: подъезд 1 этаж 9 (холл) - 1 шт; этаж 1 (холл) - 1 шт; этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 1 шт; подъезд 2 этаж 8 (холл) - 1 шт; между 3 и 4 этажами (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт; между 1 и 2 этажами (лестничный марш) - 1 шт; этаж 1 (холл) - 1 шт; подъезд 3 этаж 1 (холл) - 1 шт; подъезд 5 этаж 8 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 7 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 6 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 4 (мусорокамера) - 1 шт; между 1 и 2 этажами (лестничный марш) - 1 шт; подъезд 9 этаж 9 (холл) - 1 шт.  

56. Закрепить крышку распределительной коробки подъезд 3 этаж 9 (мусорокамера) - 1 шт. 

57. Установить в электрическом щите защитную металлическую планку/крышку автоматических выключателей подъезд 1 этаж 9 (холл) - 1 шт.  

58. Выполнить заземление дверцы эл. щита: подъезд 1 этаж 9 (холл) - 1 шт; этаж 8 (холл) -2 шт; этаж 7 (холл) - 2 шт; эт. 6 (холл) - 2 шт; этаж 3 (холл) - 2 шт; этаж 2 (холл) - 2 шт; подъезд 2 этаж 9 (холл) - 3 шт; этаж 8 (холл) - 3 шт; этаж 7 (холл) - 3 шт; этаж 6 (холл) - 3 шт; этаж 5 (холл) - 3 шт; этаж 4 (холл) - 3 шт; этаж 3 (холл) - 3 шт; этаж 2 (холл) - 3 шт.  

59. Подключить ЗУМ (не подведён кабель) подъезд 1 этаж 9 (мусорокамера) - 1 шт. 

60. Завести кабель для ЗУМ в гофру подъезд 3 этаж 9 (мусорокамера) - 1,5 мп.  

61. Закрепить розетку/выключатель подъезд 1 этаж 1 (холл) -1 шт; подъезд 6 этаж 7 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 5 (холл) - 1 шт; этаж 4 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 3 (мусорокамера) -1 шт.  

62. Установить розетку подъезд 6 этаж 6 (мусорокамера) - 1 шт; этаж 2 (мусорокамера) - 1 шт; подъезд 8 выход на кровлю - 1 шт; этаж 6 (мусорокамера) - 1 шт.  

63. Устранить свисание провода из-под плитки «армстронг» над лифтом подъезд 8 этаж 7 (холл) - 4 шт.  

64. Установить декоративные накладки на фурнитуру створок, заглушки на торцы подоконников: подъезд 1 этажи с 1-го по 9-й; подъезд 2 этажи с 1-го по 9-й; подъезд 3 этажи с 1-го по 9-й; подъезд 4 этаж с 1-го по 8-й; подъезд 5 этажи с 1-го по 8-й; подъезд 6 этажи с 1-го по 8-й; подъезд 7 этажи с 1-го по 7-й; подъезд 8 этажи с 1-го по 7-й; подъезд 9 этажи с 1-го по 9-й.  

65. Выполнить регулировку створки на витраже: подъезд 1 этажи со 2-го по 9-й - 7 шт; подъезд 2 этажи со 2-го по 9-й - 8 шт; подъезд 3 этажи со 2-го по 9-й - 7 шт; подъезд 4 этажи со 2-го по 8-й - 7 шт; подъезд 5 этажи со 2-го по 8-й - 6 шт; подъезд 6 этажи со 2-го по 8-й - 6 шт; подъезд 7 этажи со 2-го по 7-й - 5 шт; подъезд 8 этажи со 2-го по 7-й - 5 шт; подъезд 9 этажи со 2-го по 9-й - 7 шт.  

66. Демонтировать плёнку со створок витражного остекления: подъезд 1 этажи с 1-го по 9-й; подъезд 2 этажи с 1-го по 9-й; подъезд 3 этажи с 1-го по 9-й; подъезд 4 этажи с 1-го по 8-й; подъезд 5 этажи с 1-го по 8-й; подъезд 6 этажи с 1-го по 8-й; подъезд 7 этажи с 1-го по 7-й; подъезд 8 этажи с 1-го по 7-й; подъезд 9 этажи с 1-го по 9-й.  

67. Очистить витраж от краски, строительной смеси: подъезд 1 этаж с 1-го по 9-й; подъезд 2 этажи с 1-го по 9-й; подъезд 3 этажи с 1-го по 9-й; подъезд 4 этаж с 1-го по 8-й; подъезд 5 этаж с 1-го по 8-й; подъезд 6 этаж с 1-го по 8-й; подъезд 7 этажи с 1-го по 7-й; подъезд 8 этажи с 1-го по 7-й; подъезд 9 этажи с 1-го по 9-й.  

68. Заменить стеклопакеты: подъезд 1 между 6 и 7 этажами (лестничный марш) 834*1114 мм - 1 шт; подъезд 2 (лестничный марш перед выходом на кровлю) 1000*833мм - 1 шт; между 4 и 5 этажами (лестничный марш) 816*1781 мм - 1 шт; подъезд 3 между 6 и 7 этажами (лестничный марш) 864* 1164 мм - 1 шт; между 3 и 4 этажами (лестничный марш)  

834*1114мм - 1 шт, 1086*1786мм - 1 шт; между 2 и 3 этажами (лестничный марш)- 0,76*1,7 м - 1 шт, 1,06*1,7 м - 1 шт; подъезд 5 между 7 и 8 этажами (лестничный марш) 806* 1326мм - 1 шт; между 5 и 6 этажами (лестничный марш) 796*1336 мм -1 шт; 1060* 1744мм - 1 шт; подъезд 7 лестничный марш перед выходом на кровлю 800* 1220мм - 1 шт; Подъезд 8 между 3 и 4 этажами (лестничный марш) 760*1310 мм - 1 шт; между 2 и 3 этажами (лестничный марш) 1336*776 мм - 1 шт; Подъезд 9 между 8 и 9 этажами (лестничный марш) 816*1436 мм - 1 шт; между 6 и 7 этажами (лестничный марш) 816* 1761мм - 1 шт; между 5 и 6 этажами (лестничный марш) 1086*1781 мм - 1 шт.  

69. Заменить подоконную доску: подъезд 1 между 1 и 2 этажами (лестничный марш) 2*0,4 м - 1 шт.  

70. Заполнить примыкание подоконной доски к откосу (либо короткая подоконная доска): Подъезд 5 между 7 и 8 этажами (лестничный марш) - 0,3 мп.  

71. Установить штапики на створке: подъезд 4 лестничный марш перед выходом на кровлю - 1,64 мп; между 7 и 8 этажами - 1,74 мп.  

72. Установить заглушки на регуляторе перепада давления (балансировочный клапан): подъезд 1 этажи со 2-го по 9-й (холл) - 8 шт; подъезд 2 этажи со 2-го по 9-й (холл) -8 шт; подъезд 3 этажи со 2-го по 9-й (холл ) - 8 шт; подъезд 4 этажи со 2-го по 8-й (холл) - 7 шт; подъезд 5 этажи со 2-го по 8-й (холл) - 7 шт; подъезд 6 этажи со 2-го по 8-й (холл) - 7 шт; подъезд 7 этажи со 2-го по 7-й (холл) - 6 шт; подъезд 8 этажи со 2-го по 7-й (холл) - 6 шт; подъезд 9 этажи со 2-го по 9-й (холл) - 8 шт.  

73. Развернуть балансировочный клапан в нише ГВС, ХВС (развернуть от стены), организовать к нему доступ: подъезд 1 этаж 2 (холл, повернут к стене) - 1 шт; подъезд 2 этаж 3 (холл, прибор учета кв.39 закрыт стойкой) - 1 шт.  

74. Развернуть приборы учета отопления (организовать доступ для снятия показаний): подъезд 3 этаж 9 (ниша отопления) - 4 шт; этаж 7 (ниша отопления) - 4 шт; этаж 6 (ниша отопления) - 4 шт; подъезд 4 этажи со 2-го по 8-й (ниша отопления) - 28 шт; подъезд 8 этаж 6 (ниша отопления) - 2 шт; этаж 3 (ниша отопления) - 1 шт; этаж 2 (ниша отопления) - 2 шт; подъезд 9 этажи со 2-го по 9-й (ниша отопления) - по 4 шт.  

75. Установить приборы учета отопления: подъезд 7 этаж 6 (ниша отопления) - 4 шт. 

76. Срезать гильзы проходок: подъезд 8 лестничный марш перед выходом на кровлю -2 шт.  

77. Установить сборку на ХВС подъезд 9 холл, ниша ГВС, ХВС - 1 шт. 

78. Выполнить регулировку двери тамбура: подъезд 1 этаж 1 (тамбур со стороны двора дверь в лифтовой холл) - 1 hit; этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 3 шт; подъезд 3 этаж 1 (тамбур выхода на улицу) - 1 шт; подъезд 4 этаж 1 (тамбур выхода на улицу)  

- 2 шт; этаж 1 (тамбур выхода во двор) - 1 шт; подъезд 5 этаж 1 (тамбур выхода на улицу) - 1 шт; Подъезд 6 этаж 1 (тамбур выхода на улицу) - 1 шт; подъезд 7 этаж 1 (из лифт, холла в тамбур выхода во двор) - 1 шт; подъезд 8 этаж 1 (тамбур выхода во двор) - 2 шт.  

79. Установить нащельник по примыканию дверного блока к стене подъезд 2 этаж 1 (тамбур 1 с улицы) - 3,7 мп.  

80. Установить доводчик подъезд 1 этаж 1 (тамбур со стороны двора) - 1 шт.  

81. Демонтировать плёнку с входных дверей подъезд 1 этаж 1 (тамбур со стороны двора)  

- 0,3 м2. 

82. Заменить стеклопакет двери: подъезд 3 этаж 1 (тамбур на улицу) 1424*750 мм - 1 шт; подъезд 8 этаж 1 (тамбур во двор) 720* 1390мм - 1 шт.  

83. Закрепить порог двери: подъезд 1 этаж 1 (тамбур со стороны двора) - 1 мп; подъезд 2 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 2 мп; этаж 1 (тамбур со стороны двора) - 1 мп; подъезд 3 этаж 1 (тамбур со стороны двора) - 1 мп; подъезд 4 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 2 мп; подъезд 5 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 1 мп; этаж 1 (тамбур со стороны двора) - 1 мп; подъезд 6 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 2 мп; подъезд 7 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 2 мп; этаж 1 (тамбур выхода во двор) - 1 мп; подъезд 8 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 2 мп; эт.1 (тамбур со стороны улицы) - 1 мп.  

84. Установить ответные планки ригелей малой створки: подъезд 5 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 2 шт (2 двери); подъезд 7 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 2 шт (2 двери); подъезд 8 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 3 шт; подъезд 9: этаж 1 (входные двери) - по 1 шт.  

85. Установить заглушки на шарнирах дверей: подъезд 7 этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 2шт (2 двери).  

86. Установить в дверцах эл. щита замки (личинки): подъезд 1 этаж 8 (холл)- 2 шт; этаж 7 (холл) - 1 шт; этаж 6 (холл) - 1 шт; этаж 5 (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт; подъезд 2 этаж 6 (холл) - 1 шт; подъезд 3 этаж 6 (холл) - 1 шт; подъезд 4 этаж 8 (холл) - 2 шт; этаж 6 (холл) - 1 шт; этаж 3 (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт; подъезд  

5 этаж 8 (холл) - 2 шт; этаж 7 (холл) - 1 шт; этаж 6 (холл) - 1 шт; этаж 3 (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 2 шт; подъезд 6 этаж 8 (холл) - 2 шт; этаж 7 (холл) - 4 шт; этаж 3 (холл) - 3 шт; этаж 2 (холл) - 2 шт; подъезд 7 этаж 7 (холл) - 1 шт; этаж 6 (холл) - 1 шт; этаж 5 (холл) - 2 шт; этаж 4 (холл) - 2 шт; этаж 3 (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт; подъезд 8 этаж 5 (холл) - 1 шт; этаж 3 (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт; подъезд 9 этаж 6 (холл) - 1 шт; этаж 5 (холл) - 2 шт; этаж 3 (холл) - 2 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт.  

87. Установить уплотнительную резинку на клапане мусоропровода: подъезд 1 этаж 8 (мусорокамера) - 1,4 мп; этаж 7 (мусорокамера) - 1,4 мп; этаж 6 (мусорокамера) - 1,4 мп; этаж 5 (мусорокамера) - 1,4 мп; этаж 4 (мусорокамера) - 1,4 мп; подъезд 7 этаж 6 (мусорокамера) - 1,4 мп; этаж 5 (мусорокамера) - 1,4 мп; этаж 4 (мусорокамера) - 1,4 мп; этаж 3 (мусорокамера) - 1,4 мп.  

88. Демонтировать плёнку с дверей лифта: подъезд 1 этажи с 1-го по 9-й (холл) - по 2 м2; подъезд 3 этаж 1 (холл) -2м2; подъезд 4 этаж 5 (холл) -2м2; этаж 4 (холл) - 2 м2; этаж 3 (холл) - 2 м2; этаж 2 (холл) - 2 м2; этаж 1 (холл) - 2 м2; подъезд 5 этажи с 1-го по 8-й (холл) - по 2 м2; подъезд 6 этажи с 1-го по 8-й (холл) - по 2 м2; подъезд 8 этажи с 1-го по 7-й (холл) - по 2 м2; подъезд 9 этажи с 1-го по 9-й (холл) - по 2 м2.  

89. Установить ревизионный пластиковый люк: подъезд 1 этаж 9 (холл) - 1 шт; этаж 7 (холл) - 1 шт; этаж 4 (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт; этаж 1 (холл) - 2 шт; этаж 1 (тамбур со стороны улицы) - 1 шт; подъезд 2 этаж 4 (холл) - 1 шт; этаж 1 (холл) - 1 шт; подъезд 3 этаж 4 (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт; этаж 1 (холл, потолок) - 2 шт; подъезд 4 этаж 1 (холл) - 2 шт; подъезд 5 этаж 8 (холл) - 1 шт; этаж 6 (холл) - 1 шт; этаж 2 (холл) - 1 шт; этаж 1 (холл) - 2 шт; подъезд 6 этаж 4 (холл) - 1 шт.  

90. Установить ревизионный люк по размеру: подъезд 8 этаж 2 (холл) - 1 шт. 

91. Устранить отслоение краски с дверец ниш. (дверцы ниши цепляют раму в местах шарниров, коррозия): подъезд 1 этаж 7 (ниша отопления) - 0,001 м2; этаж 7 (ниша ГВС, ХВС) - 0,001 м2; этаж 6 (эл. ниша) - 0,01 м2; этаж 4 (ниша ГВС, ХВС) - 0,01 м2; этаж 4 (ниша отопления) - 0,01 м2; подъезд 2 этаж 6 (ниша ГВС, ХВС) - 0,001 м2; этаж  

6 (ниша отопления) - 0,001 м2; этаж 2 (ниша отопления) - 0,001 м2; подъезд 3 этаж 9 (ниша отопления) - 0,01 м2; этаж 9 (ниша ГВС,ХВС) - 0,01 м2; этаж 4 (ниша ГВС,ХВС) - 0,01 м2; подъезд 4 этаж 3 (ниша отопления) - 0,01 м2; подъезд 5 этаж 7 (ниша отопления) - 0,001 м2; этаж 6 (ниша отопления) - 0,001 м2; этаж 5 (ниша ГВС, ХВС) -0,001 м2; этаж 4 (ниша ГВС, ХВС) - 0,001 м2; этаж 4 (ниша отопления) - 0,001 м2; этаж 3 (ниша ГВС, ХВС) - 0,001 м2; подъезд 6 этаж 8 (ниша ГВС, ХВС) - 0,001 м2; этаж 7 (ниша ГВС, ХВС) - 0,001 м2; этаж 4 (ниша ГВС, ХВС) - 0,01 м2; этаж 3 (ниша ГВС, ХВС, отопление) - 0,02 м2; подъезд 8 этаж 4 (ниша ГВС, ХВС) - 0,001 м2.  

92. Установить наклейки с обозначением номеров квартир на приборах учёта в эл. щите: подъезд 1 этаж 9 (холл) - 4 шт; этаж 5 (холл) - 4 шт; этаж 4 (холл) - 4 шт; этаж 3 (холл) - 4 шт; подъезд 4 этаж 2 (холл) - 4 шт; подъезд 5 этаж 2 (холл) - 2 шт; подъезд 6 этаж З(холл) - 4 шт; этаж 2 (холл) - 4 шт; подъезд 7 этаж 5 (холл) - 4 шт; этаж 3 (холл) - 4 шт; этаж 2 (холл) - 4 шт.  

93. Установить пластиковое смотровое окошко в эл. щите: подъезд 1 этаж 9 (холл) - 4шт; этаж 8 (холл) - 4 шт; этаж 7 (холл) - 2 шт; подъезд 2 этаж 8 (холл) - 1 шт; подъезд 3 этаж 5 (холл) - 1 шт; подъезд 7 этаж 7(холл) - 1 шт.  

94. Установить пластиковые заглушки у автоматов в эл. щите: подъезд 2 этаж 9 (холл) - 4 шт; подъезд 3 этаж 9 (холл) - 4 шт; этаж 8 (холл) - 4 шт.  

95. Установить ограждения у лестницы выхода на кровлю не менее 0,9 м: подъезд 1 (Ь.факт = 0,67 м) -1,3 мп; Подъезд 3 (Ь.факт = 0,6 м) -1,6 мп; подъезд 5 (Ь.факт = 0,67 м) - 1,35 мп; подъезд 7 (Ь.факт = 0,66 м) - 1,3 мп; подъезд 8 (Ь.факт = 0,73 м) - 1,28 мп.  

96. Установить ручку в двери выхода на кровлю подъезд 7-1 шт; Подъезд 8 - 1 шт.  

97. Закрепить к стене щит: подъезд 1 этаж 7 (холл. эл. щит) - 1 шт; этаж 3 (холл щит ГВС, ХВС) - 1 шт; подъезд 2 этаж 6 (холл, щит отопления) - 1 шт; этаж 5 (холл. эл. щит) - 1 шт; этаж 4 (щит ГВС, ХВС) - 1 шт; этаж 2 (щит ГВС, ХВС) - 1 шт; подъезд 4 этаж 6 (холл, щит ГВС, ХВС) - 1 шт; подъезд 7 этаж 6 (холл, щит ГВС, ХВС) - 1 шт; этаж 3 (холл, щит ГВС, ХВС) - 1 шт; подъезд 9 этаж 8 (холл, щит ГВС, ХВС) - 1 шт; этаж 2 (холл, щит ГВС, ХВС) - 1 шт.  

98. Закрепить ревизионный люк: подъезд 7 этаж 7 (холл) - 1 шт; этаж 4 (холл) - 1 шт; подъезд 9 этаж 9 (холл) - 1 шт.  

99. Заменить дверцу щита: подъезд 1 этаж 5 (холл, эл.щит) - 1 шт; подъезд 6 этаж 8 (холл, эл.щит) - 1 шт; подъезд 8 этаж 3 (холл, эл.щит) - 1 шт; подъезд 9 этаж 3 (холл, ниша отопления) - 1 шт.  

100. Заменить шарнир на двери щита подъезд 8 этаж 2 (холл, щит отопления) - 1 шт. 

101. Срезать арматуру/шпильки: подъезд 1 между 5 и 6 этажами (торец лестничного марша) - 1 шт; подъезд 4 этаж 8 (напротив кв.119) - 1 шт; подъезд 7 помещение выхода на кровлю (над отверстием вентиляции) - 1 шт.  

102. становить нумерацию квартир и этажей (навигацию) с 1-го по 9-й подъезды.  

103. Установить декоративную решетку радиатора в стене: подъезд 1 этаж 1 (холл) 1,5* 0,6 м - 1шт.; подъезд 8 этаж 1 (тамбур выхода на улицу) 1,26 * 0,6 м - 1 шт.  

104. Установить ограждение между металлической лестницей выхода на кровлю и лифтовой шахтой подъезд 2, подъезд 6.  

105. Установить личинку в замке двери выхода на кровлю: подъезд 9 выход на кровлю - 1 шт.  

106. Убрать из холла железобетонные перемычки подъезд 9 этаж 8 холл - 2 шт.  

107. Перенести возле парковочных мест № 14, 38, 51, 68, 97, 98 на подземной автостоянке установленные пожарные шкафы для размещения пожарных кранов и первичных средств пожаротушения в целях исключения ограничения доступа к указанным средствам обеспечения пожарной безопасности из-за припаркованных автомобилей, также произвести подключение холодного водоснабжения к шкафам с учетом их переноса.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Преображенский 9" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. судебных расходов по государственной пошлине.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.А. Горбатова