Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-211931/24-96-1426

06 декабря 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 22.11.2024

Полный текст решения изготовлен 06.12.2024

Арбитражный суд в составе: судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС" Г.СанктПетербург, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2018, ИНН: 

<

***>, КПП: 784201001, 191167, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКАЯМСКАЯ, УЛ ТЕЛЕЖНАЯ, Д. 37, ЛИТЕРА С, ПОМЕЩ. 8-Н/5 

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГРАДКАПСТРОЙ" Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.08.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 773501001, 124460, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАТУШКИНО, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА, Д. 16, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. I, КОМ. 60А 

о взыскании 14 471 268,61 руб.

при участии: 

от истца: ФИО1 по дов. от 01.03.24г.; диплом;

от ответчика: ФИО2 по дов. от 26.03.23г.адвокат,

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГРАДКАПСТРОЙ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании (с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений) задолженности по Договору подряда № ДО2-28/01-2022КВ от 28.01.2022 г. в размере 13 877 335 (тринадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать пять) рублей 23 копейки, неустойки по Договору подряда № ДО2-28/01-2022КВ от 28.01.2022 г. в размере 578 933 рубля 38 копеек.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика по иску возражал по основаниям. 

Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

28.01.2022 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленоградкапстрой» (далее - Генподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс» (далее - Подрядчик) был заключен Договор подряда № ДО2-28/01-2022КВ (далее - Договор).

В соответствии с п. 1.1 Договора Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению подрядных работ по благоустройству и озеленению, в том числе поверхностному водоотведению и устройству летнего водопровода на объекте: «Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (1, 2, 3 этап), Домодедовский район, Московская область» (далее «Работы»), на свой риск собственными силами в соответствии с условиями Договора и согласно технической документации, соблюдая промежуточные сроки и общий срок производства работ.

В соответствии с п. 1.2 Договора Подрядчик обязуется сдать Результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять Результат работ и оплатить Подрядчику обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 2.1 Договора стоимость Работ по Договору является предварительной, в том числе НДС 20%, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору). Стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора, в том числе затраты на инструмент, расходные материалы, питание, проживание, транспортировку рабочих, регистрацию и разрешение на работу, спецодежду.

В соответствии с п. 2.2 Договора оплата за выполненные Работы производится Генподрядчиком ежемесячно в размере до 98% от стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком в отчетном месяце Работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента сдачи результата работ Генподрядчику в порядке, предусмотренном п.п. 7.1-7.3 Договора, подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3 соответственно; представления Подрядчиком Исполнительной документации на выполненный объем работ и других документов; выставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного по правилам, установленным налоговым законодательством РФ, соответствующего счета на оплату, и документов, подтверждающих оплату выставленных Генподрядчиком штрафных санкций, предусмотренных Договором, а также возмещение расходов Генподрядчика на обслуживание и аренду сантехнических кабин, за вывоз мусора, за потребляющую энергию.

27.04.2022 г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда № ДО2-28/01-2022КВ от 28.01.2022 г. (далее - Дополнительное соглашение №1).

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 1 стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции: «4.1. Работы по настоящему Договору Подрядчик начинает - с даты подписания настоящего Договора. Общий срок выполнения всех работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, а также передача полного пакета исполнительной документации - не позднее 30 июня 2022 года.». 

30.06.2022 г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору подряда № ДО2-28/01-2022КВ от 28.01.2022 г. (далее - Дополнительное соглашение №2).

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 2 стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции: «4.1. Работы по настоящему Договору Подрядчик начинает - с даты подписания настоящего Договора. Общий срок выполнения всех работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, а также передача полного пакета исполнительной документации - не позднее 21 июня 2023 года.». 

01.03.2023 г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение №3 к Договору подряда № ДО2-28/01-2022КВ от 28.01.2022 г. (далее - Дополнительное соглашение №3).

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 3 Стороны договорились утвердить новый Протокол предварительной договорной цены к Договору (Приложение № 1 к Договору). 

30.11.2023 г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение №4 к Договору подряда № ДО2-28/01-2022КВ от 28.01.2022 г. (далее - Дополнительное соглашение №4).

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 4 Стороны договорились утвердить новый Протокол твёрдой договорной цены к Договору (Приложение № 1 к Договору).

В соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения № 4 Стороны пришли к соглашению изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции: «4.1. Работы по настоящему Договору Подрядчик начинает - с даты подписания настоящего Договора. Общий срок выполнения всех работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, а также передача полного пакета исполнительной документации - не позднее 30 ноября 2023 года.». 

В соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение № 1 к Договору, утвержденное Дополнительным соглашением № 4) итоговая цена Договора - 92 428 047 (девяносто два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч сорок семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 20%. 

Подрядчик исполнил обязательства по Договору надлежащим образом, выполнив Работы на общую сумму 92 428 047 (девяносто два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч сорок семь) рублей 98 копеек, что подтверждается следующими документами, подписанными обеими сторонами без замечаний:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.06.2022 г. на сумму 18 702 151,79 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.06.2022 г. на сумму 14 053 116,88 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № 2 от 08.06.2022 г. на сумму 5 030 711,48 руб.;

- акт № 68 от 08.06.2022 г. на сумму 19 083 828,36 руб.;

- журнал учета выполненных работ за 2022 год в 2 экз.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.11.2023 г. на сумму 58 877 335,23 руб.;

- акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.11.2023 г. на сумму 73 344 219,62 руб.;

- акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2020 г. - 18.01.2024 г.

Генподрядчиком обязательства по оплате исполнены частично. По состоянию на сегодняшний день актуальная задолженность Генподрядчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ (за вычетом гарантийного удержания, предусмотренного п. 2.8 Договора) составляет 13 877 335 (тринадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать пять) рублей 23 копейки.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

Кроме того, ответчик не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ. 

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В свою очередь иных доказательств, подтверждающих наличие недостатков в выполненных истцом работах, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании 13 877 335 руб. 23 коп. основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки по Договору подряда № ДО2-28/01-2022КВ от 28.01.2022 г. в размере 578 933 рубля 38 копеек.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с п. 12.8 Договора за невыполнение Генподрядчиком обязательств по оплате выполненных Работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, Генподрядчик уплачивает Подрядчику пеню - в размере 0,01% от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

С учетом отсрочки оплаты, предусмотренной п. 2.2 Договора, расчет неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате выполненных работ производится следующим образом:

Задолженность: 58 877 335,23 руб.

Ставка: 0,01% в день от просроченной суммы (п. 12.8 Договора);

Период: с 22.12.2023 г. (+15 банковских дней с даты подписания последнего Акта (п. 2.2 Договора)) по 27.08.2024 г. (дата подготовки искового заявления).

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по дней

22.12.2023

58 877 335,23

58 877 335,23

22.12.2023

26.01.2024 36

58 877 335,23 х 36 х 0.01%

211 958,41 р.

-25 000 000,00

26.01.2024

Погашение части долга

33 877 335,23

27.01.2024

01.03.2024 35

33 877 335,23 * 35 х 0.01%

118 570,67 р.

-8 000 000,00

01.03.2024

Погашение части долга

25 877 335,23

02.03.2024

01.03.2024 0

25 877 335,23 x 0 x 0.01%

0,00 р.

-3 000 000,00

01.03.2024

Погашение части долга

22 877 335,23

02.03.2024

01.03.2024 0

22 877 335,23 x 0x 0.01%

0,00 р.

-9 000 000,00

01.03.2024

Погашение части долга

13 877 335,23

02.03.2024

27.08.2024 179

13 877 335,23 x 179x 0.01%

248 404,30 р.

Итого:

578 933,38 руб.

Сумма основного долга: 13 877 335,23 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 578 933,38 руб.

Расчет неустойки судом проверен, произведён в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, требованиями действующего законодательства, ответчиком контррасчет не представлен. Учитывая установленные судом обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГРАДКАПСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 13 877 335 руб. 23 коп., неустойку в размере 578 933 руб. 38 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 95 281 руб.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 75 руб., уплаченную по платежному поручению №1471 от 28.08.2024 года. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.С. Гутник