АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

21 марта 2025 года

Дело № А33-38855/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21.03.2025.

В полном объёме решение изготовлено 21.03.2025.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730, ОГРН 1028400000298)

к обществу с ограниченной ответственностью "Грайс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании денежных средств,

в судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности №КП-09/16 от 20.05.2024, представлен диплом о наличии высшего юридического образования, личность удостоверена паспортом;

в отсутствии ответчика;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лалетиной А.О., 

установил:

публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Грайс" (далее – ответчик) о взыскании штрафа в связи с односторонним отказом от договора подряда № ЗФ-5177/22 от 01.11.2022 в размере 10 107 741,15 рублей: пени за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № ЗФ5177/22 от 01.11.2022 в размере 9 940 480,91 рублей; судебных расходов по оплате государственной пошлины. Определением от 27.12.2024 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ПАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) и ООО «Грайс» (подрядчик) заключен договор подряда от 01.11.2022 № ЗФ-5177/22.

На основании пункта 7.1. договора, его неотъемлемой частью являются «Общие условия договоров, заключаемых ПАО «ГМК «Норильский никель» и организациями, входящими в его группу лиц» (далее – «Общие условия»). 

В силу пункта 1.1 договора подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика в соответствии с Приложением № 1 к договору, проектной, сметной и технической документацией работы по ремонту на объектах заказчика, указанных в столбце 3 Приложения № 1 к договору, сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора. 

Подрядчик обязался приступить к работам и выполнить все работы по договору в сроки, установленные пунктом 1.2 договора, Приложением № 1 к договору, графиком производства работ. (пункт 2.1.1 договора). Пунктом 1.2 договора стороны согласовали общий срок выполнения работ с момента заключения договора, то есть с 15.07.2022 (начало) по 30.09.2024 (окончание). (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 06.02.2024).

В соответствии с пунктом 3.1. договора, стоимость работ по договору составляет 192 211 204,52 руб. НДС не облагается. 

Согласно пункта 3.2., общая стоимость работ по договору, указанная в п.3.1. договора, включает в себя: - постоянную часть – стоимость ремонтных работ в сумме 158 299 204,52 рублей без НДС; - переменную часть - стоимость фактически понесенных командировочных расходов представителей подрядчика, в сумме не более 33 912 000,00 рублей без НДС. 

Отчетным периодом по договору является месяц (пункт 1.2 договора). Работы по договору в отношении конкретного объекта основных средств заказчика считаются выполненными подрядчиком в полном объеме, а результат работ принятым с момента подписания сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», составленного по форме № НН.ОС-3.1 (пункт 1.3 договора). 

В соответствии с Приложением №1 «Укрупненный перечень, цен и сроки выполнения работ в 2022 -2024 годах» (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 06.02.2024), Ответчик должен выполнить следующие объемы работ: - в 2022 году – 0 рублей; - в 2023 году – 114 607 475,82 рублей, из них стоимость ремонтных работ 95 504 745,49 рублей, командировочные расходы 19 102 730,33 рублей; - в 2024 году (до 31.09.2024) – 77 603 828,70 рублей, из них стоимость ремонтных работ 62 794 459,03 рублей, командировочные расходы 14 809 269,67 рублей. 

В нарушение принятых обязательств подрядчик в установленный срок работы не выполнил, из запланированного объемов работ по договору всего ремонтных работ выполнено на сумму 91 133 792,98 руб., что составляет 57,6%.

В 2024 году подрядчик ремонтные работы по договору не выполнял. В соответствии с п.3.4. договора, заказчик оплатил фактически выполненные работы платежными поручениями: №67818 от 27.12.2023, №569 от 10.01.2024, №570 от 10.01.2024, №1564 от 10.01.2024, №12209 от 22.03.2023, №18317 от 19.04.2023, №18529 от 19.04.2023, №22788 от 17.05.2023, №29296 от 21.06.2023, №29297_от_21.06.2023, №35656_от 19.07.2023, №40375 от 16.08.2023, №48451 от 20.09.2023, №48452 от 20.09.2023, №49498 от 27.09.2023, №53628 от 18.10.2023, №_53629 от 18.10.2023, №54827 от 25.10.2023, №54828 от 25.10.2023, №56153 от 08.11.2023, №56154 от 08.11.2023 , на общую сумму 91 133 792,98. Заказчик, неоднократно, письмами №ЗФ/11334-исх от 21.03.2024, №ЗФ/1810- исх, №ЗФ/9901-исх от 12.03.2024, №ЗФ/22388 от 30.05.2024, обращал внимание подрядчика на необходимость своевременного выполнения работ по договору. 

Однако все обращения были оставлены без ответа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Пунктами 2.4.2, 6.12. договора предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать от подрядчика возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный договором срок становится явно невозможным. 

В связи с допущенным нарушением срока выполнения работ заказчиком предъявлена претензия от 13.12.2024 № ЗФ/52408-исх об отказе от исполнения договора и уплате неустойки и штрафа в размере 29 564 593,83 руб. Учитывая ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе требовать оплаты следующих штрафных санкции.

В соответствии с пунктом 6.12 договора в случае отказа заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке по виновным действиям подрядчика последний обязан уплатить заказчику штраф в размере 10 % от общей стоимости работ по договору. Общая стоимость работ - 192 211 204,52 руб. с НДС (пункт 3.1 договора), в связи с этим сумма штрафа, рассчитанного по условиям Договора составляет 19 211 120,45 рублей. Однако истцом учтено, что по договору подрядчиком выполнены и приняты Заказчиком работы стоимостью 91 133 792,98 руб. Общая стоимость невыполненных работ на момент отказа Заказчика от договора – 101 077 411,54, в связи с этим сумма штрафа составляет: 101 077 411,54 руб. * 10% = 10 107 741,15 руб.

Согласно пункту 6.2 договора, в случае нарушения начального и/или конечного срока выполнения работ, предусмотренных п. 1.2 договора, подрядчик обязан уплатить заказчику пени в размере 0,2% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. 

Общий размер неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ в период с 01.10.2024 по 13.12.2024 согласно расчету составляет 9 940 480,91 руб.: 67 165 411,54 руб. – стоимость невыполненных ремонтных работ 74 к. дн – период просрочки с 01.10.2024 по 13.12.2024 0,2% - размер пени за каждый день просрочки от стоимости не выполненных работ 67 165 411,54 руб. * 0,2%* 74 дн = 9 940 480,91 руб. 

Таким образом, общий размер штрафных санкций за односторонний отказ от договора по вине подрядчика и нарушение срока выполнения работ составляет: 10 107 741,15 руб. + 9 940 480,91 руб. = 20 048 222,06 рублей.

В соответствии с п 7.1. Общих условий, спор на рассмотрение Арбитражного суда может быть передан по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной почты или факсу. 13.12.2024 на электронную почту ответчика направлена претензия № ЗФ/48347-исх с уведомлением об одностороннем отказе от Договора и с требованием об оплате штрафных санкций. Ответ на претензию до настоящего времени не получен, в связи с чем, истец обратился в суд.

Ответчик требования не оспорил. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Между сторонами сложились подрядные правоотношения, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Пунктами 2.4.2, 6.12. договора предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать от подрядчика возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный договором срок становится явно невозможным. 

В связи с допущенным нарушением срока выполнения работ заказчиком предъявлена претензия от 13.12.2024 № ЗФ/52408-исх об отказе от исполнения договора и уплате неустойки и штрафа в размере 29 564 593,83 руб. 

Учитывая ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по договору, заказчик вправе требовать оплаты следующих штрафных санкции.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 6.12 договора в случае отказа заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке по виновным действиям подрядчика последний обязан уплатить заказчику штраф в размере 10 % от общей стоимости работ по договору. Общая стоимость работ - 192 211 204,52 руб. с НДС (пункт 3.1 договора), в связи с этим сумма штрафа, рассчитанного по условиям Договора составляет 19 211 120,45 рублей. Однако истцом учтено, что по договору подрядчиком выполнены и приняты Заказчиком работы стоимостью 91 133 792,98 руб. Общая стоимость невыполненных работ на момент отказа Заказчика от договора – 101 077 411,54, в связи с этим сумма штрафа составляет: 101 077 411,54 руб. * 10% = 10 107 741,15 руб.

Согласно пункту 6.2 договора, в случае нарушения начального и/или конечного срока выполнения работ, предусмотренных п. 1.2 договора, подрядчик обязан уплатить заказчику пени в размере 0,2% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. 

Общий размер неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ в период с 01.10.2024 по 13.12.2024 согласно расчету составляет 9 940 480,91 руб.: 67 165 411,54 руб. – стоимость невыполненных ремонтных работ 74 к. дн – период просрочки с 01.10.2024 по 13.12.2024 0,2% - размер пени за каждый день просрочки от стоимости не выполненных работ 67 165 411,54 руб. * 0,2%* 74 дн = 9 940 480,91 руб. 

Таким образом, общий размер штрафных санкций за односторонний отказ от договора по вине подрядчика и нарушение срока выполнения работ составляет: 10 107 741,15 руб. + 9 940 480,91 руб. = 20 048 222,06 рублей.

Проверив расчет истца, суд нарушений не установил.

Ответчик требования не оспорил.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Грайс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 20 048 222 руб. 06 коп. неустойки, 425 482 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

Возвратить публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 27 000 руб. государственной пошлины излишне уплаченной платежным поручением № 64147 от 24.12.2024.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.Н. Мальцева