Арбитражный суд Калининградской области 

Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Калининград Дело № А21-16067/2019 

«04» марта 2020 года  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Муниципального казенного учреждения городского округа  «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов»  удовлетворить.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский регион» в  месячный срок со дня вступления в силу решения суда исполнить гарантийные  обязательства по договору подряда от 16.04.2018 № 19-дп на выполнение работ по  благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по  

ул. Молочинского, 27-45, 45-49, а именно, выполнить следующие работы для  устранения недостатков:  

 №  пп  

Наименование работ 

Единица  измерения  

Количество 

1 

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их 

отноской и кладкой в штабель 

кв.м. 

147,5 

2 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных  

куб.м. 

7,37 

3 

Разборка покрытий и оснований: мостовой из 

булыжного камня 

куб.м. 

6,5 

4 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5 мЗ  

1т. груза  

13,275 

5 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на  расстояние до 40 км  

1т. груза  

13,275 

6 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований: из песка  

куб.м. 

2,95 

7 

Песок природный для строительных работ средний  

куб.м. 

3,245 

8 

Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси  

куб.м. 

7,375 

9 

Смесь пескоцементная 

куб.м. 

7,52 

10  

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (плитка  б/у)  

кв.м. 

147,5 

11  

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  оснований: из песка  

куб.м. 

1,3 

12  

Песок природный для строительных работ средний  

куб.м. 

1,43 

13  

Устройство покрытий: из брусчатки толщ. 20мм (б/у),  по готовому подстилающему слою с заполнением швов  

песком 

кв.м. 

26 

14  

Песок природный для строительных работ средний  

куб.м. 

0,1118 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский регион»  в пользу Муниципального казенного учреждения городского округа «Город  Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» расходы по уплате  госпошлины 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья М.Н. Надежкина