Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-2689/2024

г. Хабаровск

28 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 марта 2024

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи М.А. Оржеховской

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680547, 

<

...>)

к акционерному обществу «Региоснаб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>)

о взыскании 5 358 912 руб. 76 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, действующего по доверенности от 01.09.2023 б/н,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к акционерному обществу «Региоснаб»  о взыскании 5 358 912 руб. 76 коп., составляющих основной долг в размере 4 448 146 руб., пени в размере 910 766 руб. 76 коп. за периоды с 30.12.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.02.2024, пени с 21.02.2024 по день фактической оплаты основного долга.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец заявил ходатайство об увеличении размера исковых требований, просил взыскать основной долг в размере 4 448 146 руб., пени в размере 977 192 руб. 41 коп. за периоды с 30.12.2021 по 19.03.2024, пени с 20.03.2024 по день фактической оплаты основного долга.

Суд принимает увеличение размера исковых требований, так как данное распорядительное действие закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковое требование удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых оно основано, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из договора субподряда от 01.07.2021 № 036/СП-21, ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, наличие основного долга в размере 4 448 146 руб., право на взыскание пени в размере 977 192 руб. 41 коп. за периоды с 30.12.2021 по 19.03.2024, пени с 20.03.2024 по день фактической оплаты основного долга.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва и возражений на иск не представил.

На основании пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом пункта 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65, суд завершил предварительное заседание и перешел к судебному разбирательству дела.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ч.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

01.07.2021 между акционерным обществом «Региоснаб», подрядчик и обществом с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой», субподрядчик, заключен договор субподряда №036/СП-21, в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 1.1. договора, предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края, протяженностью 95,217км.

В соответствии с пунктом 1.2. договора объем выполненных работ и материалов, принимаемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

Максимальная цена договора составляет 11 000 000 руб., с учетом НДС 20% (пункт 2.1. договора).

В соответствии с пунктом 3.1. договора, оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Субподрядчиком выполнены работы по договору от 01.07.2021 №036/СП-21 на общую сумму 4 448 146 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 25.10.2021 №4 на сумму 3 209 302 руб., от 25.11.2021 №5 на сумму 397 312 руб., от 22.12.2021 №6 на сумму 841 532 руб., справками о стоимости выполненных работ от 25.10.2021 №4 на сумму 3 209 302 руб., от 25.11.2021 №5 на сумму 397 312 руб., от 22.12.2021 №6 на сумму 841 532 руб., подписанными акционерным обществом «Региоснаб» без замечаний и заверенными оттиском его печати.

Истцом ответчику направлена претензия № 392 от 28.12.2023 (вх. № 1788 от 28.12.2023) с требованием об оплате основного долга и пени.

Неисполнение в добровольном порядке ответчиком обязанности по оплате задолженности послужило основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» в арбитражный суд с настоящим иском.

Отношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 АПК РФ является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Оценив и исследовав представленные доказательства, суд установил, что истцом выполнены работы в рамках договора от 01.07.2021 №036/СП-21.

Доказательств оплаты основного долга на сумму 4 448 146 руб. ответчиком не представлено.

Исковое требование истца о взыскании основного долга подлежит удовлетворению в размере 4 448 146 руб.

Истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 977 192 руб. 41 коп. за периоды с 30.12.2021 по 19.03.2024, пени с 20.03.2024 по день фактической оплаты основного долга.

Пунктом 9.2. договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 9.3. договора, пени начисляются за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы.

Расчет пени произведен истцом, исходя из пункта 3.1. договора (с учетом 45 рабочих дней), количества дней просрочки (периоды начисления с 30.12.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 19.03.2024), в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды,  составляет 977 192 руб. 41 коп.

Расчет пени судом проверен, юридически и математически является верным.

Исковое требование истца о взыскании пени подлежит удовлетворению в размере 977 192 руб. 41 коп.

В пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016  № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», разъясняется, что истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна.

Требование о начислении пени подлежит удовлетворению с 20.03.2024 исходя из основного долга 4 448 146 руб., в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки по день фактической оплаты основного долга.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в сумме 49 795 руб.  подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Поскольку истцом был увеличен размер исковых требований, с акционерного общества «Региоснаб» в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 332 руб.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Региоснаб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680547, 

<

...>) 5 425 338 руб. 41 коп., составляющих основной долг в размере 4 448 146 руб., пени в размере 977 192 руб. 41 коп., за периоды с 30.12.2021 по 19.03.2024, а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере  49 795 руб.

Начислять пени с 20.03.2024 исходя из основного долга 4 448 146 руб., в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки по день фактической оплаты основного долга.

Взыскать  с акционерного общества «Региоснаб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 332 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                                       М.А. Оржеховская