328/2024-9832(1) 

 

ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,  

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А06-6852/2022

г. Саратов

12 марта 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2024 года. Полный текст постановления изготовлен 12 марта 2024 года. 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Н. В. Савенковой, судей А. Ю. Самохваловой, В. Б. Шалкина, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Стройпроект»  

на решение Арбитражного суда Астраханской области от 08 декабря 2023 года по делу  № А06-6852/2022, 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект», Ростовская область,  г. Белая Калитва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Государственному казенному учреждению Астраханской области «Управление по  капитальному строительству Астраханской области», г. Астрахань (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

об изменении договора, 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (далее по тексту ООО  «Стройпроект», истец) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с иском к  государственному казенному учреждению Астраханской области «Управление по  капитальному строительству Астраханской области» (далее по тексту ГКУ АО «УКС  Астраханской области», ответчик) об обязании внести изменения в пункт 2.1, установив  цену контракта в сумме 36 887 359 руб. 61 коп. исходя из заключения судебной  экспертизы, а также в пункт 3.1 контракта, установив конечный срок выполнения работ  до 01.12.2022.  

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 08 декабря 2023 года по делу  № А06-6852/2022 в удовлетворении исковых требований отказано. 

ООО «Стройпроект» из федерального бюджета возращена государственная пошлина в  сумме 6 000 руб., перечисленная по платежному поручению от 18.08.2022 № 175.  

ООО «Экспертиза-1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета  Арбитражного суда Астраханской области перечислены денежные средства за проведение  судебной экспертизы в сумме 30000 руб., поступившие на депозитный счет Арбитражного  суда Астраханской области от ООО «Стройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) согласно платежному поручению от 14.02.2023 года № 31.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Стройпроект» обратилось в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой  просит обжалуемый судебный акт отменить, по основаниям, изложенным в  апелляционной жалобе.  

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает, что вопреки  выводам суда первой инстанции, исполнение условий, предусмотренных контрактом,  было невозможно без выполнения подрядчиком дополнительных объемов работ.  Соответственно, истцом подтверждено наличие существенных обстоятельств влекущих  изменение условий контракта. Следовательно у суда не имелось оснований для отказа в  удовлетворении требований.  

В порядке статьи 262 АПК РФ от ГКУ СО «УКС АО» письменный отзыв на  апелляционную жалобу не поступал.  

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, надлежащим образом  извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения,  выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его  размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена судом  апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 258,  266-271 АПК РФ.  

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 АПК РФ повторно  рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным  доказательствам.  

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе,  исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что судебный акт  не подлежит отмене или изменению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 28.12.2021 между государственным казенным  учреждением Астраханской области «Управление по капитальному строительству  Астраханской области» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью  «Стройпроект» (Исполнитель) заключен государственный контракт  

 № 03252000067210000310001 на выполнение работ для государственных нужд  Астраханской области (далее - Контракт), в соответствии с которым Исполнитель  обязался на свой риск и под свою ответственность, собственными и (или) привлеченными  силами и средствами, в конечный и промежуточные сроки выполнить комплексные  планировочные, изыскательские и проектные работы по объекту: «Водоснабжение р.п.  Ильинка Икрянинского района Астраханской области» (далее – проектная документация),  с прохождением государственной экспертизы результатов проектной документации и  результатов инженерных изысканий, с проверкой достоверности определения сметной  стоимости объекта, в соответствии с требованиями задания (Приложение № 1 к  Контракту) (далее – Задание) в сроки установленные графиком выполнения проектно-изыскательских работ (Приложение № 2 к Контракту), условиями настоящего Контракта и  нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязался  

своевременно принять выполненные Исполнителем работы и оплатить их в соответствии  с графиком оплаты выполненных работ по контракту (Приложение № 3 к Контракту) и  условиями настоящего Контракта.  

Согласно пункту 2.1 контракта цена Контракта является твердой, определена на  весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов,  сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с  выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ)  составляет: 29 000 000 руб., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС)  по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если Контракт заключается с  лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о  налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.  

Пунктом 3.1 контракта стороны согласовали сроки выполнения работ: с даты  заключения Контракта до 30.05.2022.  

Выполнение работ осуществляется - в 2 этапа: I этап: до 30.12.2021; II этап: до 30.05.2022. Цена работы в разрезе этапов работ: I этап: 10 456 840 руб.; II этап: 18 543 160 руб. (пункт 2.1.1 контракта). 

 В обоснование своих требований истец ссылается на то, что согласно пункту 3.2  Задания общая протяженность сетей водоснабжения составляет 31,7 км.  

 На основании согласованной Администрацией МО «Икрянинский район» 

(исх.03-35/4008 от 19.05.2022) предварительной схемы расположения объекта  водоснабжения общая протяженность сетей водоснабжения увеличилась до 40,1 км, что в  свою очередь больше по показателю протяженности, указанному в Задании более чем на  10%.  

 В связи с этим истец вынужден выполнить дополнительные работы. 

Ссылаясь на положения пункта 1 статьи 451 ГК РФ как на основание для внесения  изменений в контракт, истец полагает, что:  

 - в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения  обстоятельств не произойдет, поскольку изначально разработанное и подписанное  сторонами Задание не могло иметь столь кардинальные расхождения между заявленными  и фактически необходимыми к выполнению объемами работ;   

 - изменение обстоятельств вызвано причинами, которые истец не мог преодолеть  после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него  требовалась по характеру договора и условиям оборота - увеличение объемов работ в  столь значительном количестве обусловлено обязанностью истца надлежащим образом  выполнить работы, а именно обеспечить в разрабатываемом проекте водоснабжение всего  населенного пункта р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области.  

 - исполнение договора без изменения его условий настолько нарушит  соответствующее контракту соотношение имущественных интересов сторон и повлечет  для истца такой ущерб, что он в значительной степени лишится того, на что был вправе  рассчитывать при заключении договора. С учетом того, что объем, на который увеличится  общий объем работ, составляет более 10% от первоначального объема работ, выполнение  данных дополнительных работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ  значительно нарушит соответствующее контракту соотношение имущественных  интересов в пользу ответчика, и повлечет для истца ущерб в виде оплаты выполнения  дополнительных работ, на оплату которых истец вправе рассчитывать. Так же если не  будет увеличен срок выполнения работ по контракту, истец может понести ущерб в виде  штрафов, пеней за невыполнение работ в срок.  

 - из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск  изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона - изменение (увеличение)  

объемов работ по контракту не является желанием истца, а наоборот является  необходимостью для надлежащего выполнения работ (обеспечение всего населенного  пункта качественной водой в рамках разработки технической документации).  

 Истец просит внести изменения в пункт 2.1 контракта, установив цену контракта в  сумме 36 887 359 руб. 61 коп. исходя из заключения судебной экспертизы, а также в пункт  3.1 контракта, установив конечный срок выполнения работ до 01.12.2022.  

Суд первой инстанции, исходя из совокупной оценки доказательств,  руководствуясь положениями статей 702, 709, 743 Гражданского кодекса Российской  Федерации далее - ГК РФ), статей 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной  системе), пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о  внесении изменений в государственный контракт, поскольку сторонами обязательства по  контракту исполнены, результат сдан ответчику, а ответчиком оплачены работы в сумме  определенной контрактом.  

В результате анализа материалов дела судебная коллегия соглашается с выводом  суда первой инстанции, считает его основанным на тщательном исследовании  представленных сторонами доказательств, правильном применении норм права.  

При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего. 

В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)  обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то:  передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от  определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его  обязанности. Обязательства возникают из договора. Обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона  (статья 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).  

 По своей правовой природе, заключенный между сторонами контракт является  государственным контрактом на выполнение подрядных работ для государственных нужд  правоотношения сторон по которому подпадают под регулирование главы 37  Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом специальных норм параграфа 5  данной главы, а также Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную  работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

В силу пункта 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному  контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных  нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется  выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом  объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или  обеспечить их оплату.  

Статьей 766 ГК РФ определено, что государственный или муниципальный контракт  на выполнение подрядных работ должен содержать условия об объеме и о стоимости  подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке  финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.  

Условия об объемах, стоимости и сроках выполнения работ являются  существенными условиями государственного или муниципального контракта на  выполнение подрядных работ (статьи 432, 708, 709, 766 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 767 ГК РФ при уменьшении соответствующими  государственными органами или органами местного самоуправления в установленном  порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования  подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие  условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или  муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков  выполнения работ.  

Из пункта 2 статьи 767 ГК РФ следует, что изменения условий государственного  контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 данной статьи, в  одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях,  предусмотренных законом.  

Статья 450 ГК РФ предусматривает исчерпывающий перечень оснований для  изменения и расторжения договора.  

В соответствии со статьей 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны  по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими  законами или договором.  

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по  решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных  случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.  

Согласно пункту 4 статьи 451 ГК РФ изменение договора в связи с существенным  изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях,  когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для  сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения  договора на измененных судом условиях.  

В силу пункта 2 статьи 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о  приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами  или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям,  предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию  заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:  

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения  обстоятельств не произойдет;  

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона  не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и  осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;  

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы  соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы  для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы  того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;  

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск  изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.  

При этом, основанием для изменения договора в силу вышеуказанных правовых  норм является одновременное наличие всех четырех указанных условий. Отсутствие  одного из четырех необходимых условий изменения муниципального контракта влечет  отказ в удовлетворении иска.  

Судом установлено, что в обоснование исковых требований общество указало, что в  ходе исполнения контракта, на основании согласованной с Администрацией МО  «Икрянинский район» (исх.03-35/4008 от 19.05.2022) предварительной схемы  расположения объекта водоснабжения общая протяженность сетей водоснабжения  увеличилась до 40,1 км, что в свою очередь больше по показателю протяженности,  

указанному в Задании к контракту более чем на 10%, в связи с чем общество было  вынуждено выполнить дополнительные работы, что привело к увеличению цены  контракта и сроков выполнения работ.  

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении  контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев,  предусмотренных указанной статьей и статьей 95 того же Закона.  

В части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрено общее правило о том, что  изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за  исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, указанных в пунктах 1 - 6  части 1 указанной статьи.  

1.1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,  выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  

1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом  (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального  строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской  Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять  процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого  товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять  процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений  бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально  дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя  из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем  на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом  количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить  цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы  дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении  предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как  частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте  количество такого товара;  

1.3) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,  предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,  капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому  изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам,  предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом  допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской  Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;  

1.4) если Правительством Российской Федерации принято решение о введении  специальных мер в сфере экономики, предусмотренное пунктом 1 статьи 26.1  Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», и предметом контракта  является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги по государственному  оборонному заказу. По предложению заказчиков, являющихся федеральными органами  исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации  государственной политики в области обороны, в области гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения  безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии  Российской Федерации, допускается увеличение предусмотренных таким контрактом  количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги  

либо уменьшение предусмотренных таким контрактом количества поставляемого товара,  объема выполняемой работы или оказываемой услуги. При этом допускается изменение  цены контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской  Федерации и в пределах основных показателей государственного оборонного заказа  пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы  или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или  услуги. При уменьшении предусмотренных контрактом количества поставляемого товара,  объема выполняемой работы или оказываемой услуги стороны контракта обязаны  уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена  единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении  предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как  частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте  количество такого товара;  

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем  три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный  Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по  независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий  невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства  Российской Федерации;  

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации  на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены,  установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного  контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его  условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения  высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской  Федерации;  

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее  одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный  Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по  независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий  невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной  администрации;  

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации  регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;  

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или  муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных  обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения  контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или)  сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,  предусмотренных контрактом.  

На недопустимость изменения сторонами сроков выполнения работ по  государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и  заключенным в соответствии с ним контрактом, указано в пункте 9 Обзора судебной  практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017,  что обеспечивает равенство участников размещения заказов и свободу конкуренции.  

Пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что  изменение существенных условий контракта допустимо по соглашению сторон, в том  числе в случае, если контракт, предметом которого является выполнение работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального  

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по  независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его  исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию,  либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается  однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока  исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.  

В части 65.1. статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ указано, что по соглашению  сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1  января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон  контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.  

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением  положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на основании  решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа  государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при  осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации,  муниципальных нужд соответственно.  

Пунктом 11.1 контракта также предусмотрено, что все изменения и дополнения к  контракту будут считаться действительными и рассматриваться как неотъемлемая часть  контракта, если они совершены в письменной форме путем подписания дополнительного  соглашения к контракту уполномоченными представителями сторон и содержат прямую  отсылку на контракт.  

Пунктом 11.2 изменение существенных условий контракта при его исполнении не  допускается, кроме случаев предусмотренных ФЗ № 44.  

Таким образом, при соблюдении совокупности условий, установленных указанными  нормами Закона о контрактной системе, существенные условия контракта, могут быть  изменены исключительно по соглашению сторон.  

Заказчик отказался внести изменения в государственный контракт, что следует из  представленных в материалы дела доказательств.  

Действующее законодательство о контрактной системе не предусматривает право  подрядчика требовать понуждения заказчика к изменению условий контракта в части  сроков выполнения работ, цены и технических условий. Аналогичная позиция изложена в  определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2022 № 305-ЭС22-4781 по  делу № А40-82590/2021.  

В рассматриваемом случае судом правомерно учтено, что несмотря на  необходимость выполнения дополнительных работ, истцом не представлено  доказательств невозможности их выполнения в предусмотренный контрактом срок,  доказательств приостановления выполнения работ до заключения дополнительного  соглашения о внесении изменений в контракт об увеличении стоимости и сроков  выполнения работ.  

Согласно положениям статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе  строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим  необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости  строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа  на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного  подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить  соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика.  Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие  необходимости в проведении дополнительных работ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно  предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при  обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком  материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки  

(обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения  его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика  обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы  либо создают невозможность ее завершения в срок.  

Также, в силу статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую  работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по  договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической  документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению  договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих  о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный  срок (статья 328).  

Из материалов дела не усматривается, что подрядчик, заявляя требование об  увеличении цены контракта, сроков выполнения работ представил доказательства  реализации им права на приостановление исполнения обязательств по контракту,  доказательства невозможности приостановления выполнения работ ввиду чрезвычайных,  экстренных обстоятельств, равно как и не представил доказательства неисполнения либо  ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.  

Истец, являясь профессиональным участником предпринимательской деятельности в  сфере строительного подряда, проявляя должную осмотрительность, заботливость и  осторожность при заключении государственного контракта, мог и должен был  предполагать возможные предпринимательские риски.  

Кроме того, следует учесть, что пунктом 6 статье 709 ГК РФ установлено, что  подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, в том числе в случае, когда в  момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный  объем подлежащих выполнению работ.  

Также следует отметить, что государственный контракт от 28 декабря 2021 года №  03252000067210000310001 сторонами исполнен, истцом работа выполнена и ее результат  сдан ответчику, а ответчиком, в свою очередь, работы оплачены в сумме, определенной  контрактом.  

Данные обстоятельства сторонами не оспаривались, в то время как внесение  изменений в договор, обязательства по которому исполнены, невозможно, поскольку  обязательства прекращены исполнением (статья 408 ГК РФ).  

В связи с изложенным у суда апелляционной инстанции не имеется оснований для  признания доводов истца обоснованными.  

Повторно оценив представленные доказательства, доводы сторон, суд  апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции об отсутствии  оснований для удовлетворения требований правильными.  

Представленные в материалы дела доказательства судом первой инстанции  исследованы полно и всесторонне, оспариваемый судебный акт принят при правильном  применении норм материального права, выводы, содержащиеся в решении,  мотивированы, не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам,  нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ  безусловным основанием для отмены судебного акта, не установлено.  

С учетом изложенного решение суда следует оставить без изменения,  апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Согласно части 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в сети «Интернет» в режиме  ограниченного доступа не позднее следующего дня после его принятия либо в  документарном виде по ходатайству стороны в срок не превышающий пяти дней.  

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 08 декабря 2023 года по  делу № А06-6852/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского  округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через  арбитражный суд первой инстанции.  

Председательствующий Н. В. Савенкова 

Судьи А. Ю. Самохвалова 

 В. Б. Шалкин