Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-221222/23-2-1283

07 ноября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 07 ноября 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи - Махлаевой Т.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по заявлению ООО «Энергии Технологии» (ИНН 

<

***>)

к ответчику: ООО «Гранд Инвест» (ИНН 

<

***>)

о взыскании денежных средств в размере 2 423 700,31 руб.,

при участии:

От истца: ФИО2 (паспорт, доверенность от 01.01.2023, диплом)

От ответчика: ФИО3 (паспорт, доверенность от 17.01.2021, диплом) 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Энергии Технологии» обратилось в арбитражный суд с иском в котором просит взыскать с ООО «Гранд Инвест» (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 2 423 700,31 рублей.

Ответчик просит в удовлетворении требований отказать по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

В судебном заседании стороны поддержали свои правовые позиции.

          Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив все имеющиеся в деле доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела Между ООО «Энергии Технологии» (сетевая организация) и ООО «Град Инвест» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.04.2021 № ДТП/21-01-255 (далее - договор).

В соответствии с условиями договора осуществляется комплекс мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств административно-делового здания, ДОУ на 150 детей на земельном участке заявителя к электрическим сетям.

В соответствии с пунктом 1.6 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 2 года с даты подписания сторонами договора (по 28.04.2023).

Согласно п. 1.3 договора срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Дополнительным соглашением № 1 от 22.05.2023 к договору технические условия к договору утверждены в новой редакции со сроком действия до 30.06.2023.

Акт об осуществлении технологического присоединения подписан сторонами 20.06.2023.

ООО «Град Инвест» нарушен установленный договором срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Срок нарушения составляет 53 календарных дня (с 29.04.2023 по 20.06.2023).

Форма и порядок исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрической сети утверждены Правилами технологического присоединения от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

Пунктом 7 Правил № 861 установлена процедура технологического присоединения, включающая в себя: подачу заявки; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 16 Правил № 861 договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

При этом, выполнение мероприятий по технологическому присоединению невозможно без осуществления всех обязательств, указанных в технических условиях.

Согласно пункту 4.2 договора, сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Общая сумма неустойки составляет 2 423 700,31 руб. (два миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот рублей 31 копейка).

Расчет неустойки судом проверен, признан арифметически и методологически верным, Ответчиком по существу не оспорен.

В обоснование своих возражений Ответчик указывает на то что «22» мая 2023 года между ООО «Град Инвест» и ООО «Энергии Технологии» было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору № ДТП/21-05-255 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.04.2021 г. (далее - «Дополнительное соглашение к Договору»), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению аннулировать Технические условия для присоединения к электрическим сетям № ЭТ/ТП/21-01-255 от 01.04,2021 г., а Технические условия для присоединения к электрическим сетям № ЭТ/ТП/21-01 -255 (1) от 15.05.2023 г. считать Приложением № 1 к Договору.

Согласно же п. 11.5 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № ЭТ/ТП/21-01 -255 (1) от 15.05.2023 г., принятых в редакции Дополнительного соглашения к Договору, срок действия технических условий - до «30» июня 2023 года.

Целью заключения указанного Дополнительного соглашения о продлении срока действия технических условий было продление срока осуществления технологического присоединения к электрически к сетям.

Таким образом, подписывая Дополнительное соглашение о продлении срока действия технических условий, ООО «Град Инвест» и ООО «Энергии Технологии» намеревались продлить срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению с целью осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям.

Именно поэтому продление срока действия технических условий по смыслу Договора подразумевает продление срока осуществления мероприятий, указанного в п. 1.6 Договора, то есть до «30» июня 2023 года.

Акт об осуществлении технологического присоединения подписан Сторонами «20» июня 2023 года.

Таким образом, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению ООО «Град Инвест» нарушен не был.

Данные доводы отклоняются судом в связи со следующим.

В соответствии с подп. «б», «в» п. 16 Правил № 861 договор должен содержать, в том числе срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, положение об ответственности сторон при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.         

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению является существенным условием договора технологического присоединения.

Срок действия технических условий предусмотрен другим пунктом - п. 24 Правил № 861.

По смыслу Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий не тождественны. 

Срок действия технических условий, предусмотренный п. 24 Правил № 861, не может составлять менее 2 лет и более 6 лет. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, после которых составляются документы, фиксирующие технологическое присоединение, определяется Правилами № 861 и сторонами при заключении договора.

Наличие действующих технических условий является непременным атрибутом технологического присоединения. Поэтому предполагается, что по истечении срока действия технических условий выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению перестает быть возможным, так как подобные действия будут являться неправомерными. Срок действия технических условий определяет техническую возможность выполнения мероприятий по технологическому присоединению. При этом обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению должны быть выполнены в установленные в договоре сроки, но в пределах срока действия технических условий.

Таким образом, срок осуществления мероприятий и срок действия технических условий являются разными правовыми категориями. Более того, сроки осуществления мероприятий и сроки действия технических условий согласно Правилам № 861 не тождественны.

ООО «Энергии Технологии» заявлено требование о взыскании с ООО «Град Инвест» неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий и в пределах срока действия технических условий.

Согласно положениям части 3.1. статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При изучении представленных доказательств, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

При таких обстоятельствах требования заявлены правомерно, обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.

С учетом изложенного руководствуясь ст. ст. 64, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167 -170, 176, 198, 200, 201 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «Гранд Инвест» (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «Энергии Технологии» (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 2 423 700,31 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 119,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья:                                                                                    Т.И.Махлаева