АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

02 ноября 2021 года

Дело № А33-23571/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 26 октября 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 02 ноября 2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Современные технологии и К" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Республика Хакасия, г. Саяногорск, РП Черемушки, дата регистрации - 05.10.2012)

к обществу с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации - 28.12.2016)

о взыскании задолженности, неустойки,

в отсутствие представителей сторон,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии и К" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору субподряда от 20.06.2020 № 508С001С781/1 в размере 984 377,41 руб., неустойки в сумме 49 218,87 руб. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 28.09.2021 возбуждено производство по делу.

Представитель истца ФИО2 к участию в судебном заседании не допущен, в связи с отсутствием доказательств наличия высшего юридического образования. Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание явку представителей не обеспечил. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "Современные технологии и К" (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (подрядчик) 20.07.2020 заключен договор № 508С001С781/1.

В соответствии с пунктом 2.1 договора в порядке и на условиях, установленных договором, проектно-сметной документацией, календарным графиком выполнения работ в соответствии со СНиП, ГОСТ, и действующим законодательством субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить в полном объеме следующие работы по строительству объекта, обеспечивающие ввод его в эксплуатацию: благоустройство и озеленение промплощадки между ж/д путями 14 и 20, далее именуемые «Работы», а подрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. 

Согласно пункту 4.1 договора цена выполняемых субподрядчиком по договору работ определена на основании проектно-сметной документации и закреплена сторонами в протоколе согласования цены работ (приложение № 1 к договору).

На основании пункта 4.4.3 договора все платежи осуществляются подрядчиком ежемесячно, за фактически выполненные и принятые подрядчиком работы, на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В названных документах указываются объем и стоимость выполненных работ и использованных материалов, наименование и код инвестиционного проекта подрядчика, наименование и код объекта основных средств, наименование и код пакета работ. Подрядчик производит удержание в размере 5 % от стоимости выполненных субподрядчиком работ (гарантийное удержание), указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) за соответствующий отчетный период. Удержанные суммы по соответствующему объекту выплачиваются субподрядчику после подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) и предоставления всех документов, названных в пункте 4.10 договора. В связи с частичным надлежащим исполнением обязательств (этапа работ) по договору указанного в календарном графике выполнения работ (приложение № 1/1 к договору), обеспеченных суммой гарантийного удержания, Субподрядчик вправе обратиться к подрядчику с официальным письмом, а подрядчик обязан немотивированно не уклоняться от рассмотрения обращения субподрядчика о частичной выплате гарантийного удержания в размере не более 4 % от стоимости выполненного и принятого этапа и рассмотреть предложение субподрядчика в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента обращения субподрядчика. Выплата части гарантийного удержания на этап работ производится при условии своевременного выполнения этапа работ, отсутствия замечаний по качеству и сданного подрядчику полного комплекта исполнительной документации на соответствующий этап работ. При удовлетворении предложения субподрядчика, оплата части гарантийного удержания производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия Подрядчиком положительного решения о частичной выплате гарантийного удержания, о чем письменно уведомляет субподрядчика, на основании счета субподрядчика и при условии подписания сторонами акта о выполнении этапа работ (приложение № 1/17 к договору).

Пунктом 15.4 договора установлено, что за просрочку оплаты принятых работ, при отсутствии вины субподрядчика, подрядчик по письменному требованию субподрядчика уплачивает неустойку в размере 0,03% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы. Неустойка за просрочку оплаты работ не начисляется в случае, если субподрядчиком не были своевременно предоставлены подрядчику надлежащим образом оформленные счет-фактура, счет на оплату выполненных работ, либо в случае, если названные документы были переданы субподрядчиком не уполномоченным лицам подрядчика, а также в иных случаях, установленных договором, когда подрядчик вправе приостановить платеж по договору.

Сторонами подписаны акт от 02.11.2020 на сумму 4 949 662,00 руб. без НДС, реестр 1 за период с 01.08.2020 по 06.10.2020, справка КС-3 от 01.02.2021 на сумму 5 939 594,40 руб. с НДС, счет-фактуру от 02.11.2020 № 36 на сумму 5 939 594,40 руб. с НДС, акт от 01.02.2021 на сумму 637 834,00 руб. без НДС, расчет 1 стоимости вахтовых затрат, реестр 2 за период с 01.08.2020 по 06.10.2020, справка КС-3 от 01.02.2021 на сумму 765 400,80 руб. с НДС, счет-фактуру от 01.02.2021 № 4 на сумму 5 939 594,40 руб. с НДС.

За просрочку оплаты принятых работ исполнителем начислена пеня за период с 01.03.2021 по 08.09.2021 в сумме 49 218,87 руб. (984 377,41 руб. х 5% (984 377,41 руб. х 0,03% х 192 дня = 56 700,13 руб.)).

Исполнитель в претензии от 10.06.2021 № 12 просил оплатить задолженность за выполненные работы в размере 984 377,41 руб. Претензия направлена Почтой России 10.06.2021 (опись, кассовый чек).

Задолженность и неустойка не оплачены до настоящего времени, что послужило основанием для обращения исполнителя в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Из материалов дела следует, что между обществом с ограниченной ответственностью "Современные технологии и К" (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (подрядчик) 20.07.2020 заключен договор № 508С001С781/1, правоотношения сторон регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. На основании пункта 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как усматривается из материалов дела, сторонами подписаны акт от 02.11.2020 на сумму 4 949 662,00 руб. без НДС, реестр 1 за период с 01.08.2020 по 06.10.2020, справка КС-3 от 01.02.2021 на сумму 5 939 594,40 руб. с НДС, счет-фактуру от 02.11.2020 № 36 на сумму 5 939 594,40 руб. с НДС, акт от 01.02.2021 на сумму 637 834,00 руб. без НДС, расчет 1 стоимости вахтовых затрат, реестр 2 за период с 01.08.2020 по 06.10.2020, справка КС-3 от 01.02.2021 на сумму 765 400,80 руб. с НДС, счет-фактуру от 01.02.2021 № 4 на сумму 5 939 594,40 руб. с НДС.  

Каких-либо замечаний по объемам выполненных работ, их стоимости ответчиком не указано, претензий к качеству выполненных работ - не заявлено. Принятие выполненных работ подтверждается подписью директора общества и заверено печатью ответчика.

Истцом указано, что размер задолженности составляет 984 377,41 руб.

Ответчик отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил, требование истца не оспорил. В силу пункта 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которых истец основывает требования, считаются признанными ответчиком, поскольку им прямо не оспорены, возражения относительно существа заявленных требований не заявлены. 

С учетом изложенного, требование истца о взыскании с ответчика 984 377,41 руб.                  задолженности является правомерным.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика неустойки в размере 49 218,87 руб.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 4.4.3 договора все платежи осуществляются подрядчиком ежемесячно, за фактически выполненные и принятые подрядчиком работы, на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В названных документах указываются объем и стоимость выполненных работ и использованных материалов, наименование и код инвестиционного проекта подрядчика, наименование и код объекта основных средств, наименование и код пакета работ. Подрядчик производит удержание в размере 5 % от стоимости выполненных субподрядчиком работ (гарантийное удержание), указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) за соответствующий отчетный период. Удержанные суммы по соответствующему объекту выплачиваются субподрядчику после подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (формы КС-11) и предоставления всех документов, названных в пункте 4.10 договора. В связи с частичным надлежащим исполнением обязательств (этапа работ) по договору указанного в календарном графике выполнения работ (приложение № 1/1 к договору), обеспеченных суммой гарантийного удержания, Субподрядчик вправе обратиться к подрядчику с официальным письмом, а подрядчик обязан немотивированно не уклоняться от рассмотрения обращения субподрядчика о частичной выплате гарантийного удержания в размере не более 4 % от стоимости выполненного и принятого этапа и рассмотреть предложение субподрядчика в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента обращения субподрядчика. Выплата части гарантийного удержания на этап работ производится при условии своевременного выполнения этапа работ, отсутствия замечаний по качеству и сданного подрядчику полного комплекта исполнительной документации на соответствующий этап работ. При удовлетворении предложения субподрядчика, оплата части гарантийного удержания производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия Подрядчиком положительного решения о частичной выплате гарантийного удержания, о чем письменно уведомляет субподрядчика, на основании счета субподрядчика и при условии подписания сторонами акта о выполнении этапа работ (приложение № 1/17 к договору).

Пунктом 15.4 договора установлено, что за просрочку оплаты принятых работ, при отсутствии вины субподрядчика, подрядчик по письменному требованию субподрядчика уплачивает неустойку в размере 0,03% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы. Неустойка за просрочку оплаты работ не начисляется в случае, если субподрядчиком не были своевременно предоставлены подрядчику надлежащим образом оформленные счет-фактура, счет на оплату выполненных работ, либо в случае, если названные документы были переданы субподрядчиком не уполномоченным лицам подрядчика, а также в иных случаях, установленных договором, когда подрядчик вправе приостановить платеж по договору.

В связи с тем, что ответчиком допущена просрочка оплаты принятых работ, истец начислил пеню за период с 01.03.2021 по 08.09.2021 в сумме 49 218,87 руб. (984 377,41 руб. х 5% (984 377,41 руб. х 0,03% х 192 дня = 56 700,13 руб.)), то есть размер неустойки определен истцом с учетом ограничения, установленного пунктом 15.4 договора.

Расчет неустойки проверен  судом, признан верным.

Соблюдение истцом претензионного порядка разрешения спора подтверждается материалами дела.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению полностью.

В силу пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 23 336,00 руб., за рассмотрение заявления об обеспечении иска – 3 000,00 руб.

Истец при обращении в суд оплатил государственную пошлину в сумме 56 525,00 руб., то есть на 30 189,00 руб. больше установленного размера пошлины.

Учитывая результат рассмотрения дела и отказ в принятии обеспечительных мер, с ответчика в пользу истца 23 336,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины; излишне уплаченная государственная пошлина в размере 30 189,00 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета; государственная пошлина в сумме 3 000,00 руб. за рассмотрение обеспечительных мер подлежит отнесению на истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой"                                  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации - 28.12.2016)                      в пользу общества с ограниченной ответственностью "Современные технологии и К"                  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Республика Хакасия, г. Саяногорск, РП Черемушки, дата регистрации - 05.10.2012) 984 377,41 руб. задолженности, 49 218,87 руб. неустойки, 23 336,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Современные технологии и К" (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 30 189,00 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щёлокова