АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Севастополь 

«17» августа 2018 года Дело № А84-1532/18  

Полный текст судебного акта изготовлен 17.08.2018  

Резолютивная часть судебного акта оглашена 15.08.2018 Арбитражный суд города Севастополя В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., 

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Публичного  акционерного общества «Энергетическая компания «Севастопольэнерго»  

к Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРРА» 

<

...>, ИНН 

<

***>  

о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, у с т а н о в и л : 

15.05.2018 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось ПАО «ЭК  «Севастопольэнерго» в лице Филиала в г. Севастополе (истец) с исковым заявлением о  взыскании с ООО «ТЕРРА» (ответчик) задолженности по оплате работ, выполненных в  рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения   № 25016-836 от 13.11.2015 в сумме 1 571 494,75 руб..  

Ответчик с иском не согласился, представил отзыв, в котором указал на не  наступление срока исполнения обязательства по оплате.  

Из материалов дела следует, что 13.11.2015 между истцом как сетевой  организацией и ответчиком как заявителем был заключен договор № 25016-836, по  условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательство по  осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств  

заявителя к энергопринимающих устройствам третьих лиц, урегулированию  отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами  принадлежащим им объектов электросетевого хозяйства, с учётом следующих  характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств 238,1 кВт, категория надежности: I, II, класс напряжения электрических  сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.  Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоквартирного  жилого дома со встроенными помещениями и подземным паркингом по ул. Папанина,  дом 3А.  

Согласно техническим условиям № 1592/08 от 17.07.20016 (п.10.2) истец обязан  выполнить технологическое присоединение ЭПУ объекта к электрическим сетям, в  состав которого включены:  

- проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических  условий;  

- осмотр (обследование) должностным лицом органа федерального  государственного энергетического надзора при участии сетевой организации  применяемых ЭПУ заявителя;  

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения ЭПУ  заявителя.  

По условиям п.10 договора размер платы за технологическое присоединение  составляет 3 928 736,86 руб., которая оплачивается в следующем порядке:  

10% - 392 873,69 руб. в течение 15 дней со дня заключения договора; 

30% - 1 178 621,06 руб. в течение 60 дней со дня заключения договора, но не  позже дня фактического присоединения;  

20% - 785 747,37 руб. в течение 180 дней со дня заключения договора, но не  позже дня фактического присоединения;  

30% - 1 178 621,06 руб. – 1 178 621,06 руб. в течение 15 дней со дня  фактического присоединения;  

10% - 392 873,69 руб. в течение 10 дней со дня подписания акта о  технологическом присоединении.  

Истец указывает, что свои обязательства по технологическому присоединению  энергопринимающих устройств ответчика к устройствам третьих лиц он выполнил, что  подтверждается актом рабочей комиссии от 20.06.2017. Исходя из данного акта,  приемочная комиссия в лице представителей истца произвела прием в эксплуатацию  строительство: КТП-1465 (новая), КЛ-6кВ КТП-1465 яч.5-ТП-75 яч.2; КЛ-6кВ КТП- 

1465 яч.2-ТП-418 яч.5. Однако, ответчик уклоняется от подписания акта выполненных  работ и оплаты предпоследнего и последнего платежей.  

В подтверждение осуществления технологического присоединения истец  представил также справку о стоимости выполненных работ, акт о приемке  выполненных работ, подписанным совместно с привлеченным истцом лицом для  строительства КТПБ-6/0, КЛ-6кВ, проектно-изыскательских работ, а также договор  подряда с данным лицом.  

Вместе с тем, из п.12 технических условий следует, что фактическое  присоединение ЭПУ заявителя будет произведено после осмотра присоединенных ЭПУ  должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  при участии представителей сетевой организации и заявителя и после выдачи  уполномоченным органом федерального государственного энергетического надзора  разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.  

По правилам статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение  его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики,  полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений,  основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении  деятельности в сфере электроэнергетики определяются Федеральным законом от  26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике).  

Согласно пункту 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, по договору об  осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на  себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления  такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в  случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об  электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий,  обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их  проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению  энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию  отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации)  такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства  (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Плата по договору об  осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным  

условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому  присоединению.  

По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать  мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического  присоединения, а потребитель обязан помимо всего прочего внести плату за  технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1  статьи 26 Закона об электроэнергетике).  

Порядок технологического присоединения установлен Правилами  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным  лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от  27.12.2004 № 861 (далее - Правила N 861).  

Пунктом 7 Правил № 861 предусмотрено, что технологическое присоединение -  это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание  условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки  сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и  составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и  разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении  технологического присоединения.  

В соответствии со ст. 328 ГК РФ ни одна из сторон обязательства, по условиям  которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду  исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.  

Между тем, требуя оплату с ответчика за конечный результат, для достижения  которого заключался договор, истец не доказал, что исполнил свои обязательства по  договору в полном объеме, что фактическое присоединение ЭПУ ответчика состоялось  в соответствии с порядком, установленном законом. Указывая на уклонение ответчика  от подписания окончательного акта, истец не представил доказательств выдачи  уполномоченным органом федерального государственного энергетического надзора  разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.  

Взыскание в принудительном порядке с должника предварительной оплаты  (аванса) по спорному договору действующим законодательством не предусмотрено.  Названный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в Определении  Верховного Суда РФ от 01.06.2018 № 303-ЭС18-6227 по делу № А51-10891/2017.  

Поскольку технологическое подключение фактически не состоялось, то  

оснований для взыскания предварительной оплаты с ответчика до достижения  

предусмотренного договором результата не имеется. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении искового заявления отказать. 

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  

апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный  

законом срок. 

Судья С.Н. Архипова