Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-100098/2021

14 февраля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  10 февраля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  14 февраля 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «100 тонн монтаж» (адрес: 620014, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Петербургцемент» (адрес: 188561, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании денежных средств, 

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 20.01.2022), 

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 27.01.2022), 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «100 тонн монтаж» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Петербургцемент» о взыскании 5 215 248 руб. 70 коп. неустойки по договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ от 13.02.2018 № 18-3045-15 (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ). 

Ответчик против удовлетворения требования истца не возражал. 

В судебном заседании истец поддержал заявленное требование в полном объеме с учетом уточнения, ответчик требование истца о взыскании неустойки признал. 

Суд установил, что между обществом с ограниченной ответственностью «Петербургцемент» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «100 ТОНН МОНТАЖ» (до переименования ООО «100 ТОНН СЕРВИС», далее - Подрядчик) заключен Договор № 18-3045-15 от 13.02.2018 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) и электроснабжение производственной площадки ООО «Петербургцемент» (далее – Договор). 

Общая стоимость подлежащих выполнению Работ определяется на основании Реестра локальных смет, сформированного на основании Локальных смет, и составляет 170 198 000,5 руб. (пункт 3.1 Договора). 

Согласно пункту 3.9. Договора если по причинам, не зависящим от Подрядчика, при полном выполнении Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору и получения (ответственность Заказчика совместно с Подрядчиком) заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от органов государственного строительного надзора, Заказчик не осуществит подписание соответствующих Актов приемки объекта капитального строительства в течение 90 календарных дней с даты подписания Заказчиком по окончании всех работ Акта приемки выполненных работ, то Заказчик перечисляет Подрядчику 10 % от стоимости Договора на основании выставленного счета в течение 10 рабочих дней.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.10.2019 по судебному делу № А56-93009/2019 установлено, что в соответствии с пунктами 3.7, 3.8, 3.9, 7.16 Договора и положениями статей 720, 753 ГК РФ ООО «Петербургцемент» обязано было принять выполненные ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» работы не позднее 16.01.2019 и 17.01.2019 и оплатить оставшиеся 10% от стоимости договора не позднее 17.04.2019, и 5% - не позднее, 17.07.2019. Однако, ООО «Петербургцемент» исполнило свою обязанность по оплате выполненных ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» (до переименования - ООО «100 ТОНН СЕРВИС») работ только 16.04.2021. 

В соответствии с пунктом 11.3 Договора за нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ согласно условиям настоящего договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,03 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ по настоящему Договору.

Срок оплаты ООО «Петербургцемент» платежа в размере 17 019 800,05 рублей истек 17.04.2019. ООО «Петербургцемент» осуществило оплату указанной суммы 16.04.2021, просрочка составила 729 дней. Размер неустойки оставляет 3 722 201,1 руб. 

Срок оплаты ООО «Петербургцемент» платежа в размере 7 800 549,12 руб. истек 17.07.2019. ООО «Петербургцемент» осуществило оплату указанной суммы 16.04.2021, просрочка составила 638 дней,. Размер неустойки составляет 1 493 047,6 руб. 

Таким образом, общий размер неустойки за несвоевременную оплату выполненных ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» работ составляет 5 215 248,7 руб. 

В соответствии с пунктом 12.1 Договора перед передачей дела в суд обязательно предъявление претензии другой Стороне, рассмотрение претензии осуществляется в течение 10 календарных дней. ООО «100 ТОНН МОНТАЖ» 30.04.2021 направило в адрес ООО «Петербургцемент» претензию с требованием об уплате неустойки по Договору в размере 5 215 248,7 руб. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Факт просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ установлен вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.10.2019 по делу № А56-93009/2019 между теми же сторонами, поэтому в силу части 2 статьи 69 АПК РФ не подлежит повторному доказыванию. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается нарушение обязательств по договору в части сроков оплаты выполненных работ, в связи с чем, у истца возникло право на взыскание пеней. 

Проверив расчет, суд признал его обоснованным, выполненным в соответствии с условиями договора и подлежащим применению.

Ответчик расчет неустойки не оспорил; контррасчет не представил; ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ не заявил. 

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Петербургцемент» в пользу общества с ограниченной ответственностью «100 тонн монтаж» 5 215 248 руб. 70 коп. неустойки и 49 076 руб. 20 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.