ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

дело № А40-158198/23

 

Резолютивная часть постановления объявлена 05 февраля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 07 февраля 2024 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Тетюка В.И., Бодровой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.11.2023г. (резолютивная часть от 10.10.2023г.) по делу № А40-158198/23 

по иску ООО "МОСТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к АО "КРОНШТАДТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании, 

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.01.2024, 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 02.11.2023, ФИО4 по доверенности от 29.12.2023 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "МОСТ" (подрядчик) предъявило  АО "КРОНШТАДТ" (заказчик) иск о признании п. 7 итогового акта по Договору №2-СМР/2021 от 25.01.2021 г. заключённым в следующей редакции: «7. Стоимость выполненных работ 5 241 568 164,24 руб. (Пять миллиардов двести сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 24 коп.»; о взыскании задолженности в размере 716 466 167, 95 руб.; неустойки в размере 2 149 398, 30 руб., с последующим начислением по день фактического исполнения, начиная с 14.07.2023.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 10.10.2023г., изготовленным в полном объеме 15.11.2023г. исковые требования удовлетворены частично.

Суд взыскал с АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОНШТАДТ" в пользу ООО "МОСТ" задолженность в размере 716 466 167, 95 руб.; пени в размере 2 149 398, 30 руб., а также с 14.07.2023 по день фактического исполнения в размере 0,01% от суммы 716 466 167, 95 руб. за каждый день просрочки, но не более 35 823 308, 39 руб.; госпошлину в размере 200 000 руб. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции явились Истец и Ответчик; заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, полагает мировое соглашение подлежащим принятию судом, а производство по апелляционной жалобе – прекращению.

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное ООО "МОСТ" (Истец) и АО "КРОНШТАДТ" (Ответчик) по делу № А40-158198/23 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:

«Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ» (далее - ООО «Мост») в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,

Акционерное общество «Кронштадт» (далее - АО «Кронштадт) в лице Генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, с другой стороны (при совместном упоминании именуются Стороны),

в целях урегулирования судебного спора по делу № А40-158198/2023 по иску Истца к Ответчику о признании п. 7 итогового акта по Договору №2-СМР/2021 от 25.01.2021 г. заключённым в следующей редакции: «7. Стоимость выполненных работ 5 241 568 164,24 руб. (Пять миллиардов двести сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 24 коп.»; о взыскании задолженности в размере 716 466 167, 95 руб., пени в размере 2 149 398, 30 руб., с продолжением начисления пени, начиная с 14.07.2023 по день фактического исполнения в размере 0,01% от суммы 716 466 167, 95 руб. за каждый день просрочки, но не более 35 823 308, 39 руб., госпошлины в размере 206 000 руб.,

заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Цена Договора №2-СМР/2021 от 25.01.2021 составляет 4 968 148 744 (Четыре миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто сорок восемь тысяч семьсот сорок четыре) руб. 68 коп., в том числе НДС (20%) 828 024 790 (Восемьсот двадцать восемь миллионов двадцать четыре тысячи семьсот девяносто) руб. 78 коп., в т.ч.:

1.1. Стоимость материалов, оборудования и конструкций 2 933 162 185 (Два миллиарда девятьсот тридцать три миллиона сто шестьдесят две тысячи сто восемьдесят пяты руб. 68 коп.;

1.2. Стоимость строительно-монтажных работ - 1 847 720 138 (Один миллиард восемьсот сорок семь миллионов семьсот двадцать тысяч сто тридцать восемь) руб. 63 коп.;

1.3. Стоимость прочих работ - 187 266 420 (Сто восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) руб. 37 коп.

Цена Договора №2-СМР/2021 от 25.01.2021 в размере 4 968 148 744 (Четыре миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто сорок восемь тысяч семьсот сорок четыре) руб. 68 коп., в том числе НДС (20%) 828 024 790 (Восемьсот двадцать восемь миллионов двадцать четыре тысячи семьсот девяносто) руб. 78 коп. является твердой, окончательной и изменению не подлежит.

Цена договора включает в себя все виды работ по выполнению всего комплекса работ по строительству здания «Производственного корпуса по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу: 

<

...> (далее Объект), включая все услуги и расходы, связанные с выполнением таких работ до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта. В случае выявления недостатков в гарантийный период, вышеперечисленные расходы Истец несет до полного устранения недостатков.

2.Стоимость выполненных работ, подлежащая отражению Сторонами в п. 7 Итогового акта по Договору №2-СМР/2021 от 25.01.2021, составляет 4 968 148 744 (Четыре миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто сорок восемь тысяч семьсот сорок четыре) руб. 68 коп., в том числе НДС (20%) 828 024 790 (Восемьсот двадцать восемь миллионов двадцать четыре тысячи семьсот девяносто) руб. 78 коп.

3.На дату заключения настоящего Мирового соглашения Сторонами подписаны Акты выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3 на общую сумму 4 518 148 744,68 руб., которые оплачены АО «Кронштадт» в размере 4 436 354 187,43 рублей за вычетом гарантийного удержания в размере 81 794 557,25 рублей.

4.Общая стоимость всех иных работ, фактически выполненных ООО «Мост», необходимых для нормальной эксплуатации Объекта и подлежащих оплате АО «Кронштадт» с подписанием Сторонами Акта/ов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки/ок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) составляет 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) руб. 00 коп. Гарантийные удержания с данной стоимости работ не удерживаются и не выплачиваются.

5.ООО «Мост» не позднее 05.02.2024 года в отношении работ, указанных в п. 4 настоящего Мирового соглашения, обязуется подготовить и представить АО «Кронштадт» по акту приема-передачи следующие документы: локальные сметные расчеты от 17.01.2024, комплект Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №№ 84-123 от 17.01.2024, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 8 от 17.01.2024, счет-фактуру от 17.01.2024. АО «Кронштадт» обязуется подписать и возвратить ООО «Мост» один экземпляр указанных документов в срок не позднее 12.02.2024.

6.Не позднее 05.02.2024 АО «Кронштадт» обязуется подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №4 к договору №2-СМР/2021 от 25.01.2021 (Приложение № 1 к настоящему Мировому соглашению), Акт о приеме-передаче результатов работ в гарантийную эксплуатацию по форме приложения №5 к Договору №2-СМР/2021 от 25.01.2021 (Приложение № 2 к настоящему мировому соглашению).

7.Стороны пришли к соглашению, что все локальные сметные расчеты, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на сумму 730 541 886,94 руб. (в т.ч. НДС 20%), не подписанные АО «Кронштадт» по причине превышения предельной цены Договора №2-СМР/2021 от 25.01.2021, являются аннулированными.

8.Установленная в п.4 Мирового соглашения стоимость всех иных работ, фактически выполненных ООО «Мост» и необходимых для нормальной эксплуатации Объекта, в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) руб. 00 коп. подлежит оплате АО «Кронштадт» согласно следующего графика:

 

№

Дата платежа

Сумма платежа, руб.

1

До 01.06.2024

100 000 000,00

2

До 01.12.2024

350 000 000,00

9. Стороны пришли к соглашению, что выплата АО «Кронштадт» денежных средств в размере и сроки согласно п. 8 настоящего Мирового соглашения, подтверждает надлежащее исполнение АО «Кронштадт» своих обязательств по Договору №2-СМР/2021 от 25.01.2021 и отсутствие у ООО «Мост» каких-либо материальных или иных претензий к АО «Кронштадт» по исполнению  Договора  №2-СМР/2021   от   25.01.2021,   за   исключением   возврата  гарантийных удержаний.

Какие-либо проценты за предоставление рассрочки оплаты указанных сумм согласно установленного в пункте 8 настоящего Мирового соглашения графика не начисляются и не уплачиваются.

10.Платежи, указанные в пункте 8 настоящего Мирового соглашения, осуществляются АО «Кронштадт» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Мост» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, р/с 

<

***> в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225).

11.ООО «Мост» отказывается от взыскания суммы задолженность в размере 266 466 167,95 (Двести шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят семь) руб. 95 коп. (в т.ч. НДС 20%), а также взыскания пени в размере 2 149 398, 30 руб., продолжения начисления пени, начиная с 14.07.2023 по день фактического исполнения в размере 0,01% от суммы 716 466 167, 95 руб. за каждый день просрочки, но не более 35 823 308, 39 руб.

12.Стороны пришли к соглашению, что дополнительные, не указанные в настоящем Мировом соглашении расходы, убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки и иные штрафные санкции и/или требования, касающиеся неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору №2-СМР/2021 от 25.01.2021, Стороны друг другу не выставляют, не начисляют, указанные расходы и/или убытки и/или штрафные санкции уплате/возмещению не подлежат. Исключением являются требования Сторон, вытекающие из гарантийных обязательств, ненадлежащего качества выполненных работ.

13.В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме ООО «Мост» документов, указанных в п. 5 настоящего Мирового соглашения, ООО «Мост» компенсирует АО «Кронштадт» сумму НДС, возможность возмещения которого из федерального бюджета утрачена АО «Кронштадт» по причине отсутствия вышеуказанных документов. Компенсация осуществляется на основании счета АО «Кронштадт».

14.Стороны подтверждают, что заключение настоящего Соглашения является полным и окончательным урегулированием всех споров, связанных с оплатой АО «Кронштадт» выполненных по Договору №2-СМР/2021 от 25.01.2021 ООО «Мост» работ, за вычетом невыплаченных гарантийных удержаний, включая любые штрафные санкции, убытки и расходы, компенсации, упущенную выгоду, инфляционные потери и/или убытки, связанные с исполнением АО «Кронштадт» обязательств по Договору. Положения настоящего пункта применяются с учетом положений п. 12.

15.Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.

16.Стороны договорились о следующем распределении судебных расходов в соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ:

16.1 ООО «Мост» возмещается государственная пошлина в размере 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей в следующем порядке:

50 процентов от суммы уплаченной госпошлины, а именно 103 000 руб. в соответствии с положениями п. 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ подлежит возврату ООО «Мост» из федерального бюджета;

50 процентов от суммы уплаченной госпошлины, а именно 103 000 руб., АО «Кронштадт» обязуется возместить ООО «Мост» в течение 30 дней с даты утверждения настоящего Мирового соглашения.

16.2. Расходы на оплату услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с рассмотрением дела № А40-158198/2023 (в том числе расходы на проведение экспертиз, привлечение экспертов и специалистов), Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

17.Настоящее Мировое соглашение заключено по обоюдному согласию сторон, всоответствии со ст. ст. 139-141 АПК РФ, в целях устранения возникшего спора, явившегося причиной предъявления искового заявления по указанному выше судебному спору.

18.Настоящее Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежитпринудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца.

19.Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение не нарушает праваи законные интересы других лиц и не противоречит действующему законодательству РФ.

20.В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Стороны заверяют, что:

все корпоративные процедуры, необходимые для одобрения настоящего мирового соглашения, были ими соблюдены либо таковые не требуются;

лица, подписавшие настоящее мировое соглашение, обладают всеми полномочиями на его подписание.

21.Стороны, в соответствии со ст. 139, 141 и 150 АПК РФ будут ходатайствовать перед Девятым арбитражным апелляционным судом об утверждении настоящего Мирового соглашения.

22.Мировое соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, по одному для каждой стороны, третий экземпляр - в Девятый арбитражный апелляционный суд.

23.Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом».

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2023г. (резолютивная часть от 10.10.2023г.) по делу № А40-158198/23 отменить.

Производство по делу прекратить.

Возвратить ООО "МОСТ" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 103 000 руб., уплаченную при подаче иска по платежному поручению от 29.06.2023 № 7439.

Основанием для возврата государственной пошлины, является настоящее постановление.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

 

Председательствующий судья                                                             Е.Е. Кузнецова 

 

Судьи                                                                                                     В.И. Тетюк

 

                                                                                                                 Е.В. Бодрова