Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

« 02 » октября 2024 г. Дело № А12-21335/2024  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Калмыковская средняя школа» Клетского муниципального района  Волгоградской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Эверест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> об  обязании безвозмездно устранить недостатки, с участием в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора  администрации Клетского муниципального района Волгоградской области  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, по доверенности 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по контракту от 01.06.2020 г.   № 0329200062220002462 на выполнение работ по ремонту кровли МКОУ «Калмыковская  СШ» Клетского муниципального района Волгоградской области за счет собственных  средств в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  настоящему делу устранить недостатки, выявленные на объекте, а именно, ввиду полного  отсутствия всех элементов кровли выполнить следующие виды работ:  

- Сборка двухскатной кровли площадью 630 кв. м (с учетом отвода атмосферных  вод) с укладкой мауэрлата, установкой стропил, подкосов, прогонов из бруса деревянного  сечением не менее 50x150 мм.  

- В целях недопущения возникновения нарушения целостности предусмотреть  крепления деревянных элементов к бетонным плитам покрытия.  

- Устройство обрешетки и ветровых элементов из досок толщиной до 30 мм для  площади 630 кв. м.  

- Устройство пароизоляции (пленка гидроизоляционная) для площади 630 кв.м. 

- Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа для площади 630 кв. м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эверест» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Стрельникова Н.В.