РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-167148/22-110-1250

г. Москва

25 января 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13 января 2023  года 

Решение в полном объеме изготовлено 25 января 2023  года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЭТУАЛЬСТРОЙПРОЕКТ" (119361, ГОРОД МОСКВА, 2-Й ОЧАКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 1(А), ОГРН: 5167746450944) к государственному бюджетному учреждению города Москвы "ЖИЛИЩНИК ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА" (129515, ГОРОД МОСКВА, АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА УЛИЦА, 4, 2, ОГРН: 5137746236800) о взыскании 9 390 022,46 руб.,

при участии:

от истца – Нечаев  К.В. , гендиректор,

от ответчика- Ефимкина Н.С. по дов.  от  29.01.2021,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЭТУАЛЬСТРОЙПРОЕКТ" обратилось с иском к государственному бюджетному учреждению города Москвы "ЖИЛИЩНИК ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 9 278 678,31 руб. задолженности по договору №32110654582 от 11.10.2021, 466 253,59 руб. пеней, пеней на сумму 9 278 678,31 руб., исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды с 05.01.2023 по дату фактиечского исполнения обязательства.

Ответчик иск не признал, отзыв не представил.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ООО «ЭтуальСтройПроект» (далее - Истец, Подрядчик) и ГБУ «Жилищник Останкинского района» (далее - Ответчик, Заказчик) на основании результатов определения Подрядчика способом закупки электронный конкурс в электронной форме (реестровый № торгов 32110654582, протокол от 30.09.2021 г. № 32110654582) был заключен Договор № 32110654582 от 11.10.2021 г. (далее - Договор) на разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

Москва г., Королева Академика ул. 7 к.1

Москва г., Мира просп. 91 к.3

Москва г., Останкинская 2-я ул. 2

Москва г., Лазоревый пр. 14

Москва г., Уржумская ул. 3 к.1

Москва г., Уржумская ул. 3 к.2

Москва г., Уржумская ул.5 к.2

Согласно пункту 1.1. Договора - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, осуществляемый за счет средств фонда капитального ремонта в объеме, установленном в Техническом задании, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п. 2.6.2 Договора - Заказчик поэтапно оплачивает работы, выполненные Подрядчиком на соответствующем этапе Графика выполнения работ (Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, с приложением отчетных документов, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

Работы по разработке проектно-сметной документации по всем вышеперечисленным объектам были в полном объёме завершены Истцом в сроки, установленные Договором, прошли рассмотрение рабочей комиссией с участием ФКР (что подтверждается соответствующими актами приемки выполненных работ по разработке проектной документации, подписанными без замечаний).

Кроме того, в соответствии с п. 4.3. Договора проектно-сметная документация по всем вышеперечисленным объектам прошла экспертизу в Государственном автономном учреждении г. Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза), были выданы положительные заключения.

По факту прохождения разработанной Истцом проектно-сметной документацией всех установленных Договором и действующим законодательством согласований и экспертиз итоговая проектно-сметная документация была направлена Ответчику в электронном виде по электронной почте в следующие даты:

Москва г., Королева Академика ул. 7 к.1 (ПСД передана Заказчику 27.01.2022 г.)

Москва г., Мира просп. 91 к.3 (ПСД передана Заказчику 01.02.2022 г.)

Москва г., Останкинская 2-я ул. 2 (ПСД передана Заказчику 12.02.2022 г.)

Москва г., Лазоревый пр. 14 (ПСД передана Заказчику 25.01.2022 г.)

Москва г., Уржумская ул. 3 к.1 (ПСД передана Заказчику 01.02.2022 г.)

Москва г., Уржумская ул. 3 к.2 (ПСД передана Заказчику 01.02.2022 г.)

Москва г., Уржумская ул.5 к.2 (ПСД передана Заказчику 01.02.2022 г.)

Факт передачи итоговой проектно-сметной документации подтверждается прилагаемыми к настоящему иску файлами электронных сообщений.

Акты сдачи-приемки выполненных работ, соответствующие счета на оплату и счет-фактуры были нарочно вручены Ответчику 08.04.2022 г., что подтверждается сопроводительным письмом № 17/22 от 08.04.2022 г.

Согласно п. 4.2. договора - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

Акты выполненных работ, полученные Ответчиком 08.04.2022 г., должны были быть им в течение 30 рабочих дней (либо в тот же срок должны быть представлены мотивированные возражения / замечания), однако до настоящего времени не подписаны. При этом компетентные мотивированные возражения по существу выполненных работ от Ответчика Истцу не поступали, тогда как правильность и качество выполненных работ подтверждены соответствующими заключениями Мосгорэкспретизы.

Согласно п. 5.3.1 Договора Подрядчик вправе требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в статье 4 Договора.

Также согласно п. 5.3.2 Договора Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 Договора.

Из п. 4 ст. 753 ГК РФ следует, что при уклонении одной из сторон от подписания акта выполненных работ на нем делается соответствующая отметка, и акт подписывается другой стороной в одностороннем порядке.

Таким образом, в соответствии с условиями договоров и нормами действующего гражданского законодательства, проектно-сметная документация по вышеперечисленным объектам Истцом разработана, прошла все необходимые согласования и экспертизы, передана Ответчику.

Поскольку Ответчик переданные ему 08.04.2022 г. акты выполненных работ в установленные законом и договором сроки не подписал и Истцу не направил, данные акты следует считать подписанными в одностороннем порядке с 26.05.2022 г., ввиду чего с этой даты у Заказчика возникает обязательство по их оплате.

Стоимость фактически выполненного объема работ составляет 9 278 678,31 руб., в т.ч. НДС 20%, в частности по объектам:

Москва г., Королева Академика ул. 7 к.1 - 1 156 201,40 руб., в т.ч. НДС 20%

Москва г., Мира просп. 91 к.3 - 3 937 564,83 руб., в т.ч. нДс 20%

Москва г., Останкинская 2-я ул. 2 - 2 027 041,30 руб., в т.ч. НДС 20%

Москва г., Лазоревый пр. 14 - 1 290 427,46 руб., в т.ч. НДС 20%

Москва г., Уржумская ул. 3 к.1 - 253 113,30 руб., в т.ч. нДс 20%

Москва г., Уржумская ул. 3 к.2 - 252 643,94 руб., в т.ч. НДС 20%

Москва г., Уржумская ул.5 к.2 - 361 686,08 руб., в т.ч. нДм 20%

Указанная стоимость работ Ответчиком до настоящего времени не оплачена.

Статьями 309, 310 и 408 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приёмку.

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Поскольку Ответчик переданные ему 08.04.2022 г. акты выполненных работ в установленные законом и договором сроки не подписал и Истцу не направил, данные акты следует считать подписанными в одностороннем порядке с 26.05.2022 г.

Из п. 7.8 Договора следует, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно п. 2.6.2. Договора - оплата должна быть произведена Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, т.е. а данном случае до 17.06.2022 г. включительно.

Следовательно, общий размер пени по Договору за просрочку Заказчиком оплаты выполненных работ составляет 111 344,15 руб.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ.

С учетом изложенного, истец просит взыскать 9 278 678,31 руб. задолженности по договору №32110654582 от 11.10.2021, 466 253,59 руб. пеней, пеней на сумму 9 278 678,31 руб., исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды с 05.01.2023 по дату фактического исполнения обязательства.

Вместе с тем, постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" постановлено:

1. Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев. 

Постановление вступило в силу с 01.04.2022

Согласно п.3 ч.3 ст. 9.1 Федерального закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 63 указанного Федерального закона не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В пунктах 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет. Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта Правительства Российской Федерации, если Правительством Российской Федерации не установлено иное (пункт 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве, часть 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", часть 8 статьи 23 действовавшего ранее Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"). В случае принятия Правительством Российской Федерации в период действия моратория решения о расширении перечня лиц, на которых он распространяется, следует исходить из того, что в отношении таких лиц мораторий действует со дня изменения названного перечня, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

В данном случае, Постановлением Правительства № 497 перечень лиц расширен, мораторий распространяется на всех лиц, за исключением указанных в п.2 постановления Правительства РФ №497.

Как указано в п. 7 названного постановления Пленума №44 в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Таким образом, поскольку требования возникли до 01.04.2022 (до расширения перечня лиц, на которых мораторий распространяется, т.е. до введения моратория и в отношении ответчика), то финансовые санкции не подлежат начислению с 01.04.2022 в течение действия моратория.

На основании изложенного, требования истца о взыскании процентов начисленных на общую сумму основного 9 278 678,31 руб., подлежат удовлетворению за период с 05.01.2023 по дату фактического исполнения обязательства по указанным выше основаниям.

Сумма процентов за период с 02.10.2022 по 04.01.2023 составляет 220 368,59 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с  государственного бюджетного учреждения города Москвы "ЖИЛИЩНИК ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА" ( ОГРН: 5137746236800)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "ЭТУАЛЬСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 5167746450944) 9 278 678 руб. 31  коп. задолженности, 220 368 руб. 59  коп. пени, пени на сумму  9 278 678 руб. 31  коп., исходя из  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату оплаты,  с  05.01.2023 по день фактической оплаты задолженности, 69 915 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ЭТУАЛЬСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 5167746450944)  в федеральный бюджет госпошлину в размере 1 775 руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко