Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-76287/18

14 декабря 2018 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 14 ноября 2018

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании  дело по заявлению 

Управление капитального строительства Администрации городского округа Мытищи(ИНН 5029147340, ОГРН 1115029000316)

к ООО "СТРОЙ ГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об устранении недостатков и дефектов работ, о предоставлении документации, взыскании штрафа 

при участии в заседании: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Управление капитального строительства Администрации городского округа Мытищи обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» об устранении недостатков и дефектов работ, выполненных по муниципальному контракту на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд городского округа Мытищи Московской области № 0848300062717000516-0258492-01 от 28.07.2017г., о предоставлении документации на материалы и оборудование, о взыскании штрафа.

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено МБУ Молодежный центр "Маяк".

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представители ответчика и третьего лица в  судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, ходатайств о рассмотрении дела в их отсутствие не заявляли, возражений на иск не представили.

Суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы искового заявления Управления капитального строительства Администрации городского округа Мытищи, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителя истца, суд полагает, что требования иска подлежат удовлетворению в полном объеме, в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что 28 июля 2017 года между Муниципальный образованием «Городской округ Мытищи Московской области», интересы которого представляло Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи (далее муниципальный заказчик)      и      Обществом      с      ограниченной      ответственностью      «СтройГрупп» (ООО «СтройГрупп», «Подрядчик) в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме (протокол итогов аукциона № 0848300062717000516-3-114/2017 от 14.07.2017) заключен муниципальный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд городского округа Мытищи Московской области № 0848300062717000516-0258492-01 (далее - Контракт).

Согласно п. 1.1 Контракта Подрядчик обязался выполнить работы по текущему ремонту помещений МБУ МЦ «Маяк», расположенных в здании по адресу: 

<

...>, в соответствии с Техническим заданием в объеме установленном в Локальном сметном расчете, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в размере, предусмотренном пунктом 2.1 Контракта.

Согласно п. 5.4.1 Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Муниципальному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

В соответствии с Техническим заданием все поставляемые для ремонта материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия пожарной безопасности, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности (далее - Документация).

Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, установленным в техническом задании, соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам. Результат выполненной работы должен обладать свойствами, указанными в Контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями к таким работам, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.

Сроки выполнения работ определены разделом 3 Контракта и Календарным планом. Окончание срока действия Контракта в соответствии с п. 3.3 Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

Согласно п. 6.1 Контракта подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта, а именно: обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 5.4.3 Контракта подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ в течение гарантийного срока, за свой счет.

Согласно п. 6.2 Контракта гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи приемки работ (услуг) по форме № 4 Приложения, который в комплекте отчетной документации (вместе с формами КС-2, КС-3, сертификатами на применяемые материалы и оборудование, а также документами, подтверждающими выполнение скрытых работ) в соответствии с п.4.1 Подрядчиком представляется Муниципальному заказчику.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов (п. 6.3 Контракта).

22.09.2017 года сторонами Контракта подписан Акт сдачи-приемки работ, Муниципальным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ и 12.10.2017 Муниципальный заказчик произвел оплату ремонта в полном объеме.

12.03.2018 в адрес Муниципального заказчика поступило письмо от директора МБУ МЦ «Маяк» об обнаружении дефектов выполненных Подрядчиком работ, которые ранее, в том числе при приемке работ, обнаружить не представилось возможным.

Направленные Муниципальным заказчиком специалисты обнаружили следующие дефекты работ, выполненных в рамках Контракта (фотографии имеютя в материалах дела):

№ п/п

Наименование выполненных работ

Описание обнаруженных дефектов

Объем

1.

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» в коридоре

Имеется вздутие напольных покрытий из линолеума на всей площади помещения (Фото «1»).

24,8 м2

2.

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самона^езающих

Не зафиксирован плинтус у дверного проема в коридоре (Фото «2»)

1 м

3.

Облицовка стен СМЛ по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем

Имеется разлом плиты СМЛ (Фото «3», «4»).

5м2

4.

Т-профиль ("Заглушка") универсальный длиной 3 м

Заглушка на стеновой панели не закреплена. (Фото «5»)

I шт.

5.

Установка и крепление наличников

Декоративные пластиковые накладки на стеновых панелях и пластиковые наличники на дверных проемах отклеились (Фото «6», «7», «8», «9»)

15м

6.

Устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

Имеется провисание подвесного потолка, подвесные элементы смонтированы и закреплены не надлежащим образом (Фото «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17»)

46 м2

7.

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» в кабинете

Имеется вздутие напольных покрытий из линолеума на всей площади помещения (Фото «18»).

17,6м2

8.

Профиль "Омега-проф" (стыковочный) универсальный длиной 3 м.

Стыковочный профиль отклеивается (Фото «19», «20», «21»)

21 шт.

Управлением капитального строительства администрации городского округа Мытищи в адрес Подрядчика были направлены требования от 02.02.2018 № И-110, от 06.03.2018 № И-3428, от 11.04.2018 № 3428, от 18.04.2018 № И-3637 об устранении недостатков, выявленных в рамках гарантийного срока, а также о предоставлении Документации (сертификатов на примененные материалы и оборудование, а также всех документов, подтверждающих выполнение работ (акты на скрытые работы)

№п/п

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса

Объем

Наименование документов

1

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых

24,8 м2

не представлены

сертификаты и акты

скрытых работ

2

Разборка бетонных фундаментов

26 м2

не представлены акты скрытых работ

Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной 4 см

0,9 мЗ

не представлены акты скрытых работ

4

Армирование подстилающих слоев и набетонок

25 кг

не представлены акты скрытых работ

5

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

24,8 м2

не представлены акты скрытых работ

6

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщины 40 мм

24,8 м2

не представлены акты скрытых работ

7

Линолеум коммерческий гомогенный (класс 34;43) ОЕКРШК МПЮЬАМ КОВШ ЕЬ 7, толщ.2,0 мм, Франция.

24,8 м2

не представлены сертификаты

8

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

24.8 м2

не представлены

сертификаты и акты

скрытых работ

9

Ь-профиль (внутренний угол) 8/10мм длш

Р-профиль (наружный угол) 8/10мм

длиной 3 м

Т-профиль ("Заглушка") универсальный

длиной 3 м

Профиль "Омега-проф" (стыковочный)

универсальный длиной 3 м

9 шт

19 шт 32 шт 32 шт

не представлены

сертификаты и акты на

подсистему

11

Устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

24,8 м2

не представлены

сертификаты и акты

скрытых работ

12

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

Зм

не представлены акты скрытых работ

13

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке,

суммарное сечение до 16 мм2

Зм

не представлены акты скрытых работ

14

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ь§, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

Зм.

не представлены акты скрытых работ

15

Ь-профиль (внутренний угол) 8/10мм

длиной 3 м

Р-профиль (наружный угол) 8/10мм длиной

Зм

Т-профиль ("Заглушка") универсальный

длиной 3 м

Профиль "Омега-проф" (стыковочный)

универсальный длиной 3 м

9 10 54 54

не представлены

сертификаты и акты на

подсистему

16

Шпатлевка Бетонит ЬК

14 кг

не представлены акты скрытых работ

17

Ь-профиль (внутренний угол) 8/10мм

ДЛИНОЙ 3 М

Р-профиль (наружный угол) 8/10мм длиной

Зм

Т-профиль ("Заглушка") универсальный

длиной 3 м

Профиль "Омега-проф" (стыковочный)

универсальный длиной 3 м

6

13

2 2

не представлены

сертификаты и акты на

подсистему

18

Устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

46 м2

не представлены

сертификаты и акты

скрытых работ

19

Облицовка стен СМЛ по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем

Зм2

не представлены

сертификаты и акты на

подсистему

20

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм

7

не представлены

сертификаты и акты

скрытых работ

21

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

82 м

не представлены акты скрытых работ

22

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в обшей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

81 м

не представлены акты скрытых работ

23

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ь5, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

83,64 м

не представлены акты скрытых работ

24

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

6 линий

не представлен протокол испытаний

25

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

6

токопроем ников

не представлен протокол испытаний

26

Ь-профиль (внутренний угол) 8/10мм

длиной 3 м

Р-профиль (наружный угол) 8/10мм

длиной 3 м

Т-профиль ("Заглушка") универсальный

длиной 3 м

Профиль "Омега-проф" (стыковочный)

универсальный длиной 3 м

4

7 15 15

не представлены

сертификаты и акты на

подсистему

27

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

8,3 м

не представлены акты скрытых работ

28

Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (1Р55) серии РН, с

Юм

не представлены акты скрытых работ

зондом, диаметром 16 мм

29

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

11 м

ие представлены акты скрытых работ

30

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ь5, с числом жил - 3 и сечением 1,5 м.

11 м

не представлены

сертификаты и акты

скрытых работ

^~31

Ь-профиль (внутренний угол) 8/10мм длиной 3 м

-профиль (наружный угол) 8/10мм длиной Зм

Т-профиль ("Заглушка") универсальный длиной 3 м

Профиль "Омега-проф" (стыковочный) универсальный длиной 3 м

6 4 21 21

не представлены

сертификаты и акты на

подсистему

32

Устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

17,6 м

ие представлены

сертификаты и акты на

подсистему

33

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

45 м

не представлены акты скрытых работ

34

Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (1Р55) серии РН, с зондом, диаметром 16 мм

45 м

не представлены акты скрытых работ

35

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в обшей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

45.9

не представлены акты скрытых работ

36

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-Ь5, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

45

ие представлены

сертификаты и акты

скрытых работ

37

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

2 шт

не представлены акты проверки оборудования

38

Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150

38 пл-

не представлены акты скрытых работ

Таким образом, Подрядчик уведомлен в досудебном порядке о необходимости устранения дефектов по ремонтным работам, выявленных в период гарантийного срока, также о предоставлении документов (сертификатов).

03.05.2018 представителями Управления капитального строительства администрации городского округа Мытищи ФИО2, генеральным директором ООО «Стройгрупп» ФИО3 и директором МБУ МЦ «Маяк» ФИО4 составлен Акт осмотра, в котором стороны зафиксировали:

недостатки (дефекты), выявленные в пределах гарантийного срока:

необходимость предоставления Документации;

срок (до 17 мая 2018) для устранения выявленных недостатков (дефектов). Составив     акт     осмотра,     Муниципальный     заказчик     выполнил     условия,

предусмотренные п. 6.3 Контракта.

Поскольку до настоящего времени ответчиком не устранены выявленные дефекты ремонтных работ, не представлена Документация, истец обратился с настоящим иском в суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, судом. Возможность защиты гражданских прав служит одной из гарантий их осуществления. Право на судебную защиту является правом, гарантированным ст. 46 Конституции Российской Федерации.

Статья 12 ГК РФ устанавливает способы защиты гражданских прав. Право каждого лица защищается всеми не запрещенными законами способами, что следует из положений Конституции Российской Федерации. В соответствии со статьей 12 ГК РФ к способам защиты гражданских прав относится такой способ, как присуждение к исполнению обязанности в натуре. Таким образом, избранный истцом способ защиты права не противоречит названной норме закона.

Согласно статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором (ст. 310 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд проектировщик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Правовое регулирование государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной ГК РФ, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также взаимоотношения сторон по Контракту регулируются положениями о подряде (далее - Федеральный закон).

В соответствии с п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода».

В соответствии с п. 1 ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Согласно пункту 4 статьи 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

В соответствии с п. 1 ст.723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом илидоговором, по своему выбору потребовать от подрядчика, в частности, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В соответствии с п. 1 ст. 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 ГК РФ, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В соответствии с п. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей.

Поскольку указанный акт сдачи-приемки работ подписан 22.09.2017, гарантийный срок по Контракту истекает 22.09.2019. Следовательно, недостатки работ обнаружены Муниципальным заказчиком в период гарантийного срока.

Требования об исполнении гарантийных обязательств направлялись Подрядчику в разумные сроки, а именно: 02.02.2018, 06.03.2018, 11.04.2018, 18.04.2018, т.е. в сроки, установленные для исполнения гарантийных обязательств. Муниципальным заказчиком неоднократно (в сроки до 14.04.2018 идо 17.05.2017) предлагалось в досудебном порядке устранить выявленные дефекты работ и представить документацию. Однако ответчиком этого сделано не было.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что требование об обязании ответчика выполнить договорные обязательства по муниципальному контракту от 28.07.2017 № 0848300062717000516-0258492-01 в части исполнения гарантийных обязательств является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании штрафа за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 28.07.2017 № 0848300062717000516-0258492-01 на выполнение подрядных работ для обеспечения муниципальных нужд, в размере 86 500, 00 руб.

В соответствии с условиями Контракта (п. 7.3) штраф начисляется за неисполнение, ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 86 500 рублей.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядных обязательств Муниципальный заказчик вправе требовать от подрядчика возмещения убытков. Такие убытки могут быть выражены в неустойке (пени, штраф), установленной договором (п. 4 ст. 421 ГКРФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В силу ч. 8 ст. 34 Федерального закона за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Учитывая, что Подрядчиком не выполнены договорные обязательства, предусмотренные п.п. 5.4.1 и 5.4.3 Контракта, а именно: не исполнены гарантийные обязательства по обеспечению устранения недостатков и дефектов, допущенных в результате текущего ремонта помещений МБУ МЦ «Маяк», выявленных в течение гарантийного срока, а также не представлена отчетная документация (сертификаты на примененные при проведении текущего ремонта материалы и оборудование, а также документы, подтверждающие выполнение работ (акты на скрытые работы, иная исполнительная документация), суд приходит к выводу о том, что с ответчика подлежит взысканию штраф за неисполнение договорных обязательств.

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации, поскольку истец в соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 333.7 НК РФ освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «Строй Групп» выполнить договорные обязательства по муниципальному контракту от 28.07.2017 № 0848300062717000516-0258492-01 на выполнение подрядных работ для обеспечения муниципальных нужд городского округа Мытищи, заключенного между Муниципальным образованием «Городской округ Мытищи Московской области» и ООО «Строй Групп», в части исполнения гарантийных обязательств:

- обеспечить устранение следующих недостатков и дефектов, допущенных в результате текущего ремонта помещений МБУ МЦ «Маяк», выявленных в течение гарантийного срока, за счет ООО «СтройГрупп»:

№ п/п

Наименование выполненных работ

Описание обнаруженных дефектов

Объем 

1.

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» в коридоре

Вздутие напольных покрытий из линолеума на всей площади помещения (Фото «1»).

24,8 м2

2.

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

Не зафиксирован плинтус у дверного проема в коридоре (Фото «2»)

1 м

3.

Облицовка стен  СМЛ по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем

Разлом плиты СМЛ (Фото «3», «4»).

5 м2

4.

Т-профиль ("Заглушка") универсальный длиной 3 м 

Заглушка на стеновой панели не закреплена. (Фото «5»)

1 шт.

5.

Установка и крепление наличников

Декоративные пластиковые накладки на стеновых панелях и пластиковые наличники на дверных проемах отклеились (Фото «6», «7», «8», «9»)

15 м

6.

Устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

Провисание подвесного потолка, подвесные элементы смонтированы и закреплены не надлежащим образом (Фото «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17»)

46 м2

7.

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» в кабинете

Вздутие напольных покрытий из линолеума на всей площади помещения (Фото «18»).

17,6 м2

8.

Профиль "Омега-проф" (стыковочный) универсальный длиной 3 м.

Стыковочный профиль отклеивается (Фото «19», «20», «21»)

21 шт.

- предоставить сертификаты на примененные при проведении текущего ремонта материалы и оборудование, а также документы, подтверждающие выполнение работ (акты на скрытые работы, иную исполнительную документацию)

№п/п

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса

Объем 

Наименование документов

1

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых

24,8 м2

представить  сертификаты на материалы и  акты скрытых работ

2

Разборка бетонных фундаментов

26 м2

представить акты  скрытых работ

3

Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной  4 см

0,9 м3

представить акты скрытых работ

4

Армирование подстилающих слоев и набетонок

25 кг

представить акты скрытых работ

5

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

24,8 м2

представить акты  скрытых работ

6

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщины 40 мм 

24,8 м2

представить акты скрытых работ

7

Линолеум коммерческий гомогенный (класс 34;43) GERFLOR MIPOLAM ROBUS EL 7, толщ.2,0 мм, Франция.

24,8 м2

представить акты скрытых работ и   сертификаты

8

Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»

24.8 м2

представить  сертификаты и акты скрытых работ

9

L-профиль (внутренний угол) 8/10мм длиной 3 м 

F-профиль (наружный угол) 8/10мм длиной 3 м 

Т-профиль ("Заглушка") универсальный длиной 3 м 

Профиль "Омега-проф" (стыковочный) универсальный длиной 3 м 

9 шт

19 шт

32 шт

32 шт

представить сертификаты и акты на подсистему

11

Устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

24,8 м2

представить сертификаты и акты скрытых работ

12

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

3 м

представить акты скрытых работ

13

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

3 м

представить акты  скрытых работ

14

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

3 м.

представить акты  скрытых работ

15

L-профиль (внутренний угол) 8/10мм длиной 3 м 

F-профиль (наружный угол) 8/10мм длиной 3 м 

Т-профиль ("Заглушка") универсальный длиной 3 м 

Профиль "Омега-проф" (стыковочный) универсальный длиной 3 м 

9

10

54

54

представить сертификаты и акты на подсистему

16

Шпатлевка Ветонит LR

14 кг

представить акты скрытых работ

17

L-профиль (внутренний угол) 8/10мм длиной 3 м 

F-профиль (наружный угол) 8/10мм длиной 3 м 

Т-профиль ("Заглушка") универсальный длиной 3 м 

Профиль "Омега-проф" (стыковочный) универсальный длиной 3 м 

6

13

2

2

представить  сертификаты и акты на подсистему

18

Устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

46 м2

представить сертификаты и акты  скрытых работ

19

Облицовка стен СМЛ по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем

3 м2

представить сертификаты и акты на подсистему

20

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

7

представить сертификаты и акты  скрытых работ

21

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

82 м

представить акты скрытых работ

22

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

81 м

представить акты скрытых работ

23

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

83,64 м

представить акты скрытых работ

24

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

6 линий

представить акты скрытых работ 

25

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

6 токопроемников

представить протокол  испытаний

26

L-профиль (внутренний угол) 8/10мм длиной 3 м 

F-профиль (наружный угол) 8/10мм длиной 3 м 

Т-профиль ("Заглушка") универсальный длиной 3 м 

Профиль "Омега-проф" (стыковочный) универсальный длиной 3 м 

4

7

15

15

представить  сертификаты и акты на подсистему

27

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

8,3 м

представить сертификаты и акты на подсистему

28

Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 16 мм

10 м

представить акты скрытых работ

29

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

11 м

представить акты скрытых работ

30

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 м.

11 м

представить   сертификаты и акты  скрытых работ

31

L-профиль (внутренний угол) 8/10мм длиной 3 м 

-профиль (наружный угол) 8/10мм длиной 3 м 

Т-профиль ("Заглушка") универсальный длиной 3 м 

Профиль "Омега-проф" (стыковочный) универсальный длиной 3 м 

6

4

21

21

представить сертификаты и акты на подсистему

32

Устройство подвесных потолков типа 

<

Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

17,6 м

представить сертификаты и акты на подсистему

33

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

45 м

представить акты скрытых работ

34

Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 16 мм

45 м

представить акты скрытых работ

35

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

45,9

представить акты  скрытых работ

36

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

45

представить сертификаты и акты  скрытых работ

37

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

2 шт 

представить акт проверки оборудования

38

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150

38 шт

представить акты  скрытых работ

Взыскать с ООО «Строй Групп» в пользу Управления капитального строительства Администрации городского округа Мытищи штраф за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 28.07.2017 № 0848300062717000516-0258492-01 на выполнение подрядных работ для обеспечения муниципальных нужд, в размере 86 500, 00 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ООО «Строй Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 9 460 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья                                                               Е.А. Морозова