АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Барнаул                                                                                     Дело № А03-4515/2024

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая  2024 года

Полный текст решения изготовлен  22 мая  2024 года

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи   Ситниковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Евдокимовой Т.Ю., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Транспортная компания АРКОМ» (656056, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН:

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» (660021, Красноярский край, Красноярск город, Бограда улица, 144а, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании исполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «административное здание», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.Санниково, мкр.имени В.А.Соколенко. бульвар Цветной, 1а, кадастровый номер земельного участка 22:33:040801:8175 до 01 мая 2024 года, о взыскании неустойки в размере 33957,58 руб., произвести начисление неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки за период с 02.03.2024 по день фактического исполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «административное здание», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.Санниково, мкр.имени В.А.Соколенко. бульвар Цветной, 1а, кадастровый номер земельного участка 22:33:040801:8175,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1 паспорт от 11.03.2020, доверенность от 22.04.2024, диплом №БВС 0703723, ФИО2, по доверенности от 22.04.2024, ФИО3, директор, по паспорту,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Транспортная компания АРКОМ» (далее – истец, компания, ООО «ТТК АРКОМ») обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» (далее – ответчик, ПАО «Россети Сибирь») об обязании исполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «административное здание», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.Санниково, мкр.имени В.А.Соколенко. бульвар Цветной, 1а, кадастровый номер земельного участка 22:33:040801:8175 до 01 мая 2024 года, о взыскании неустойки в размере 33957,58 руб., произвести начисление неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки за период с 02.03.2024 по день фактического исполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «административное здание», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.Санниково, мкр.имени В.А.Соколенко. бульвар Цветной, 1а, кадастровый номер земельного участка 22:33:040801:8175.

Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 309-310, 539-542 Гражданского кодекса российской Федерации (далее – ГК РФ), пунктами 3,12.1,14,16,34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила №861), и мотивированы тем, что по окончанию установленного договором срока на осуществление мероприятий по технологическому присоединению ответчиком не выполнены мероприятия.

Определением суда от 22.03.2024 исковое заявление принято к производству, назначено проведение предварительного судебного заседания. Определением суда от 23.04.2024 дело назначено к рассмотрению в судебном заседании суда первой инстанции.

Ответчик в судебное заседание не явился, возражений против рассмотрения дела не заявил.  В соответствии со статьей 123 АПК РФ извещен надлежащим образом, в связи с чем, в порядке статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в его отсутствие.

В судебном заседании истец настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме, с учетом уточнения. 

Ответчик возражал относительно удовлетворения требования; указал, что им выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение (пункт 10.1.1 технических условий), а также выполнена проектная документация и согласована со всеми заинтересованными лицами (пункт 10.2 технических условий); полагал размер судебной неустойки чрезмерно завышенным и не разумным; в случае удовлетворения требований, решение суда будет неисполнимым, в связи с недостаточным сроком для выполнения мероприятий капитального характера, при этом указанный объем работ неизбежно отвлечет силы и средства от других сетевых районов, чем поставит их в невыгодное положение, что в свою очередь приведет к нарушение прав и законных интересов потребителей других районов.

Изучив материалы дела, проанализировав обстоятельства спора и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее. 

Между ООО «Торгово-транспортная компания АРКОМ» и ПАО «Россети Сибирь» заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор), Технические условия № 8000530000 (далее - ТУ) для присоединения к электрическим сетям Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (далее - Технические условия) на электроснабжение объекта: «Административное здание», расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край. Первомайский район, с. Санниково, мкр. Имени В.А. Соколенко, бульвар Цветной, 1а, кадастровый номер земельного участка 22:33:040801:8175.

Подлежащие выполнению сторонами договора мероприятия, необходимые для присоединения объекта ответчика к энергоустановкам истца, согласованы в Технических условиях №8000530000, срок действия которых определен в 2 года со дня заключения договора (пункт 12 ТУ). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, перечень которых определен в пунктах 10 (для сетевой организации) и 11 (для заявителя) технических условий, составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 13 ТУ).

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п.21 договора). 

Оплата за технологическое присоединение произведена 01.11.2022 платежным поручением №401, соответственно срок на выполнение мероприятий начинал течь с 01.11.2022.

Поскольку до настоящего времени мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств не выполнены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Указанный порядок регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами № 861.

В силу пункта 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им этих правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил №861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами технологического присоединения. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил №861). 

По условиям указанного договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения, а заявитель обязан выполнить свою часть мероприятий по технологическому присоединению и внести плату за технологическое присоединение.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт «е» пункта 16, пункты 16(2) 16(4), 17, 18 Правил №861).

В силу подпункта «б» пункта 16 Правил №861 договор технологического присоединения должен содержать, в том числе существенное условие о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, не может превышать 1 год.

Как следует из материалов дела договор сторонами не расторгнут, не изменен, является действующим, при этом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению на дату судебного разбирательства истек, однако, интерес в его исполнении со стороны заявителя не утрачен.

Пунктом 10 технических условий, которые являются Приложением №1 к договору, предусмотрены мероприятия для сетевой организации, которые включают в себя, в том числе подготовку технических условий на технологическое присоединение,  фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя, реконструкции ячейки ф.1 ТП-35-13-77, строительство ЛЭП 0,4 кВ, монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии.

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что предусмотренные техническими условиями мероприятия, необходимые для присоединения энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям, сетевой организацией не выполнены.

Доводы ответчика о том, что им выданы технические условия (п.10.1.1 технических условий), а также выполнена проектная документация и согласована со всеми заинтересованными лицами (п.10.2 технических условий), судом отклонены в силу следующего.

В силу пункта 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Согласно пункту 18 Правил №861, технологическое присоединение включает в себя последовательность следующих мероприятий: 

- подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; 

- разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

- разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

- выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.

Завершает указанный процесс фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, под которым понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») (подпункт «г» 1 пункта 7 Правил №861).

Установленный Правилами № 861 срок для осуществления технологического присоединения (шесть месяцев) является пресекательным, обязательным для соблюдения сетевой организацией. Такие ограничения направлены на обеспечение прав и законных интересов заинтересованных лиц как более слабой стороны в рассматриваемых правоотношениях.

Сетевая организация согласно пункту 6 договора взяла на себя обязательства завершить выполнение мероприятий по технологическому присоединению до 01.05.2023.

При этом, судом учтено, что в защиту своих интересов компания обращалась в Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю (далее - Управление) с жалобой на бездействие сетевой организации. Постановлением о назначении административного наказания по делу №022/04/9.21-168/2024 доводы компании признаны обоснованными, должностное лицо сетевой организации привлечено к административной ответственности, в виде штрафа.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статья 12 ГК РФ предусматривает защиту гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Доказательства внесения изменений в договор или технические условия, а также существования технических либо иных независящих от ответчика препятствий объективного характера для создания возможности подключения энергопринимающих устройств объекта ответчика к электрическим сетям, в материалы дела не представлены.

По правилам статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, суд пришел к выводу об отсутствии обстоятельств, препятствующих компании в выполнении обязательств по договору, в связи с чем, иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

По смыслу статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", статей 16 и 182 АПК РФ судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов.

По мнению истца, достаточный срок для исполнения ответчиком обязанности технологического присоединения, является срок – 5 рабочих дней, с момента вступления в законную силу решения суда.

Как указано выше, в силу подпункта «б» пункта 16 Правил №861 договор технологического присоединения должен содержать, в том числе существенное условие о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, не может превышать 1 год.

Установленный Правилами № 861 срок для осуществления технологического присоединения является пресекательным, обязательным для соблюдения сетевой организацией. Такие ограничения направлены на обеспечение прав и законных интересов заинтересованных лиц как более слабой стороны в рассматриваемых правоотношениях.

Сетевая организация согласно пункту 13 ТУ взяла на себя обязательства завершить выполнение мероприятий по технологическому присоединению, в течении 6 месяцев  с даты заключения договора, т.е. до 03.05.2023.

Учитывая длительную просрочку, допущенную сетевой организацией по исполнению договора о технологическом присоединении, а также пресекательные сроки установленные Правилами № 861 (который истек 01.05.2023), обязательные для соблюдения сетевой организацией, суд считает возможным удовлетворить требования истца, в части обязания ответчика исполнить договор, в течении 5 рабочих дней месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Доводы ответчика о невозможности исполнить обязательство по договору в указанный истцом срок, поскольку  указанный объем работ неизбежно отвлечет силы и средства от других сетевых районов, чем поставит их в невыгодное положение, что в свою очередь приведет к нарушение прав и законных интересов потребителей других районов, судом отклонены, поскольку ни договором, ни действующим законодательством данное обстоятельство не предусмотрено как освобождающее от исполнения обязанности по технологическому присоединению.

При этом суд принимает во внимание, что организационные трудности относятся к обычным предпринимательским рискам хозяйствующих субъектов, которые должны их учитывать при осуществлении своей деятельности.

Какие либо, доказательства в обоснование необходимости увеличения срока исполнения решения суда, ответчиком вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ не представлено. 

Согласно п. 17 Договора, Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

С учетом того, что ПАО «Россети Сибирь» до настоящего времени не исполнило свои обязательства, неустойка в порядке п. 17 Договора подлежит начислению.

Контррасчет ответчиком не представлен, арифметическая составляющая расчета истца не оспорена.

Поскольку ответчик нарушил сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, согласованные в договоре, требование истца о применении ответственности в виде неустойки является правомерным на сумму 33957,58руб. с 02.05.2023 по 01.03.2024.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании договорной ответственности за просрочку выполнения работ по технологическому присоединению подлежит  удовлетворению в указанном размере.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 65 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

На основании вышеизложенного, суд находит подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки за период с 02.03.2024 по день фактического исполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «административное здание», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.Санниково, мкр.имени В.А.Соколенко. бульвар Цветной, 1а, кадастровый номер земельного участка 22:33:040801:8175, но не более года просрочки. 

Согласно пункту 1 Постановления Пленума ВАС  РФ  от 22.12.2011 №81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ " при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ  от 14.07.1997 №17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ " основанием для снижения в порядке статьи 333 ГК РФ предъявленной ко взысканию неустойки может быть только ее явная несоразмерность последствиям нарушения обязательства.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

В силу п.п.73,77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Заявляя ходатайство о снижении неустойки, ответчик указал на её несоразмерность, однако документально не обосновал несоразмерность предъявленных санкций последствиям нарушения обязательства.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, ГК РФ  и федеральное законодательство предполагает выплату кредитору компенсацию его потерь при несвоевременном исполнении встречного обязательства. Истец был вправе рассчитывать на своевременную оплату оказанных услуг и не может быть лишен гарантированной законом компенсации его потерь от нарушения обязательств ответчиком.

Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ  разъяснено, что соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Условие о неустойке в договоре соответствует обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (пункт 1 статьи 422 ГК РФ).

Ответчик не представил доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Ответчик отсутствие вины не доказал. Оснований для применения статьи 333 ГК РФ  у арбитражного суда не имеется.

В связи с наличием просрочки исполнения обязательства требование о применении ответственности, в виде начисления пени, является правомерным и подлежит удовлетворению, в установленном судом размере.

Иные доводы ответчика суд отклоняет за необоснованностью.

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Все иные доводы заявителя рассмотрены судом, признаны не имеющими юридического значения для рассмотрения настоящего спора по существу.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).  

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, понесенные истцом судебные расходы по оплате государственной пошлины  подлежат возмещению ответчиком.

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течении 5 дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «административное здание», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.Санниково, мкр.имени В.А.Соколенко. бульвар Цветной, 1а, кадастровый номер земельного участка 22:33:040801:8175. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Транспортная компания АРКОМ» неустойку в размере 33957,58 руб.,  а также 8000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Продолжить начисление неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки за период с 02.03.2024 по день фактического исполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «административное здание», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.Санниково, мкр.имени В.А.Соколенко. бульвар Цветной, 1а, кадастровый номер земельного участка 22:33:040801:8175, но не более года просрочки. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                          И.В. Ситникова