АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-24633/2019

26 мая 2020 года

город Омск

Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 19 мая 2020 года. Полный текст решения изготовлен 25 мая 2020 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Уховой Л.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ИКГ-Транс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 626 690 руб. 95 коп.,

в судебном заседании приняли участие: 

от истца - представитель ФИО2 по доверенности от 01.01.2020 № 23;

от ответчика - представитель ФИО3 по доверенности от 03.04.2020 № 7,

У С Т А Н О В И Л:

акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети» (далее – АО «Омск РТС», истец) обратилось в Арбитражный cуд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ИКГ-Транс» (далее – ООО «ИКГ-Транс», ответчик) о взыскании 1 626 690 руб. 95 коп., в том числе: 1 367 541 руб. 78 коп. платы по договору о подключении к системе теплоснабжения от 16.07.2018 № 07.112.452.18 и 259 149 руб. 17 коп. неустойки, а также расходов по уплате государственной пошлины.

До рассмотрения спора по существу истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил исковые требования, в связи с оплатой задолженности, просил взыскать с ответчика 277 085 руб. 00 коп. пени за период с 29.11.2018 по 10.02.2020. Уточнение исковых требований судом принято.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал, возражал против начисления пени на авансовый платеж.

Как следует из материалов дела, 16.07.2018 между АО «Омск РТС» (далее - исполнитель) и ООО «ИКГ-Транс» (далее - заказчик) был подписан договор о подключении к системе теплоснабжения от 16.07.2018 № 07.112.452.18 (в редакции протокола согласования разногласий от 30.08.2018, далее - договор), в соответствии с которым исполнитель обязуется осуществить совокупность организационных и технических действий, дающих возможность Объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения, а заказчик обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором (пункт 2.1. договора).

Согласно пункту 3.1. – 3.6. договора наименование объекта - многоквартирный жилой дом средней этажности с нежилыми помещениями. Адрес объекта - на земельном участке относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ЛАО, ул. Чайковского, 53. Подключаемая тепловая нагрузка объекта — 0,3983 Гкал/ч, в том числе: на отопление - 0,3267 Гкал/ч; на вентиляцию-0,0716 Гкал/ч; на горячее водоснабжение - кал/ч. Начало строительства объекта - 4 квартал 2018 года. Срок подключения объекта (срок осуществления исполнителем мероприятий по подключению) — 2 квартал 2020 года. Местоположение точки подключения - на границе с инженерно-техническими сетями жилого дома.

В соответствии с пунктом 5.2.12 договора заказчик обязан внести плату за подключение в размере и сроки, установленные настоящим договором.

Плата за подключение, рассчитанная исходя из подключаемой тепловой нагрузки объекта (пункт 3.3), составляет - 2 781 440 руб. 90 коп., в том числе НДС 20 % - 463 573 руб. 48 коп. (пункт 4.2. договора в редакции дополнительного соглашения № 1от 08.11.2018).

В соответствии с пунктом 4.4. договора заказчик вносит плату за подключение (пункт 4.2.) в следующем порядке: 

- в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего договора заказчик оплачивает 15 % от размера платы за подключение, что составляет 410 262 руб. 53 коп., в том числе НДС по ставке 18 % - 62 582 руб. 42 коп.;

-в течение 90 календарных дней с момента заключения настоящего договора, но непозднее даты фактического подключения, заказчик оплачивает 50 % от размераплаты за подключение, что составляет - 1 367 541 руб. 78 коп., в том числе НДС по ставке 18 % - 208 608 руб. 07 коп.;

- в течение 15 календарных дней с даты подписания акта о подключенииуполномоченными представителями сторон заказчик оплачивает оставшиеся 35 % от размера платы за подключение, что составляет – 1 003 636 руб. 59 коп., в том числе НДС по ставке 20 % - 167 272 руб. 76 коп. (в редакции дополнительного соглашения № 1от 08.11.2018).

Пунктом 7.1. договора (в редакции протокола согласования разногласий от 30.08.2018) предусмотрено, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банк РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной  в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «ИКГ-Транс» обязанностей по внесению платы за подключение в размере 1 367 541 руб. 78 коп. (оплата произведена 10.02.2020 по платежному поручению от 10.02.2020 № 292) АО «Омск РТС» произвело расчет пени в соответствии с пунктом 7.1. договора за период с 29.11.2018 по 10.02.2020 в размере 277 085 руб. (уточнение от 17.02.2020).

АО «Омск РТС» направило в адрес ООО «ИКГ-Транс» претензию от 01.11.2019 № 36-15/1819 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность.

Отсутствие действий со стороны ответчика по плате задолженности послужило основанием для подачи настоящего искового заявления в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьёй 65 АПК РФ установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные в обоснование иска доказательства, доводы сторон, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению с учетом уточнения.

Договор технологического присоединения (подключения) объекта к энергетическим сетям представляет собой двусторонний возмездный консенсуальный синаллагматический (взаимный) договор, регулирование отношений по которому производится как специальным энергетическим законодательством, так и нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями раздела III ГК РФ об обязательствах и договоре (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 N 304-ЭС16-16246).

Из пункта 1 статьи 779 ГК РФ следует, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В статье 781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 13 Закона о теплоснабжении потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьей 14 названного Федерального закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (далее - Правила № 787).

Размер платы за подключение определен сторонами в сумме 2 781 440 руб. 90 коп., в том числе НДС 20 % - 463 573 руб. 48 коп. (пункт 4.2. договора в редакции дополнительного соглашения № 1от 08.11.2018)

Исходя из положений статей 1, 421 и 422 ГК РФ авансирование заказчиком услуг исполнителя может устанавливаться законодательством или соглашением сторон.

Пунктом 39 Правил № 787 предусмотрено, что внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке: 15% платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; 50% платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения; оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.

Аналогичный порядок расчетов по договору предусмотрен условиями договора (пункты 4.2, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 договора).

По смыслу пункта 3 статьи 380 ГК РФ всякая предварительно уплаченная сумма признается авансом, если по поводу этой суммы в письменном соглашении не имеется прямого указания о том, что таковая является задатком. Аванс составляет часть суммы, подлежащей уплате, то есть денежной суммой, уплачиваемой обязанной к денежному платежу стороной договора в счет данного платежа до фактического исполнения предмета договора.

Действующее законодательство не позволяет взыскивать предварительную оплату по синаллагматическому (взаимному) договору, поскольку нарушение должником срока внесения предварительной оплаты влечет право кредитора по правилам пункта 2 статьи 328 ГК РФ приостановить свою часть исполнения или вовсе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (пункт 3 статьи 328 ГК РФ, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.11.2010 N 9217/10).

Однако невозможность принудительного исполнения основного обязательства не влечет освобождения должника от ответственности за его неисполнение (пункт 2 статьи 396 ГК РФ, пункт 23 Постановления № 7).

Неустойка может быть установлена сторонами договора за нарушение любого обязательства (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.10.2011 N 5531/11, от 12.02.2013 N 13585/12, от 09.07.2013 N 1488/13, от 08.04.2014 N 16973/13, определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.01.2017 N 305-ЭС16-14210), положениями ГК РФ и энергетического законодательства не ограничена возможность взыскания неустойки за нарушение сроков перечисления промежуточных платежей (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.08.2016 N 305-ЭС16-4576).

Факт просрочки внесения платы за подключение ООО «ИКГ-Транс» не оспаривается.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения (пункту 1 статьи 330 ГК РФ).

Согласно пункту 41 Правил № 787 в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Пункт 7.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 08.11.2018 соответствует пункту 41 Правил № 787.

Неустойка, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон.

Согласно пункту 5.3.5. договора исполнитель имеет право обращаться в суд за взысканием платы за подключение, неустойки, предусмотренной настоящим договором, в случае нарушения заказчиком каждого из указанных в пункте 4.4. настоящего договора сроков и размеров внесения платы, предусмотренных настоящим договором.

Ответчиком нарушены условия о внесении платы в размере 50% от размера платы за подключение (пункт 4.2 договора) 1 367 541,78 руб. – в течение 90 календарных дней с момента заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения, предусмотренные пунктами 4.4, 4.4.2 договора.

Принимая во внимание, что стороны в рамках договора достигли соглашение об ответственности за внесение авансовых платежей, в том числе – второго платежа в размере 1 367 541, 78 – в течение 90 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее даты фактического подключения, то суд отклоняет возражения ответчика относительно недопустимости ответственности за внесение авансовых платежей.

Расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Требование истца с учетом уточнения о взыскании 277 085 руб. 00 коп. пени за период с 29.11.2018 по 10.02.2020 подлежит удовлетворению в полном объеме.

При подаче искового заявления в суд истец уплатил государственную пошлину в размере 29 566 руб. (платежное поручение от 19.12.2019 № 20319). 

Пунктом 1 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с уменьшением истцом исковых требований, государственная пошлина в размере 21 024 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИКГ-Транс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 646160, 

<

...>) в пользу акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 644037, 

<

...>) 277 085 руб. 00 коп. пени, а также 8 542 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить акционерному обществу «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 644037, 

<

...>) из федерального бюджета 21 024 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 19.12.2019 № 20319.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                Л.Д. Ухова