АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции 

(резолютивная часть) 

«

Дело № А38-7967/2019

г. Йошкар-Ола

27» мая 2021 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Фурзиковой Е.Г. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарем ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску Министерства внутренних дел Республики Марий Эл  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ответчику производственному кооперативу «Медведевская ПМК»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ 

третьи лица ООО «Проектное управление «Парус», ФКУЗ «Медико-санитарная  часть Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл  

с участием представителей: от истца – ФИО2 по доверенности, от ответчика – ФИО3 по доверенности, ФИО4 по доверенности, 

от третьего лица, ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД по РМЭ – Кайдашо- ва Н.А. по доверенности,  

от третьего лица, ООО «Проектное управление «Парус» – не явился, извещен по  правилам статьи 123 АПК РФ,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Обязать производственный кооператив «Медведевская ПМК» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить недостатки работ, допущенные при  реконструкции здания госпиталя МСЧ МВД России по Республике Марий Эл,  расположенного по адресу: РМЭ, 

<

...>:  

- в течение 6 месяцев со дня вступления решения арбитражного суда в закон- ную силу устранить отслаивание окрасочного слоя в помещении № 7 (ЦСО), № 30  подвала; устранить трещины штукатурки в помещении № 14, 23, 24, 25, 26 I этажа; устранить трещины штукатурки в помещении № 10, 26-35 IV этажа, за исклю- 

чением трещин штукатурки на внутренней стене в кабинетах IV этажа по оси «В»;  заполнить швы кладки из газобетонных блоков клеевым раствором и устранить  трещины штукатурки в помещении № 19, 20, 21, 23 мансардного этажа; устранить  разрыв в монолитном поясе помещения № 19 мансардного этажа; заполнить швы  кладки из газобетонных блоков клеевым раствором и устранить трещины штукатурки лестничного марша мансардного этажа со входа № 1;  

- в летний период после вступления решения арбитражного суда в законную  силу выполнить примыкание металлических отливов к откосам проема без зазо- ров, с герметизацией; установить между кладкой и оконными блоками централь- ные теплоизоляционные швы, удалить установочные клинья в оконных блоках 1-4  этажей со входа № 1; выполнить герметизацию продольных и поперечных стыков  между листами и планками примыкания кровли входа в подвал № 1, № 2 и устранить следы намокания и отслаивание окрасочного слоя стен и потолка указанных  входов; устранить недостатки отмостки по периметру здания с учетом выявлен- ных экспертизой нарушений.  

В остальной части иска отказать. 

2. Взыскать с производственного кооператива «Медведевская ПМК» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Министерства внутренних дел Республики Марий Эл (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по оплате  экспертизы в сумме 95 000 руб.  

3. Взыскать с производственного кооператива «Медведевская ПМК» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государствен- ную пошлину в сумме 1800 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья Е.Г. Фурзикова