10410_10403602  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-41143/21

07 марта 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального казенного  учреждения "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "РН  Процентр" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

третьи лица МБДОУ «Детский сад № 101», МКУ «УЖКХ Пролетарского района  г.Ростова-на-Дону», Акционерное общество «ДОНЭНЕРГО», ИНН 

<

***>  Муниципальное унитарное предприятие «Районный комбинат благоустройства  Пролетарского района г. Ростова-на-Дону», ИНН 

<

***>, Общество с ограниченной  ответственностью «Велес Профи-М», ИНН 

<

***>,  

 об обязании (уточненные требования) 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «PH Процентр» в течении 30 дней с момента вступления решения  

суда в законную силу безвозмездно устранить следующие выявленные недостатки  

(замечания): 

1. Устранить просадку основания отмостки здания (восстановить разуклонку  

отмостки здания). 

2. Заменить тую западную в количестве 5 шт. и клен остролистный в количестве 6  

шт. 

3. Восстановить по всему периметру детского сада окраску подпорных стен.  

4. Устранить дефекты сварных швов в местах стыковки металлических частей,  

устранить ржавчину, отслоившийся слой краски и выполнить грунтовку, окрасу  

ограждения по всему периметру детского сада. 

5. Установить заглушки на опоры ограждения в количестве 12 шт. и закрепить  

заглушки на опоры ограждения по всему периметру детского сада. 6. Восстановить кровлю здания детских игрушек. 7. Восстановить внешний вид малых архитектурных форм. 

8. Устранить дефекты сварных швов в местах стыковки металлических частей  входных групп, устранить ржавчину, выполнить грунтовку, окраску ограждений входных  групп.  

9. На границе детского сада с больницей восстановить благоустройство  прилегающей территории больницы к территории детского сада (асфальтобетонное  покрытие).  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РН Процентр" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) 154 562,95 руб. расходов за оплату судебной  экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РН Процентр" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 27.12.2021 7:46:39

Кому выдана Танова Диана Григорьевна