Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-10243/2021

17 мая 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  13 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  17 мая 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "БИ.СИ.СИ." 

ответчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПИКАЛЕВО" БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

о взыскании 8 175 793,30 руб.

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности №54 от 01.01.2020

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Истец - ООО "БИ.СИ.СИ." обратился в суд с иском к ответчику - АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПИКАЛЕВО" БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ о взыскании 7 566 414,40 руб. задолженности, 609 378,90 руб. неустойки, всего 8 175 793,30 руб.

Ответчик в установленном порядке извещен о слушании дела, не явился. В соответствии с п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

В отсутствие возражений сторон и в соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд завершил слушание в предварительном судебном заседании, и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Заслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что между ООО «Би.Си.Си.» (Генеральный подрядчик) и Администрацией Муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (Муниципальный заказчик, Ответчик) заключен Муниципальный контракт № 0145300006911000001-0245316-03 от 13.05.2011 (Муниципальный контракт №1) на выполнение работ по объекту «Проектирование и строительство подводящих инженерных сетей для реализации инвестиционного проекта (площадки под промышленные предприятия) в составе долгосрочной целевой программы «Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификация экономики города Пикалево», на общую сумму 165 195 384,39 руб., а также Муниципальный контракт №0145300006913000023-0245316-02 от 09.01.2014 (Муниципальный контракт №2) на выполнение дополнительных работ при строительстве подводящих инженерных сетей для реализации инвестиционного проекта (площадки под промышленные предприятия) на сумму 34 759 073,31 руб.

Дополнительным соглашением №5 от 12.12.2018 к Муниципальному контракту №1 и Дополнительным соглашением №3 от 12.12.2018 к Муниципальному контракту №2 стороны согласовали срок окончания выполнения работ – 31.12.2018.

В соответствии с условиями Муниципальных контрактов Генеральный подрядчик  выполнил проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы подводящих инженерных сетей промышленных Площадок инвесторов №1, №3, №4, расположенных на территории города Пикалево в срок до 31.12.2018.

Объемы выполненных работ соответствуют проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу в 2011 году, а также проектно-сметной документации, прошедшей повторную государственную экспертизу в 2014 и 2018 годах. (Положительное заключение №47-1-1-3-0113-18 от 10.04.2018). 

В процессе сдачи работ Муниципальному заказчику Генеральный подрядчик направил Акты о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на общую сумму 163 459 143,04 руб. по Муниципальному контракту №1 и 34 676 193,32 руб. по Муниципальному контракту №2. 

Муниципальным заказчиком оплачены Акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Муниципальному контракту №1 на сумму 156 806 981,64 руб., по Муниципальному контракту №2 на сумму 33 761 940,32 руб.

Муниципальным заказчиком не приняты работы и не подписаны Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости работ и затрат (по форме КС-3) по Муниципальному контракту №1 на сумму 6 652 161,40 руб., и Акты о приемке выполненных работ по Муниципальному контракту №2 на сумму 914 253,00 руб.

Вышеуказанные документы передавались Муниципальному заказчику следующими письмами и Актами:

1. Акт передачи актов выполненных работ от 17.12.2018 (Автомобильная дорога Площадки №3);

2. Акт передачи актов выполненных работ от 05.04.2019 (Сети хозяйственно-бытовой канализации Площадки №3 и №4);

3. Акт передачи актов выполненных работ от 05.04.2019 (Сети электроснабжения и электроосвещения);

4. Акт передачи актов выполненных работ от 24.04.2019 (Сети хозяйственно-бытовой канализации Площадки №3 и №4);

5. Акт передачи актов выполненных работ от 10.07.2019 (Автомобильная дорога площадки №3);

По муниципальному контракту №1 сумма задолженности подтверждена следующими документами:

1. Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1-0000705/1-№0000705/5 от 22.03.2019 по сети хозяйственно-бытовой канализации промышленной площадки №3 (подписаны со стороны Муниципального заказчика), Справка о стоимости работ и затрат №1-0000705 от 22.03.2019 на сумму 706 183,00 руб. 

2. Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №00706/1-№00706/4 от 22.03.2019 по сети электроснабжения промышленной площадки №4 (подписаны со стороны Муниципального заказчика), Справка о стоимости работ и затрат №1-0000706 от 22.03.2019 на сумму 414 310,00 руб. 

3. Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1-0000974/1-№0000974/2 от 17.04.2019 по сети водоснабжения промышленной площадки №4 (Акты КС-2 подписаны со стороны Муниципального заказчика), Справка о стоимости работ и затрат №1-0000974 от 17.04.2019 на сумму 103 133,18 руб. 

4. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №1-000975/2 от 17.04.2019 на 179 925,22 руб. по сети водоснабжение промышленной площадки №4. Принимая к зачету исключенные объемы работ из проектно-сметной документации, прошедшей повторную государственную экспертизу в 2018 году по Актам о приемке выполненных работ №1-0000975/1 от 17.04.2019 на общую сумму «-» 146 200,00 руб. (КС-2 подписаны со стороны Муниципального заказчика), Справка о стоимости работ и затрат №1-0000975 на сумму 33 725,22 руб. 

5. Акт о приемке выполненных работ  (по форме КС-2) №1-001584 от 02.07.2019 на сумму 2 962 650,00 руб. (КС-2) по автомобильной дороге площадки №4, Справка о стоимости работ и затрат №1-001584 от 02.07.2019 на сумму 2 962 650,00 руб. 

6. Акт о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) №1-001586 от 02.07.2019 на сумму 2 432 160,00 руб. по автомобильной дороге промышленной площадки №3, Справка о стоимости работ и затрат №1-001586 от 02.07.2019 на сумму 2 432 160,00 руб. 

По Муниципальному контракту №2 сумма задолженности подтверждена следующими документами:

1. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №1-001585 от 02.07.2019 по площадке №4, Справка о стоимости работ и затрат №1-001585 от 02.07.2019 на сумму 914 253,00 руб. 

В указанных Актах о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) отражены работы, предусмотренные внесенными изменениями в проектно-сметную документацию, а также исключенные из проектно-сметной документации объемы работ в 2018 году. 

Основанием для изменения проектно-сметной документации в 2018 году, является Соглашение на внесение изменений в проектную документацию от 18.01.2018.

Таким образом, со стороны Муниципального заказчика не оплачены выполненные Генеральным подрядчиком работы по Муниципальному контракту №1 в размере 6 652 161,40 руб. и по Муниципальному контракту №2 в размере 914 253,00 руб. 

В соответствии с ч.9 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации №94-ФЗ от 21.06.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Закон №94-ФЗ) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Согласно расчету неустойки по правилам Закона 94-ФЗ, размер неустойки по Муниципальному контракту №1 составляет 540 842,54 руб.

Согласно расчету по правилам Закона 94-ФЗ, размер неустойки по Муниципальному контракту №2 составляет 79 626,37,99 руб.

Спорные работы приняты Муниципальным заказчиком в рамках итоговой приемки работ, что подтверждается Актами приемки законченного строительством объекта (форма -КС-14) по всем строительным площадкам Объекта и Заключениями о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложения №№ к настоящему исковому заявлению).

Из положений статей 702, 740, 746 ГК РФ следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств - выполнение работ и передача их результата заказчику.

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

В соответствии с ч. 31. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, возражений против требований истца и расчета задолженности не заявил.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Администрации Муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «Би.Си.Си.» (ОГРН 

<

***>) 7 566 414,40 руб. задолженности, 609 378,90 руб. неустойки, всего 8 175 793,30 руб., а также 63 876,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Виноградова Л.В.