АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-390/2024

г. Салехард

05 сентября 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Санджиева М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Ивановым С.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства  Тазовского района» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Ямал СТ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  об устранении недостатков (дефектов) в рамках гарантийных обязательств по  контракту,  

в отсутствие представителей сторон. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Тазовского района» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ямал СТ» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по  муниципальному контракту № 0190300000722000606 от 22.08.2022 устранить дефекты  выполненных работ, отраженные в акте от 24 апреля 2024 года, а именно:  

- произвести зачистку и окраску перил ограждения в количестве 10 метров  погонных (пункт 4 акта);  

- произвести изоляцию трубопровода в количестве 5 погонных метров  листовыми материалами из оцинкованной стали (пункт 5 акта);  

- произвести проварку сварного шва на балках металлического ростверка.  Количество 3 балки: ПВ1-1шт., ПВ-2-2 шт. (пункт 8 акта).  

Вышеуказанные работы выполнить в течение 30 календарных дней с момента  вступления решения суда в законную силу.  

В удовлетворении оставшейся части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ямал СТ» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  

 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

М.А. Санджиев

Судья