И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                                                                 Дело  № А40-268259/22-151-2034

21.03.2023 года                                                                                                 

Резолютивная часть решения объявлена 13.03.2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 21.03.2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «ГЕС КОМПАНИ» (ОГРН 

<

***>)

к ответчику ООО «АБД ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 14 432 353, 95 руб.

при участии: лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены,  

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 820 045, 70 руб., неустойки в размере 10 612 308, 25 руб.  

Надлежащим образом извещенный представитель истца и ответчика в судебное заседание не явился, в порядке ст. 156 АПК РФ суд считает возможным провести судебное заседание в их отсутствие. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с условиями договора подряда № 01/11/21 от 19.03.2021 года, ООО «АБД Инжиниринг» как Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ, указанных в смете (Приложение № 1 к Договору) на Объекте «Санаторий Плаза», корпус Б, 4 и 5 этажи.

В соответствии с условиями договора подряда ООО «ГЕС Компани» в период с 16.04.2021 года по 17.09.2021 года) перечислило в адрес ООО «АБД Инжиниринг» авансовые платежи и оплата за выполненные работы в размере 36 572 052,00 (Тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьдесят два рубля 00 копеек):

I) Платежное поручение № 100 от 16.04.2021 года на сумму 5 462 871,39 рублей;

2) Платежное поручение № 131 от 28.04.2021 года на сумму 2 147 834,07 рублей;

3) Платежное поручение № 141 от 30.04.2021 года на сумму 7 610 705,46 рублей;

4) Платежное поручение № 197 от 02.06.2021 года на сумму 224 721,10 рублей;

5) Платежное поручение № 218 от 10.06.2021 года на сумму 500 000,0 рублей;

6) Платежное поручение № 241 от 23.06.2021 года на сумму 800 000,0 рублей;

7) Платежное поручение № 881 от 24.06.2021 года на сумму 881 905,0 рублей;

8) Платежное поручение № 265 от 28.06.2021 года на сумму 450 000,0 рублей;

9) Платежное поручение № 281 от 05.07.2021 года на сумму 530 998,53 рублей;

10) Платежное поручение № 292 от 07.07.2021 года на сумму 1 000 000,0 рублей;

II) Платежное поручение № 306 от 13.07.2021 года на сумму 8 000 000,0 рублей;

12) Платежное поручение № 326 от 22.07.2021 года на сумму 1 000 000,0 рублей;

13) Платежное поручение № 352 от 28.07.2021 года на сумму 463 016,45 рублей.

14) Платежное поручение № 168 от 04.08.2021 года на сумму 1 500 000,0 рублей;

15) Платежное поручение № 189 от 10.08.2021 года на сумму 1 000 000,0 рублей;

16) Платежное поручение № 218 от 17.08.2021 года на сумму 3 500 000,0 рублей;

17) Платежное поручение № 260 от 10.09.2021 года на сумму 500 000,0 рублей;

18) Платежное поручение № 265 от 15.09.2021 года на сумму 300 000,0 рублей;

19) Платежное поручение № 274 от 17.09.2021 года на сумму 500 000,0 рублей;

20) Платежное поручение № 518 от 23.11.2021 года на сумму 200 000,0 рублей;

По распределительным письмам от ООО «АБД Инжиниринг», ООО «ГЕС Компани» произвело оплаты поставщикам Подрядчика на общую сумму 6 276 550,50 (Шесть миллионов двести семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 50 копеек):

1) по письму исх. № 24/09/ИП от 24.09.2021 года в адрес ИП ФИО2 - 500 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 290 от 24.09.2021 года на сумму 400 000,0 рублей;

-          Платежное поручение № 499 от 17.11.2021 года на сумму 100 000,0 рублей.

2)        по письму исх. № 24/09/ХС от 24.09.2021 года в адрес ИП ФИО3 - 350 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 289 от 24.09.2021 года на сумму 350 000,0 рублей;

3)        по письму исх. № 27/09/РП от 27.09.2021 года в адрес ООО «АРВИК ИНЖИНИРИНГ» - 164 943,30 рублей:

-          Платежное поручение № 305 от 28.09.2021 года на сумму 148 143,30 рублей;

-          Платежное поручение № 326 от 29.09.2021 года на сумму 16 800,0 рублей;

4)        по письму исх. № 28/09/ХС от 28.09.2021 года в адрес ИП ФИО3 - 350 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 327 от 29.09.2021 года на сумму 350 000,0 рублей;

5)        по письму исх. № 28/09 от 28.09.2021 года в адрес ИП ФИО4- 300 000,00 рублей:

-          Платежное поручение № 312 от 28.09.2021 года на сумму 200 000,0 рублей;

-          Платежное поручение № 412 от 20.10.2021 года на сумму 100 000,0 рублей;

6)        по письму исх. № 30/09 от 30.09.2021 года в адрес ИП ФИО4 - 380 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 343 от 01.10.2021 года на сумму 200 000,0 рублей;

-          Платежное поручение № 375 от 12.10.2021 года на сумму 80 000,0 рублей;

-          Платежное поручение № 387 от 14.10.2021 года на сумму 100 000,0 рублей;

7)        по письму исх. № 30/09/ФБ от 30.09.2021 года в адрес ООО «ЛЕСКРАФТ» - 42 420,0 рублей:

-          Платежное поручение № 330 от 30.09.2021 года на сумму 42 420,0 рублей;

8)        по письму исх. № 08/21/МХ от 04.10.2021 года в адрес АО «Маркон-Холод» - 34 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 349 от 05.10.2021 года на сумму 34 000,0 рублей;

9)        по письму исх. № 04/21/Г от 04.10.2021 года в адрес ООО «ГЕОМЕТРИЯ» - 305 124,0 рублей:

-          Платежное поручение № 345 от 05.10.2021 года на сумму 305 124,0 рублей;

10)      по письму исх. № 07/21/ИП от 04.10.2021 года в адрес ИП ФИО3 - 350 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 348 от 05.10.2021 года на сумму 350 000,0 рублей;

11)      по письму исх. № 08/21/МХ от 04.10.2021 года в адрес АО «Маркон-Холод» - 34 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 349 от 05.10.2021 года на сумму 34 000,0 рублей;

12) по письму исх. № 05/21/ИП от 04.10.2021 года в адрес ИП ФИО5 - 66 339,0 рублей:

-          Платежное поручение № 346 от 05.10.2021 года на сумму 66 339,0 рублей;

13)      по письму исх. № 06/21/ИП от 04.10.2021 года в адрес ИП ФИО6 - 350 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 347 от 05.10.2021 года на сумму 100 000,0 рублей;

-          Платежное поручение № 372 от 11.10.2021 года на сумму 100 000,0 рублей;

-          Платежное поручение № 386 от 14.10.2021 года на сумму 100 000,0 рублей;

-          Платежное поручение № 399 от 19.10.2021 года на сумму 50 000,0 рублей;

14)      по письму исх. № 11/21/СС от 05.10.2021 года в адрес ИП ФИО7. - 84 900,0 рублей:

-          Платежное поручение № 363 от 07.10.2021 года на сумму 84 900,0 рублей;

15)      по письму исх. № 15/21/ИП от 07.10.2021 года в адрес ИП ФИО2 - 70 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 433 от 27.10.2021 года на сумму 70 000,0 рублей;

16)      по письму исх. № 17/10-МС от 11.10.2021 года в адрес ООО «Мастеркреп» - 403 871,0 рублей:

-          Платежное поручение № 394 от 15.10.2021 года на сумму 130 000,0 рублей;

-          Платежное поручение № 489 от 12.11.2021 года на сумму 273 871,0 рублей;

17)      по письму исх. № 20/21/СС от 16.10.2021 года в адрес ООО «Старт-Строй» - 110 880,0 рублей:

-          Платежное поручение № 400 от 19.10.2021 года на сумму 110 880,0 рублей;

18)      по письму исх. № 24/21/ИП от 18.10.2021 года в адрес ИП ФИО6 - 200 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 432 от 27.10.2021 года на сумму 200 000,0 рублей;

19)      по письму исх. № 29/21/ИП от 29.10.2021 года в адрес ИП ФИО8 - 36 500,0 рублей:

-          Платежное поручение № 450 от 01.11.2021 года на сумму 36 500,0 рублей;

20)      по письму исх. № 15/1-ДВ от 16.11.2021 года в адрес ООО «ДВ-ПРОДЖЕКТ» - 100 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 498 от 17.11.2021 года на сумму 100 000,0 рублей;

21)      по письму исх. № 09/11-МС от 12.11.2021 года в адрес ООО «ТК Мастеркреп» - 877 066,20 рублей:

-          Платежное поручение № 495 от 16.11.2021 года на сумму 877 066,20 рублей;

22)      по письму исх. № 26/11-МС от 26.11.2021 года в адрес ООО «ТК Мастеркреп» - 202 400,0 рублей:

-          Платежное поручение № 529 от 26.11.2021 года на сумму 202 400,0 рублей;

23)      по письму исх. № 26/11-МС от 30.11.2021 года в адрес ООО «ТК Мастеркреп» - 100 100,0 рублей:

-          Платежное поручение № 535 от 30.11.2021 года на сумму 100 100,0 рублей;

24)      по письму исх. № 31/21/ИП от 30.11.2021 года в адрес ИП ФИО4 - 100 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 549 от 02.12.2021 года на сумму 100 000,0 рублей;

25)      по письму исх. № 21/12-МС от 02.12.2021 года в адрес ООО «ТК Мастеркреп» - 299 500,0 рублей:

-          Платежное поручение № 548 от 02.12.2021 года на сумму 199 500,0 рублей;

-          Платежное поручение № 575 от 10.12.2021 года на сумму 100 000,0 рублей;

26)      по письму исх. № 31/09 от 06.12.2021 года в адрес ИП ФИО4 - 200 000,0 рублей:

-          Платежное поручение № 563 от 07.12.2021 года на сумму 200 000,0 рублей.

Таким образом по договору подряда № 01/11/21 от 19.03.2021 года Подрядчику была выплачена сумма Размере 42 848 602,50 рублей.

Согласно подписанным КС-2 и КС-3 за период с 12.05.2021 года по 14.01.2022 года Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 39 028 556,80 (Тридцать девять миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 80 копеек):

1)        по КС-2, КС-3 от 12.05.2021 года выполнены работы на общую сумму 312 183,76 рублей;

2)        по КС-2, КС-3 от 30.06.2021 года выполнены работы на общую сумму 3 329 372,14 рублей;

3)        по КС-2, КС-3 от 15.07.2021 года выполнены работы на общую сумму 2 008 924,72 рублей;

4)        по КС-2, КС-3 от 30.08.2021 года выполнены работы на общую сумму 2 493 035,34 рублей;

5)        по КС-2, КС-3 от 05.09.2021 года выполнены работы на общую сумму 6 256 429,08 рублей;

6)        по КС-2, КС-3 от 21.10.2021 год выполнены работы на общую сумму 6 777 436,25 рублей;

7)        по КС-2, КС-3 от 20.10.2022 года выполнены работы на общую сумму 5 434 705,13 рублей;

8)        по КС-2, КС-3 от 20.10.2021 года выполнены работы на общую сумму 885 641,64 рублей;

9)        по КС-2, КС-3 от 18.11.2021 года выполнены работы на общую сумму 7 857 148,91 рублей;

10)      по КС-2, КС-3 от 14.01.2022 года выполнены работы на общую сумму 3 673 679,83 рублей.

Письмом исх. № 23 от 27.04.2022 года ООО «ГЕС Компани» уведомило ООО «АБД Инжиниринг» о расторжении договора подряда № 01/11/21 от 19.03.2021 года. В соответствии с условиями п.21.1.5 договора и п.1 ст.450.1 ГК РФ, договор считается расторгнутым с момента получения ООО «АБД Инжиниринг» уведомления о расторжении договора.

Согласно отчета об отслеживании почтового отправления Письмо с уведомлением о расторжении договора подряда, было получено ООО «АБД Инжиниринг» 16.05.2022 года. Соответственно с 16 мая 2022 года договор считается расторгнут.

На 28.09.2022 года по акту сверки взаимных расчетов между ООО «ГЕС Компани» и ООО «АБД Инжиниринг» фактическая задолженность ООО «АБД Инжиниринг» перед ООО «ГЕС Компани» (основной долг, без учета финансовых санкций) составляет 3 820 045,70 (Три миллиона восемьсот двадцать тысяч сорок пять рублей 70 копеек).

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 от 01.08.2021 года к договору подряда № 01/11/21 от 19.03.2021 года срок окончания работ - 30.09.2021 года, а размер пени установлен 300 000 рублей за каждый день календарный день просрочки, но не более 10% от цены договора.

Срок просрочки исполнения обязательства со стороны Ответчика составил 106 календарных дней (за период с 01.10.2022 года по 14.01.2022 года).

Размер пени составляет 106 дней * 300 000 рублей = 31 800 000,00 рублей.

Цена договора согласно Договора подряда и дополнительных соглашений к нему составляет 106 123 082,48 рублей, соответственно максимальный размер пени составляет 10% от цены договора -10 612 308,25 рублей.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 450, 450.1, 717, 1102 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

Совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств, подтверждает обоснованность заявленных требований в части неосновательного обогащения в размере 3 820 045,70 руб. 

Рассмотрев расчет неустойки, суд признает его расчет методологически и арифметически верным, контррасчет и возражения по расчету истца ответчиком не представлено. 

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 450, 450.1, 717, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «АБД ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «ГЕС КОМПАНИ» (ОГРН 

<

***>) неосновательного обогащения в размере 3 820 045, 70 руб., неустойку в размере 10 612 308, 25 руб., госпошлину в размере 95 162, 00 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                    К.В. Вольская