АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-15592/2022

г. Краснодар

18 апреля 2025 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Бондаренко И.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению ООО «Лифт строй ДВ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

к ФГАУ «Дом отдыха «Туапсе» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), об обязании о взыскании,  

и по встречному исковому заявлению ФГАУ «Дом отдыха «Туапсе» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

к ООО «Лифт строй ДВ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), о взыскании, 

Руководствуясь статьями 64-71, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску. В удовлетворении исковых требований отказать. По встречному иску. 

Взыскать с ООО «Лифт строй ДВ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФГАУ «Дом отдыха «Туапсе» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ в размере 536 891, 52 руб. за период с 31.12.2021 по 31.03.2022, штраф за несвоевременную передачу проектной документации в размере 5 000 руб., неустойку за нарушение срока выполнения гарантийных работ в размере 4 569 966,72 руб. за период с 02.10.2022 по 19.11.2024, стоимость устранения недостатков в размере 977 916,71 руб., расходы на проведение судебной экспертизы в размере 160 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 930 руб.  

Взыскать с ООО «Лифт строй ДВ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 519 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья И.Н. Бондаренко