Арбитражный суд Брянской области 241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ решения

 по делу 

№ А09-10839/2024

город Брянск

10 марта 2025 года

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Поддубной И.С.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чепиковой Ю.С. (до и после перерыва),  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью специализированный застройщик «Мегаполис-Строй», п. Путевка Брянского района Брянской области,  

к Управлению имущественных отношений Брянской области, г.Брянск, об обязании заключить дополнительное соглашение,  

при участии представителей: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 26.12.2024, копия диплома, паспорт (до и после перерыва),  

от ответчика: ФИО2 по доверенности № 01-01 от 09.01.2025, копия диплома, паспорт (до и после перерыва),  

Руководствуясь ст.ст.167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Мегаполис-Строй» к Управлению имущественных отношений Брянской области удовлетворить.  

Обязать Управление имущественных отношений Брянской области, г.Брянск, течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу настоящего решения, заключить с обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Мегаполис-Строй», п. Путевка Брянского района Брянской области,  

дополнительное соглашение к договору о комплексном освоении территории № 3727-К от 05.06.2018 со следующим содержанием:  

- в пункте 2.3. договора «Срок действия настоящего договора: 10 (десять) лет. С 05 июня 2018 года по 04 июня 2028 года.» заменить на «Срок действия настоящего договора с 05 июня 2018 года по 04 июня 2031 года.».  

- в пункте 3.3.4. договора срок «не позднее 10 лет» заменить на «не позднее 04 июня 2031 года».  

- в пункте 3.4.8. договора срок «не позднее 10 лет» заменить на «не позднее 04 июня 2031 года».  

- в графике освоения территории, являющимся неотъемлемой частью договора, увеличить на три года дату начала строительства и дату освоения земельного участка.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в г.Туле. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Брянской области.  

Судья И.С. Поддубная