АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

10 декабря 2019 года

 

Дело № А33-7252/2019

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 03 декабря 2019 года.

В полном объеме решение изготовлено 10 декабря 2019 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Нечаевой И.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Кемерово,

к краевому государственному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

о взыскании задолженности

в судебном заседании участвовали:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 24.05.2019, ФИО2, представитель по доверенности от 18.10.2019,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 04.09.2019,

в здании Седьмого Арбитражного апелляционного суда эксперты: ФИО4, личность удостоверена паспортом, ФИО5,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО6, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  краевому государственному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» (далее – ответчик) о взыскании 243 433 338,02 руб. задолженности за выполненные работы.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 18.03.2019 возбуждено производство по делу.

Истцом было заявлено ходатайство о назначении по делу судебной строительно-технической экспертизы.

Определением 21.06.2019 ходатайство истца было удовлетворено и назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Проведение судебной экспертизы было поручено экспертам ФГБО УВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» ФИО4, ФИО7, ФИО5.

17.10.2019 в материалы дела от экспертной организации поступило ходатайство о продлении срока проведения судебной строительно-технической экспертизы до 20.11.2019, в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов для наиболее полного и всестороннего ответа на поставленные судом вопросы. Определением от 23.10.2019 срок проведения экспертизы продлен. К судебному заседанию 21.11.2019 в материалы дела от экспертной организации поступило экспертное заключение.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом принято уменьшение размера исковых требований до суммы 236 518 925 руб. 06 коп.

02.12.2019 в материалы дела от экспертов ФГБО УВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» поступили пояснения к экспертному заключению.

В судебном заседании 03.12.2019 суд заслушал пояснения экспертов ФГБО УВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет».

Суд в отсутствие возражений ответчика повторно приобщил к материалам дела представленные истцом первичные документы в обоснование исковых требований, том числе содержащиеся на CD-диске.

Суд исследовал материалы дела.

 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между краевым государственным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» (подрядчик) заключен контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования на объекте Стадион «Енисей» от 01.03.2017 № Ф.2017.61949 (далее – контракт), по условиям пункта 1.1. которого, подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по объекту Стадион «Енисей», г. Красноярск», указанный в описании объекта закупки (техническом задании) (приложение № 1 к контракту), в соответствии с утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией, в том числе: строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, приобретение монтируемого оборудования.

В соответствии с пунктом 1.2. контракта, результатом выполненных работ по контракту является объект, который полностью подготовлен к вводу в эксплуатацию и в отношении которого подписан акт приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме № КС-11, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, а также получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно пункту 2.1. контракта, течение срока выполнения работ начинается на следующий день после даты заключения контракта, дата начала выполнения работ: 01.03.2017, дата окончания выполнения работ: 30.11.2018.

В силу пункта 3.1. контракта, стоимость работ, выполняемых подрядчиком по контракту, составляет 2 870 508 169 руб., с учетом НДС 18%. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Лимит финансирования на 2017 год составляет 1 141 530 700 руб., лимит финансирования на 2018 год составляет 1 728 977 469 руб.

Пунктом 3.5. контракта предусмотрено, что изменение цены контракта возможно по соглашению сторон в случае увеличения или уменьшения по предложению заказчика предусмотренного контрактом объема работы не более чем на 10 %. Увеличение цены производится пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 %  цены контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом объема работы стороны уменьшают цену контракта исходя из цены единицы работы.

Согласно пункту 12.4. контракта, в случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

В приложении № 1 к контракту стороны согласовали техническое задание.

Дополнительным соглашением от 09.04.2018 № 6 к контракту стороны внесли изменения в пункт 3.1. контракта, который изложен в следующей редакции: стоимость работ, выполняемых подрядчиком по контракту, составляет 3 157 558 986 руб. 90 коп., в том числе НДС 18%. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Оплата осуществляется в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований: на 2017 год в размере 1 274 516 955 руб. 52 коп.; на 2018 год в размере 1 883 042 031 руб. 38 коп.

Как следует из иска, в ходе выполнения работ выявились дополнительные объемы работ, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, но не предусмотренные техническим заданием к контракту.

В подтверждение факта выполнения дополнительного объема работ на сумму 243 433 338 руб. 02 коп., в материалы дела представлены подписанные между сторонами акты о приемке выполненных работ.

В материалы дела представлены письма заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ по контракту, положительные заключения экспертизы от 31.10.2016 № 24-1-1-3-0108-16, от 17.10.2017 № 24-1-1-3-0095-17, от 24.07.2018 № 24-1-1-2-0071-18, от 27.11.2018 № 24-1-0830-18, от 29.11.2017 № 024-1-3-0621-17, 22.06.2017 № 0010, от 22.06.2017 № 0009.

30.11.2018 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства № 173-ГСНЗ.

18.12.2018 Администрацией города Красноярска выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 24-308-32-2017.

В целях определения объема выполненных истцом дополнительных работ по контракту, по ходатайству истца, определением от 21.06.2019, судом назначена судебная строительно-техническая экспертиза по делу, проведение экспертизы поручено экспертам ФГБО УВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» ФИО4, ФИО7, ФИО5, перед экспертами поставлены следующие вопросы:

1) Какова стоимость дополнительных качественно выполненных обществом с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017 г. по следующим актам выполненных работ формы КС-2 общей стоимостью 243 433 338,02 руб. (далее по тексту именуемым «Акты формы КС-2»):

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 73/1 на сумму 3 052 585,66 руб. (Общестроительные работы КПП 1 доп. 1 (сваи));

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 87 на сумму 2 240 902,60 руб. (Трубы для прокладки коммуникаций в ростверках);

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 90 на сумму 24 296 941,04 руб. (Опорная плита ледовой арены);

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 91 на сумму 12 087 675,74 руб. (Предварительно-напряженные затяжки арок покрытия);

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 92 на сумму 1 020 662,24 руб. (Земляные работы для предварительно-напряженных затяжек арок покрытия);

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 98 на сумму 7 124 824,66 руб. (Общестроительные работы (работы ранее не учтенные));

- акт о приемке выполненных работ за июль 2018 г. № 286 на сумму 2 505 229,68 руб. (Эксплуатируемая кровля (267 м2) + парапет);

- акт о приемке выполненных работ за июнь 2018 г. № 287 на сумму 1 653 013,62 руб. (Общестроительные работы. Каркас. Жидкая теплоизоляция);

- акт о приемке выполненных работ за июль 2018 г. № 288 на сумму 2 144 621,68 руб. (Система контроля и управления доступом. Фундаменты под блокираторы);

- акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г. № 392 на сумму 4 990 479,60 руб. (Намораживание льда, окраска льда и укладка разметки);

- акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г. № 393 на сумму 236 231,28 руб. (Технологические системы ледовой арены);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 518 на сумму 518 410,58 руб. (Яма снеготаяния (общестроительные работы));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 519 на сумму 715 954,38 руб. (Яма снеготаяния ВК);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 520 на сумму 755 507,98 руб. (Яма снеготаяния (отопление));

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 521 на сумму 739 687,72 руб. (Яма снеготаяния (обвязка теплообменника));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 525/1 на сумму 1 271 342,62 руб. (Общестроительные работы КПП 2 доп. 2);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 527 на сумму 1 580 056,58 руб. (Разборка асфальтобетонного покрытия, кирпичного забора, валка деревьев);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 533 на сумму 410 759,18 руб. (Общестроительные работы доп 2);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 534 на сумму 204 799,62 руб. (Водоотводный лоток);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 535 на сумму 499 399,60 руб. (Водоотводный лоток доп. 1);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 536 на сумму 1 282 910,16 руб. (Силовое электрооборудование. Устройство молниезащиты);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 539/1 на сумму 2 646 830,86 руб. (Общестроительные работы КПП 1 доп. 2);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 543 на сумму 17 242 688,64 руб. (Общестроительные работы. Кровля (утепление, обшивка карниза и парапета, ограждение кровли, снегозадержание));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 543/1 на сумму 1 578 429,36 руб. (Общестроительные работы. Каркас (корректировка));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 546/1 на сумму 5 294 655,28 руб. (Общестроительные работы (витражи, окна));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 551 на сумму 3 105 021,32 руб. (Общестроительные работы. Дополнительные работы);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 552 на сумму 675 545,28 руб. (Сети водопровода В1 (участок от сущ. Колодца до колодца 4 ПГ));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 553 на сумму 319 808,32 руб. (Фундамент под холодильную установку доп 3);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 556/1 на сумму 9 064 486,24 руб. (Общестроительные работы. Перегородки противопожарные, алюминиевые (корректировка));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 561 на сумму 335 967,24 руб. (Общестроительные работы. Обшивка сэндвич-панелями СПА-зоны, коробов, монтаж металлоконструкций для крепления потолка);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 562 на сумму 127 595,76 руб. (Отопление, воздушное отопление доп. 3 изм);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 564 на сумму 78 138,42 руб. (Общестроительные работы);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 565 на сумму 36 144,58 руб. (Кондиционирование КПП-1);

- акт о приемке выполненных работ № 603 от 27.11.2018 г. на сумму 5 178 230,58 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Аспирационная система внешняя, Стадион);

- акт о приемке выполненных работ № 604 от 27.11.2018 г. на сумму 4 619 088,76 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Кабеленесущая система внешняя, Стадион);

- акт о приемке выполненных работ № 605 от 27.11.2018 г. на сумму 1 112 475,68 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Структурированная кабельная система МВД);

- акт о приемке выполненных работ № 606 от 27.11.2018 г. на сумму 229 383,74 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Структурированная кабельная система ФСБ);

- акт о приемке выполненных работ № 607 от 27.11.2018 г. на сумму 7 173 350,98 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система охраны периметра);

- акт о приемке выполненных работ № 608 от 27.11.2018 г. на сумму 464 075,12 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система охраны периметра. Стадион);

- акт о приемке выполненных работ № 609 от 27.11.2018 г. на сумму 3 021 033,64 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система охранного освещения);

- акт о приемке выполненных работ № 610 от 27.11.2018 г. на сумму 223 683,16 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Блок А);

- акт о приемке выполненных работ № 612 от 27.11.2018 г. на сумму 1 304 560,80 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Блок Б);

- акт о приемке выполненных работ № 613 от 27.11.2018 г. на сумму 864 299,26 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Блок В);

- акт о приемке выполненных работ № 614 от 27.11.2018 г. на сумму 691 188,54 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Блок Г);

- акт о приемке выполненных работ № 615 от 27.11.2018 г. на сумму 187 064,22 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Заземление. Блоки А, Б, В, Г);

- акт о приемке выполненных работ № 617 от 27.11.2018 г. на сумму 22 986,40 руб. (Система видеонаблюдения. Тревожные мониторы);

- акт о приемке выполненных работ № 618 от 27.11.2018 г. на сумму 65 046 028,54 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система видеонаблюдения);

- акт о приемке выполненных работ № 619 от 27.11.2018 г. на сумму 4 573 667,02 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система контроля и управления доступом, КПП);

- акт о приемке выполненных работ № 620 от 27.11.2018 г. на сумму 228 641,52 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Пусконаладочные работы билетно-пропускной системы);

- акт о приемке выполненных работ № 621 от 27.11.2018 г. на сумму 56 273,43 руб. (Пусконаладочные работы системы кабельного, эфирного и спутникового телевидения);

- акт о приемке выполненных работ № 622 от 27.11.2018 г. на сумму 3 563 991,26 руб. (Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом);

- акт о приемке выполненных работ № 623 от 27.11.2018 г. на сумму 75 096,46 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Пусконаладочные работы системы ЦОД);

- акт о приемке выполненных работ № 624 от 27.11.2018 г. на сумму 691 461,12 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Пусконаладочные работы СМИК);

- акт о приемке выполненных работ № 625 от 27.11.2018 г. на сумму 344 321,64 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Пусконаладочные работы СМИС);

- акт о приемке выполненных работ № 626 от 27.11.2018 г. на сумму 2 457 368,88 руб. (Пусконаладочные работы автоматической системы диспетчеризации и управления инженерными системами);

- акт о приемке выполненных работ № 627 от 27.11.2018 г. на сумму 15 523 746,06 руб. (Пусконаладочные работы системы охранной сигнализации, пожарной сигнализации);

- акт о приемке выполненных работ № 628 от 27.11.2018 г. на сумму 25 312,18 руб. (Пусконаладочные работы аспирационной системы);

- акт о приемке выполненных работ № 629 от 27.11.2018 г. на сумму 2 267 872,68 руб. (Пусконаладочные работы системы охраны периметра);

- акт о приемке выполненных работ № 630 от 27.11.2018 г. на сумму 61 023,70 руб. (Пусконаладочные работы системы охранного освещения);

- акт о приемке выполненных работ № 631 от 27.11.2018 г. на сумму 250 866,82 руб. (Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом);

- акт о приемке выполненных работ № 632 от 27.11.2018 г. на сумму 4 426 913,96 руб. (Пусконаладочные работы системы охранной сигнализации, пожарной сигнализации);

- акт о приемке выполненных работ № 633 от 27.11.2018 г. на сумму 259 818,30 руб. (Пусконаладочные работы системы охраны периметра);

- акт о приемке выполненных работ № 634 от 27.11.2018 г. на сумму 4 215 225,50 руб. (Системы передачи данных);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 635 на сумму 162 756,22 руб. (Автоматизация ОВ);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 636 на сумму 1 013 956,30 руб. (Общестроительные работы (отделка помещений № 7, 13, 18 согласно акта) доп. 3);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 637 на сумму 1 545 487,30 руб. (Общестроительные работы доп4);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 638 на сумму 186 198,10 руб. (Электроосвещение доп.3);

- акт о приемке выполненных работ № 645 от 27.11.2018 г. на сумму 1 383 646,76 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта КПП-1);

- акт о приемке выполненных работ № 646 от 27.11.2018 г. на сумму 9 973,36 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем. Заземление КПП-1);

- акт о приемке выполненных работ № 647 от 27.11.2018 г. на сумму 132 947,06 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». КПП-2);

- акт о приемке выполненных работ № 648 от 27.11.2018 г. на сумму 2 015,44 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Заземление КПП-2)?

2) Могло ли невыполнение работ, указанных в перечисленных актах формы КС-2, повлиять на годность и прочность результата работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017?

3) Являются ли работы, указанные в перечисленных актах формы КС-2, работами, без выполнения которых общество с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» не могло приступить к другим работам или продолжать уже начатые по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017 г. либо без выполнения которых невозможно было ввести объект Стадион «Енисей» в эксплуатацию?

Согласно поступившему экспертному заключению № 1811-2019, эксперты ФИО4, ФИО7, ФИО5 пришли к следующим выводам:

по вопросу № 1: общая стоимость дополнительных качественно выполненных ООО «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» по объекту Стадион «Енисей» № 2017.61949 от 01.03.2017 года, составляет: 236 518 925,06 руб.

Стоимость дополнительных качественно выполненных ООО «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» подлежащие оплате после получения положительного заключения достоверности сметной стоимости работ, составляет: 34 020 262,58 руб.

Стоимость дополнительных качественно выполненных 000 «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных   и   пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017, подлежащие оплате, составляет: 202 498 662,48 руб.;

по вопросу № 2: невыполнение данного комплекса дополнительных работ, указанных в перечисленных актах формы КС-2, могло существенным образом повлиять на годность и прочность результата работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017.

по вопросу № 3: работы, указанные в перечисленных актах формы КС-2, являются работами, без выполнения которых, общество с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» не могло приступить к другим работам или продолжать уже начатые по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» в эксплуатацию № Ф.2017.61949 от 01.03.2017.

Ссылаясь на неисполнение ответчиком требований по оплате стоимости дополнительно выполненных истцом работ, истец обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим исковым заявлением.

 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

Из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном кодексом.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных  правовых актов, а при  отсутствии таких - условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Отказ от исполнения обязательств, изменение условий обязательств в одностороннем порядке статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается.

Заключенный между сторонами контракт от 01.03.2017 № Ф.2017.61949 по своей правовой природе является договором строительного подряда, который регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Частью 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

По смыслу положений статей 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате стоимости выполненных работ является сдача результатов работ заказчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации, государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом (пункт 2 статьи 767 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 6 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (статья 768 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона (пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Согласно подпункту «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Из пункта 5 статьи 709 и пункта 3 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что подрядчик обязан сообщать заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, которые увеличивают сметную стоимость строительства объекта.

С учетом положений статьи 8, части 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», увеличение объема работ по государственному (муниципальному) контракту, в том числе когда такое увеличение превышает 10 процентов от цены или объема, предусмотренных контрактом, допустимо исключительно в случае, если их невыполнение грозит годности и прочности результата выполняемой работы. К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком также могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

По смыслу приведенных норм в случае, если заказчик согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создавал бы возможности для извлечения им преимуществ из своего недобросовестного поведения, что противоречит пункту 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 12 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017).

Таким образом, подрядчик может взыскать стоимость дополнительных строительных работ, превышающую 10 процентов цены контракта, при одновременном наличии четырех условий: работы согласованы с заказчиком; необходимы для завершения основных работ, а в документации их заранее нельзя было учесть; влияют на годность и прочность результата основных работ; не могли быть выполнены иным лицом без увеличения их стоимости.

При этом пунктом 4 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 данной статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Таким образом, подрядчик, выполняя строительные работы по контракту, вправе претендовать на оплату дополнительно выполненных работ при соблюдении условий, предусмотренных законом.

По смыслу названных норм под дополнительными работами понимаются работы, необходимость проведения которых обнаруживается подрядчиком в ходе проведения строительных работ и которые отсутствуют в технической документации, то есть таких работ, без проведения которых продолжение строительства невозможно.

В частности, дополнительными могут быть признаны только те работы, которые не были учтены в технической документации, но должны были быть учтены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступить к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата работ. При этом не могут быть признаны дополнительными работы, которые по своей сути являются самостоятельным объектом строительства, в связи с чем для их выполнения требуется размещение заказа в установленном специальным законодательством порядке.

Бремя доказывания совершения этих действий при выявлении необходимости дополнительных работ лежит на подрядчике.

Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре (пункт 5 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в особых случаях (когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам) (пункт 5 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что в ходе выполнения работ выявились дополнительные объемы работ, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, но не предусмотренные техническим заданием к контракту.

Выполнение подрядчиком дополнительных работ подтверждается представленными в материалы дела подписанными между сторонами актами о приемке выполненных работ, указанные документы ответчикам не оспорены.

В целях определения объема выполненных истцом дополнительных работ по контракту, по ходатайству истца, определением от 21.06.2019, судом назначена судебная строительно-техническая экспертиза по делу, проведение экспертизы поручено экспертам ФГБО УВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» ФИО4, ФИО7, ФИО5, перед экспертами поставлены следующие вопросы:

1) Какова стоимость дополнительных качественно выполненных обществом с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017 г. по следующим актам выполненных работ формы КС-2 общей стоимостью 243 433 338,02 руб. (далее по тексту именуемым «Акты формы КС-2»):

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 73/1 на сумму 3 052 585,66 руб. (Общестроительные работы КПП 1 доп. 1 (сваи));

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 87 на сумму 2 240 902,60 руб. (Трубы для прокладки коммуникаций в ростверках);

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 90 на сумму 24 296 941,04 руб. (Опорная плита ледовой арены);

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 91 на сумму 12 087 675,74 руб. (Предварительно-напряженные затяжки арок покрытия);

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 92 на сумму 1 020 662,24 руб. (Земляные работы для предварительно-напряженных затяжек арок покрытия);

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2017 г. № 98 на сумму 7 124 824,66 руб. (Общестроительные работы (работы ранее не учтенные));

- акт о приемке выполненных работ за июль 2018 г. № 286 на сумму 2 505 229,68 руб. (Эксплуатируемая кровля (267 м2) + парапет);

- акт о приемке выполненных работ за июнь 2018 г. № 287 на сумму 1 653 013,62 руб. (Общестроительные работы. Каркас. Жидкая теплоизоляция);

- акт о приемке выполненных работ за июль 2018 г. № 288 на сумму 2 144 621,68 руб. (Система контроля и управления доступом. Фундаменты под блокираторы);

- акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г. № 392 на сумму 4 990 479,60 руб. (Намораживание льда, окраска льда и укладка разметки);

- акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г. № 393 на сумму 236 231,28 руб. (Технологические системы ледовой арены);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 518 на сумму 518 410,58 руб. (Яма снеготаяния (общестроительные работы));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 519 на сумму 715 954,38 руб. (Яма снеготаяния ВК);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 520 на сумму 755 507,98 руб. (Яма снеготаяния (отопление));

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 521 на сумму 739 687,72 руб. (Яма снеготаяния (обвязка теплообменника));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 525/1 на сумму 1 271 342,62 руб. (Общестроительные работы КПП 2 доп. 2);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 527 на сумму 1 580 056,58 руб. (Разборка асфальтобетонного покрытия, кирпичного забора, валка деревьев);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 533 на сумму 410 759,18 руб. (Общестроительные работы доп 2);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 534 на сумму 204 799,62 руб. (Водоотводный лоток);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 535 на сумму 499 399,60 руб. (Водоотводный лоток доп. 1);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 536 на сумму 1 282 910,16 руб. (Силовое электрооборудование. Устройство молниезащиты);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 539/1 на сумму 2 646 830,86 руб. (Общестроительные работы КПП 1 доп. 2);

- акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. № 543 на сумму 17 242 688,64 руб. (Общестроительные работы. Кровля (утепление, обшивка карниза и парапета, ограждение кровли, снегозадержание));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 543/1 на сумму 1 578 429,36 руб. (Общестроительные работы. Каркас (корректировка));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 546/1 на сумму 5 294 655,28 руб. (Общестроительные работы (витражи, окна));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 551 на сумму 3 105 021,32 руб. (Общестроительные работы. Дополнительные работы);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 552 на сумму 675 545,28 руб. (Сети водопровода В1 (участок от сущ. Колодца до колодца 4 ПГ));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 553 на сумму 319 808,32 руб. (Фундамент под холодильную установку доп 3);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 556/1 на сумму 9 064 486,24 руб. (Общестроительные работы. Перегородки противопожарные, алюминиевые (корректировка));

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 561 на сумму 335 967,24 руб. (Общестроительные работы. Обшивка сэндвич-панелями СПА-зоны, коробов, монтаж металлоконструкций для крепления потолка);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 562 на сумму 127 595,76 руб. (Отопление, воздушное отопление доп. 3 изм);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 564 на сумму 78 138,42 руб. (Общестроительные работы);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 565 на сумму 36 144,58 руб. (Кондиционирование КПП-1);

- акт о приемке выполненных работ № 603 от 27.11.2018 г. на сумму 5 178 230,58 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Аспирационная система внешняя, Стадион);

- акт о приемке выполненных работ № 604 от 27.11.2018 г. на сумму 4 619 088,76 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Кабеленесущая система внешняя, Стадион);

- акт о приемке выполненных работ № 605 от 27.11.2018 г. на сумму 1 112 475,68 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Структурированная кабельная система МВД);

- акт о приемке выполненных работ № 606 от 27.11.2018 г. на сумму 229 383,74 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Структурированная кабельная система ФСБ);

- акт о приемке выполненных работ № 607 от 27.11.2018 г. на сумму 7 173 350,98 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система охраны периметра);

- акт о приемке выполненных работ № 608 от 27.11.2018 г. на сумму 464 075,12 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система охраны периметра. Стадион);

- акт о приемке выполненных работ № 609 от 27.11.2018 г. на сумму 3 021 033,64 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система охранного освещения);

- акт о приемке выполненных работ № 610 от 27.11.2018 г. на сумму 223 683,16 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Блок А);

- акт о приемке выполненных работ № 612 от 27.11.2018 г. на сумму 1 304 560,80 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Блок Б);

- акт о приемке выполненных работ № 613 от 27.11.2018 г. на сумму 864 299,26 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Блок В);

- акт о приемке выполненных работ № 614 от 27.11.2018 г. на сумму 691 188,54 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Блок Г);

- акт о приемке выполненных работ № 615 от 27.11.2018 г. на сумму 187 064,22 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Заземление. Блоки А, Б, В, Г);

- акт о приемке выполненных работ № 617 от 27.11.2018 г. на сумму 22 986,40 руб. (Система видеонаблюдения. Тревожные мониторы);

- акт о приемке выполненных работ № 618 от 27.11.2018 г. на сумму 65 046 028,54 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система видеонаблюдения);

- акт о приемке выполненных работ № 619 от 27.11.2018 г. на сумму 4 573 667,02 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Система контроля и управления доступом, КПП);

- акт о приемке выполненных работ № 620 от 27.11.2018 г. на сумму 228 641,52 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Пусконаладочные работы билетно-пропускной системы);

- акт о приемке выполненных работ № 621 от 27.11.2018 г. на сумму 56 273,43 руб. (Пусконаладочные работы системы кабельного, эфирного и спутникового телевидения);

- акт о приемке выполненных работ № 622 от 27.11.2018 г. на сумму 3 563 991,26 руб. (Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом);

- акт о приемке выполненных работ № 623 от 27.11.2018 г. на сумму 75 096,46 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Пусконаладочные работы системы ЦОД);

- акт о приемке выполненных работ № 624 от 27.11.2018 г. на сумму 691 461,12 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Пусконаладочные работы СМИК);

- акт о приемке выполненных работ № 625 от 27.11.2018 г. на сумму 344 321,64 руб. (Создание комплекса систем безопасности и инженерного обеспечения спортивного сооружения. Пусконаладочные работы СМИС);

- акт о приемке выполненных работ № 626 от 27.11.2018 г. на сумму 2 457 368,88 руб. (Пусконаладочные работы автоматической системы диспетчеризации и управления инженерными системами);

- акт о приемке выполненных работ № 627 от 27.11.2018 г. на сумму 15 523 746,06 руб. (Пусконаладочные работы системы охранной сигнализации, пожарной сигнализации);

- акт о приемке выполненных работ № 628 от 27.11.2018 г. на сумму 25 312,18 руб. (Пусконаладочные работы аспирационной системы);

- акт о приемке выполненных работ № 629 от 27.11.2018 г. на сумму 2 267 872,68 руб. (Пусконаладочные работы системы охраны периметра);

- акт о приемке выполненных работ № 630 от 27.11.2018 г. на сумму 61 023,70 руб. (Пусконаладочные работы системы охранного освещения);

- акт о приемке выполненных работ № 631 от 27.11.2018 г. на сумму 250 866,82 руб. (Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом);

- акт о приемке выполненных работ № 632 от 27.11.2018 г. на сумму 4 426 913,96 руб. (Пусконаладочные работы системы охранной сигнализации, пожарной сигнализации);

- акт о приемке выполненных работ № 633 от 27.11.2018 г. на сумму 259 818,30 руб. (Пусконаладочные работы системы охраны периметра);

- акт о приемке выполненных работ № 634 от 27.11.2018 г. на сумму 4 215 225,50 руб. (Системы передачи данных);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 635 на сумму 162 756,22 руб. (Автоматизация ОВ);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 636 на сумму 1 013 956,30 руб. (Общестроительные работы (отделка помещений № 7, 13, 18 согласно акта) доп. 3);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 637 на сумму 1 545 487,30 руб. (Общестроительные работы доп4);

- акт о приемке выполненных работ за 2018 г. № 638 на сумму 186 198,10 руб. (Электроосвещение доп.3);

- акт о приемке выполненных работ № 645 от 27.11.2018 г. на сумму 1 383 646,76 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта КПП-1);

- акт о приемке выполненных работ № 646 от 27.11.2018 г. на сумму 9 973,36 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем. Заземление КПП-1);

- акт о приемке выполненных работ № 647 от 27.11.2018 г. на сумму 132 947,06 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». КПП-2);

- акт о приемке выполненных работ № 648 от 27.11.2018 г. на сумму 2 015,44 руб. (Электротехническая часть слаботочных систем для объекта «Стадион Енисей». Заземление КПП-2)?

2) Могло ли невыполнение работ, указанных в перечисленных актах формы КС-2, повлиять на годность и прочность результата работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017?

3) Являются ли работы, указанные в перечисленных актах формы КС-2, работами, без выполнения которых общество с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» не могло приступить к другим работам или продолжать уже начатые по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017 г. либо без выполнения которых невозможно было ввести объект Стадион «Енисей» в эксплуатацию?

Согласно поступившему экспертному заключению № 1811-2019, эксперты ФИО4, ФИО7, ФИО5 пришли к следующим выводам:

по вопросу № 1: общая стоимость дополнительных качественно выполненных ООО «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» по объекту Стадион «Енисей» № 2017.61949 от 01.03.2017 года, составляет: 236 518 925,06 руб.

Стоимость дополнительных качественно выполненных ООО «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» подлежащие оплате после получения положительного заключения достоверности сметной стоимости работ, составляет: 34 020 262,58 руб.

Стоимость дополнительных качественно выполненных 000 «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных   и   пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017, подлежащие оплате, составляет: 202 498 662,48 руб.;

по вопросу № 2: невыполнение данного комплекса дополнительных работ, указанных в перечисленных актах формы КС-2, могло существенным образом повлиять на годность и прочность результата работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» № Ф.2017.61949 от 01.03.2017.

по вопросу № 3: работы, указанные в перечисленных актах формы КС-2, являются работами, без выполнения которых, общество с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» не могло приступить к другим работам или продолжать уже начатые по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» в эксплуатацию № Ф.2017.61949 от 01.03.2017.

На основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.

Ответчик экспертное заключение № 1811-2019 не оспорил. В ходе судебного разбирательства после исследования заключения судебной экспертизы указал, что считает обоснованной стоимость качественно выполненных дополнительных работ в размере 202 498 662,48 руб. (как указано экспертами в абзаце 3 ответа на первый вопрос).

Суд заслушал пояснения истцом по данным доводам ответчика, а также вызвал для дачи пояснений по данному вопросу судебных экспертов в заседание 03.12.2019.

В ходе судебного разбирательства эксперты ответили на вопросы суда и истца, пояснили, что общая стоимость дополнительных качественно выполненных ООО «СДС-Строй» работ по контракту на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту Стадион «Енисей» по объекту Стадион «Енисей» № 2017.61949 от 01.03.2017, составляет: 236 518 925,06 руб.; выделение в отдельные пункты (абзацы) стоимости в размере 202 498 662 руб. 48 коп. и стоимости в размере 34 020 262 руб. 58 коп. обусловлено наличием проектно-сметной документации на сумму 202 498 662 руб. 48 коп.; в части суммы 34 020 262 руб. 58 коп. сметная документация в распоряжение экспертов не предоставлена в связи с ее отсутствием, вместе с тем дополнительные работы на общую сумму 236 518 925 руб. 06 коп. (202 498 662 руб. 48 коп. + 34 020 262 руб. 58 коп.) выполнены истцом качественно и в соответствующих объемах. На соответствующий вопрос представителя истца эксперты пояснили, что заявителем на получение положительного заключения достоверности сметной стоимости должен являться заказчик (ответчик). Ответчик пояснил, что указанное заключение не получал.

Изучив экспертное заключение № 1811-2019 по правилам статей 71 и 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что оно соответствует требованиям, установленным действующим законодательством, содержит в себе полное и всестороннее описание хода и результатов произведенных исследований с указанием и обоснованием методов исследования и используемой литературы, дает ответы на поставленные перед экспертами вопросы. В процессе исследования экспертами не допущено ошибок методического характера, нарушений норм закона, которые могли бы повлиять на сделанные выводы, вследствие чего основания для сомнений в правильности выводов экспертов у суда отсутствуют.

Эксперты ФИО4, ФИО7, ФИО5 предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Истцом, с учетом результатов проведения судебной строительно-технической экспертизы, заявлено об уменьшении размера исковых требований до суммы 236 518 925 руб. 06 коп. На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уменьшение размера исковых требований принято судом.

Целью регулирования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» являются, в том числе, предотвращение неэффективного использования бюджетных денежных средств и недопущение предоставления отдельным лицам преимуществ в получении государственного или муниципального заказа по сравнению с теми претендентами, кто имеет возможность предложить более выгодные условия удовлетворения государственных либо муниципальных нужд.

С учетом того, что необходимость проведения работ, предусмотренных в актах для достижения целей контракта, факт их выполнения, отсутствие претензий относительно объема и качества выполненных работ, а также использование их результата заказчиком, то есть наличие у данных работ потребительской стоимости, ответчиком не опровергаются, ответчик исковые требования не оспорил, каких-либо заявлений, ходатайств не заявил, суд отклоняет указанные выше доводы ответчика и удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика 236 518 925 руб. 06 коп. задолженности.

В соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения настоящего спора, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины и оплате судебной экспертизы относятся на ответчика.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с краевого государственного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

<

...> 518 925 руб. 06 коп. задолженности, взыскать 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 180 000 руб. судебных расходов на оплату судебной экспертизы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Кемерово, с депозитного счета Арбитражного суда Красноярского края 270 000 руб., уплаченных платежным поручением от 15.05.2019 № 4432.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подается через Арбитражный суд Красноярского края.

 

 

Судья

И.С. Нечаева