Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-863/2021

21 мая 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  21 мая 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АО "ОТДЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ВЕКТОР" 

ответчик: ЗАО "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент" 

о взыскании 10 329 748,45 руб. 

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Истец - АО "ОТДЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ВЕКТОР" обратился в суд с иском к ответчику - ЗАО "Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент" о взыскании 3 398 817,41 руб. задолженности, 214 578,68 руб. неустойки за период с 18.12.2019 по 21.12.2020 по договору №1718187208131442210024794/ГН-2-17 от 19.12.2017, 6 254 626,40 руб. задолженности, 394 875,42 руб. неустойки по договору №1819187308491442210024791/21-1 АН-18 от 23.07.2018, всего 10 329 748,45 руб.

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличил исковые требования и просит взыскать 247 817,20 руб. неустойки по договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17 от 19.12.2017, 462 967,90 руб. неустойки по договору от 23.07.2018 № 1819187308491442210024791/21-1, всего 710 785,10 руб. неустойки.

Стороны в установленном порядке извещен о слушании дела, не явились. В соответствии с п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что между АО «ОКТБ «Вектор» и ЗАО «НИИТС «Синвент» 19.12.2017 заключен договор № 1718187208131442210024794/ГН-2-17 на выполнение работ по сервисному обслуживанию (техническому и авторскому надзору) учебно-тренировочных средств РВСН.

Согласно условиям Договора АО «ОКТБ «Вектор» обязуется, в пределах цены Договора в установленный Договором срок, выполнить работы, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Договором, а АО «НИИТС «Синвент» обязуется принять и оплатить выполненные работы, соответствующие требованиям, установленным Договором.

В соответствии с п. 4.1. Договора Цена Договора составляет 33 700 800,00 руб.

АО «НИИТС «Синвент» для проведения работ перечислен аванс платежным поручением №923 от 26.03.2018 на сумму 16 850 400,00 руб. и платежным поручением № 10 от 26.03.2019 на сумму 1 200 000,00 руб., итого общая сумма авансовых платежей составила 18 050 400,00 руб.

АО «ОКТБ «Вектор» в установленный срок и с надлежащим качеством выполнило работы.

Однако АО «НИИТС «Синвент» свои обязательства по оплате выполненных работ выполнил в неполном объеме.

Таким образом, за минусом авансовых платежей АО «НИИТС «Синвент» не оплатил АО «ОКТБ «Вектор» выполненные работы по договору на сумму 2 251 733,77 руб., сводному Акту № 1-2019 от 15.05.2019  на сумму 411 082,09 руб., сводному Акту № 2-2019 от 15.05.2019  на сумму 646 800,46 руб., сводному Акту № 3-2019 от 28.05.2019 на сумму 89 201,09 руб., всего на общую сумму 3 398 817,41 руб. 

Согласно п. 3.1.1. Договора Исполнитель вправе требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ на условиях, установленных Договором.

В соответствии с п. 10.3. Договора оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по цене, согласованной Госзаказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления средств от Госзаказчика, при условии предоставления Заказчику:

- счета на выполненные работы;

- счета-фактуры;

-сводного акта сдачи-приемки по форме, установленной в приложении № 4 к Договору;

-удостоверения ВП о соответствии результатов работ условиям договора. АО «ОКТБ «Вектор» от 21.11.2018, от 21.05.2019, от 29.05.2019, от 05.06.2019 направило в адрес АО «НИИТС «Синвент» необходимые отчетные документы.

АО «ОКТБ «Вектор» 18.12.2019 направило в адрес АО «НИИТС «Синвент» счет на оплату № 1718187208131442210024794/66 от 17.12.2019, однако счет оплачен частично, общая сумма задолженности составляет 3 398 817,41 руб. 

Размер задолженности подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 20.04.2020 между АО «ОКТБ «Вектор» и АО «НИИТС «Синвент» по договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17 от 19.12.2017.

В п. 11.8. Договора оговорено, что в случае просрочки Исполнения Заказчиком обязательства по авансированию (окончательному расчету за выполненные Работы), предусмотренного Договором, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от размера просроченного авансового платежа (размера окончательного расчета за выполненные Работы) за каждый факт просрочки.

Размер неустойки (пени) за период с 18.12.2019 по 21.12.2020 составляет 3 613 396,09 руб. 

Между АО «ОКТБ «Вектор» и АО «НИИТС «Синвент» заключен договор №1819187308491442210024791/21-1 АН-18 от 23.07.2018 на выполнение работ по сервисному обслуживанию (авторский надзор) комплексов П165, П165М1, П165М1-01, П155, П155М, П155М1, П155М1-01, П158, П175.

Согласно условиям Договора АО «ОКТБ «Вектор» обязуется, в пределах цены Договора в установленный Договором срок, выполнить работы, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Договором, а АО «НИИТС «Синвент» обязуется принять и оплатить выполненные работы, соответствующие требованиям, установленным Договором.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2-19 от 14.06.2019 к Договору Цена Договора на 2018 г. и 2019 г. составляет 12 664 570,00 руб.

АО «НИИТС «Синвент» для проведения работ перечислен аванс платежным поручением № 2713 от 10.08.2018 на сумму 2 750 000,00 руб. и платежным поручением № 1812 от 10.07.2019 на сумму 3 582 000,00 руб., итого общая сумма авансовых платежей составила 6 332 000,00 руб.

АО «ОКТБ «Вектор» в установленный срок и с надлежащим качеством выполнило работы.

Однако АО «НИИТС «Синвент» свои обязательства по оплате выполненных работ выполнил в неполном объеме.

Таким образом, за минусом авансовых платежей АО «НИИТС «Синвент» не оплатил АО «ОКТБ «Вектор» выполненные работы по договору № 1819187308491442210024791/21-1 АН-18 от 23.07.2018 по Акту 2/21-1АН-2018 на сумму 1 599 274,13 руб., Акту 3/21-1АН-2018 на сумму 1 116 988,00 руб., Акту 2/21-1АН-2019 на сумму 2 058 879,47 руб., Акту 3/21-1АН-2019 на сумму 1 479 484,80 руб., на общую сумму 6 254 626,40 руб. 

Согласно п. 3.1.1. Договора Исполнитель вправе требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ на условиях, установленных Договором.

В соответствии с п. 8.2. Договора Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по цене, согласованной Госзаказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления средств от Госзаказчика, при условии предоставления Заказчику:

- счета-фактуры;

- счета на выполненные работы;

-акта сдачи-приемки по форме, установленной в приложении № 1 к дополнительному соглащения № 2-19 от 24.06.2019 к Договору;

-удостоверения ВП о соответствии результатов работ условиям договора;

-акта окончания технической приемки по форме, установленной в приложении № 4 и № 6 к Договору

АО «ОКТБ «Вектор» 13.10.2018, 21.08.2019 и 28.10.2019 направило в адрес АО «НИИТС «Синвент» необходимые отчетные документы.

АО «ОКТБ «Вектор» 18.12.2019 направило в адрес АО «НИИТС «Синвент» счет на оплату № 64 от 17.12.2019 и № 65 от 17.12.2019, однако счета оплачены частично общая сумма задолженности составляет 6 254 626,40 руб. 

Размер данной задолженности подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 20.04.2020.

В п. 9.6. Договора оговорено, что в случае просрочки Исполнения Заказчиком обязательства по авансированию (окончательному расчету за выполненные Работы) предусмотренного Договором, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от размера просроченного авансового платежа (размера окончательного расчета за выполненные Работы) за каждый факт просрочки.

Размер неустойки (пени) за период с 18.12.2019 по 21.12.2020 составляет 6 649 501,82 руб.  

Между АО «ОКТБ «Вектор» и АО «НИИТС «Синвент» заключен договор поставки № 1718187208131442210024794/ГН-2-17/П-1 от 25.05.2018.

Согласно условиям Договора АО «ОКТБ «Вектор» обязан поставить, а АО «НИИТС «Синвент» принять и оплатить продукцию (ПИК 15К601М преобразователь информационных каналов «Тропа» в количестве двух штук с доставкой) на общую сумму 135 152,13 руб. 

АО «ОКТБ «Вектор» в установленный срок поставил оборудование, что подтверждается следующими документам:

- Акт № 20 от 05.06.2018 на сумму 2 088,60 руб.;

- Товарная накладная № 17 от 01.06.2018 на сумму 66 531,59 руб.;

- Товарная накладная № 50 от 19.10.2018 на сумму 66 531,94 руб. 

Однако АО «НИИТС «Синвент» свои обязательства по оплате выполнил в неполном объеме.

Таким образом, АО «НИИТС «Синвент» частично не оплатил АО «ОКТБ «Вектор» денежные средства за поставленный товар по договору поставки № 1718187208131442210024794/ГН-2-17/П-1 от 25.05.2018 по акту № 20 от 05.06.2018 на сумму 318,60 руб., товарной накладной № 50 от 19.10.2018 на сумму 66 531,94 руб. Всего на общую сумму 66 850,54 руб. 

Размер данной задолженность подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 20.04.2020 между АО «ОКТБ «Вектор» и АО «НИИТС «Синвент» по договору поставки № 1718187208131442210024794/ГН-2-17/П-1 от 25.05.2018.

На основании вышеизложенного АО «НИИТС «Синвент» имеет перед АО «ОКТБ «Вектор» задолженность по договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17 от 19.12.2017 в размере 3 613 396,09 руб., договору № 1819187308491442210024791/21-1 АН-18 от 23.07.2018 в размере 6 649 501,82 руб. и договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17/П-1 от 25.05.2018 в размере 66 850,54 руб. Всего на общую сумму 10 329 748,45 руб.

Истец 22.06.2020 АО «ОКТБ «Вектор» направил в адрес АО «НИИТС «Синвент» претензию с требованием погасить задолженность за выполненные работы. АО «НИИТС «Синвент» 01.09.2020 обязался погасить задолженность в срок до ноября 2020 года, однако свои обязательства по оплате не исполнил.

АО «НИИТС «Синвент» не согласно с предъявленными исковыми требованиями по следующим основаниям.

Согласно представленному Истцом акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 20.04.2020 по договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17 от 19.12.2017 задолженность на 20.04.2020 составляет 3 398 817,41 руб.

Между тем платежным поручением № 2174 от 01.12.2020 АО «НИИТС «Синвент» частично погасило сумму долга в размере 398 817,41 руб.

Таким образом, по состоянию на 21.12.2020 размер задолженности составлял 3 000 000,00 руб.

Следовательно, расчет суммы неустойки по договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17 от 19.12.2017 за период с 01.12.2020 по 21.12.2020 не является корректным, взыскание указанной Истцом суммы является необоснованным.

Согласно представленному Истцом акту сверки взаимных расчетов за период с01.01.2019  по 20.04.2020 по договору № 1819187308491442210024791/21-1 АН-18 от 23.07.2018 задолженность на 20.04.2020 составляет 6 254 626,40 руб.

Между тем платежным поручением № 2176 от 01.12.2020 АО «НИИТС «Синвент» частично погасило сумму долга в размере 254 626,40 руб.

Таким образом по состоянию на 21.12.2020 размер задолженности составлял 6 000 000,00 руб.

Следовательно, расчет суммы неустойки по договору 1819187308491442210024791/21-1 АН-18 от 23.07.2018 за период с 01.12.2020 по 21.12.2020 не является корректным, взыскание указанной Истцом суммы является необоснованным.

Согласно представленному Истцом акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 20.04.2020 по договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17/П-1 от 25.05.2018  задолженность на 20.04.2020 составляет 6 254 626,40 руб.

Между тем платежным поручением № 2175 от 01.12.2020 АО «НИИТС «Синвент»погасило сумму долга в полном объеме в размере 66 850,54 руб.

Таким образом по состоянию на 21.12.2020 задолженность по договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17/П-1 от 25.05.2018 полностью погашена.

Истец подтвердил факт частичной оплаты, указанный ответчиком в отзыве, произвел перерасчет неустойки по состоянию на 14.05.2021 с учетом оплаченных сумм. 

Исковые требования подлежат удовлетворению с учетом изменения размера требований. 

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с АО «Научно-исследовательский институт технических систем «Синвент» (ОГРН 

<

***>) в пользу АО «ОКТБ «Вектор» (ОГРН 

<

***>) 3 000 000 руб. задолженности, 247 817,20 руб. неустойки по договору № 1718187208131442210024794/ГН-2-17 от 19.12.2017, 6 000 000 руб. задолженности, 462 967,90 руб. неустойки по договору от 23.07.2018 № 1819187308491442210024791/21-1, всего 9 710 785,10 руб., а также 74 649,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с АО «Научно-исследовательский институт технических систем «Синвент» (ОГРН 

<

***>) в пользу АО «ОКТБ «Вектор» (ОГРН 

<

***>) неустойку на сумму 9 000 000 руб. по ставке 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ с 15.05.2021 по день фактической уплаты задолженности. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.