Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-57597/2018

26 июля 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  13 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  26 июля 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташов А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "СКС-Инжиниринг" (адрес:  Россия 117587, 

<

...>, ком. 1; ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>; Дата регистрации: 17.03.2015);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСистемы" (адрес:  Россия 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литер А, офис 217; ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>; Дата регистрации: 22.10.1998);

о взыскании,

 

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 17.04.2018;

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 19.01.2017; 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СКС-Инжиниринг"  (далее – ООО  "СКС-Инжиниринг") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭлектроСистемы"  (далее – ООО "ЭлектроСистемы") о взыскании 476 000 руб. 00 коп. долга, 1 215 228 руб. неустойки, 70 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

В порядке ст. 49 АПК РФ от ООО  "СКС-Инжиниринг"  поступило ходатайство о частичном отказе от исковых требований в части взыскания с ответчика долга в размере 476 000 руб. 00 коп.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд признал иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между 16.05.2017 между ООО  "СКС-Инжиниринг" (подрядчик) и ООО "ЭлектроСистемы" (заказчик) заключен договор подряда № Э-Э-43/2017, согласно которому  ООО "СКС-Инжиниринг" обязалось выполнить комплекс работ для Энергокомплекса (Мини ТЭС) Цементного завода ООО «Холсим (Рус)», расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии с техническим заданием на дымовые трубы (Приложение № 1).

Цена договора составляет 10 261 00 руб. (п. 6.1 договора).

По правилам п. 6.3.1 договора расчёты за выполненные работ производятся ежемесячно на основании подписанных заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Согласно п. 7.3 договора в случае нарушение сроков оплаты работ по договору заказчик уплачивает подрядчику пени в размере 0.1%  от установленной в п. 6.1 общей цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей цены.

В связи с нарушением ООО "ЭлектроСистемы" сроков оплаты работ по договору ООО  "СКС-Инжиниринг" на основании п. 7.3 договора начислило неустойку в размере 1 026 100 руб.

Кроме того, истцом также начислена неустойка в размере 189 128 руб. по договору от 01.03.2017 № 05/03-17.

Факт нарушения ответчиком сроков оплаты по указанным договорам подтвержден материалами дела, в связи с чем иск на основании положений ст.ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса РФ, условий договоров подлежит удовлетворению.

Оснований для уменьшения неустойки судом не установлено.

Факт несения судебных расходов в размере 70 000 руб. также подтвержден материалами дела.  

С учётом изложенного заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объёме.

Отказ от требования в части взыскания задолженности подлежит принятию (ст. 49 АПК РФ). 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Принять отказ от иска в части взыскания долга.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Электросистемы" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СКС-Инжиниринг" неустойки на общую сумму 1 215 228 руб. 00 коп., 25 152 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску, 70 000 руб. 00 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СКС-Инжиниринг" из федерального бюджета 4 760 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.