АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, 

<

...>; тел/ факс: 

<

***>; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Саратов Д ело № А57-33405/2024 04 сентября 2025 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Производство по делу № А57-33405/2024 в части требований о понуждении акционерного общества «Ситиматик», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Москва осуществить на территории полигона для размещения ТКО в Энгельсском районе Саратовской области: проектно-изыскательские работы; получить заключение государственной экологической экспертизы проектной документации прекратить, в связи с отказом истца от части исковых требований.  

Обязать акционерное общество «Ситиматик», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Москва в течение десяти месяцев со дня вступления в силу решения суда обязанность исполнить следующие мероприятия инвестиционной программы:  

Провести проектно-изыскательские работы в целях осуществления строительства рабочей карты № 1 полигона ТКО в Балаковском муниципальном районе Саратовской области; получить заключения экспертизы ЛСР, экологической экспертизы и главгосэкспертизы; осуществить строительство карты № 1 полигона ТКО в Балаковском районе; представить в Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области акты приемки работ, акты ввода объектов в эксплуатацию;  

Осуществить на территории полигона для размещения ТКО в Энгельсском районе Саратовской области: переустройство линии ВЛ 110 кВ (с проектными решениями); строительно-монтажные работы рабочей карты № 4; строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока, канализационно-насосной станции очищенных стоков, локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, пункта заправки топливом, канализационно-насосной станции фильтрата № 1, канализационно-насосной станции фильтрата № 2, локальных очистных сооружений фильтрата; получить заключение главгосэкспертизы на проектносметную документацию; представить в Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области акты приемки работ, акты ввода объектов в эксплуатацию.  

Взыскать с акционерного общества «Ситиматик», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Москва в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 руб.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в апелляционную и кассационную инстанции в порядке, предусмотренном статьями 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом решения.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1