АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б  

http://ivanovo.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А17-5805/2023

г. Иваново

27 мая 2024 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Макаровой С.Е.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Лесниковой Е.Е.,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз»  (ОГРН 

<

***>, адрес: 153035, 

<

...>, помещ.  33, 34)  

к некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» (ОГРН 

<

***>, адрес:  153000, 

<

...>)  об обязании устранить недостатки выполненного капитального ремонта,  с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью  «ДорПромСтрой», общества с ограниченной ответственностью «Генпроект»,  общества с ограниченной ответственностью «Центр независимых экспертиз»,  ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,  ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9,  при участии в судебном заседании представителей:  истца – ФИО10 по доверенности от 14.06.2023, диплом о наличии  высшего юридического образования;  ответчика − ФИО11 по доверенности от 28.12.2023 № 5; диплом о наличии  высшего юридического образования;  третьих лиц − представителя общества с ограниченной ответственностью  «ДорПромСтрой» ФИО12 по доверенности от 27.10.2022, диплом о  наличии высшего юридического образования, ФИО3, ФИО1,  представителя ФИО13, диплом о наличии высшего юридического  образования,  

руководствуясь статьями 110, 112, 156, 167-170, 176, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить, обязать некоммерческую организацию  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской  области» (ОГРН 

<

***>, адрес: 153000, 

<

...>) в  

течение месяца с момента вступления в законную силу решения по настоящему  делу устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирного дома N 4а по ул. Мякишева г. Иваново, а именно:  

устранить провалы обрешетки по линии конька и ската кровли секции N l над  2-м подъездом, для чего демонтировать кровельное покрытие и обрешетку данного  участка, выровнять конструкции стропильной системы в одной плоскости,  восстановить демонтированные обрешетку и кровельное покрытие;  

выполнить герметизацию стыков листов кровельного профнастила по всей  площади кровли;  

выполнить крепление между собой накрывающей и накрываемой кромок  продольных стыках листов профнастила по всей площади кровли;  

выполнить заполнение пустот в гофрах профнастила в зоне карнизных свесов,  по оси ендовы, а также заполнение пазух желоба ендовы устройством гребенок или  установкой герметизирующей ленты по всей площади кровли;  

демонтировать и выполнить заново устройство примыканий по всей площади  кровли к вертикальным поверхностям стен с устройством герметизации, установкой  прижимной планки и фартуков с фальцевым соединением элементов и установкой  гребенок или уплотнительных лент;  

демонтировать и выполнить заново устройство вытяжных частей  вентиляционных стояков канализации по всей площади кровли с заменой труб на  полиэтиленовые по ГОСТ 18599- 2001; монтаж выполнить вертикально с  креплением трубопроводов к обрешетке или стропильной системе, с утеплением из  вспененного каучука K-flex ST толщиной 25 мм;  

демонтировать и выполнить заново устройство примыканий по всей площади  кровли в местах прохода вентиляционных труб через кровлю с заменой  силиконовых манжет и креплением их к кровле на герметик через стальной фланец  с установкой обжимных хомутов;  

установить недостающие элементы стоек и кронштейнов ограждения кровли,  и выполнить замену и (или) подтяжку крепежных элементов (болтов, шурупов«глухарей») кронштейнов ограждения по всему периметру кровли;  

выполнить выравнивание водосборных желобов с соблюдением нормативных  уклонов и их центровку относительно водоприемных воронок, а также установку  недостающих элементов крепления;  

выполнить дополнительное утепление чердачного перекрытия по всей  площади слоем утеплителя из минераловатных плит с коэффициентом  теплопроводности не более 0,042 Вт/(м°С) толщиной не менее 140 мм;  

выполнить устройство карнизных вентиляционных отверстий площадью не  менее 1/600 от площади горизонтальной проекции кровли, например, в виде зазора  высотой не менее 100 мм ((425/300):86,2=0,01 м (где 86,2 − полезный периметр  кровли одной секции)) между обрешеткой и каменной кладкой карнизной части  стен здания по всему периметру кровли, закрытых сеткой от проникновения  насекомых;  

выполнить устройство коньковых вентиляционных отверстий установкой  аэраторов площадью не менее 1/600 от площади горизонтальной проекции кровли,  например, в виде вытяжных шахт, равномерно распределенных вдоль конька  кровли, совокупной площадью не менее 425/600=0,741 м2 для каждой секции;  

выполнить устройство кабельной системы противообледенения карнизного  свеса кровли и системы водоотведения (желобов и водосточных труб) по всему  

периметру кровли;  

выполнить устройство листвоуловителей на водоприемных воронках.  

Взыскать с некоммерческой организации «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ОГРН 

<

***>,  адрес: 153000, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Управляющая компания «Союз» (ОГРН 

<

***>, адрес:  153035, 

<

...>, помещ. 33, 34) 155 600 рублей 00  копеек судебных расходов.  

 Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии  со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья С.Е. Макарова