Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

« 04 » июля 2023 г. Дело № А12-12279/2022  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В. (до  перерыва), помощником судьи Кисловой С.И. (после перерыва), рассмотрев в судебном  заседании дело по иску Территориального орган Федеральной службы государственной  статистики по Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании безвозмездно устранить недостатки и взыскании денежных  средств, с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора общества с ограниченной ответственностью  «Лиммат», Комитета государственной охраны объектов культурного наследия  Волгоградской области, ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ», ООО «РЕНОВАЦИО»  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность; от ответчика – ФИО2, доверенность 

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 49, 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Принять отказ от иска в части взыскания с общества с ограниченной  ответственностью «ЛИНТ» в пользу Территориального органа Федеральной службы  государственной статистики по Волгоградской области:  

- убытков в размере оплаты работ по Государственному контракту № 132-14 от  21.09.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на  выполнение работ по инструментальному обследованию строительных конструкций  здания Волгоградстата для определения их фактического износа с выдачей заключения с  указанием рекомендаций подготовки проектных решений по укреплению строительных  конструкций в размере 60 000 руб.,   

- убытков в размере оплаты работ по Государственному контракту № 135-14 от  27.09.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку  проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ карниза здания  Волгоградстата в размере 85 500 руб.,   

- убытков в размере оплаты работ по Государственному контракту № 177-14 от  02.12.2022, заключенному Волгоградстатом с ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» на разработку  

научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия  регионального значения «Мариинская женская гимназия (Волгоградское областное  статистическое управление)», 1878 г. (капитальный ремонт карниза административного  здания Волгоградстата) в размере 263 250 руб.,   

- неустойки (пени) за период с 15.03.2022 по 29.03.2023 в размере 303 488,05 руб., за  просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 18211 от 01.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта  культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия),  

- неустойки (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения  обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения  гарантийных обязательств по государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на  выполнение работ по капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия  регионального значения (Мариинская женская гимназия)  

- неустойки (пени) за период с 15.03.2022 по 29.03.2023 в размере 40 781,89 руб., за  просрочку исполнения гарантийных обязательств гарантийных обязательств по  государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по  капитальному ремонту конструктивных элементов здания, в целях поддержания  эксплуатационного состояния,  

- неустойки (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения  обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения  гарантийных обязательств гарантийных обязательств по государственному контракту №  134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивных  элементов здания, в целях поддержания эксплуатационного состояния на сумму 429 283  руб. 00 коп.,  

- неустойки (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 548 239,49 руб. за  просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 17311 от 12.10.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта  культурного наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия),  

- неустойку (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения  обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения  гарантийных обязательств по государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на  выполнение работ по капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного  наследия регионального значения (Мариинская женская гимназия),  

- неустойки (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере  30 453,88 руб. за просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному  контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной  группы № 2 внутреннего двора административного здания Волгоградстата,  

- неустойки (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения  обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения  гарантийных обязательств по государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на  выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора  административного здания Волгоградстата,  

- неустойки (пени) за период с 12.04.2022 по 29.03.2023 в размере 41 402, руб. за  просрочку исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту № 13911 от 25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1  внутреннего двора административного здания Волгоградстата,  

- неустойки (пени) за период с 30.03.2023 до момент фактического исполнения  обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за просрочку исполнения  гарантийных обязательств по государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на  выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора  административного здания Волгоградстата.  

Производство по делу № А12-12279/2023 в данной части прекратить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств в  течении одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему  делу устранить недостатки (дефекты) работ, а именно:  

- устранить дефекты входной группы № 2 внутреннего двора административного  здания Волгоградстата в полном объеме путем устранения негерметичности конструкций  за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 138-11 от  25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 2  внутреннего двора административного здания Волгоградстата;  

- устранить дефекты входной группы № 1 внутреннего двора административного  здания Волгоградстата в полном объеме путем устранения негерметичности конструкций  за счет Подрядчика в соответствии с условиями государственного контракта № 139-11 от  25.08.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы № 1  внутреннего двора административного здания Волгоградстата.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств в  течении одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему  делу устранить недостатки отделки внутреннего кабинета № 28 в виде:  

А) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки внутренних  оконных откосов на площади 4,3 м2:  

1) Демонтаж оконных откосов из ГКЛ (без демонтажа металл. профилей) – 4,3 м2; 

2) Обработка поверхности внутреннего оконного откоса антисептическими  растворами для устранения образования грибка – 4,3 м2;  

3) Устройство оконных откосов из листов ГКЛ (без установки металл. профилей) –  4,3 м2;  

4) Шпатлевание поверхности листов из ГКЛ (выравнивание поверхности под  окраску) – 4,3 м2;  

5) Окраска внутренних оконных откосов – 4,3 м2; 

Б) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки наружных  оконных откосов на площади 4,3 м2:  

1) Очистка поверхности оконных откосов от следы плесени металлической щеткой –  1 м2;  

2) Обработка поверхности наружного оконного откоса антисептическими  растворами для устранения возможного образования грибка – 1 м2;  

3) Шпатлевание поверхности оконных откосов (после воздействия металлической  щеткой) – 1 м2;  

4) Окраска поверхности оконных откосов – 1 м2. 

В) осуществления объема работ по устранению недостатков отделки внутренних  стен и потолка в помещении № 28 на площади 6,4 м2 необходимо выполнить следующие  работы:  

1) Очистка поверхности стен и потолка от следов плесени металлической щеткой –  6,4 м2;  

2) Обработка поверхности стен и потолка антисептическими растворами для  устранения возможного образования грибка – 6,4 м2;  

3) Шпатлевание поверхности стен и потолка (после воздействия металлической  щеткой) – 6,4 м2;  

4)  Окраска поверхности стен и потолка – 6,4 м2. 

Взыскать общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу Территориального орган Федеральной службы  государственной статистики по Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>):  

- убытки в размере стоимости возмещения расходов на устранение недостатков  работ, выполненных ООО «ЛИНТ», в размере 5 054 900 руб. (размер стоимости трех  государственных контрактов № 34-14  от 14.03.2023, № 45-14 от 09.03.2023, № 46-14 от 09.03.2023, заключенных  Волгоградстатом с ООО «РЕНОВАЦИО»).  

- штраф в размере 5 000 руб. за неисполнение гарантийных обязательств по  государственному контракту № 173-11 от 12.10.2021 на выполнение работ по  капитальному ремонту дворового фасада объекта культурного наследия регионального  значения (Мариинская женская гимназия)  

- штраф в размере 34 606,68 руб. за неисполнение гарантийных обязательств по  государственному контракту № 138-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по  капитальному ремонту входной группы № 2 внутреннего двора административного  здания Волгоградстата  

- штраф в размере 47 047 руб. 8 коп. за неисполнение гарантийных обязательств по  государственному контракту № 139-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по  капитальному ремонту входной группы № 1 внутреннего двора административного  здания Волгоградстата  

- штраф в размере 55 830 руб. 6 коп. за неисполнение гарантийных обязательств по  государственному контракту № 143-11 от 25.08.2021 на выполнение работ по  капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата  (замена оконных блоков)  

- штраф в размере 59 977 руб. 3 коп. за неисполнение гарантийных обязательств по  государственному контракту № 127-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по  капитальному ремонту административно-производственного здания Волгоградстата  (замена оконных блоков)  

- штраф в размере 5 000 руб. за неисполнение гарантийных обязательств по  государственному контракту № 182-11 от 01.09.2020 на выполнение работ по  капитальному ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения  (Мариинская женская гимназия)  

- штраф в размере 42 928 руб. 30 коп. за неисполнение гарантийных обязательств по  государственному контракту № 134-11 от 20.08.2021 на выполнение работ по  капитальному ремонту конструктивных элементов здания  

- судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 79 200 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 55 922  руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

Судья Э л е к т р о н н а я  п о д п и с ь   д е й с т в и т е л ь н а . Стрельникова Н.В. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 10.02.2023 10:35:00Кому выдана Стрельникова Наталья Викторовна