Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-4929/2023

город Мурманск

9 августа 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

иск Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление  дорожного хозяйства» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» в течение месяца  со дня вступления решения суда в законную силу в рамках гарантийных обязательств  устранить недостатки работ на объекте: «автомобильные дороги общего пользования  местного значения города Мурманска», выполненных по гражданско-правовому договору  от 16.12.2019 № 08/112019/1179, а именно:  

1) выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги и тротуаров на ул. Горького - ул. Советская г. Мурманск устранить  следующие дефекты:  

- разрушение поперечного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги к  ул. Марата г. Мурманск объемом 0,68 м2;  

- поперечную трещину проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...> м2;  

- поперечную трещину проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...> м2;  

- разрушение продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги  от 

<

...> до пересечения с ул. Генералова г. Мурманска  объемом 5,24 м2;  

- разрушение поперечного шва проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...> м2;  

- разрушение примыкания проезжей части автомобильной дороги к ул. Декабристов  г. Мурманск в объеме 0,6 м2;  

- разрушение примыкания проезжей части автомобильной дороги к ул. Генералова г.  Мурманск объемом 2,24 м2;  

- множественные продольные и поперечные трещины асфальтобетонного покрытия  в районе 

<

...> м2;  

2) выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги и тротуаров на ул. Генерала Фролова г. Мурманск устранить  следующие дефекты:  

- разрушения продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги  от д. 23 до 

<

...> м2;  

- поперечную трещину проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...> в объеме 0,1 м2;  

- разрушение продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги  от 

<

...> до ул. Полухина г. Мурманск в объеме 9,52 м2;  

- заделать места отбора проб проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...>;  

- надлежащим образом заделать места отбора проб на тротуаре в районе 

<

...>;  

- разрушение поперечного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги к  ул. Полухина г. Мурманск в объеме 0,6 м2;  

3) выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги и тротуаров по ул. Радищева г. Мурманск устранить следующие  дефекты:  

- разрушение продольного шва проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...> в объеме 0,6 м2;  

- поперечную трещину тротуара в районе 

<

...> в  объеме 0,04 м2;  

- разрушение продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги  от д. 50 до 

<

...> в объеме 5,04 м2;  

- провал асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе 

<

...> в объеме 3 м2;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  вокруг колодца в районе 

<

...> в объеме 1,44 м2;  

- разрушение продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги  от 

<

...> до ул. Павлова г. Мурманск в объеме 7,52 м2;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе д. 38/27 по ул. Радищева г. Мурманск в объеме 3,1 м2;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе д. 36/10 по ул. Радищева г. Мурманск в объеме 8,4 м2;  

- разрушение поперечного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги к  ул. Павлова г. Мурманск в объеме 0,48 м2;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  вокруг колодца в районе д. 36/10 по ул. Радищева г. Мурманск в объеме 1,44 м2;  

- разрушение продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги в  районе 

<

...> в объеме 7,2 м2;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе 

<

...> в объеме 1,1 м2;  

- качественно заделать места отбора проб на тротуаре в районе 

<

...>;  

- поперечную трещину асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной  дороги в районе 

<

...> в объеме 0,14 м2;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  вокруг колодца в районе 

<

...> в объеме 1,44 м2;  

- качественно заделать места отбора проб проезжей части автомобильной дороги в  районе 

<

...>;  

- разрушение продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги  от 

<

...> до конца участка в объеме 13,9 м2;  

- заделать места отбора проб на тротуаре в районе 

<

...>;  

- заделать места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...>;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе 

<

...> в объеме 5,2 м2;  

3) выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги и тротуаров по пр. Кольский г. Мурманск устранить следующие  дефекты:  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной  дороги в районе кинотеатра «Атлантика» - 

<

...> в  объеме 0,45 м2;  

- заделать места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...>;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе 

<

...> в объеме 0,5 м2;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе 

<

...> в объеме 1,3 м2;  

- заделать места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...> Мурманск;  

- поперечную трещину асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной  дороги в районе 

<

...> в объеме 0,21 м2;  

- заделать места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...>;  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной  дороги проспект в районе 

<

...> в объеме 0,15 м2;  

- заделать места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...>;  

- заделать места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе 

<

...>.  

Взыскать с ООО «СеверСтрой» в пользу ММБУ «УДХ» 6000 рублей судебных  расходов.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня  принятия.  

Судья Р.С. Дубровкин